민간자본 활용 시설개량사업 사전 설명회 개최

□ 일시 / 장소 : 2015. 10. 5.(월) 14:00 /도로교통연구원 대강당

ㅇ  중견 건설사 대상 사업 설명

□ 참 석 자

ㅇ 도      공 : 도로조사팀장, 도로관리팀장, 계약팀장, 자금부장 외 3

ㅇ 건 설 사 : 중견 건설사 및 포장 전문 업체 등 참가 희망업체

ㅇ 협    회 : 대한건설협회 및 포장건설협회

□ 설명회 순서

ㅇ 사업 개요 설명 → 질의 및 응답

〈 민간자본 활용 중부선 및 영동선 시설개량 사업 개요 〉

(단위 : 억원)

구 분		계	중부선 (호법～하남)	영동선			비 고
				여주～만종	만종～면온	면온～강릉
총 사업비 (1+2)		4,553	996	955	1,247	1,355
1. 공 사 비		4,429	965	924	1,216	1,324
1-1 토목공사비		3,793	916	888	1,023	966
도급액	소 계	2,455	608	507	661	679
	포 장 공	1,041	239	241	283	278
	부 대 공	1,034	205	228	297	304
	구조물공	380	164	38	81	97
지급자재(토목)		1,338	308	381	362	287
1-2 기타공사비		636	49	36	193	358
전 기		429	-		133	296
폐기물처리		207	49	36	60	62
2. 시설부대경비		124	124				홍보비 등

중부선, 영동선 민간자본 활용 시설개량사업

□ 사업 방식

o 도공에서 공사발주 후 낙찰자(민간 사업자)는 자금을 우선 투자해 개량하되, 준공 이후 도공은 투입된 자금에 공사채 수준의 이율을 추가하여 낙찰자(민간 사업자)에게 분할 지급하는 방식

□ 대상 사업

(단위 : 억원)

구 분		계	중부선 (호법～하남)	영동선			비 고
				여주～만종	만종～면온	면온～강릉
총 사업비 (1+2)		4,553	996	955	1,247	1,355
1. 공 사 비		4,429	965	924	1,216	1,324
1-1 토목공사비		3,793	916	888	1,023	966
도급액	소 계	2,455	608	507	661	679
	포 장 공	1,041	239	241	283	278
	부 대 공	1,034	205	228	297	304
	구조물공	380	164	38	81	97
지급자재(토목)		1,338	308	381	362	287
1-2 기타공사비		636	49	36	193	358
전 기		429	-		133	296
폐기물처리		207	49	36	60	62
2. 시설부대경비		124	124				홍보비 등

□ 대가 지급방법

o 준공 후 3년간 이자지급 (분기별)

- 공사기간 중 발생이자 반영, 도공채 금리 기준

o 공사비 원금은 준공 3년 후 지급

□ 향후 계획

ㅇ ‘15. 10 : 공사발주 및 입찰공고

ㅇ ‘15. 12 ～ `17. 12 : 공사 시행

참고		민간자본 활용 시설개량사업 공사시행

□ 주요 사업물량

구 분		계	중 부 선 (호법~하남)	영 동 선(145.2km)
				여주~만종	만종~면온	면온~강릉
공 사 연 장		186.3km	41.1km	37.3km	53.2km	54.7km
포장개량	토 공 부	422만㎡	88만㎡	99만㎡	118만㎡	117만㎡
	교 량 부	28.2만㎡	8.2만㎡	5.7만㎡	3.5만㎡	11만㎡
	터 널 부	181천㎡	16천㎡	3천㎡	43천㎡	119천㎡
중 앙 분 리 대		79.9km	-	22.9km	39.2km	17.8km
가 드 레 일		260.9km	57.9km	60.2km	74.3km	68.5km
신 축 이 음		4,160m	2,210m	528m	636m	786m
교통량(2014년 AADT, 대/일)			53,213	61,826	31,876	29,068

□ 공사추진

o (공기단축) 양방향 동시작업, 주․야간 및 주말공사 시행

o (교통차단) 출입시설 사이 (IC 또는 JCT 사이)

o (공사순서) 중분대 인상 → 1차로 포장 → 2차로 및 길어깨 포장 → 가드레일

o (공사조직) 전담조직 운영으로 효율적 공사관리, 노하우 축적, 홍보강화

※ 1년 공사가능일수 : 5개월/150일 (설해대책기간, 3년평균 강우일수, 명절기간, 하계휴가철 제외)

□ 주요공법

o (본선포장) 비절삭 아스콘 덧씌우기(10cm), 절삭 아스콘 덧씌우기(5cm) 등

o (교면포장) 절삭 아스콘 덧씌우기(5cm, 8cm), 절삭 LMC 포장 등

o (중앙분리대) 구체 인상(81→1.27m), 기초 열화구간 재설치

o (가드레일) 설치기준 미달구간 교체, 개방형 가드레일 설치

o (길어깨 및 다이크) 철거 및 10cm인상 재설치

o (구 조 물) 난간 및 중분대 인상, 신축이음교체, 교량점검시설 설치 등