<첨부2>

「책임감리 현장참여자 업무지침서」

일부 개정(안)

2012. 5

국토해양부

(건설안전과)

1. 개정이유

도로․철도 등 SOC건설현장에서 발생되는 붕괴사고의 안전관리 개선대책의 후속조치로서 감리원의 안전관리 역할 등을 명확히 하고, 감리업무 수행과정에서 나타난 일부 미비점을 보완․개선하기 위함

* 터널공사 현장 안전관리 개선대책(‘11.10.23, 방침결정)

2. 주요내용

가. 공사 중단이 예상되는 건설현장에서의 안전사고 예방을 위한 제도적 장치 마련

ㅇ 3개월 이상 방치가 예상되는 건설현장은 감리원 입회하에 시공자로 하여금 자체 안전점검을 의무 실시토록 규정(제50조)

나. 책임감리 업무수행과정에서 나타난 제도적 미비점 개선․보완

ㅇ 설계서 등 사전검토 기한을 현행 공사착공 이전단계에서 해당 건설공사 시공 이전일을 기준으로 검토토록 조정(제8조)

ㅇ 시공계획서 제출 기준일을 현행 공사착수 이전단계에서 진행단계별 해당공사 시공 이전일을 기준으로 제출토록 조정(제33조)

3. 주요 토의과제  :  없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표

국토해양부 고시 제2012-   호

책임감리 현장참여자 업무지침서 일부 개정안

책임감리 현장참여자 업무지침서 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제2항 중 “해당공사 착공이전에”를 “해당 건설공사 시공 이전에”로 한다.

제33조제1항 중 “공사착수 30일 안에”를 “진행단계별 해당공사 시공 30일 전에”로 하고, 제2항을 다음과 같이 한다.

② 감리원은 공사 중 시공계획서에 중요한 내용변경이 발생할 경우에는 변경 시공계획서를 제출받은 후 5일 이내에 검토․확인하여 승인한 후 시공토록 하여야 한다.

제50조제12항을 다음과 같이 신설한다.

책임감리원은 공사중지(차수별 준공에 따라 공사가 중단된 경우를 포함한다) 등으로 3개월 이상의 방치가 예상되는 건설현장에 대해서는 안전관리담당자로 지정된 감리원을 입회하도록 하여 공사중지(준공)일로부터 5일 이내에 시공자로 하여금 「건설기술관리법 시행령」제95조제1항제1호에 따른 자체 안전점검을 실시하도록 하고, 점검결과를 발주청에 보고한 후 취약한 부분에 대해서는 시공자에게 필요한 안전조치를 하게 하여야 한다.

부    칙(2012. 5.  .)

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정(안)
제8조(설계서 등의 검토) ① (생 략) ② 감리원은 설계서 등의 공사 계약문서 상호간의 모순되는 사항, 현장 실정과의 부합 여부 등 현장시공을 중심으로 하여 해당공사 착공이전에 적정성을 검토하여야 하며, 특히 기술지원감리원은 주요구조부(가시설물을 포함한다)를 포함한 기술적 검토사항과 상주감리원이 요청한 사항을 세밀하게 검토하여야 한다. 이 경우, 검토내용에는 다음 각 호의 사항 등이 포함되어야 한다. 1. ～ 8. (생 략) ③ (생 략) 제33조(시공계획서의 검토․확인) ① 감리원은 시공자로부터 공사시방서의 기준(공사종류별,시기별)에 의하여 시공계획서를 공사착수 30일 안에 제출 받아 이를 검토․확인하여 7일 안에 승인한 후 시공토록 하여야 하고 시공계획서의 보완이 필요한 경우 그 내용과 사유를 문서로서 통보해야한다. 시공계획서에는 공사시방서의 작성기준과 함께 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. 1.～10. (생 략) ② 감리원은 시공계획서를 공사착공계와 별도로 실제 공사착수 전에 제출받아야 하며 공사중 시공계획서에 중요한 내용변경이 발생할 경우에는 변경 시공계획서를 제출받은 후 5일이내에 검토․확인하여 승인한 후 시공토록 하여야 한다. 제50조(안전관리) ① ～ (생 략) <신 설>	제8조(설계서 등의 검토) ① (현행과 같음) ② ---------------------- --------------------------------------------------------------------------해당 건설공사 시공 이전에------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1. ～ 8. (현행과 같음) ③ (현행과 같음) 제33조(시공계획서의 검토․확인) ① ---------------------- ------------------------- --------------------- 진행단계별 해당공사 시공 30일 전에---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1.～10. (현행과 같음) ② 감리원은 공사 중 ------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 제50조(안전관리) ① ～ (현행과 같음) 책임감리원은 공사중지(차수별 준공에 따라 공사가 중단된 경우를 포함한다) 등으로 3개월 이상의 방치가 예상되는 건설현장에 대해서는 안전관리담당자로 지정된 감리원을 입회하도록 하여 공사중지(준공)일로부터 5일 이내에 시공자로 하여금 「건설기술관리법 시행령」제95조제1항제1호에 따른 자체 안전점검을 실시하도록 하고, 점검결과를 발주청에 보고한 후 취약한 부분에 대해서는 시공자에게 필요한 안전조치를 하게 하여야 한다.