유해·위험방지계획서 및 안전관리계획서

통합작성 지침서

2003. 5

노동부·건설교통부

목      차

제1장  일반사항

1. 목적

2. 적용범위

3. 관계법령 및 기준

4. 통합계획서의 작성·제출

제2장  통합계획서 작성기준

Ⅰ. 기본사항

1. 공사개요

2. 안전관리조직

3. 안전교육계획

4. 재해발생 등 비상시 긴급조치계획

Ⅱ. 유해·위험방지계획

1. 안전보건관리계획

2. 유해·위험요인별 재해방지계획

Ⅲ. 안전관리계획

1. 공사현장 및 주변 안전관리계획

2. 공종별 안전관리계획

Ⅳ. 유해·위험방지와 안전관리 공통계획

1. 굴착공사 안전관리계획

2. 가설비계 안전관리계획

3. 거푸집 및 거푸집동바리 안전관리계획

4. 발파공사 안전관리계획

제3장  부 록

1. 표지서식

2. 별지서식

제1장  일반사항

1. 목 적

2. 적용범위

3. 관계법령 및 기준

4. 통합계획서의 작성 제출

제1장  일반사항

1. 목적

이 통합작성지침서는 산업안전보건법 제48조 제3항 및 시행규칙 제120조 내지 제123조의2 규정에 의하여 작성·제출토록 되어 있는 유해·위험방지계획서와 건설기술관리법 제26조의2 제2항 및 시행령 제46조의 2의 규정에 의한 건설공사 안전관리계획서(이하 □양 계획서□라 한다)를 수립함에 있어 양 계획서를 모두 제출해야 하는 건설공사에 대하여 해당업체가 희망하는 경우 동시에 작성할 수 있는 세부적인 기준을 정함으로써, 계획서 작성을 용이하게 하여 체계적이고 효율적인 건설안전관리를 정착시킴은 물론 업체의 부담을 경감하여 안전관리업무를 원활하게 수행토록 함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 지침서는 산업안전보건법에 의한 유해·위험방지계획서와 건설기술관리법에 의한 안전관리계획서를 작성하여 제출함에 있어 양 계획서의 제출대상에 동시에 해당되어 사업주가 희망하는 경우 양 계획서를 통합하여 작성·제출할 수 있도록 정해놓은 기준이다.

따라서 유해·위험방지계획서와 안전관리계획서의 제출 대상공사에 모두 해당되어 양 계획서를 통합하여 제출하는 건설공사에 적용한다. 본 기준에서 정해놓은 사항 외의 필요한 사항 및 명시되지 않은 사항은 관계법령 및 해당규정의 세부기준에 따른다.

3. 관계법령 및 기준

이 작성지침서에 의거 양 계획서에 대한 통합계획서를 작성하고자 하는 경우에는 양 계획서와 관련된  관련 법령 및 세부기준을 충분히 이해하고 통합계획서를 작성하여야 한다.

양 계획서에 대한 관계법령의 주요내용은 다음 <표1> 및  <표2>와 같다.

<표1> 유해·위험방지계획서 관계 법령
관계법령	관 련 조 항
산업안전보건법	제48조(유해·위험방지계획서의 제출 등) ① 노동부령이 정하는 업종 및 규모에 해당하는 사업의 사업주는 당해 사업에 관계 있는 건설물·기계·기구 및 설비 등을 설치·이전하거나 그 주요 구조부분을 변경할 때에는 노동부령이 정하는 자격을 갖춘 자의 의견을 들은 후 이 법 또는 이 법에 의한 명령에서 정하는 유해·위험방지사항에 관한 계획서(이하 □유해·위험방지계획서□라 한다)를 작성하여 노동부령이 정하는 바에 의하여 노동부장관에게 제출하여야 한다. ③ 건설업중 노동부령이 정하는 규모의 사업을 착공하려고 하는 사업주는 노동부령이 정하는 자격을 갖춘 자의 의견을 들은 후 이 법 또는 이 법에 의한 명령에서 정하는 유해·위험방지계획서를 작성하여 노동부령이 정하는 바에 의하여 노동부장관에게 제출하여야 한다. ④ 노동부장관은 제1항 내지 제3항의 유해·위험방지계획서를 심사한 후 근로자의 안전과 보건상 필요하다고 인정할 때에는 공사의 착공을 중지하거나 계획을 변경할 것을 명할 수 있다. ⑤ 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 유해·위험방지계획서를 제출한 사업주는 노동부령이 정하는 바에 의하여 노동부장관의 확인을 받아야 한다.
동법 시행규칙	제120조[대상사업장의 종류] ④ 법 제48조 제3항에서 □노동부령이 정하는 규모의 사업□이라 함은 다음 각호의 1에 해당하는 규모의 사업을 말한다. 1. 지상 높이가 31미터 이상인 건축물 또는 공작물의 건설·개조 또는 해체(이하 □건설 등□이라 한다) 2. 최대지간 길이가 50미터 이상인 교량건설등 공사 3. 터널건설 등의 공사 4. 제방높이 50미터 이상인 댐건설 등의 공사 5. 깊이가 10.5미터 이상인 굴착공사

관계법령	관 련 조 항
동법 시행규칙	⑤ 법 제48조제3항에서 □노동부령이 정하는 자격을 갖춘 자□라 함은 다음 각 호의 1에 해당하는 자를 말한다. 1. 건설안전분야 산업안전지도사 2. 건설안전기술사 또는 토목·건축분야 기술사 3. 건설안전산업기사 이상으로서 건설안전관련 실무경력 7년(기사는 5년) 이상인 자 ⑥ 법 제48조제3항에서 □착공□이라 함은 유해·위험방지계획서 작성대상 시설물 또는 구조물의 공사를 시작하는 것을 말한다. 이 경우 대지정리 및 가설사무소 설치 등의 공사준비기간은 착공으로 보지 아니한다. 제121조[제출서류등] ① 법 제48조제3항의 규정에 의하여 유해·위험방지계 획서를 제출하고자 하는 사업주는 별지 제26호서식의 건설공사 유해·위험방지계획서에 별표 15의 서류를 첨부하여 당해 공사 착공전일까지 공단에 2부를 제출하여야 한다. 다만, 노동부장관이 산업재해 발생율 등을 고려하여 자율안전관리 능력이 있다고 인정하여 지정하는 건설업체(이하□자율안전관리업체□라 한다)의 경우에는 지정통보 후 1년의 범위내에서 노동부장관이 정하는 기간에 한하여 유해·위험방지계획서에 대한 자체심사를 거쳐 당해 공사의 착공전일까지 별지 제26호의2 서식의 유해·위험 방지계획서 자체심사서를 공단에 제출할 수 있다. ※ [붙임] 참조 ② 동일한 사업장내에서 제120조제4항의 각호의 규정에 의한 공사의 착공시기를 달리하여 행하는 사업의 사업주는 당해 사업별로 유해·위험방지계획서를 분리하여 각각 제출할 수 있다. 이 경우 이미 제출한 유해·위험방지계획서의 첨부서류와 중복되는 서류는 이를 제출하지 아니할수 있다. ③ 제1항 단서의 규정에 의한 자율안전관리업체의 지정기준, 지정방법 및 자체심사 절차는 별표 15의 2와 같다.

관계법령	관 련 조 항
동법 시행규칙	제122조[계획서의 검토등] ① 공단은 제121조의 규정에 의하여 유해·위험 방지계획서 및 그 첨부서류를 접수 한 때에는 접수일부터 15일이내에 심사하여 사업주에게 그 결과를 통지하여야 한다. 다만, 제121조제1항 단서의 규정에 의하여 자율안전관리업체가 유해·위험방지계획서 자체 심사서등을 제출한 경우에는 심사를 하지 아니할 수 있다. ② 공단은 제1항의 규정에 의한 유해·위험방지계획서 심사시 관련분야의 학식과 경험이 풍부한 자를 심사위원으로 위촉하여 해당 분야의 심사에 참여하게 할 수 있다. ③ 공단은 유해·위험방지계획서 심사에 참여한 위원에 대하여는 수당 및 여비를 지급 할 수 있다. 다만, 소관업무와 직접 관련되어 참여한 위원의 경우에는 그러하지 아니하다. 제123조[심사결과의 구분] ① 공단은 유해·위험방지계획서의 심사결과에 따라 다음 각호와 같이 구분·판정한다. 1. 적 정 : 근로자의 안전과 보건상 필요한 조치가 구체적으로 확보되었다고 인정될 때 2. 조건부 적정 : 근로자의 안전과 보건을 확보하기 위하여 일부 개선이 필요하다고 인정될 때 3. 부 적 정 : 기계·설비 또는 건설물이 심사기준에 위반되어 공사착공시 중대한 위험발생의 우려가 있거나 계획에 근본적 결함이 있다고 인정될 때 ② 공단은 심사결과 적정판정 또는 조건부 적정판정을 한 경우에는 별지 제26호의5 서식의 유해·위험방지계획서 심사결과통지서에 보완사항을 포함(조건부 적정판정을 한 경우에 한한다)하여 해당 사업주에게 교부하고 지방노동관서의 장에게 보고 하여야 한다. ③ 공단은 심사결과 부적정 판정을 한 경우에는 지체없이 별지 제26호의6 서식의 유해·위험방지계획서 심사결과(부적정)통보서에 그 이유를 기재하여 지방노동관서의 장에게 통보하고 사업장 소재지 시장·군수·구청장에게 그 사실을 통보하여야 한다.

관계법령	관 련 조 항
동법 시행규칙	④ 제3항의 규정에 의한 통보를 받은 지방노동관서의 장은 사실여부를 확인한 후 공사착공중지 명령·계획변경 명령 등 필요한 조치를 하여야 한다. ⑤ 사업주는 지방노동관서의 장으로부터 공사착공중지 명령 또는 계획변경 명령을 받은 경우에는 계획서를 보완 또는 변경하여 공단에 제출하여야 한다. 제123조의2[계획서의 비치등] ① 유해·위험 방지계획서의 심사를 받은 사 업주와 제121조 제1항 단서의 규정에 의한 자체심사서를 제출한 사업주는 유해·위험방지계획서를 당해 사업장에 비치하여야 한다. ② 사업주는 유해·위험방지계획서의 변경사유가 발생한 경우에는 이를 보완하여 비치하여야 한다. 제124조[확인] ① 법 제48조제3항의 규정에 의한 사업주는 건설공사중 3월 에 1회(제120조제4항제1호의 사업장중 냉동창고 및 호텔을 제외한 사업장은 6월에 1회) 이상 법 제48조제5항의 규정에 의하여 다음 각호의 사항에 관하여 공단의 확인을 받아야 한다. 다만, 자율안전관리업체는 당해 공사의 준공시까지 확인을 받지 아니할 수 있으며, 영 제3조의3제1항제3호의 규정에 의한 안전·보건관리수준 평가결과 그 성적이 우수하여 노동부장관으로부터 인증을 받은 사업장은 인증 유효기간 만료시까지 확인을 받지 아니할 수 있다. 1. 유해·위험방지계획서의 내용과 실제공사 내용과의 부합 여부 2. 제123조의2제2항의 규정에 의한 유해·위험방지계획서 변경내용의 적정성 3. 추가적인 유해·위험요인의 존재 여부 ② 공단은 제1항의 규정에 의한 확인을 실시할 경우에는 그 일정을 사업주에게 미리 통보하여야 한다.

관계법령	관 련 조 항
동법 시행규칙	③ 공단은 확인실시 결과 당해 사업장의 유해·위험의 방지상태가 적정하다고 판단되는 경우에는 5일이내에 별지 제26호의7서식의 확인결과통지서를 사업주에게 교부하여야 하며, 확인실시 결과 경미한 유해·위험 요인이 발견된 경우에는 일정한 기간을 정하여 이를 개선하도록 권고하되, 당해 기간내에 개선되지 아니한 경우에는 기간만료일부터 10일 이내에 별지 제26호의 8서식의 확인결과조치요청서에 그 이유를 기재한 서면을 첨부하여 지방노동관서의 장에게 보고하여야 한다. ④ 공단은 확인실시 결과 중대한 유해·위험요인이 있어 작업의 중지, 사용중지 및 주요시설의 개선 등이 필요하다고 인정되는 경우에는 지체없이 별지 제26호의8서식의 확인결과조치요청서에 그 이유를 기재한 서면을 첨부하여 지방노동관서의 장에게 보고하여야 한다. ⑤ 제3항 또는 제4항의 규정에 의한 보고를 받은 지방노동관서의 장은 사실여부를 확인한 후 필요한 조치를 하여야 한다. 제124조의2[보고등] 공단은 유해·위험방지계획서의 작성·제출·확인업무 와 관련하여 다음 각호의 1에 해당하는 사업장을 발견한 경우에는 지체없이 당해 사업장의 명칭·소재지 및 사업주명 등을 명시하여 지방노동관서의 장에게 보고하여야 한다. 1. 유해·위험방지계획서를 제출하지 아니한 사업장 2. 유해·위험방지계획서 제출기간이 경과한 사업장 3. 제120조제2항 및 제5항의 규정에 의한 자격자의 의견을 듣지 아니하고 유해·위험방지계획서를 작성한 사업장

[붙임]

유해·위험방지계획서 첨부서류 (산업안전보건법 시행규칙 [별표15])

제 출 항 목	제 출 서 류 및 내 용
1. 공사개요	가. 공사개요서(별지 제45호서식) 나. 공사현장의 주변현황 및 주변과의 관계를 나타내는 도면 (매설물 현황 포함) 다. 건설물·공사용 기계설비 등의 배치를 나타내는 도면 및 서류 라. 전체공정표
2. 안전보건 관리계획	가. 산업안전보건관리비 사용계획서(별지 제46호서식) ※ 각 항목별 세부 사용계획 내역 작성 나. 안전관리조직표·안전보건교육 계획 다. 개인보호구 지급계획(별지 제47호서식) 라. 재해발생 위험시 연락 및 대피방법
3. 추락방지계획	고소작업 또는 추락위험장소의 안전방호시설물 설치계획
4. 낙하·비래 예방계획	낙하·비래 위험장소에 대한 방호시설 설치계획
5. 붕괴방지계획	굴착 및 구조물 작업시 붕괴재해예방을 위한 안전조치 또는 가시설물 계획(거푸집동바리 조립도 등)
6. 차량계 건설기계 및 양중기에 관한 안전 작업계획	가. 안전규칙 제100조 제1항의 규정에 의한 양중기 안전작업 및 자체 검사계획 나. 안전규칙 별표 2에 의한 차량계 건설기계 안전작업계획
7. 감전재해 예방계획	고압선 및 전기 기계·기구 등에 의한 감전재해 예방계획
8. 유해·위험기계·기구 등에 관한 재해예방계획	영 별표 7에 의한 기계·기구 등에 관한 안전사용 및 방호장치계획 (목공용 둥근톱·교류아크 용접기·Hand Grinder등)
9. 보건·위생시설 및 작업환경 개선계획	가. 분진 및 소음발생작업 공종에 대한 방호대책 나. 위생시설물 설치 및 관리대책(식당·화장실·세면장등) 다. 근로자 건강진단 실시계획(터널작업 등 특수작업시에는 특수건강진단 포함) 라. 조명시설물 설치계획 마. 질식 및 산소결핍 예방을 위한 환기설비계획 바. 산소 및 유해가스 농도 측정장비 비치계획
10. 화재·폭발에 의한 재해방지계획	화재·폭발 및 위험물 누출에 의한 위험방지계획 가. 위험물질의 종류·사용량과 환기설비 설치계획 나. 위험물질의 저장·보관 및 사용시 안전작업계획 다. 발파작업시 안전계획

※ 비고 : 계획서의 항목중 각 현장별로 해당되는 항목에 대하여 제출한다.

<표 2> 안전관리계획서 관계 법령
관계법령	관 련 조 항
건설기술관리법	제26조의2 (건설공사의 안전관리) ② 건설업자 및 주택건설등록업자는 건설공사의 안전을 확보하기 위하여 안전점검 및 안전관리조직 등 건설공사의 안전관리계획(이하 "안전관리계획"이라 한다)을 수립하고 이에 따라 안전점검을 실시하여야 한다. 이 경우 건설업자 및 주택건설등록업자에 고용되어 안전점검업무를 수행하는 건설기술자는 안전관리계획에 따라 성실하게 그 업무를 수행하여야 한다. ③ 제2항의 규정에 의한 안전관리계획을 수립하여야 할 건설공사의 범위, 안전관리계획의 수립기준 및 절차, 안전점검의 실시시기·방법 및 대가 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
동법 시행령	제46조의2 (안전관리계획의 수립) ① 법 제26조의2제3항의 규정에 의한 안전관리계획(이하 "안전관리계획"이라 한다)을 수립하여야 하는 건설공사는 다음 각호와 같다. 다만, 원자력시설공사를 제외한다. <개정 2001.7.30> 1. 시설물의안전관리에관한특별법 제2조제2호 및 제3호의 규정에 의한 1종시설물 및 2종시설물(동법시행령 별표 1 제8호의 시설물을 제외한다)의 건설공사 2. 지하 10미터이상을 굴착하거나 폭발물을 사용하는 건설공사로서 20미터안에 시설물이 있거나 100미터안에 양육하는 가축이 있어서 당해 건설공사로 인한 영향을 받을 것이 예상되는 건설공사 3. 삭제 4. 제1호 및 제2호외의 건설공사로서 발주자가 특히 안전관리가 필요하다고 인정하는 건설공사 ② 건설업자 또는 주택건설등록업자는 안전관리계획을 작성한 때에는 공사감독자 또는 감리원의 확인을 받아 건설공사를 착공(건설공사 현장의 부지정리 및 가설사무소의 설치 등의 공사준비행위는 착공으로 보지 아니한다)하기 전에 발주자에게 제출하여야 한다. 안전관리계획의 내용을 변경한 때에도 또한 같다.

관계법령	관 련 조 항
동법 시행령	③ 제2항의 규정에 의하여 안전관리계획을 제출받은 발주자중 발주청이 아닌 자는 건설업자 또는 주택건설등록업자가 제출한 안전관리계획의 내용을 당해 건설공사를 허가·인가·승인등을 한 행정기관의 장에게 제출하여야 한다. ④ 제2항 및 제3항의 규정에 의하여 안전관리계획을 제출받은 발주자 또는 행정기관의 장은 안전관리계획의 내용을 검토하여 보완하여야 할 사항이 있는 경우에는 건설업자 또는 주택건설등록업자로 하여금 이를 보완하도록 하여야 한다. 제46조의3 (안전관리계획의 내용) ① 안전관리계획에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 건설공사의 개요 및 안전관리조직 2. 공정별 안전점검계획 3. 공사장 주변의 안전관리대책 4. 통행안전시설의 설치 및 교통소통에 관한 계획 5. 안전관리비집행계획 6. 안전교육 및 비상시 긴급조치계획 7. 공종별 안전관리계획(대상시설물별 건설공법 및 시공절차를 포함한다) ② 제1항 각호에 규정된 사항의 세부적인 내용은 건설교통부령으로 정한다.
동법 시행규칙	제21조의3 (안전관리계획) ① 법 제26조의2제2항의 규정에 의한 안전관리계획(이하 "안전관리계획"이라 한다)의 작성기준은 별표 14와 같다. ※ [붙임] 참조 ② 영 제46조의3제1항제3호의 규정에 의한 공사장주변의 안전관리대책에는 건설공사중 발파·진동·소음이나 지하수차단등으로 인한 주변지역의 피해방지대책이 포함되어야 한다.

[붙임]

안전관리계획서작성기준(건설기술관리법 시행규칙 [별표14])

1. 안전관리계획

가. 공사의 개요

- 공사전반에 대한 개략을 파악하기 위한 위치도·공사개요·전체공정표 및 설계  도서(공사 인·허가 또는 승인한 행정기관 등에 이미 제출된 경우 제외)

나. 안전관리조직

- 공사관리조직 및 임무에 관한 사항으로서 시설물의 시공안전 및 공사장 주변  안전에 대한 점검·확인등을 위한 관리조직표

다. 공정별 안전점검계획

- 자체· 정기 안전점검 시기·내용·안전점검공정표  실시계획 등에 관한 사항

라. 공사장 주변 안전관리계획

- 공사중 지하매설물의 방호, 인접시설물의 보호등 공사장 및 공사현장주변에    대한 안전관리에 관한 사항

마. 통행안전시설 설치 및 교통소통계획

- 공사장 주변의 교통소통대책, 교통안전시설물, 교통사고 예방대책 등 교통 안전관리에 관한 사항

바. 안전관리비 집행계획

- 안전관리비의 계상금액, 산정내역, 사용계획 등에 관한 사항

사. 안전교육계획

- 안전교육계획표, 교육의 종류·내용 및 교육관리에 관한 사항

아. 비상시 긴급조치계획

- 공사현장에서의 비상사태에 대비한 비상연락망, 비상동원조직, 경보체제, 응급조치 및 복구 등에 관한 사항

2. 대상시설물별 세부 안전관리계획

가. 가설공사

- 가설구조물의 설치개요, 시공 상세도면

- 안전시공절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 가설물 안전성계산서

나. 굴착공사 및 발파공사

- 굴착·흙막이·발파·항타등의 개요, 시공상세도

- 안전시공절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 굴착비탈면, 흙막이 등 안전성계산서

다. 콘크리트공사

- 거푸집·동바리·철근·콘크리트등 공사개요, 시공상세도면

- 안전시공절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 동바리등 안전성계산서

라. 강구조물공사

- 자재·장비등의 개요, 시공상세도면

- 안전시공절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 강구조물의 안전성계산서

마. 성토 및 절토공사(흙댐공사를 포함한다)

- 자재·장비등의 개요, 시공상세도면

- 안전시공절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 안전성계산서

바. 해체공사

- 구조물해체의 대상·공법등의 개요, 시공상세도면

- 해체순서, 안전시설 및 안전조치등에 대한 계획

사. 건축설비공사

- 자재·장비 등의 개요 및 시공상세도면

- 안전시공절차 및 주의사항

- 안전점검계획표 및 안전점검표

- 안전성 계산서

4.  통합계획서의 작성·제출

가. 통합계획서의 작성

(1) 통합계획서는 기본사항, 유해·위험방지계획, 안전관리계획, 유해·위험방지와 안전관리 공통계획으로 구성한다

□ 기본사항은 유해·위험방지계획서와 안전관리계획서에서 기본적으로 요구하고 있는 사항으로서 공사개요, 안전관리조직, 안전교육계획, 재해발생 등 비상시 긴급조치계획이 여기에 해당된다.

□ 유해·위험방지계획은 기본사항이외에 유해·위험방지계획서에서만 요구하는 사항으로서 안전보건관리계획 및 유해·위험요인별 재해방지계획으로 구분된다.

□ 안전관리계획은 기본사항이외에 안전관리계획서에서만 요구하고 있는 사항으로서 공사현장 및 주변 안전관리계획 및 공종별 안전관리계획으로 구분된다.

□ 유해·위험방지와 안전관리 공통계획은 유해·위험방지계획서와 안전관리계획서에서 공통적으로 요구하는 계획 및 서류, 도면을 작성하도록 하여 중복을 방지한다.

(2) 통합계획서는 당해 공사의 시공자(건설업자 또는 주택건설등록업자)가 직접 작성함을 원칙으로 한다.

(3) 통합계획서의 작성 규격은 A4 용지 종으로 작성함을 원칙으로 하며, 공정표 및 도면 등 규격이 다른 경우에는 A4 크기에 맞게 접어서 제출한다.

(4) 통합계획서의 내용 중 구조계산서 및 안전성 검토서 등을 당해 공사 시공자가 작성한 경우에는 도서에 작성일과 책임자의 서명날인을 한다.

(5) 통합계획서를 작성하는 경우 작성지침서 순서에 따라 작성하되 당해 공사와 관련 없는 항목은 제외하고 관련 있는 항목만 작성하면 된다.

(6)「Ⅲ. 안전관리계획 중 공종별 안전관리계획」은 통합계획서와 분리하여 공종별로 별도 작성하여 해당 공종 착공전 제출이 가능하다. 단 「Ⅵ. 공통계획」은 유해·위험방지계획서 심사시 검토되어야 하므로 통합계획서 제출시  반드시 제출하여야 한다.

나. 통합계획서의 구성

Ⅰ. 기본사항

1. 공사개요

2. 안전관리조직

3. 안전교육계획

4. 재해발생 등 비상시 긴급조치계획

Ⅱ. 유해·위험방지계획

1. 안전보건관리계획

가. 산업안전보건관리비 사용계획서

나. 개인보호구 지급계획

2. 유해·위험요인별 재해방지계획

가. 추락방지계획

나. 낙하·비래 예방 계획

다. 붕괴방지계획

라. 차량계 건설기계 및 양중기에 관한 안전작업계획

마. 감전재해 예방계획

바. 유해·위험 기계·기구 등에 관한 재해예방계획

사. 보건·위생시설 및 작업환경 개선계획

아. 화재·폭발에 의한 재해방지 계획

Ⅲ. 안전관리계획

1. 공사현장 및 주변 안전관리계획

가. 안전관리비 집행계획

나. 공정별 안전점검계획

다. 공사현장 주변 안전관리계획

라. 통행안전시설 설치 및 교통소통 대책

2. 공종별 안전관리계획

가. 가설공사

나. 굴착공사 및 발파공사

다. 콘크리트공사

라. 강구조물공사

마. 성토 및 절토공사

바. 해체공사

사. 건축설비공사

Ⅳ. 유해·위험방지와 안전관리 공통계획

1. 굴착공사 안전관리계획

2. 가설비계 안전관리계획

3. 거푸집 및 거푸집동바리 안전관리계획

4. 발파공사 안전관리계획

다. 통합계획서의 제출

시공자(건설업자 또는 주택건설등록업자)는 통합계획서를 작성한 경우에는 유해·위험방지계획서(별지 제1호 서식) 및 안전관리계획서(별지 제2호 서식) 관련 규정에 따라 관계기관에 제출한다

(1) 유해·위험방지계획서

□ 유해·위험방지계획서 작성 대상공사를 착공하려고 하는 사업주는 일정한 자격을 갖춘자의 의견을 들은 후, 동 계획서를 작성하여, 공사착공 전일까지 한국산업안전공단 관할 지역본부 및 지도원(이하 □안전공단□ 이라 한다)에 2부를 제출한다.

※ 일정한 자격을 갖춘자

· 건설안전분야 산업안전지도사

· 건설안전기술사 또는 토목·건축분야 기술사

·  건설안전산업기사 이상으로서 건설안전관련 실무경력 7년(기사는 5년) 이상인 자

□ 자율안전관리업체로 지정된 업체는 자체심사를 거쳐 공사착공전일까지 자체심사서를 안전공단에 제출한다

(2) 안전관리계획서

□ 시공자는 통합계획서를 2부 작성하여 공사감독자 또는 감리원의 확인을 받아 공사착공 전일까지 발주자에게 제출한다. 단, 안전관리계획을 제출받은 발주자중 발주청이 아닌 자는 당해 건설공사를 인가□허가·승인 등을 한 행정기관의 장에게 제출한다.

□ 공종별 안전관리계획서의 제출(확인신청) 기간은 당해 공종의 착공전일까지로 한다.

라. 통합계획서의 심사 및 확인

(1) 유해·위험방지계획서

□ 안전공단은 동 계획서 접수일로부터 15일 이내에 심사하여 결과를 사업주에게 통보한다

※ 심사결과 구분

① 적  정 : 근로자의 안전과 보건상 필요한 조치가 구체적으로  확보되었다고 인정될 때

② 조건부 적정 : 근로자의 안전과 보건을 확보하기 위하여 일부개선이 필요하다고 인정될 때

③ 부적정 : 중대한 위험발생 우려가 있거나 계획에 근본적 결함이 있다고 인정될 때

□ 부적정 판정을 한 경우에는 지방노동관서에 통보하여 공사착공중지 또는 계획변경명령 등 필요한 조치를 취하도록 한다

□ 확인검사(산업안전보건법 시행규칙 제124조)는 3월에 1회(높이 31m 이상 건축물 또는 공작물 건설사업장 중 냉동창고 및 호텔을 제외한 사업장은 6월에 1회) 이상 실시한다

※ 확인제외

자율안전관리업체 : 당해 공사 준공시까지

□ 심사 및 확인검사 절차

■ 심사

	▼							▼
사 업 주				① 공사착공전 제출		♠	공단 지역본부 및 지도원 (접수, 심사, 결과통보)					③ 결 과	♠	노 동 부 지방관서
												통보서 (부적정)
				▶
▲				③ 결과통보
							④ 행정조치
				(공사착공중지명령, 계획변경 명령 등)

■ 확인검사

사 업 주				▶ ▶	③ 개선여부 확인		공단 지역본부 및 지도원 (확인, 결과통보)					② 확인결과 조치요청	♠	노 동 부 지방관서
					① 일정통보
▲		▲
					② 확인 및 결과 통보
							③ 행정조치

(2) 안전관리계획서

□ 총괄 안전관리계획서 및 공종별 안전관리계획서의 확인은 당해 건설공사의 공사감독자 또는 감리원(이하 □확인자□라 함)이 총괄하여 수행한다. 단, 공사감독자 또는 감리원이 없는 민간건설공사의 경우에는 당해 건설공사를 인□허가 또는 승인한 행정기관의 장(이하 □확인자□라 함)이 확인업무를 수행한다.

□ 확인결과의 구분은 아래와 같다.

① 적정 : 안전에 필요한 조치가 구체적이고 명료하게 계획되어 건설공사의 시공상 안전성이 충분히 확보되어 있다고 인정될 때

② 조건부 적정 : 안전성 확보에 치명적인 영향을 미치지는 않지만 일부 보완이 필요하다고 인정될 때

③ 부적정 : 시공시 안전사고 발생의 우려가 있거나 계획에 근본적인 결함이 있다고 인정될 때

□ 확인결과 □조건부 적정□ 또는 □부적정□으로 평가된 항목에 대해서는 반드시 보완 또는 대안 등 확인자의 의견을 명시한다.

□ 확인결과의 통지 기한

① 총괄 안전관리계획서의 확인결과 통지 기한은 접수 후 10일 이내로 한다.

② 공종별 안전관리계획서의 확인결과 통지 기한은 접수 후 10일 이내로 한다.

□ 확인결과의 통지 내용

① 확인결과가 □적정□일 경우

확인필이 날인된 안전관리계획서

② 확인결과가 □조건부 적정□일 경우

안전관리계획서의 확인내용 중 보완이 필요한 사항을 구체적으로 명시한 내용 첨부

③ 확인결과가 □부적정□일 경우

부적정 판정에 대한 이유와 대책을 구체적으로 명시한 내용 첨부

□ 안전관리계획서의 재확인 신청

① 확인결과가 □조건부 적정□일 경우

확인결과 통지서의 내용에 따른 보완계획서를 작성하여 재확인을 신청한다.

② 확인결과가 □부적정□일 경우

안전관리계획서를 보완하여 재확인을 신청한다.

□ 재확인 신청 기한

확인결과가 □조건부 적정□ 또는 □부적정□일 경우 확인결과의 통지를 받은 날로부터 총괄 안전관리계획서는 5일 이내, 공종별 안전관리계획서는 10일 이내에 재확인을 신청한다.

□ 안전관리계획서의 재확인 및 재확인결과 통지

안전관리계획서의 재확인 절차, 재확인 기준, 재확인결과의 통지 등은 최초의 확인과 동일하며, 다만 재확인결과의 통지 기한은 총괄 안전관리계획서는 접수 후 3일 이내, 공종별 안전관리계획서는 접수 후 5일 이내로 한다.

제2장  통합계획서 작성기준

Ⅰ. 기본사항

1. 공사개요

2. 안전관리조직

3. 안전교육계획

4. 재해발생 등 비상시 긴급조치계획

Ⅱ. 유해·위험방지계획

1. 안전보건관리계획

2. 유해·위험요인별 재해방지계획

Ⅲ. 안전관리계획

1. 공사현장 및 주변 안전관리계획

2. 공종별 안전관리계획

Ⅳ. 유해·위험방지와 안전관리 공통계획

1. 굴착공사 안전관리계획

2. 가설비계 안전관리계획

3. 거푸집 및 거푸집동바리 안전관리계획

4. 발파공사 안전관리계획

제2장  통합계획서 작성기준

Ⅰ. 기본사항

1. 공사개요

가. 공사 개요서

(1) 공사명, 시공자, 발주자, 설계자, 감리자, 공사개요 등을 기재한다.

(별지 제3호 서식)

(2) 대상공사의 종류, 구조, 층수, 굴착깊이, 최고높이(건축법에 의한 건축물의 높이), 연면적 등을 구체적으로 기재한다.

나. 위치도

공사현장의 정확한 위치를 나타낼 수 있는 위치도(축척 1/25,000 또는 1/50,000)를 첨부한다.

다. 전체 공정표

전체 공정의 흐름이나 각 공종의 전·후 관계 등을 파악할 수 있도록   Net-Work 공정표 또는 Bar Chart 공정표를 첨부하고 주요 공종별 계획공정표를 첨부한다.

ㅇ 공종별 공사기간, 작업순서, 기계·설비의 조립 및 해체시기 등을 기재

라. 공사 설계도면 및 서류

(1) 대상공사의 전체 개요를 나타내는 도면을 첨부한다

(2) 대상구조물의 배치도, 평면도, 단면도, 측면도 및 관계서류를 첨부한다.

마. 공사현장 주변현황 및 주변의 관계를 나타내는 도면

배치도에 공사현장 주변의 위험요인에 대한 현황을 정확히 기재한다.

(1) 도로 폭, 인접건물의 구조·층수 표시

(2) 전기·가스·상하수도 등 지하매설물 현황 표기

(3) 공사현장 주변의 사육가축 등의 규모, 위치 표시

바. 건설물·공사용 기계 설비 등의 배치를 나타내는 도면 및 서류

(1) 현장사무실, 가설숙소, 가설식당, 현장출입구, 가설울타리 등의 배치도

(2) 타워크레인, 리프트, 수전 설비 등 공사용 기계·설비 배치도

- 공사용 기계·설비, 인접 건축물, 가공전로 등과의 관계에 대해 명시

2. 안전관리조직

가. 안전관리조직표

(1) 산업안전보건법과 건설기술관리법 규정에 적정한 안전관리조직을 구성하여 조직표를 작성한다.

산업안전보건법 제2장 안전관리체제 및 건설기술관리법 제26조의3의 건설공사의 안전관리조직은 다음과 같이 병기하여 표기한다.

□ 안전보건총괄책임자 / 안전총괄책임자

□ 관리감독자 / 분야별 안전관리책임자

□ 관리감독자 / 안전관리담당자

(2)  건설공사에 있어서의 안전관리조직은 종적·횡적으로 원활하고 신속하게 업무전달이 이루어지고 상호 협조가 용이한 형태로 구성한다.

(3) 안전보건총괄책임자, 안전관리자, 관리감독자 등 가급적 현장의 직원, 근로자 등이 모두 포함될 수 있도록 안전관리 조직을 구성하고, 조직구성원에게 책임을 부여한다.

□ 안전관리조직표(예시)

							안전보건총괄책임자 (안전총괄책임자)
							현장소장
							연락처
안 전 관 리 자																	협 의 체
□ □ □																	(수급인 및 하수급인 사업주 전원)
관리감독자 (안전관리책임자)					관리감독자 (안전관리책임자)							관리감독자 (안전관리책임자)					관리감독자 (안전관리책임자)
(예)토목					○○							○○					○○
연락처					연락처							연락처					연락처
관리감독자 (안전관리담당자)					관리감독자 (안전관리담당자)							관리감독자 (안전관리담당자)					관리감독자 (안전관리담당자)
담당자					담당자							담당자					담당자
연락처					연락처							연락처					연락처
전 근 로 자

나. 협의체 구성

수급인 및 하수급인 사업주 전원으로 협의체를 구성하여 조직표에 기재하고 변경사항이 있는 경우에는 수시로 변경하여 현황을 유지한다.

다. 산업안전보건위원회의 구성

산업안전보건법 제 19조의 규정에 의한 산업안전보건위원회 설치대상 건설현장은 근로자 대표와 사용자 위원으로 산업안전보건위원회를 구성하고 변경사항이 있는 경우에는 수시로 변경하여 현황을 유지한다.

3. 안전보건교육

가. 안전보건교육

(1) 산업안전보건법 시행규칙 제33조의 규정에 의한 정기교육(근로자, 관리감독자 구분)과 신규채용 시 교육, 작업내용 변경 시 교육, 특별안전·보건교육 등의 교육대상, 교육시간 및 목적에 적합한 교육내용 등에 대한 계획을 수립한다.

□ 산업안전보건법상 안전보건교육기준

구 분	교 육 기 준	근 거
정기교육		법 제31조 규칙 제33조
	정 기 교 육
	관리감독자		근 로 자
ㅇ관리감독자 ㅇ전 근로자
ㅇ반기 8시간이상 또는 ㅇ매월 2시간이상
연간 16시간이상
수시교육		법 제31조 규칙 제33조
	수 시 교 육
	신규채용시		작업내용변경시		특 별
ㅇ신규채용근로자 ㅇ작업변경근로자 ㅇ특별작업에 종사 ㅇ1시간 이상 ㅇ1시간 이상 하는근로자

(2) 건설기술관리법 시행령 제46조의 7 안전교육 규정에 적합하도록 안전교육계획을 수립한다.

□ 건설기술관리법상 안전교육기준

○ 안전관리책임자 및 안전관리담당자는 매일 공사 착수전에 안전교육실시

- 교육내용 : 당일작업의 공법이해, 시공 상세도면에 따른 세부 시공순서 및 시공기술상의 주의사항

- 기록관리 : 안전교육내용을 기록 관리하여야 하며, 준공 후 발주청에 제출

※ 산업안전보건법상 특별안전보건교육 대상작업

① 고압실내 작업(잠함공법 기타 압기공법에 의하여 대기압을 넘는 기압하의 작업실 또는 수갱 내부에 있어서 행하는 작업에 한한다.)

② 밀폐된 장소(탱크내 또는 환기가 극히 불량한 좁은 장소를 말한다)에서 행하는 용접작업 또는 습한 장소에서 행하는 전기용접작업

③ 폭발성·발화성 및 인화성 물질의 제조 또는 취급작업(시험연구를 위한 취급작업을 제외한다.)

④  목재가공용기계(둥근톱기계·띠톱기계·대패기계·모떼기기계 및 루타에 한하며 휴대용을 제외한다)를 5대 이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업

⑤ 1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 이하의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업

⑥ 건설용 리프트·곤도라를 이용한 작업

⑦ 전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업

⑧ 콘크리트파쇄기를 사용하여 행하는 파쇄작업(2미터이상인 구축물의 파쇄작업에 한한다)

⑨ 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반 굴착(터널 및 수직갱외의 갱굴착을 제외한다) 작업

⑩ 흙막이지보공의 보강 또는 동바리의 설치 또는 해체작업

⑪ 터널안에서의 굴착작업(굴착용 기계를 사용하여 행하는 굴착작업중 근로자가 칼날 밑에 접근하지 아니하고 행하는 작업을 제외한다) 또는 동작업에 있어서의 터널 거푸집 지보공의 조립 또는 콘크리트 작업

⑫ 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 암석의 굴착작업

⑬ 거푸집 지보공의 조립 또는 해체작업

⑭ 비계의 조립·해체 또는 변경작업

⑮ 건축물의 골조·교량의 상부구조 또는 탑의 금속제의 부재에 의하여 구성되는 것 (5미터이상인 것에 한한다)의 조립·해체 또는 변경작업

□ 처마 높이가 5미터 이상인 목조건축물의 구조 부재의 조립이나 건축물의 지붕 또는 외벽 밑에서의 설치작업

□ 콘크리트 공작물(그 높이가 2미터 이상인 것에 한한다)의 해체 또는 파괴작업

□ 맨홀작업

□ 산소결핍장소에 있어서의 작업

□ 유기용제 또는 특정화학물질의 제조 또는 취급작업(시험연구를 위하여 취급하는 작업을 제외한다)

4. 재해발생 등 비상시 긴급조치계획

가. 비상사태의 범위

건설현장에서 예상할 수 있는 위험상황은 다음과 같다.

□ 붕괴, 폭발, 가스누출 등에 의한 근로자·시설물 및 인근지역에 악영향의 우려가 있는 경우

□ 호우, 강풍, 폭설, 지진 등의 천재지변

□ 인근지역에서 발생한 비상사태가 현장에 파급효과의 우려가 있는 경우

□ 기타 인명 및 시설물에 치명적인 영향이 우려되는 경우

나. 비상연락망

아래사항이 포함된 비상연락망을 구성한다

(1) 내부 비상연락망

□ 발주자 또는 인·허가 기관 등의 담당자 연락처

□ 시공자, 감리자의 현장 근무자 및 본사 연락처

□ 현장 근무자 출타시 연락방법 등

(2) 외부 비상연락망

비상사태 발생에 대비한 관계기관(관할행정기관, 소방서, 경찰서, 지방노동관서, 가스·상하수도·전기·통신 등 지하매설물 관리주체, 응급병원 등)의 연락망

다. 비상동원조직의 구성

비상사태의 수습을 위한 조직 구성을 다음과 같이 분류하여 인원 편성과 각 조직의 업무 분담 내용을 명시한다.

(1) 유도반

대피인원의 유도와 관련된 인원의 편성 및 활동에 관한 사항

(2) 응급 조치반

피해자의 응급조치와 관련된 인원 편성 및 활동에 관한 사항

(3) 복구 작업반

손상된 시설에 대한 복구와 관련된 인원의 편성 및 활동에 관한 사항

(4) 상황반

상황전파, 외부연락 등과 관련된 인원의 편성 및 활동에 관한 사항

라. 비상경보체계

비상사태의 발생에 대비한 각종 경보시설의 설치에 관한 계획을 수립한다.

(1) 경보시설의 설치

경보발령지점 및 경보시설 설치계획을 작성한다

(2) 경보의 종류

발생 가능한 비상사태의 종류를 파악하여 각 상황별로 비상경보의 발신방법을 구체적으로 명시한다.

마. 긴급대피 및 피난유도

비상대피가 필요한 위험 상황의 발생 시 신속한 대피 또는 피난을 위한 계획을 작성한다.

(1) 긴급대피 상황의 전파방법

음성신호, 수신호, 경보음 등 상황전파에 관한 사항

(2) 유도원 등에 의한 피난 유도방법

유도원의 배치 및 활동, 유도시설 설치 등에 관한 사항

(3) 대피장소

현장 또는 인근에 위치한 대피시설의 위치 및 대피로의 지정 등에 관한 사항

(4) 비상 연락 수단

외부 관련 단체, 기관과의 연락수단에 관한 사항

바. 응급조치 및 복구작업

상황이 잠시 중단되거나 종료되었음이 확인된 경우에 취해질 제반 조치계획에는 다음의 내용을 포함하여 작성한다.

(1) 상황의 전파

중단 또는 종료된 상황의 전파에 관한 사항

(2) 응급조치 활동

피해자에 대한 응급조치 활동의 실시에 관한 사항

(3) 복구 작업

지정된 긴급복구 조직에 의한 복구 작업의 실시에 관한 사항

(4) 지원 요청

소방서, 경찰서 등 외부기관의 인원 및 장비의 지원요청에 관한 사항

(5) 복귀 유도

대피해 있던 인원의 질서 있는 복귀 유도에 관한 사항

(6) 피해결과의 파악 및 보고

복귀의 완료와 함께 인원과 장비 및 피해상황의 확인과 보고 등에 관한 사항

사. 비상복구장비 및 자재

비상시에 사용해야 할 복구장비 및 자재에 대해서는 다음의 내용을 포함해서 작성한다.

(1) 비상복구장비

고압펌프나 유압잭 등과 같이 복구장비 동원계획

(2) 비상복구 자재의 관리

로프나 각재, 철재 형강 등 복구용으로 사용할 자재는 현장내의 자재를 적절히 활용할 수 있도록 항상 준비하고, 즉시 사용할 수 있는 자재의 위치에 관한 사항

(3) 관리담당자 지정

비상시 사용할 복구장비나 자재 관리담당자 지정

Ⅱ. 유해·위험방지계획

1. 안전보건관리계획

가. 산업안전보건관리비 사용계획

산업안전보건관리비 항목별 사용계획 등 산업안전보건관리비 사용계획을 서식(별지 제4호 서식)에 맞게 작성하여 제출한다.

(1) 공사금액은 재료비, 관급재료비, 직접 노무비, 기타 금액을 구분하여 기재한다

(2) 산업안전보건관리비 계상 대상금액에 공사종류 및 규모에 따른 요율을 곱하여 산업안전보건관리비를 산정한다.

※ 단, 관급재료비를 포함한 산업안전보건관리비는 관급재료비를 포함하지 않았을 때의 산업안전보건관리비의 1.2배를 초과할 수 없음.

(3) 산업안전보건관리비 대상액이 구분되어 있지 아니한 공사는 도급계약 또는 자체사업계획상의 총 공사금액의 70%를 산업안전보건관리비 계상 대상금액으로 하여 공사종류 및 규모에 따른 요율을 곱하여 산업안전보건관리비를 산정 한다.

(4) 산업안전보건관리비의 세부항목, 단위, 수량, 금액, 산출내역 등을 정확히 파악하여 각 항목별 비용을 산출하고 산출된 비용은 각 항목별 사용기준 비율에 맞추어 조정한 후 항목별 실행계획 및 세부 사용계획을 작성한다.

나. 개인보호구 지급계획

(1) 근로자의 직종, 보호구의 종류, 지급수량, 지급시기 등 전체 공정표에 따라 보호구의 지급계획을 서식(별지 제5호 서식)에 맞게 작성한다

(2) 개인보호구는 성능검정에 합격된 제품을 지급하고 지급된 개인보호구는 근로자가 올바르게 착용할 수 있도록 관리감독 계획을 수립한다.

2. 유해·위험요인별 재해방지계획

가. 추락방지계획

(1) 추락재해 위험 분석

□ 공사단계별 추락위험요인  분석

① 추락위험 요인의 형태, 장소, 크기, 수량 등을 파악하여 목록 작성

- 위험요인 : 수평 개구부, 수직 개구부, 슬래브 단부 등

② 추락위험 요인별 안전대책 제시

□ 추락위험장소를 평면도, 종·횡단면도 등 도면상에 명기

(2) 추락재해방지 대책 수립

□ 추락위험 요인별 안전시설 설치계획 및 상세도 작성

※ 상세도에는 재료 및 설치규격, 설치방법 명시

① 개구부별로 덮개·안전난간·방호울 등 안전시설 설치계획을 명확하게 작성

㉮ 바닥개구부 : P/D, A/D, A/V, P/S, 장비 반입구 등

㉯ 벽면개구부 : 슬래브 단부, 계단실 측면단부, 굴착선단부, 엘리베이터 피트, 카 리프트 등

② 엘리베이터 피트 내부 작업발판 및 추락방지망 설치계획

㉮ 작업발판 설치 상세도(평면도, 종·횡단면도상에 표기)

㉯ 내부 추락방지망을 벽체에 연결하는 방법, 그물코 크기 등 상세계획 작성

③ 각층의 리프트 승강구의 출입문 설치계획

④ 비계, 추락방지망, 틀비계, 달비계, 달대비계, 작업발판 등의 설치 및 사용계획 수립

㉮ 비계 설치계획

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

㉯ 추락방지망 설치계획

방망의 성능과 설치높이, 설치방법 등에 대한 계획을 수립하고 입면·평면도 작성

㉰ 틀비계 설치계획

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

㉱ 달비계  설치계획

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

㉲ 달대비계 설치계획

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

㉳ 작업발판계획

발판의 재료, 설치방법, 설치간격, 발판고정, 안전난간설치, 작업발판을 이용하는 작업공종 등 상세히 작성

⑤ 가설 경사로, 가설 통로 등 안전통로 설치계획 작성

설치위치, 안전난간 및 미끄럼방지시설 등 안전시설 설치계획 작성

⑥ 이동식사다리 설치 및 사용계획 작성

전도방지조치, 설치방법 등 명기

⑦ 기타 추락위험 요인에 대한 방호조치계획

□ 추락위험공사 안전시설 설치계획 및 상세도

① 굴착공사시 추락방지계획 작성

㉮ 굴착 선단부 안전난간 등 안전시설 설치계획

㉯ 굴착저면까지의 안전통로 설치계획

㉰ 버팀보·띠장위의 점검통로, 이동통로 설치계획 등

(안전대 부착설비계획 등)

② 철골작업시 수직 및 수평통로 설치 계획

㉮ 승강용 트랩, 수직이동용 안전대 부착설비 설치계획(위치, 방법 등)

㉯ 수평이동용 안전대 부착설비 설치계획(재료, 방법 등)

③ 철골작업시 작업발판 설치계획

㉮ 보 및 기둥접합부 작업시 달대비계 설치계획

㉯ 기둥용접 작업시 작업발판 설치계획

(불꽃비산방지막, 방풍막 등 설치계획 포함)

④ 박공(경사)지붕에서의 작업시 추락방호조치계획

작업발판, 안전난간, 안전방망, 안전대 부착설비 등

⑤ 교량공사시 기초 및 교각 안전시설 설치계획

㉮ 교각□Coping 철근조립 및 거푸집 작업중 작업발판

㉯ 가설통로, 추락방지망 설치계획

㉰ Coping상부 단부 추락방지시설 등

⑥ 교량 상부공 안전시설 설치계획

㉮ 상부공 관련 상세도면 제출

㉯ 가설통로, 작업발판, PC 또는 Steel Box Girder 하부 안전방망 설치계획

㉰ Steel Box Girder간 연결통로 및 단부 추락방지시설

㉱ PC 인장작업대 및 추락방지시설

㉲ 슬래브 단부 안전시설

㉳  슬래브 단부 난간정리용 Cage 및 Cantilever Bracket 및 Steel Box Bracket 해체용 작업대 구조 및 안전시설계획

㉴ 거푸집동바리 작업 또는 기타 작업용 특수작업대 구조 및 안전조치계획

⑦ 수상작업 안전대책

㉮ 작업공종 및 작업방법·순서 명기

㉯ 안전시설 설치계획

㉰ 구명조끼 등 안전장구 지급계획

⑧ 기타 추락위험 공사에 대한 방호조치계획

□ 추락위험 예방을 위한 안전조치사항

나. 낙하·비래 예방 계획

(1) 낙하·비래 재해 위험 분석

□ 공사단계별 낙하·비래 위험요인 분석

① 낙하·비래 위험 장소, 형태, 수량 등을 파악하여 목록 작성

- 위험요인 : 작업 중 낙하·비래, 인양작업 중 낙하·비래, 상하동시작업 등

② 낙하·비래 위험 요인별 안전대책 제시

□ 낙하·비래 위험장소를 평면도, 종·횡단면도 등 도면상에 표기

(2) 낙하·비래 재해방지 대책 수립

□ 낙하·비래 위험요인별 안전시설 설치계획 및 상세도

① 낙하물방지망 설치계획 수립

㉮ 설치높이, 설치각도, 방망의 돌출길이 명기

㉯ 벽체와의 사이에 빈틈없이 설치 등 상세히 작성

㉰ 낙하물방지망은 추락방지망 설치계획과 같은 방법으로 작성하되 맨 밑단에는 합판, 함석 등을 이용하여 방호선반 설치

② 방호선반 설치계획 수립

㉮ 지상층 리프트 탑승장소 상부

㉯ 건물 출입구 상부

③ 쓰레기 투하시설 또는 반출계획 등 쓰레기처리 계획을 작성

㉮ 투하시설 설치위치, 투하설비의 종류, 구조체와의 긴결

㉯ 하부 낙하물 비산시설 등

④ 기타 낙하·비래 위험요인에 대한 방호계획

□ 낙하·비래 위험공사 안전시설 설치계획 및 상세도

① 크레인(고정식 또는 이동식)작업시 낙하·비래 방호계획

㉮ 작업반경내 관계자외 출입금지

㉯ 중량물 달기 작업 및 결속방법 준수

-  1점지지 금지, 2개소 이상 지지

- 후크에 해지장치 부착 등

- 인양물이 요동하지 않도록 유도 로프 설치

㉰ 신호수 배치

일정한 신호방법을 정하여 사용

② 거푸집 조립·해체작업 시 낙하·비래 방호계획

작업 중 외부로 자재 등이 낙하·비래되지 않도록 안전작업방법 수립

③ 기타 낙하·비래 위험공사에 대한 방호계획

□ 낙하·비래 위험예방을 위한 안전조치사항

① 낙하·비래 재해의 위험이 있는 상·하 동시작업 금지

철골부재 및 볼트 조립작업, 석재 붙임 작업 등

② 낙하·비래 위험물 제거

비계위에 자재 적재금지 등

다. 붕괴방지계획

(1) 붕괴재해 위험 분석

□ 공사단계별, 붕괴위험요인 분석

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

□ 붕괴 위험장소를 평면도, 종·횡단면도 등 도면상에 표기

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

(2) 붕괴 재해방지대책 수립

□ 붕괴 위험공사별 안전시설 설치계획 및 상세도

① 흙막이지보공의 붕괴방지계획

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

② 터널공사 붕괴방지계획

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

③ 거푸집동바리 붕괴방지계획

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

□ 기타 붕괴 위험예방을 위한 안전조치사항

① 교량공사시 PC Girder 전도방지 대책

전도방지용 철근, 삼각 프레임 설치 등

□ 철근도괴 예방 대책

기초, 옹벽, 교대, 교각 등 다량의 철근이 배근되는 부분의 철근이음위치, 이음방법, 철근배근 작업순서 등 철근도괴 방지계획 작성

라. 차량계 건설기계 및 양중기에 관한 안전작업계획

공사기간 중 사용예정인 차량계 건설기계 및 양중기 작업에 대한 위험요인을 분석하고 이에 대한 구체적인 안전대책을 수립한다.

(1) 차량계 건설기계 및 양중기 작업 분석

□ 공사단계별 위험요인 분석

① 사용기계의 종류, 기간, 수량 등을 파악하여 목록 작성

㉮ 공사중 사용예정인 양중기 현황(종류, 대수 등) 목록 작성

크레인, 리프트, 곤도라 등

㉯ 타워크레인, 리프트 등 양중기 사양서 첨부

정격용량, 각종 안전장치 등이 포함된 내용

㉰ 사용예정인 차량계 건설기계의 종류 및 시기 파악

불도져, 굴삭기, 항타기, 항발기, 로울러, 콘크리트 펌프카 등

□ 타워크레인, 리프트 등의 설치위치 및 작업반경이 표기된 배치도 작성

타워크레인의 작업반경에 따른 허용인양하중 판단표 작성(배치도상에 표기)

(2) 양중기 안전작업 계획 수립

□ 크레인 및 리프트 안전 작업계획

① 타워크레인, 리프트의 기초 설치계획

기초콘크리트 타설 계획, 연약 지반보강계획 등

② 타워크레인, 리프트의 조립·해체 작업순서 및 안전작업방법

㉮ 타워크레인, 리프트의 마스트 지지계획(브라켓, Guy Rope 등)

㉯ 타워크레인의 텔레스코핑(마스트 연장) 작업계획

③ 안전시설 및 안전장치 설치계획

리프트의 지상방호울, 각층 승강구 안전문 등 안전시설 설치계획

④ 사용시 안전관리계획

작업자와 운전자간의 신호방법 수립

리프트 전담운전자 배치계획

□ 곤도라 안전 작업계획

① 곤도라 상부 지지계획

② 곤도라의 작업 안전조치계획

㉮ 안전장치 설치 계획

㉯ 탑승작업시 구명줄 설치계획 등

□ 이동식크레인 사용 안전대책

① 지반 지내력 검토, 부판□철판 설치 등 침하□전도방지조치

② 인양화물에 대한 인양능력 검토

□ 양중기 임대차시 준수 사항

① 대여자의 장비관리 사항

② 대여 받은자의 확인 사항

□ 양중기 완성검사, 정기검사, 자체검사 실시계획

① 검사시기

② 검사항목

③ 검사방법 등을 구체적으로 명기

□ 기타 양중기의 설치·해체·사용작업시 방호계획

(3) 차량계 건설기계 안전 작업계획 수립

□ 차량계 건설기계 안전작업방법

① 작업중 전도·전락 방지계획

노견붕괴방지, 지반 침하방지, 노폭유지 등

□ 차량계 건설기계 사용시 안전조치 계획

① 특고압선 접촉 위험이 있는 경우 접촉 방지계획

② 유도자 배치계획

③ 유도자와 운전자간의 신호방법 수립

□ 기타 차량계 건설기계 작업시 안전조치계획

마. 감전재해 예방계획

건설현장의 가설전기 설치계획을 명시하고 감전재해를 예방하기 위한 위험요인을 분석하여 이에 대한 안전조치 계획과 전기기계·기구에 대한 구체적인 안전대책을 수립한다.

(1) 감전재해 위험요인 분석

□ 임시동력 및 발전기 설치계획

① 임시동력 설치

소요전력 산정 및 설치도

② 발전기 설치

소요전력 산정 및 설치계획

□ 공사단계별 위험요인 파악

공사단계별로 사용예정인 전기 기계·기구 종류, 기간, 수량 등을 파악하여 목록 작성

- 용접기, 철근 가공기, 목재가공용 둥근톱 등

□ 현장내 임시동력 및 배·수전 설비, 분·배전반 등을 포함한 가설전기 회로도 및 배치도 작성

(2) 가설전기 시설 설치 및 안전조치 계획

□ 수·배전 설비 안전조치

① 수·배전반 표준회로도 작성

② 수배전 설비 안전조치 계획

보호울, 위험표지, 시건장치 등 설치계획

□ 분전반 안전조치

① 분전반 회로도 첨부

② 분전반 안전조치계획

㉮ 외함 접지

㉯ 누전차단기 설치

㉰ 시건장치 및 내부 회로도 표기 등

□ 가설전선 안전조치

① 전선의 종류 명시

② 통로, 지하층 등에 전선 거치대 등 전선 보호시설계획

(지중 또는 가공포설)

□ 임시전등(가설 조명등) 안전조치

① 투광등 사용계획 → 삼각대(받침대) 등 이용

② 백열전구 사용시 보호망 부착 등

□ 접지계획

① 리프트, 타워크레인, 분전반 등 고정식 전기 설비의 접지계획

② 핸드드릴, 그라인더 등 이동식 전기기계·기구의 접지형 플러그 사용 등 접지계획 수립

□ 현장주변 특고압선로 현황 및 방호계획

(3) 전기 기계·기구 안전조치 계획

□ 전기기계·기구별 방호조치계획수립

□ 전기 기계·기구 사용시 안전조치계획

① 충전부 방호계획

전기기계·기구 또는 전로 등의 충전부 방호계획

② 절연장갑 등 절연용 보호구 사용계획 등

바. 유해·위험 기계·기구 등에 관한 재해예방계획

산업안전보건법 시행령 별표7에서 정하고 있는 유해·위험기계·기구 사용에 관한 위험요인을 분석하고 기계·기구별 방호조치계획을 수립한다.

(1) 유해·위험 기계·기구 위험요인 분석

□ 유해·위험 기계·기구 사용계획

사용예정인 유해·위험 기계기구 종류, 기간, 수량 등을 파악하여 목록 작성

- 목공용 둥근톱, 교류아크용접기, 핸드그라인더 등

□ 가설기자재 사용계획

사용예정인 가설기자재 종류, 수량 등을 파악하여 목록 작성

(2) 유해·위험 기계·기구 방호조치 계획

□ 교류아아크 용접기에 대한 방호조치 계획

① 자동전격방지기 부착

② 전기 입·출력 단자는 절연테이핑 처리

③ 용접 홀더의 절연체 파손 여부 점검

□ 목재 가공용 둥근톱에 대한 방호조치 계획

① 반발예방장치 및 날접촉예방장치 등 안전장치 부착

② 전기 입·출력 단자 안전조치

□ 연삭기에 대한 방호조치 계획

- 덮개 등 안전장치 부착

□ 기타 유해·위험기계·기구 사용작업시 재해예방 계획

(3) 가설기자재의 방호조치 계획

□ 가설기자재 구입 및 반입계획

○ 가설기자재는 성능검정제품 사용

- 파이프써포트, 보조지주, 강관틀 비계용 부재(주틀, 교차가새, 띠장틀), 작업대, 선반지주, 단관비계용 강관, 외줄비계용 작업대 및 그 지지철물, 이동식비계용의 주틀 및 각륜, 벽연결용 철물, 연결철물(강관틀 비계용 주틀의 연결핀, 강관틀비계용 주틀의 암록, 단관비계용의 단관 조인트), 크램프, 받침철물(고정형, 조절형), 달비계용 부재(달기체인, 달기틀), 수직보호망, 이동식비계용 난간틀, 방호선반, 리프트승강구 안전문, 엘리베이터 개구부용 난간틀, 안전난간지주, 통로용 작업발판, 철골용 크램프, 측벽용 브라켓, 안전방망, 피벗형 받침철물 등 30종

□ 가설기자재 사용 및 관리계획

사. 보건·위생시설 및 작업환경 개선계획

공사기간 중 근로자의 보건위생을 위한 시설 설치계획을 구체적으로 명시하고 작업환경 유해요인 분석 후 그에 대한 안전대책을 수립한다.

(1) 보건위생 및 작업환경 유해요인 분석

□ 보건위생 유해요인 분석

① 보건위생상 유해요인 분석

- 식중독, 전염병 등

② 보건위생 시설목록 파악

□ 유해·위험 작업환경 요인 분석

① 공사단계별 소음, 진동 및 분진발생 작업공종 및 기간을 파악하여 목록작성

② 석면 해체·제거 작업 등 유해물질 관련작업 분석

③ 고기압하의 위험작업 분석

(2) 보건 위생시설물 설치 및 관리대책

□ 식당, 간이 화장실, 세면장, 샤워장, 휴게시설 등 위생시설 설치계획

- 설치 규모 및 위치 명시

□ 위생시설 관리계획

(3) 작업환경 개선계획

□ 소음, 진동 및 분진발생 작업에 대한 방호대책

① 적정한 공법의 선정

② 장비 및 기계·기구 사용계획

③ 살수, 분진망, 방음 휀스 등 설치계획

④ 세륜시설 설치계획 등 수립

□ 석면 해체·제거 작업 등 유해물질 관련 작업에 대한 방호대책

□ 고기압하의 위험작업에 대한 방호대책

① 잠함공법 적용에 따른 안전대책

② 잠수작업 시 안전대책

□ 조명시설물 설치계획

① 지하, 터널 등 조명 설치장소 명시

② 설치장소별 조도기준

③ 조명등 종류, 설치 위치, 개소 등 명시

□ 질식 및 산소결핍 재해예방 대책

① 질식 및 산소결핍 공종 및 장소 파악 목록 작성

㉮ 공종 : 방수작업, 동절기 콘크리트 양생작업 등

㉯ 장소 : 정화조, 저수조, 맨홀 등

② 환기설비 설치계획

㉮ 환기설비 설치장소의 필요 환기량을 산출하고 환기량에 따른 적정 용량의 송·배기 시설 선정

㉯ 환기덕트(Duct), 호스 등 배치계획 수립

③ 공기호흡기, 송기마스크 등 호흡용 개인보호구 지급·착용계획

④ 긴급사태에 대비할 수 있는 조치계획

㉮ 외부와의 연락장치, 비상용 사다리·구명로우프 비치 등

㉯ 응급구조계획

□ 산소 및 유해가스 농도측정장비 비치계획

① 측정장비 비치목록 작성 및 사양서

산소농도 측정기, 휴대용 가스탐지기 등

② 측정장비별 사용계획

㉮ 측정장비별 작동방법

㉯ 측정장소, 측정시기, 측정기록 관리방법 등

(4) 근로자 건강진단 실시계획

□ 일반건강진단

① 해당직종 및 공종을 파악하여 목록 작성

② 건강진단 실시시기, 의료기관 명시

□ 특수건강진단

① 용접작업자, 터널 작업자 등 해당직종 및 공종을 파악하여 목록 작성

② 건강진단 실시시기, 의료기관 명시

(5) 기타 보건·위생시설 및 작업환경개선계획

아. 화재·폭발에 의한 재해방지계획

(1) 화재·폭발 재해 위험요인 분석

□ 공사단계별 화재·폭발 위험 요인 분석

① 화재·폭발 위험요인을 파악하여 목록 작성

- 위험요인 : 화재, 폭발 등

② 유해·위험요인별 장소, 형태, 시기 등을 파악하여 목록 작성

- 밀폐공간, 터널, 굴착장소 등

□ 위험물누출에 의한 위험요인 분석

유해·위험 물질의 종류, 사용시기, 사용장소 파악

① 페인트류 : 유성, 본타일, 광명단, 에폭시, 신너 등

② 방수자재류 : 프라이머, 에폭시, 방수제 등

③ 단열재류 : 폴리우레탄 폼, 암면, 유리섬유, 스치로폴 등

④ 가스류 : 산소, LPG, 아르곤 등

⑤ 화약류 : 흑색화약, 안포폭약, 다이나마이트, 함수폭약 등

(2) 화재·폭발 재해방지대책 수립

□ 위험물 저장·보관·사용 안전작업계획

① 위험물 저장·보관장소

② 현장 화약고 설치

③ 화약, 뇌관 관리계획

㉮ 수불관리대장

㉯ 화약류의 반입, 반출 및 반납 등 화약류 취급에 대한 안전대책

④ 환기설비 설치계획

⑤ 물질안전보건자료(MSDS)

㉮ 물질안전보건자료(MSDS)를 작성하여 취급 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시 또는 비치

㉯ 유해□위험물질 관리대장 작성

㉰ 경고표지부착

㉱ 작업근로자에 대한 안전·보건교육 실시

□ 밀폐공간에서의 용접, 방수, 도장 및 단열작업시 화재·폭발예방 계획 수립

① 도료 등 인화물질 사용작업시 화기 사용금지

② 충분한 통풍·환기실시, 용접작업시 불꽃비산 방지조치

③ 소화기 배치

④ 감시인 배치

⑤ 상·하 동시작업금지 등

□ 굴착공사 중 도시가스 화재·폭발예방 계획 수립

① 자동경보장치 설치계획

자동경보장치의 종류, 작동방법, 설치위치, 비상시 조치계획, 담당자 지정 등

② 도시가스업자와 합동점검 및 관리계획

□ 발파작업 안전조치 계획

안전관리계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

□ 기타 화재·폭발에 의한 재해방지계획

Ⅲ. 안전관리계획

1. 공사현장 및 주변 안전관리계획

가. 안전관리비 사용계획

(1) 안전관리비 사용계획은 서식(별지 제6호 서식)에 맞게 작성한다.

(2) 건설공사에 사용되는 안전관리비의 산출기준 및 사용내역은 아래표와 같으며,  정산시에는 실비정산에 의한다.

항 목	사 용 내 역	산출기준
1.안전관리계획서 작성비	□ 안전관리계획서 작성에 소요되는 비용 □ 안전점검 공정표 작성에 소요되는 비용 □ 시공상세도면 작성비용	엔지니어링기술진흥법 제10조(엔지니어링사업대가의 기준)에 의함
2. 공사현장의 안전점검비	□ 공사현장의 정기안전점검 비용 - 건설기술관리법 시행령 제46조의4에 의한 건설안전점검기관에 의한 정기안전점검	정기안전점검 비용은 건설공사 안전점검 대가산정기준에 의함
3. 공사장주변 안전관리비용	□ 지하매설물 방호 및 인접구조물 보호대책 비용 □ 인접가축피해 등 민원대책 비용	토목·건축 등 관련분야설계기준에 의함
4. 통행안전 및 교통소통대책 비용	□ 통행안전시설 설치 및 유지관리비용 □ 교통소통 및 교통사고 예방대책 비용	토목·건축 등 관련분야설계기준에 의함

나. 공정별 안전점검계획

(1) 자체안전점검

건설기술관리법 시행령 제46조의4 제1항 제1호에 의거하여 당해 건설공사의 공사기간 동안 건설업자 또는 주택건설등록업자가 매일 실시하는 안전점검으로서 세부사항은 다음에 따른다.

□ 실시 시기

건설공사의 공사기간 동안 해당하는 공종별로 매일 실시한다.

□ 안전점검 항목 및 내용

자체안전점검시 주요 공종별 안전점검 항목은 자체 안전점검표를 참고로 하여 당해 공종의 공법 또는 작업방법에 따른 위험요소의 종류에 따라 내용을 조정할 수 있다.

□ 안전점검 결과의 기록 및 확인

안전점검을 실시한 후 그 결과를 안전점검일지에 기록하고 지적사항에 대한 조치결과를 익일 자체 안전점검 시 반드시 확인하고 그 결과를 기록한다.

(2) 정기안전점검

건설기술관리법 시행령 제46조의4 제1항 제2호에 의거하여 건설업자 또는 주택건설등록업자가 건설안전점검기관에 의뢰하여 실시하는 안전점검으로서 실시에 대한 세부사항은 다음에 따른다.

□ 정기안전점검의 의뢰

건설안전점검기관과 착공시부터 준공시까지 장기계약을 체결하여 공사기간 중 지속적이고 일관성 있는 안전점검이 이루어지도록 한다.

□ 정기안전점검 시 점검 사항

건설기술관리법 시행규칙 제21조의2 제1항에 의거하여 정기안전점검 시 점검하여야 할 사항은 정기안전점검표에 따르며, 각 현장 실정에 따라 점검항목을 조정할 수 있다.

□ 정기안전점검 시기

건설교통부에서 고시한 건설공사 안전점검 지침 별표1의 정기안전점검 실시시기를 기준으로 안전관리계획에서 정한 시기에 실시하며, 발주자는 건설공사의 규모, 기간, 현장여건에 따라 점검시기 및 횟수를 조정할 수 있다.

□ 정기안전점검 결과의 제출

건설안전점검기관은 건설기술관리법 시행령 제46조의4 제4항 및 제46조의5에 의거하여 다음 사항에 따라 발주자, 당해 건설공사 인가□허가□승인한 기관 및 시공자에게 안전점검 실시결과를 제출한다.

① 정기안전점검 실시 결과는 점검표 및 의견서를 포함하는 보고서로 제출한다. 이 경우 제출 받은 자는 점검지적사항을 반드시 보완조치□확인하고 그 기록을 남겨야 한다.

② 건설공사를 준공한 때에는 공정별 정기안전점검에 관한 종합보고서를 작성하여 제출한다.

(3) 정밀안전점검

정밀안전점검은 건설기술관리법 시행령 제46조의4 제1항 제3호에 의하며, 주요 사항은 다음과 같다.

□ 정밀안전점검의 실시

정기안전점검 결과 건설공사의 물리적·기능적 결함 등이 있을 경우에 보수·보강 등의 필요한 조치를 취하기 위하여 건설안전점검기관에 의뢰하여 실시한다.

□ 비용의 부담

정밀안전점검에 대한 비용은 그 결함을 야기 시킨 자의 부담으로 한다.

□ 정밀안전점검 결과의 제출

정밀안전점검 완료 시 다음 사항을 보고서로 작성하여 제출한다.

① 물리적·기능적 결함 현황

② 결함원인 분석

③ 구조안전성 분석결과

④ 보수·보강 또는 재시공 등 조치대책

다. 공사현장 주변 안전관리계획

(1) 지하매설물 보호조치계획

□ 지하매설물 현황 도면

공사현장 지하 및 영향범위 내에 매설되어 있는 가스배관, 통신선로, 전기선로, 상·하수도, 송유관, 지역난방 관로 등 주요 매설물의 관리주체에 대한 매설물의 유무를 조회하고 그 결과에 따라 매설물의 종류, 위치 등을 도면에 표시하여 첨부한다.

① 지하매설물 현황 평면도

공사 중 노출되거나 영향범위 내의 매설물을 확인할 수 있도록 공사지점과의 이격거리 및 매설물의 종류를 표시한다.

② 지하매설물 현황 단면도

지하매설물별 주요 부분의 매설 깊이 및 매설물의 규격을 표시한다.

③ 지하매설물 현황 상세도

맨홀, 핸드홀, 관로의 분기부 등 특수한 부분에 대한 현황 도면을 첨부하고 그 종류, 매설 깊이 등을 표시한다.

□ 지하매설물 현황

현황도면에 표시된 지하매설물에 대한 매설물의 각종 제원을 종류, 규격, 재질, 연장, 매설깊이 등으로 나누어 작성한다.

□ 지하매설물 보호조치 계획

지하매설물에 영향을 미칠 수 있는 범위 내에서 작업을 할 경우, 노출 또는 지하매설물 보호를 위한 조치계획을 다음과 같이 수립한다.

① 해당 매설물의 관계기관 또는 관리주체와의 협의, 입회, 합동 감시체제 구축 및 순회점검을 위한 조직표, 활동계획, 주요 점검항목 등을 작성하여 첨부

② 매설물의 방호 및 보호 조치에 관한 내용

관계기관 또는 관리주체와의 협의 결과에 따른 각종 방호 및 보호조치에 대한 작업방법 및 주의사항을 작성

③ 공사중의 안전관리 체제 및 비상시 조치사항에 관한 내용

비상사태 발생시 긴급 연락체제, 긴급대피, 응급조치 및 복구작업에 대한 시공자와 관계기관 또는 매설물 관리주체의 업무를 명확히 구분하여 작성 첨부

□ 매설물 관리주체와 협의사항

가스배관, 통신선로, 전기선로, 상·하수도, 송유관, 지역난방관로 등의 매설물별 관계기관 또는 관리주체와 사전에 협의 완료한 사실을 입증하는 서류 첨부

(2) 인접시설 보호조치계획

□ 인접구조물 현황 및 도면

지반의 진동, 침하 및 기타 위험요소로 인해 인접한 구조물에 영향을 줄 우려가 있는 경우, 사전조사를 통하여 피해발생의 가능성이 있는 범위를 설정하고 그 결과를 도면에 다음과 같이 상세히 표시한다.

① 위험 발생이 우려되는 공사종류와 예상되는 소음, 진동, 분진, 지반 침하 등의 위험요인을 명시

② 해당 공사가 실시되는 지점을 명시하고 이로부터 피해가 예상되는 범위 및 공사 지점으로부터의 거리를 표시

□ 인접시설물에 대한 대책

각각의 위험요인에 대한 영향 범위의 산정근거 및 대책공법 등을 다음의 내용들을 포함하여 구체적으로 제시한다.

① 영향 범위의 산정 근거

관련법규, 실험결과 및 관련분야 전문가의 의견 등을 근거로 하여 타당성 있는 영향 범위의 산정근거 및 산정결과를 명확히 제시한다.

※ 필요시 안전성 계산서에 대한 설계책임자의 확인서류 제출

② 위험 요소별 대책 방안

㉮ 항타, 발파 등에 의한 진동 및 소음의 저감 대책

㉯ 인근 지역 지하수위 변동에 대한 대책

㉰ 주변 지반 변형에 대한 대책

㉱ 기타

□ 인접 주민 및 가축 등에 대한 안전대책

소음, 진동, 분진 등에 의한 인접주민 및 가축에 대한 피해가 우려될 경우, 주변 주민들에 대한 홍보활동, 협력요청, 민원처리 등에 관한 계획을 다음사항을 포함하여 구체적으로 작성한다.

① 위험요인 발생가능 공종 명시

② 피해 예상범위 설정

③ 홍보 및 협력요청 계획

④ 민원 발생 시 협의 및 보상조치에 관한 계획

라. 통행 안전시설 설치 및 교통소통계획

공사현장의 운행차량과 가설도로, 운반로 등으로 인하여 주변지역의 보행 및 차량통행에 지장이 예상될 경우, 시공자는 원활한 교통 소통을 위해 교통안전관리에 대한 계획을 작성한다.

(1) 통행안전시설 설치계획

통행안전관리 범위를 표시한 도면에 기재된 각종 시설을 포함하여 출입방지 시설 등에 대한 설치규격, 보수관리, 점검계획을 다음의 내용들을 포함하여 구체적으로 작성한다.

□ 각종 표지판, 안내판, 조명·유도 및 경보장치의 설치계획(규격, 내용 포함)

□ 사용중인 도로에 접한 현장 출입구 단차, 빈틈 또는 미끄럼 방지를 위한 안전시설물의 설치계획

□ 설치된 안전시설물에 대한 점검계획

□ 손상, 유실, 작동이상 등에 대한 보수관리계획

(2) 교통소통 대책

원활한 교통 소통 및 안전관리를 위하여 공사현장의 운행차량과 가설도로, 운반로 등에 대한 계획을 작성하여 도면에 상세히 명시한다.

□ 공사현장 주변의 도로상황

□ 공사현장과 기존도로를 연결하는 가설도로, 운반로 등 공사용 도로 설치계획

□  현장이 기존도로를 점용하는 경우 도로 점용부분의 현황 및 원활한 소통을 위한 대책 강구

□ 유도원, 교통 안내원 등의 배치계획

□ 교통소통에 지장이 되는 작업장, 장비, 자재 등의 장애물 조치계획

(3) 교통사고 예방대책

공사용 차량의 현장 출입과 현장 주위의 차량 및 보행자의 통행 중 발생할 수 있는 사고를 예방하기 위한 활동계획을 작성한다.

2. 공종별 안전관리계획

가. 가설공사

시공 중 설치하는 비계, 가설도로, 가설울타리, 가설출입문 등 각종 가설구조물에 대한 도면, 자료 및 안전관리 대책을 구체적으로 제시한다.

(1) 비계

유해·위험방지계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

(2) 가설도로 (가교 포함)

□ 설치 개요

별지 제7호 서식에 따른 가설도로 및 가교 등의 설치개요서 작성

□ 안전시공 계획

가설도로 및 가교 설치작업 전반에 대한 안전시공 절차 및  사용중 분진방지, 유지관리, 신호수 배치 등에 대한 계획

□ 시공상세 도면

가설도로 및 가교의 설치 및 해체순서 등이 상세히 표시된 시공 상세도면

□ 주변 통행 및 교통과의 안전 연계계획

가설도로 및 가교 등의 설치에 따른 주변 통행인 및 교통소통에 대한 안전관리계획

(3) 가설울타리

□ 설치 개요

별지 제8호 서식에 따른 가설울타리의 설치개요서 작성

□ 안전시공 계획

① 기초 설치 후 지반조건에 따른 채움 및 다짐 대책

② 주 기둥, 버팀 기둥의 풍하중에 의한 변형방지 대책

③ 울타리 높이에 따른 수평재의 줄 수 및 모서리부의 연결 대책

④ 보호구대와 울타리 틈의 보완 대책 등

□ 시공상세 도면

가설울타리의 설치 및 해체순서, 울타리 하단부의 처리, 기초 설치방법 등이 상세히 표시된 시공 상세 도면

(4) 가설출입문

□ 설치 개요

별지 제8호 서식에 따른 가설울타리의 설치개요서 작성

□ 안전시공 계획

① 인접 시설물, 출입할 차량 등의 회전범위, 진입도로의 폭 등을 고려한 가설출입문의 설치 계획

② 주기둥과 문짝의 연결 대책 등

□ 시공상세 도면

가설출입문의 설치 및 해체순서 등이 상세히 표시된 시공 상세도면

(5) 기타 가설구조물

가설도로, 가설울타리, 가설출입문 외에 설치되는 기타 가설구조물에 대한 안전관리계획을 작성한다.

□ 설치개요

□ 안전시공 계획

□ 시공상세 도면

나. 굴착공사 및 발파공사

인력굴착, 기계굴착, 발파굴착 등의 공법의 개요를 나타내는 자료, 도면 및 서류 등을 제시하고 굴착 및 발파계획, 흙막이 계획, 낙반방지 및 비탈면 붕괴방지대책, 계측계획 등 기술적 안전관리 대책을 구체적으로 제시한다.

(1) 흙막이

유해·위험방지계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

(2) 굴착작업

유해·위험방지계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

(3) 발파공사

유해·위험방지계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

다. 콘크리트공사

콘크리트공사에 관련된 거푸집, 거푸집동바리, 철근조립, 콘크리트 치기, 양생 등 각종 공정에 대한 안전관리계획을 구체적으로 제시한다.

(1) 콘크리트공사의 개요

별지 제9호 서식에 따른 콘크리트공사의 개요서 작성

(2) 거푸집, 거푸집동바리

유해·위험방지계획과 중복되는 사항으로『Ⅳ. 공통계획』에 별도 작성함

(3) 철근

□ 안전시공 계획

철근의 가공 및 조립시 안전시공 절차 및 주의사항 등

□ 시공상세 도면

철근의 가공 및 조립방법 등이 상세히 표시된 시공 상세 도면의 제출 시기와 제출할 도면의 종류

(4) 콘크리트

□ 안전시공 계획

콘크리트 치기, 다짐, 양생, 사용장비 등 단위 공정별 작업 방법에 대한 안전시공계획 및 주의사항 등

□ 시공상세 도면

콘크리트의 타설순서, 다짐, 양생 등의 작업방법이 표시된 시공상세 도면의 제출 시기와 제출할 도면의 종류

라. 강 구조물공사

강 구조물 공사에 관련된 제작, 조립 및 설치, 접합 등의 각종 공정에 대한 안전관리계획을 구체적으로 제시한다.

(1) 강 구조물공사의 개요

별지 제10호 서식에 따른 강구조물 공사의 개요서 작성

(2) 안전시공 계획

□ 운반시 주의 사항

운반재가 공장에서 운반되어 목적한 시공위치에 완전히 설치될 때까지 부재의 손상 및 불리한 하중의 발생을 방지하기 위한 받침대 설치위치, 적치방법 등에 관한 주의 사항

□ 안전시공 절차 및 주의사항

조립 작업시 인양장비 및 기계배치, 부재위치, 가 용접 방법 및 위치 등 안전시공계획의 전반적인 주의사항

(3) 시공상세도면

강구조물의 조립순서, 조립방법 등을 표시한 시공상세 도면의 제출 시기와 제출할 도면의 종류를 명시한다.

(4) 구조 안전성 검토 결과

강구조물의 안전성 계산서

마. 성토 및 절토공사 (흙댐공사 포함)

성토 및 절토공사의 자재□장비 등에 대한 자료, 도면 및 안전시공절차를 구체적으로 제시하고 이에 대한 안전점검계획표 및 안전점검표, 안전성 계산서를 작성□첨부한다.

(1) 성토 및 절토공사개요

별지 제11호 서식에 따른 성토 및 절토 공사에 대한 개요서 작성

(2) 안전시공 계획

성토 및 절토공사의 안전시공절차 및 주의사항 등은 다음의 내용을 포함하여 구체적으로 작성하며 공사도면을 첨부한다.

□ 벌개 제근 및 표토 제거, 기존구조물 및 지장물 철거, 규준틀 설치 및 표면수 및 용수의 처리 대책

□ 지층분류에 따른 비탈면 기울기

□ 여굴시의 조치

□ 발파작업이나 무진동파쇄시 주변 안전대책

□ 비탈면의 변화상태를 관측할 수 있는 계측 대책

□ 비탈면 상부의 토사 유실 방지 대책

□ 장비의 안전 주행성 확보 대책

□ 비탈면의 배수처리 대책

□ 강우 후의 토사 붕괴 방지 대책

□ 피난 통로 및 공간의 확보 대책

(3) 시공상세도면

성토 및 절토공사의 시공의 방법 및 순서 등을 나타낼 수 있는 시공상세 도면의 제출 시기와 제출할 도면의 종류를 명시.

(4) 안전성 검토 결과

성토 및 절토면의 안전성 계산서

바. 해체공사

해체 대상구조물, 해체기계, 적용공법, 안전시설 등에 대한 자료·도면 및 안전관리계획을 구체적으로 제시하고 이에 대한 안전점검 공정표와 안전점검표를 작성·첨부한다.

(1) 해체공사 개요

별지 제12호 서식에 따른 해체공사의 개요서 작성

(2) 안전시공 계획

□ 안전시공 계획

해체공사 중 안전시공 절차 및 주의사항 등 다음의 내용을 포함하여 구체적으로 제시하되 대상구조물의 평□단면도 등을 첨부한다.

① 해체재의 적치 및 반출

② 장비 및 작업 유도원의 배치 계획

③ 출입금지 지역의 선정

④ 안전통로, 환기설비, 살수설비, 방화설비 등 안전시설의 설치방법 및 시공상세 도면

⑤ 기타 해체공사 중 안전을 위한 사항

□ 인접시설물 등 주변안전 대책

① 해체 대상시설물의 전도 및 붕괴방지 대책

② 발파 해체시 비산방지 대책

□ 해체시기 및 순서계획

① 해체대상 시설물의 주변여건에 따른 해체시기

② 해체대상 시설물의 해체순서

사. 건축설비공사

건축 마감·설비공사의 자재, 장비, 안전시설 등에 대한 자료·도면 및 안전관리계획을 구체적으로 제시하고 이에 대한 안전관리 대책 및 안전점검표를 작성·첨부한다.

(1) 건축설비공사 개요

건축설비 공사의 개요 작성

(2) 안전시공 절차 및 주의사항

□ 마감자재 및 설비자재의 종류 및 규격

□ 설비 및 마감공사 안전시공절차

□ 출입금지 지역의 선정

□ 안전통로, 환기설비 등 안전시설의 설치방법 및 시공 상세도면

□ 기타 건축 마감·설비공사 중 안전을 위한 사항

(3) 시공상세도면

건축설비·마감공사 시공의 방법 및 순서 등을 나타낼 수 있는 시공 상세도면의 첨부

Ⅳ. 유해·위험방지와 안전관리 공통계획

1. 굴착공사 안전관리계획

가. 굴착작업 붕괴방지

(1) 굴착작업의 개요

굴착작업의 개요서(별지 제13호 서식) 작성

(2) 붕괴재해 위험 분석

□ 공사단계별 붕괴위험요인 분석

① 붕괴위험 장소, 형태, 수량 등을 파악하여 목록 작성

② 붕괴 위험 요인별 안전대책 제시

□ 붕괴 위험장소를 평면도, 종·횡단면도 등 도면상에 표기

(3) 안전시공 계획

인력이나 기계굴착시 다음 사항들을 포함하여 안전시공 절차 및 주의사항 등을 구체적으로 제시한다.

□ 굴착면의 구배, 굴착 후의 붕락이나 토사 등의 낙하방지 대책

□ 굴착지 내의 지하수 및 용수처리 대책

□ 지하매설물에 대한 방호조치

□ 기계굴착시 유도원 배치 및 신호체계 확립

□ 계측계획 및 인접시설물 보호대책 등

(4) 안전성 검토결과

굴착면의 안전성 계산서

나. 흙막이지보공 붕괴방지

(1) 흙막이지보공 개요

흙막이 개요서(별지 제14호 서식) 작성

(2) 붕괴재해 위험 분석

□ 공사단계별 붕괴위험요인 분석

① 붕괴위험 장소, 형태, 수량 등을 파악하여 목록 작성

② 붕괴 위험 요인별 안전대책 제시

□ 붕괴 위험장소를 평면도, 종·횡단면도 등 도면상에 표기

(3) 안전시공 계획

□ 흙막이의 각 단위 공정별 안전시공 절차 및 주의사항

□ 흙막이지보공의 변위측정 등을 위한 계측계획

- 계측기 종류, 설치위치, 측정주기, 관리기준 변위발생시 보강대책 등

□ 배수로 설치 및 양수계획

□ 굴착 및 토사 반출계획

(4) 시공 상세도면

흙막이와 관련된 흙막이벽, 말뚝, 흙막이판, 띠장, 버팀보, 복공판 등의 시공방법 및 순서 등이 표시된 시공상세 도면의 제출

(5) 안전성 검토 결과

다음 사항에 대한 안전성 계산서를 첨부한다.

□ 흙막이의 안전성

흙막이의 종류, 길이 및 근입깊이, 설치방법에 따른 응력, 변위, 지지력 등에 대한 검토 결과

□ 지보공의 안전성

지보공에 작용하는 응력(축력, 모멘트, 전단력)에 대한 검토 결과

□ 굴착저면의 안전성

보일링, 히빙, 지반 융기 등에 대한 안전성 검토 결과

□ 흙막이 철거에 대한 안정성 검토결과

□ 굴착에 따른 주변지반 및 구조물에 대한 영향성 검토 및 보호대책

2. 가설비계 안전관리계획

(1) 비계설치 개요

가설비계 설치 개요서(별지 제15호 서식) 작성

(2) 안전시공 계획

□ 비계설치 계획

① 비계 시공 절차 및 유지관리 계획과 주의사항

② 침하방지조치, 기둥·띠장·장선재·가새 등의 설치간격 및 벽이음 설치간격 등을 구체적으로 작성

③ 과적치 하중에 대한 안전대책

□ 틀비계 설치계획

승·하강 사다리, 안전난간, 발판고정, 이동식 틀비계인 경우 바퀴구름 방지장치 등 안전시설 설치계획 작성

□ 달비계  설치계획

Main Rope의 결속방법, 별도의 구명줄 설치 계획 등을 작성

□ 달대비계 설치계획

운반구의 제작, 설치·사용방법에 대한 계획을 작성

(3) 시공 상세도면

□ 비계 설치계획도(입면도, 평면도)

□ 비계, 결속재료 등의 시공상세 도면

3. 거푸집 및 거푸집동바리 안전관리계획

(1) 붕괴재해 위험 분석

□ 공사단계별 붕괴위험요인 분석

① 붕괴위험 장소, 형태, 수량 등을 파악하여 목록 작성

② 붕괴 위험 요인별 안전대책 제시

□ 붕괴 위험장소를 평면도, 종·횡단면도 등 도면상에 표기

(2) 안전시공 계획

□ 거푸집, 거푸집 동바리의 각 단위 공정별 안전시공 절차 및 주의사항

□ 거푸집동바리 조립·해체계획 수립

□ 특수공법에 대한 공법 개요 및 안전작업계획

① Gang Form, Travelling Form, Slip Form 등 특수 거푸집 사용

② Hory Beam, Ferro Deck(Super Deck) 등의 공법 적용시 안전대책 등

□ 콘크리트 타설계획 수립

타설순서, 타설방법, 장비투입계획, 콘크리트 진동기의 사용방법 등

(3) 구조 안전성 검토

거푸집, 거푸집 동바리의 안전성 계산서

□ 거푸집의 안전성 검토

콘크리트 시공시의 하중, 콘크리트 측압, 타설할 때의 진동 및 충격 등에 대한 사전 검토

□ 거푸집 동바리의 구조검토

거푸집 동바리에 작용하는 수직하중, 좌굴, 비틀림, 전단력 등에 대한 검토

(4) 시공상세 도면

구조검토에 따른 조립도 작성 제출

- 거푸집동바리의 구조를 검토하여 동바리, 장선재, 멍에재 등 부재의 설치간격 기재

4. 발파공사 안전관리계획

가. 발파공사 안전

(1) 발파공사의 개요

발파공사의 개요서(별지 제16호 서식) 작성

(2) 붕괴재해 위험 분석

□ 공사단계별 붕괴위험요인 분석

① 붕괴위험 장소, 형태, 수량 등을 파악하여 목록 작성

② 붕괴 위험 요인별 안전대책 제시

□ 붕괴 위험장소를 평면도, 종·횡단면도 등 도면상에 표기

(3) 발파 안전계획

□ 화약류 취급시 안전조치 계획

① 화약관리 책임자의 선임

② 화약운반 및 취급시 관리기준

③ 사용 전후의 화약에 대한 관리 대책

④ 현장의 화약 저장고 시설 안전대책

⑤ 화약류의 반입, 반출 및 반납 등 화약류 취급에 대한 안전대책

□ 천공·장약 작업 안전조치 계획

① 발파진동의 규제에 따른 시험발파 계획

② 화약장전 안전작업계획

마찰, 충격, 정전기 등에 의한 폭발위험이 없는 장전구 사용 등

③ 발파 모선 작업시 누전, 단락, 지전류에 대한 안전 대책

□ 발파작업 안전조치 계획

① 발파장소 주변에 안전표지 부착

② 점화신호, 대피신호계획

③ 비산방지 대책 및 근로자 대피장소 설치계획

④ 발파 구역내의 출입금지구역 지정

⑤ 발파시 인원 및 차량의 통행차단 대책

⑥ 인접 시설물 및 사육가축의 보호 대책

□ 발파작업후 안전조치 계획

① 발파 후 발생가스 및 분진에 대한 저감 대책

② 불발이나 잔류폭약의 안전회수 대책

③ 낙반이나 붕괴에 대한 안전 대책

(4) 시공 상세도면

천공위치, 천공방법, 장약방법 및 발파방법, 순서 등을 나타낼 수 있는 시공 상세도면의 제출

나. 터널공사 안전

(1) 붕괴재해 위험 분석

□ 공사단계별 붕괴위험 요인 분석

① 붕괴위험 장소, 형태, 수량 등을 파악하여 목록 작성

② 붕괴 위험 요인별 안전대책 제시

□ 붕괴 위험장소를 평면도, 종·횡단면도 등 도면상에 표기

(2) 안전시공 계획

□ 터널공사 안전조치 계획

① 굴착방법 및 버럭 반출계획

② 터널지보공, 록볼트, 숏크리트 타설계획(작업대 포함)

③ 부석제거 등 낙반위험방지 대책

④ 라이닝콘크리트 타설계획

⑤ 용수 처리방법

⑥ 터널 개구부 붕괴 또는 토석낙하 방지계획(흙막이지보공, 방망 등 설치)

⑦ 터널 계측계획

□ 터널공사 등에서 가연성가스등에 의한 폭발위험 방지 계획

① 가연성가스 농도측정 담당자 지정

② 가스농도 측정 및 결과 기록□보존

(3) 시공 상세도면

터널 종·횡단면도, 발파패턴도 등을 나타낼 수 있는 시공상세 도면의 제출

제3장  부 록

1. 표지서식

2. 별지서식

1. 표지서식

유해·위험방지계획서 및 안전관리계획서

통 합 계 획 서

200  .   .   .

○ ○  건 설 (주)

○○○○건설공사

2. 별지서식

별지 제1호 서식(건설공사 유해·위험방지계획서)

건설공사 유해·위험방지계획서						처 리 기 간
						15 일
□ 공사종류
□ 대상공사
□ 발 주 처			□ 공사도급 금 액
□ 공사착공 예 정 일			□ 공사준공 예 정 일
□ 공사개요
□ 계 획 서 작 성 자			□ 작 성 자 주요경력
⑩ 계 획 서 검 토 자	(서명 또는 인)		⑪ 검 토 자 주요경력
⑫본사소재지
⑬예정총동원 근로자수		⑭참여예정 협력업체수		⑮협력예정업체근로자수
산업안전보건법시행규칙 제121조의 규정에 의하여 건설공사 유해·위험방지계획서를 제출합니다. 년 월 일 제출자(사업주 또는 대표자) (서명 또는 인) 한국산업안전공단이사장 귀하
							수 수 료
첨부서류 : 별표 15의 규정에 의한 서류							노동부장관이 정하는 수수료

별지 제2호 서식(안전관리계획서)

건설공사 안전관리계획서 확인 신청서								처리기간
								일
신청인	명 칭 (상 호)			전 화 번 호
	성명 (현장대리인)			주민등록번호
	사무소 소재지
공 사 명
현 장 소 재 지
공 사 기 간		실착공예정일			준공예정일
공 사 금 액
확인 신청내용		(총괄안전관리 주요항목, 당해공사 공종내용 기재)
건설기술관리법 시행령 제46조의2에 의거 건설공사 안전관리계획서의 확인을 신청합니다. 년 월 일 신 청 인 (인) 귀하
※ 구비서류 : 건설공사 안전관리계획서 2□부

별지 제3호 서식(공사개요서)

공 사 개 요 서
공 사 명
현장 소재지				전 화 번 호
공 사 기 간				공사금액(낙찰율)
시공자	회 사 명			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
	현장소장			주민등록번호
	주 소
발주자	회 사 명			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
	주 소
설계자	회 사 명			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
	주 소
감리자	회 사 명			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
	주 소
공사개요	대상공사	구 조	개 소	굴착깊이(M)	최고높이(M)	연면적(M□)
기 타 특 수 구조물 개요
주 요 공 법

별지 제4호 서식(산업안전보건관리비 사용계획서)

산 업 안 전 보 건 관 리 비 사 용 계 획 서
1. 일반사항
①발 주 자					③ 공 사 금 액	계
②공사 종류 (해당란에 ○표)	1. 일반건설(갑) 2. 일반건설(을) 3. 중건설 4. 철도 및 궤도신설 5. 특수 및 기타					(1)재료비(관급별도)
						(2)관 급 재 료 비
						(3)직 접 노 무 비
						(4)기 타
④안전관리비				⑤안전관리비 계상대상 금액 [공사금액중 (1)+(2)+(3)]
2. 항목별 실행계획
항 목						금 액	비 율(%)
⑥안전보건관계자 인건비 및 각종 업무수당 등							%
⑦안전시설비 등							%
⑧개인보호구 및 안전장구 구입비 등							%
⑨안전진단비 등							%
⑩안전보건교육비 및 행사비 등							%
⑪근로자 건강관리비 등							%
⑫재해예방전문지도기관 기술지도 수수료							%
⑬본사사용비							%
총 계							100 %

3. 세부사용 계획

항 목	세부항목	단 위	수 량	금 액	산 출 내 역	사용시기
⑭안전보건관계 자 인건비 및 각종 업무수당 등
⑮안전시설비 등
□개인보호구 및 안전장구 구입 비 등
□안전진단비 등
□안전보건 교육비 및 행사비 등
□근로자 건강 관리비 등
□재해예방전문지도기관 기술 지도 수수료
본사사용비

별지 제5호 서식(개인보호구 지급계획서)

개 인 보 호 구 지 급 계 획 서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
직 종	보 호 구 명	지 급 수 량	지 급 시 기

별지 제6호 서식(안전관리비 집행계획서)

안전관리비 집행계획서
1. 개요
명 칭 (상 호)			금액내역	(1) 재 료 비
대 표 자
				(2) 관급자재비
공 사 명
현 장 명
				(3) 노 무 비
발 주 자
				(4) 부대시설비
공 사 기 간
공사의종류	1. 1종시설물 2. 2종시설물 3. 10m 이상 굴착공사 4. 폭발물을 사용하는 건설공사 5. 기타 건설공사
				계
				안전관리비
2. 항목별 실행계획
항 목					금 액
1. 안전관리계획서 작성비
2. 공사현장의 안전점검비
3. 공사장 주변 안전관리 비용
4. 통행안전 및 교통소통 대책 비용
5. 기타
총 계

3. 세부사용계획 (건설기술관리법 시행규칙 제21조의4)

(1) 안전관리계획서 작성비

항 목	단 위	수 량	단 가	금 액	산출근거 및 사용시기
계
안전관리 계획서 작성
안전점검 공정표 작성
안전관리 계획서 확인

(2) 공사현장의 안전점검비

항 목	단 위	수 량	단 가	금 액	산출근거 및 사용시기
계
공사현장의 안전점검 비용
진동·소음·분진 등의 환경측정 비용
기계·기구의 완성검사 비용
기계·기구의 정기검사 비용
기타

(3) 공사장 주변 안전관리 비용

항 목	단 위	수 량	단 가	금 액	산출근거 및 사용시기
계
지하매설물 방호
인접구조물 보호
민원대책 비용
기타

(4) 통행안전 및 교통소통 대책 비용

항 목	단 위	수 량	단 가	금 액	산출근거 및 사용시기
계
통행 안전시설 설치
통행 안전시설 유지관리
교통소통 및 교통사고 예방대책 비용
기타

별지 제7호 서식(가설도로 설치개요서)

가설도로 설치 개요서
형식 및 종류	가설도로
	가 교
규 모	길 이	폭	높 이	구 배
시 공 공 법	가설도로
	가 교
사 용 재 료	명 칭	규 격	수 량	용 도
투 입 장 비	명 칭	규 격	수 량	용 도
분 야 별 책 임 자	성 명	소 속		교육이수현황
붙임 : 가설도로 설치 개요도면 (평·단면도, 조립도 등)

별지 제8호 서식(가설울타리 및 출입문 설치개요서)

가설울타리 및 출입문 설치 개요서
가설울타리	종 류
	규 모			높 이		M				길 이		M
	사용재료	종 류			명 칭				재 질		규 격			수 량
		기 둥 재 수 평 재 막 음 재 밑둥잡이 후크보울트
가설출입문	종 류			폴딩게이트, 양쪽 개방문, 슬라이딩식 출입문, 셔터식 출입문, 기타( )
	규 모			유효높이				M		유효폭		M
	사용재료	종 류			명 칭				재 질		규 격			수 량
분 야 별 책 임 자			성 명				소 속						교육이수현황
붙임 : 가설울타리 및 출입문 설치 개요도면 (평·단면도, 조립도 등)

별지 제9호 서식(콘크리트공사 개요서)

콘크리트공사 개요서
콘 크 리 트	물 량			공 기						특 기 사 항
	주요 투입 장비		장 비 명
거 푸 집 거푸집지보공	수 량			공 기			설치
							해체
	재 질
	거푸집			지 주
	장 선			수 평 연결재
	띠 장			사 재
철 근	수 량			공 기
	가 공 방 법
공 종	별 첨 도 면					시 공 안 전 계 획
거 푸 집 거푸집지보공
철 근
콘 크 리 트
분 야 별 책 임 자		성 명			소 속				교육이수현황

별지 제10호 서식(강구조물공사 개요서)

강구조물공사 개요서
강재	강재의 종류		규 격		수 량		용 도
조립기계	조립기계의 종류		규 격		수 량		조립방법
가설설비의 종류		1. 안전대 부착설비 2. 작업통로 3. 보호울 4. 재료적치장 5. 기타 ( )
안전설비의 종류		1. 수평보호 철망 2. 수직보호 철망 3. 승강설비 4. 기타 ( )
분 야 별 책 임 자		성 명		소 속		교육이수 현황
붙임 : 강구조물공사 개요도면 및 서류 (평·단면도 및 조립상세도 등)

별지 제11호 서식(성토 및 절토공사 개요서)

성토 및 절토공사 개요서
토 공 량		흙깍기					흙쌓기
규 모		길 이			폭		높 이			구 배
배수처리	배수층 설치 구역
	배수처리 공법
비탈면보호	보 호 공 법
	사 용 재 료			명 칭		규 격			수 량
주요투입장비	장 비 명			규 격		수 량			용 도
분 야 별 책 임 자		성 명			소 속					교육이수현황
붙임 : 개요도면 (토량배분, 배수처리, 비탈면 시공 및 보호공 등 관련도면 및 서류 등)

별지 제12호 서식(해체공사 개요서)

해체공사 개요서
해 체 대 상	구 조 명 칭
	구 조 종 류
	규 모
	해 체 기 간	착 수			완 료
해 체 기 계	기 계 의 종 류
	능 력, 대 수
	보조기계의 유무
	종 류, 대 수
해 체 공 법	적 용 공 법
	주 요 내 용
안 전 시 설 (해당항목에 □○□표)	1. 외부비계 ( )
	2. 방음차단벽 ( ) 7. 환기설비 ( )
	3. 방음시트 ( ) 8. 소화기 ( )
	4. 보호시트 ( ) 9. 가스용단설비 ( )
	5. 소음대책 ( ) 10. 양중설비 ( )
	6. 살수설비 ( ) 11. 기 타 ( )
분 야 별 책 임 자	성 명		소 속			교육이수현황
붙임 : 1. 해체공사 개요도면 및 서류 (해체 순서도, 해체공법 도면, 자료 등) 2. 영향권 설정도면

별지 제13호 서식(굴착공사 개요서)

굴착공사 개요서
적 용 공 법
공 사 기 간
규 모	굴착깊이		굴착폭		굴착길이
주요투입장비	장 비 명	규 격		수 량		용 도
주요자재	자 재 명	규 격		수 량		용 도
분 야 별 책 임 자	성 명		소 속		교육이수현황
붙임 : 1. 흙막이 설치 개요도면 (평·단면도 등) 2. 굴착공사로 인한 영향권 설정도면

별지 제14호 서식(흙막이 개요서)

흙막이 개요서
굴 착 토 량
굴 착 심 도
공 법 형 식
공 사 기 간	년 월 일 ∼ 년 월 일
흙 막 이 벽			구분	띠 장					지 보 형 식
흙막이벽의종류				설치깊이			제 원		설치깊이			제 원
길 이			1 단
근 입 깊 이			2 단
타 설 방 법			3 단
항 타 방 법
주요투입장비		장 비 명			규 격			수 량			용 도
주요자재		자 재 명			규 격			수 량			용 도
분 야 별 책 임 자		성 명				소 속				교육이수현황
붙임 : 흙막이 설치 개요도면 (평·단면도, 조립도 등)

별지 제15호 서식(가설비계 설치 개요서)

가설비계 설치 개요서
비계의 종류	단관비계, 강관틀비계, 달 비계, 이동식 비계, 기타 ( )
규 모
최대적재하중
사용재료	명 칭	종류(재질)		규 격	수 량		비 고
분 야 별 책 임 자	성 명		소 속			교육이수현황
붙임 : 비계설치 개요도면 (평·단면도, 조립도 등)

별지 제16호 서식(발파공사 개요서)

발파공사 개요서
적 용 공 법
발파작업량
암 의 종 류
주요재료및장비	종 류	명 칭	규 격		수 량		비 고
	화 약
	뇌 관
	천공기계
	기 타
분 야 별 책 임 자		성 명		소 속		교육이수현황
붙임 : 1. 발파공사 개요도면 및 서류 (발파설계 도면 등) 2. 발파공사로 인한 영향권 설정도면

유해·위험방지계획서 및 안전관리계획서

통합작성 지침서

2003년 5월 10일   인쇄

2003년 5월 10일   발행

발행처 : 노동부·건설교통부

주  소 : 경기도 과천시 관문로 88 (중앙동 1번지)   정부과천청사 4동· 5동

전  화 : 노동부 (02) 507-0728

건설교통부 (02) 504-9161

비매품