공사계약일반조건중개정예규 신·구조문대비표

현 행	개 정	사 유
공사계약일반조건 (회계예규 2200.04-104-11, 2003.12.26)	공사계약일반조건 (회계예규 2200.04-104-12, 2004.4.6)
제13조(관급자재 및 대여품) ①∼⑤ (생 략) ⑥계약상대자는 관급자재등의 공급이 지체되어 공사가 상당기간 지연될 것이 예상될 때에는 계약담당공무원의 승인을 얻어 자기보유의 자재등을 대체사용할 수 있다. 이 경우 계약담당공무원은 대체사용한 자재등을 계약상대자와 합의된 일시 및 장소에서 현품으로 반환하거나 대체사용당시의 가격에 의하여 그 대가를 제40조의 규정에 의한 준공대가에 합산하여 지급하여야 한다. ⑦ (생 략) ⑧ (생 략)	제13조(관급자재 및 대여품) ①∼⑤ (현행과 같음) <삭 제> ⑥ (현행과 같음) ⑦ (현행과 같음)	-제19조의6 제3항의 규정과 중복됨에 따라 삭제

현 행	개 정	사 유
제19조의6(소요자재의 수급방법 변경) ①계약담당공무원은 발주기관의 사정으로 인하여 당초 관급자재로 정한 품목을 계약상대자와 협의하여 계약상대자가 직접 구입하여 투입하는 자재(이하 □사급자재□라 한다)로 변경하고자 하는 경우 또는 제13조제6항의 규정에 의하여 계약상대자가 대체사용 승인을 신청한 경우로서 이를 승인한 경우에는 이를 서면으로 계약상대자에게 통보하여야 한다. <후단신설> ② (생 략) ③제1항의 규정에 의하여 자재의 수급방법을 변경한 경우에는 통보당시의 가격에 의하여 그 대가를 제40조의 규정에 의한 준공대가에 합산하여 지급하여야 한다. (단서 생략) ④∼⑤ (생 략)	제19조의6(소요자재의 수급방법 변경) ①--------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- 관급자재등의 공급지체로 공사가 상당기간 지연될 것이 예상되어------------------------------ ------------------------------------------ -------------------------. 이때 계약담당공무원은 계약상대자와 협의하여 변경된 방법으로 일괄하여 자재를 구입할 수 없는 경우에는 분할하여 구입하게 할 수 있으며, 분할 구입하게 할 경우에는 구입시기별로 이를 서면으로 계약상대자에게 통보하여야 한다. ② (현행과 같음) ③제1항의 규정에 의하여 자재의 수급방법을 변경한 경우에는 계약담당공무원은 통보당시의 가격에 의하여 그 대가(기성부분에 실제 투입된 자재에 대한 대가)를 제39조 내지 제40조의 규정에 의한 기성대가 또는 준공대가에 합산하여 지급하여야 한다. (현행과 같음) ④∼⑤ (현행과 같음)	-자재의 구입방법 변경시 일괄구입할 수 없는 경우가 대부분이므로 분할구입시의 지급방법을 명확 규정 -관급자재의 사급자재 변경시 그 대가를 기성대가 또는 준공대가에 합산하여 지급토록 함

현 행	개 정	사 유
제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ①∼② (생 략) ③제1항의 규정에 의하여 계약금액을 증액하는 경우에는 계약상대자의 청구에 의하여야 하며, 조정된 계약금액은 직전의 물가변동으로 인하여 계약금액조정기준일부터 60일이내에 이를 다시 조정할 수 없다. <단서신설> ④∼⑥ (생 략)	제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ①∼② (현행과 같음) ③--------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- 다만, 천재·지변 또는 원자재의 가격급등으로 당해 기간내에 계약금액을 조정하지 아니하고는 계약이행이 곤란하다고 인정되는 경우에는 계약을 체결한 날 또는 직전 조정기준일로부터 60일이내에도 계약금액을 조정할 수 있다. ④∼⑥ (현행과 같음)	-국가계약법시행령 개정에 따른 조문정리
제37조(특허권등의 사용) 공사의 이행에 특허권 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 시공방법을 사용할 때에는 계약상대자는 그 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다. 그러나 발주기관이 계약서에 시공방법을 지정하지 아니하고 그 시공을 요구할 때에는 계약상대자에 대하여 제반 편의를 제공·알선하거나 소요된 비용을 지급할 수 있다.	제37조(특허권등의 사용) ---------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- ---------------------제3조의 계약문서에---- ----------------------------------------- ----------------------------------------- -----------------------.	-계약서에 특허권의 사용을 명시함(제3자의 권리 포함은 통상 설계서에 명시하여 계약서표지에 명시하지는 않음)

현 행	개 정	사 유
제39조(기성대가의 지급) ①계약상대자는 적어도 30일마다 제27조제8항에 의한 검사를 완료하는 날까지 기성부분에 대한 대가지급청구서를 공사감독관을 경유하여 발주기관에 제출할 수 있다. ②∼⑥ (생 략) 제39조의2(계약금액조정전의 기성대가지급) ①계약담당공무원은 물가변동, 설계변경 및 기타계약내용의 변경으로 인하여 계약금액이 당초 계약금액보다 증감될 것이 예상되는 경우로서 기성대가를 지급하고자 하는 경우에는 예산회계법시행령 제57조제1항제7호 및 회계예규 □정부회계의 수입·지출·보고등에 관한 기준□ 제27조의 규정에 의하여 당초 산출내역서를 기준으로 산출한 기성대가를 개산급으로 지급할 수 있다. 다만, 감액이 예상되는 경우에는 예상되는 감액금액을 제외하고 지급하여야 한다. ② (생 략)	제39조(기성대가의 지급) ①---------------------------------------- ---대가지급청구서(기 수령한 기성대가가 있는 경우에는 건설산업기본법 제34조제1항의 규정에 의하여 기성대가를 하수급인에게 지급하였음을 증빙하는 서류를 첨부하여야 한다)----------. ②∼⑥ (현행과 같음) 제39조의2(계약금액조정전의 기성대가지급) ①---------------------------------------- ------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------국고금관리법시행규칙 제72조 ------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------ --------------------------------. ② (현행과 같음)	-하도급자 보호를 위한 건설산업기본법의 취지 반영(건교부 의견반영) -관련법령의 개정에 따른 조문정리
부 칙 ① 이 회계예규는 2003년12월26일부터 시행한다. ② 이 예규시행과 동시에 회계예규 2200.04-104-10 □공사계약일반조건□은 폐지한다	부 칙 ①(시행일) 이 회계예규는 2004년 4월 6일부터 시행한다. ②(경과조치) 이 예규시행일 이전에 체결된 계약에 대하여 계약당사자가 합의하는 경우에는 개정규정을 적용할 수 있다.

물품구매계약일반조건중개정예규 신·구조문대비표

현 행	개 정	사 유
물품구매계약일반조건 (회계예규 2200.04-103-5, 2003.12.26)	물품구매계약일반조건 (회계예규 2200.04-103-6, 2004.4.6)
제11조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ①∼② (생 략) ③제1항의 규정에 의하여 계약금액을 증액하는 경우에는 계약상대자의 청구에 의하여야 하며, 조정된 계약금액은 직전의 물가변동으로 인한 계약금액조정기준일부터 60일이내에 이를 다시 조정할 수 없다. <단서신설> ④∼⑥ (생 략)	제11조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ①∼② (현행과 같음) ③--------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- 다만, 천재·지변 또는 원자재의 가격급등으로 당해 기간내에 계약금액을 조정하지 아니하고는 계약이행이 곤란하다고 인정되는 경우에는 계약을 체결한 날 또는 직전 조정기준일로부터 60일이내에도 계약금액을 조정할 수 있다. ④∼⑥ (현행과 같음)	-국가계약법시행령 개정에 따른 조문정리
부 칙 ① 이 회계예규는 2003년12월26일부터 시행한다. ② 이 예규시행과 동시에 회계예규 2200.04-103-4 □물품구매계약일반조건□은 폐지한다.	부 칙 ①(시행일) 이 회계예규는 2004년 4월 6일부터 시행한다. ②(경과조치) 이 예규시행일 이전에 체결된 계약에 대하여 계약당사자가 합의하는 경우에는 개정규정을 적용할 수 있다.

기술용역계약일반조건중개정예규 신·조문대비표

현 행	개 정	사 유
기술용역계약일반조건 (회계예규 2200.04-141-4, 2003.12.26)	기술용역계약일반조건 (회계예규 2200.04-141-5, 2004.4.6)
제1조∼제14조 (생 략) 제15조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ①∼② (생 략) ③제1항의 규정에 의하여 계약금액을 증액하는 경우에는 계약상대자의 청구에 의하여야 하며, 조정된 계약금액은 직전의 물가변동으로 인한 계약금액조정기준일부터 60일이내에 이를 다시 조정할 수 없다. <단서신설> ④∼⑥ (생 략)	제1조∼제14조 (현행과 같음) 제15조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ①∼② (현행과 같음) ③--------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------- 다만, 천재·지변 또는 원자재의 가격급등으로 당해 기간내에 계약금액을 조정하지 아니하고는 계약이행이 곤란하다고 인정되는 경우에는 계약을 체결한 날 또는 직전 조정기준일로부터 60일이내에도 계약금액을 조정할 수 있다. ④∼⑥ (현행과 같음)	-국가계약법시행령 개정에 따른 조문정리
부 칙 ① 이 회계예규는 2003년12월26일부터 시행한다. ② 이 예규시행과 동시에 회계예규 2200.04-141-3 □기술용역계약일반조건□은 폐지한다.	부 칙 ①(시행일) 이 회계예규는 2004년 4월 6일부터 시행한다. ②(경과조치) 이 예규시행일 이전에 체결된 계약에 대하여 계약당사자가 합의하는 경우에는 개정규정을 적용할 수 있다.

제한경쟁계약운용요령중개정예규 신·구조문대비표

현 행	개 정	사 유
제한경쟁계약운용요령 (회계예규 2200.04-143-3, 2003.12.26)	제한경쟁계약운용요령 (회계예규 2200.04-143-4, 2004.4.6)
제2조(제한경쟁입찰의 대상) (생 략) 1.∼4. (생 략) 5. (생 략) (1) 공사 추정가격이 30억원(건설업법에 의한 전문공사·전기공사업법에 의한 전기공사 및 전기통신공사업법에 의한 전기통신공사의 경우에는 3억원)미만인 공사로서 공사현장을 관할하는 시·도에 본사가 있는 자로 제한하는 경우 (2) (생 략)	제2조(제한경쟁입찰의 대상) (현행과 같음) 1.∼4. (현행과 같음) 5. (현행과 같음) (1) 공사 ------------50억원-------------------- -------------------------------------- ---------------------------5억원------- -------------------------------------- ----------------------------- (2) (현행과 같음)	-국가계약법시행규칙 개정(□03.12.12)내용 반영
부 칙 ① 이 회계예규는 2003년12월26일부터 시행한다. ② 이 예규시행과 동시에 회계예규 2200.04-143-2 □제한경쟁계약운용요령□은 폐지한다.	부 칙 이 회계예규는 2004년 4월 6일부터 시행한다.