주요자재 수급불안에 따른 공사중단 현황(양식)

▢ 공사중단 현황

○ 업체명 : (작성예시)ㅇㅇ건설

연번	공사금액	발주 구분	중단일수				관급자재 대상품목	공기연장 및 계약금액 조정
			총 중단일	레미콘	철근	...
								요청여부	승인여부
1	1000억원	공공	21일	20일	2일		철근, 레미콘	요청	승인
2	500억원	공공	12일	12일	3일		철근	미요청	-
3	50억원	민간	11일	10일	1일		-	-	-

주) 1. 조사대상 : ’22.4.1 이후 자재 수급불안으로 인해 공사중단이 발생한 현장

2. 총 지연일 : 각 자재별 중단일수 중복을 고려하여 산정

※ 예시 : 철근 중단 기간이 4.1 ∼ 4.10 까지이고, 레미콘 중단기간이 4.6 ∼4.16 까지인 경우

☞ 총 중단일은 4.1 ∼ 4.16까지인 16일이 되는 것임

3. 관급자재 대상품목 : 철근, 레미콘 등 해당 현장의 관급자재를 기입