일괄입찰․대안입찰공사 계약특수조건 개정안 신․구 대비표

현 행(조달청 시설총괄팀-3316,2006. 3. 28)	개 정(조달청 시설총괄팀-2350, 2006. 6.30)	비고
제목 일괄․대안공사계약특수조건	제목 일괄입찰․대안입찰공사 계약특수조건	회계예규(적격심사기준) 개정내용 반영
제1조(목적)이 일괄․대안공사계약특수조건(이하 “일괄․대안특수조건”이라 한다)은 일괄입찰 또는 대안입찰(대안이 채택된 공종에 한한다)로 집행하여 계약담당공무원과 계약상대자가 체결하는 공사도급계약의 내용을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 일괄입찰․대안입찰공사 계약특수조건---- ---------------------------------------------- -------------------------------------- ---------------------------------------------- ---.	-일괄․대안입찰 →일괄입찰․대안 입찰
제2조(정의)①이 일괄 등 계약조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같으며, 이 일괄․대안특수조건에서 달리 정하는 경우를 제외하고는 회계예규 공사계약일반조건(이하 “일반조건”이라 한다) 제2조에 정한 바에 따른다.	④제2조(정의)일괄․대안특수조건------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------	용어정리
1.“발주기관”이라 함은 일괄․대안입찰 대상공사의 도급계 약을 체결하는 기관을 말한다. 다만, 설계도서 심의 및 그 관련업무와 공사의 착공․감독․하도급관리․대가의 지급․검사․재해 방지조치․인수․하자관리 등 당해 공 사를 이행하는 기관이 다른 경우에는 달리 규정하지 아니 한 경우 해당기관을 발주기관이라 한다.	1. -----------일괄입찰․대안입찰 대상공사 -------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------.	용어정리

현 행	개 정	비고
2.“계약담당공무원”이라 함은 일괄․대안입찰 공사를 계약하 는 중앙관서의 장(그 위임을 받은 공무원을 포함한다. 이하 같다)을 말한다. 다만, 설계도서 심의 및 그 관련업무와 공 사의 착공․감독․하도급관리․대가의 지급․검사․재해 방지조치․인수․하자관리 등 공사현장에서 계약이행과 관련 된 사항에 대해서는 달리 규정한 경우를 제외하고는 수요 기관의 장(그 위임을 받은 공무원을 포함한다. 이하 같다) 을 계약담당공무원으로 본다. 여기서 수요기관이라 함은 조 달사업에관한법률 제2조 제4호에서 정한 기관을 말한다.	2.------------------일괄입찰․대안입찰공사 ------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------.	용어정리
3호 - 10호 (내용생략)	3호 - 10호 (현행과 같음)
11.“공사감독관을 경유하여”란 계약상대자가 계약담당공무원의 승인을 필요로 하는 사항에 대하여, 통지하는 문서의 참조 인으로 공사감독관을 명기하고 문서의 사본을 공사감독관 에게 송부하는 것을 말한다.	< 삭 제 >	회계예규 개정 반영
12호 (내용생략)	11호 (현행과 같음)	조문정리
제2조 - 제7조(내용생략)	제2조 - 제7조(현행과 같음)

현 행	개 정	비고
제8조(공사손해보험의 가입)①계약상대자는 회계예규 「공사손해보험 가입업무 집행요령」(이하 “집행요령”이라 한다) 및 일반조건 제10조에서 정하는 바에 따라 공사손해보험 계약목적물의 착공일 이전에 공사손해보험 또는 조립보험(이하 “보험”이라 한다)에 가입하여야 한다.	제8조(공사손해보험의 가입)①---------------------------- 「정부 입찰․계약 집행기준」(이하 “집행기준”이라 한다) ------- ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------.	회계예규 개정 반영-용어정리
②집행요령 제5조에서 정한 손해의 담보에 대한 계약상대자의 자기부담금은 매 건당 각각 1억원 이하로 한다. 다만 ~ (이하 내용생략)	②집행기준 제57조------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- (이하 현행과 같음)	“
③ - ⑥항(내용 생략)	③ - ⑥항(현행과 같음)
⑦공사계약금액이 증감된 경우 보험가입금액의 증감은 집행요령 제5조 제4항에 의하며, 계약상대자는 계약금액 변경 일로부터 14일 이내에 보험계약을 변경하여야 한다.	⑦---------------------------------------------------------------------집 행기준 제57조-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------.	회계예규 개정 반영-용어정리
⑧계약상대자는 집행요령 제10조 제2호에 따라 계약금액의 변경, 설계변경, 공사중단 등 보험과 관련한 고지 또는 통지의무를 이행하여야 한다.	⑧---------- 집행기준 제62조 ---------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------.	“
⑨ - ⑬항 (내용생략)	⑨ - ⑬항 (현행과 같음)
⑭제1항 내지 제13항에서 규정한 사항 이외에 공사손해보험과 관련된 기타 계약조건은 일반조건 제10조 및 집행요령에서 정한 바에 의한다.	⑭---------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 집행기준-------------------------------.	회계예규 개정 반영-용어정리
제9조 - 제23조(내용생략)	제9조 - 제23조(현행과 같음)

현 행	개 정	비고
제24조(설계변경 절차)②계약상대자는 설계변경과 관련하여 계약담당공무원의 승인이 필요한 사안이 발생한 때에는, 사안이 발생한 날 또는 그 사안의 발생을 안 날로부터 14일 이내에 공사감독관을 경유하여 계약담당공무원에게 통지하여야 한다. 다만, 천재지변 등 불가피한 사유로 14일이내에 통지할 수 없는 경우에는 당해 사유가 소멸된 날로부터 14일 이내에 통지하여야 한다.	제24조(설계변경 절차)②------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ------ 공사감독관과 계약담당공무원에게 동시에 ------------ ----------------------------------------------------------------------------- --------------------------------.	회계예규 개정 반영
③ - ⑥항 (내용생략)	③ - ⑥항 (현행과 같음)
제25조(발주기관의 필요에 의한 설계변경)계약담당공무원이 일반조건 제21조제3항제1호 또는 일반조건 제19조의5의 규정에 의거 설계변경을 요구한 경우에는 계약상대자는 14일 이내에 설계변경의 이행가능 여부를 공사감독관을 경유하여 계약담당공무원에게 통지하여야 한다. 이 경우 계약담당공무원은 계약상대자가 준비서류 작성 등을 위하여 기간 연장을 요청하는 때에는 이를 승인할 수 있다.	제25조(발주기관의 필요에 의한 설계변경)------------------------ ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------공사감독관과 계약담당공무원에게 동시에 ------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------.	회계예규 개정 반영
제26조 (내용생략)	제26조 (현행과 같음)
제27조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액 조정 절차)①계약상대자는 일반조건 제23조에 규정된 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정 받고자 하는 경우, 해당 계약내용 변경일로부터 30일 이내에 증빙서류를 첨부하여 공사감독관을 경유 계약담당공무원에게 계약금액의 조정을 요청하여야 한다. 다만, 천재지변 등 불가피한 사유로 기한내에 신청할 수 없는 경우에는 당해 사유가 소멸된 날로부터 14일 이내에 신청하여야 한다.	제27조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액 조정 절차)①--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- 공사감독관과 계약담당공무원에게 동시에 --------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------.	회계예규 개정 반영

현 행	개 정	비고
제27조 제2항 - 제37조 (내용생략)	제 27조 제2항 - 제37조 (현행과 같음)
제28조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)물가변동으로 인한 계약금액의 조정은 회계예규 공사계약일반조건 제22조에 정한 바에 의한다.	제28조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)------------------ -------------------------------------일반조건 -------------------------- -----------------------.	용어정리
제29조 - 제31조 제1항(내용생략)	제29조 - 제31조 제1항(현행과 같음)
제31조(피해보상 및 복구)②계약상대자는 공사완료 이후라도 공사로 인한 주변침하, 균열발생 등 의 피해에 대하여 공사계약일반조건 제33조에 규정된 하자보수보증기간 동안은 그 보상 및 복구 책임을 진다. 다만, 발주기관의 귀책사유로 인한 경우에는 그러하지 아니하다.	제31조(피해보상 및 복구)②--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 일반조건 ------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------.	용어정리
제32조 - 제39조(내용생략)	제32조 - 제39조(현행과 같음)
제40조(대가지급지연에 대한 이자)일반조건 제41조제1항의 연체이자율은 시중은행 중 수신고 순위 상위 3개 은행의 일반자금 대출시 적용되는 연체이자율의 산술평균치로 한 다. 단, 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우 소수점 둘째 자리에서 반올림한다.	제40조(대가지급지연에 대한 이자) 대가지급 지연이 자에 대해서는 일반조건 제41조에 의거 지연 발생시점 의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계 월보 상의 금 융기관 대출평균금리를 말한다)를 적용한다. 단, --------- ----------------------------------------.	회계예규(공사계약일반조건)개정내용 반영
제41조 - 제52조 (생략)	제41조 - 제52조 (현행과 같음)

현 행	개 정	비고
제53조(보칙)②회계예규 공동도급계약운용요령에 의거 공동수급체가 제출한 공동수급협정서는 계약담당공무원의 사전승인 없이는 변경할 수 없다.	제53조(보칙)②회계예규 「공동계약 운용요령」에 의거 공동수급체가 제출한 공동수급협정서는 계약담당공무원의 사전승인 없이는 변경할 수 없다.	회계예규 개정내용 반영 : 공동도급계약 → 공동계약
제53조 ①, ③ - ⑥항 (생략)	제53조 ①, ③ - ⑥항 (현행과 같음)
부칙 이 특별유의서는 2006년 4월 1일부터 시행한다	부칙 이 특별유의서는 2006년 7월 3일 입찰공고분부터 적용 한다