붙임 2		시공평가표 신구 대비표

평가항목							평가등급(기존)				평가등급(개선안)
			배점	비고	세부기준 및 방법(기존)	세부기준 및 방법(개선안)	우수(×1.0)	보통(×0.8)	미흡(×0.6)	불량(×0.4)	우수(×1.0)	보통(×0.8)	미흡(×0.6)	불량(×0.4)
대분류	중분류	세분류
							가(충족,이행)(×1.0)		부(미충족,미이행)(×0.5)		가(충족,이행)(×1.0)		부(미충족,미이행)(×0.5)
Ⅰ. 공사관리 (68)	1. 품 질 관 리 (12)	1.1 품질관리계획 및 품질시험계획의 적기수립 및 적정성	3	-	- 발주청의 요구 또는 건진법 시행령 제90조제1항에 의한 적기 제출 및 승인 여부 ※ 건진법 시행령 제90조제1항 : 건설공사 착공(건설공사 현장의 부지정리 및 가설사무소의 설치 등의 공사 준비는 착공으로 보지 아니한다) 전에 발주청에게 제출 및 승인을 받아야 한다. ※ 감리자 또는 감독자의 적기 미확인 시, 평가자가 사유 확인 후, 시공자 귀책 여부를 판단하여 평가	- 발주자의 요구 또는 건설기술진흥법 시행령 제90조에 의한 적기 제출 및 승인 여부 ※ 제출일을 기준으로 하되, 발주자의 보완 요청이 있는 경우는 최종제출일을 기준으로 함 ※ 건설기술진흥법 시행령 제90조제1항 : 건설공사 착공(건설공사 현장의 부지정리 및 가설사무소의 설치 등의 공사 준비는 착공으로 보지아니한다) 전에 발주자에게 승인을 받아야 한다. ※ 건설사업관리기술자 또는 감독자의 적기 미확인 시, 평가자가 사유 확인 후, 시공자 귀책 여부를 판단하여 평가	적기수립	7일 이내 지연	14일 이내 지연	14일 초과 지연		좌	동
		1.2 품질관리자 및 품질시험시설의 적정 여부	3	-	- 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 품질관리자 배치기준 부합 여부 ※ 발주청이 승인한 경우 조정된 투입시기 및 인원을 기준으로 함	- 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 품질관리자 배치기준 부합 여부 ※ 발주청이 승인한 경우 조정된 투입시기 및 인원을 기준으로 함 ※ 품질시험을 외부로 위탁하는 경우, 관련 시험시설은 예외로 함. ※ 건설기술진흥법 제55조 참조	적정		부적정		좌		동
		1.3 품질관리의 적정성	6	-	- 공사 기간 전체에 대하여 품질관리계획 및 품질시험계획의 이행여부를 ①~⑤을 참고하여 이행건수 비율을 측정하여 평가함 ① 품질관리계획에 대한 점검사항(시행규칙 제16조,제20조 관련) ② 당해 건설공사 설계․시방서에서 특별히 요구하고 있는 품질시험종목 ③ 건설기술관리법에서 규정한 품질시험 항목 ④ 국토부 품질관리 기준 및 제정시방서에서 정한 품질시험 종목 ⑤ 당해 건설공사 시공상에서 필요하다고 인정하는 품질시험 종목 ※ 설계 변경 등에 의한 계획 조정 시 최종본 기준 ※ 이행건수 비율 = 이행 건수 / 표본추출 수	- 품질관리의 부적합 관련하여 시정명령 등 행정조치를 받은 결과로 평가 ※ 벌칙 관련 규정 - 건설기술진흥법 제80조(시정명령) 제2항 : 건설기술진흥법 제55조제1항 및 제2항에 따른 품질관리계획 또는 품질시험계획을 성실히 이행하지 아니하거나 품질시험 또는 검사를 성실하게 수행하지 아니한 경우 - 건설기술진흥법 제88조(벌칙) 제3항 : 건설기술진흥법 제55조제1항 및 제2항에 따른 품질관리계획 또는 품질시험계획을 성실히 이행하지 아니하거나 품질시험 또는 검사를 하지 아니한 건설업자 또는 주택건설등록업자 - 국토교통부 벌점측정기준 1.14 및 1.15항에 해당되는 경우 ※ 발주자는 필요시 국토교통부의 승인을 얻어 공사 기간 전체에 대하여 품질관리계획 및 품질시험계획의 이행여부를 참고해 이행건수 비율을 측정하여 품질관리의 적정성을 평가할 수 있음					없음	시정명령을 받은 경우	과태료, 과징금 등을 부과받은 경우	벌점 부과, 영업정지, 고발입건 등
	2. 공 정 관 리 (7)	2.1 공정관리계획 적기제출 및 적정성	3	-	- 계약에 따라 적기 승인 여부 ※ 적기 미승인시 평가자가 사유 확인 후 평가	- 계약(발주자의 요청사항)에 따라 적기 제출 및 승인 여부 ※ 제출일을 기준으로 하되, 발주자의 보완 요청이 있는 경우는 최종제출일을 기준으로 함 ※ 적기 미승인시 평가자가 사유 확인 후 평가	적기수립	7일 이내 지연	14일 이내 지연	14일 초과 지연	적기수립	7일 이내 지연	14일 이내 지연	14일 초과 지연
		2.2 계약공기 준수여부	4	-	- 계약공기를 기준으로 하며, 변경된 경우 변경된 공기를 기준으로 함	- 계약공기를 기준으로 하되, 불가항력 또는 발주자의 사정으로 인한 공기가 연장된 경우는 변경된 공기를 기준으로 함 ※ 평가시점에서 준공되지 않은 경우에는 계획공기대비 진도율로서 평가	공기준수	3%이하 지연	3%초과~5%미만 지연	5% 이상 지연	공기준수	1%이하 지연	5%이하 지연	5%초과 지연
	3. 시 공 관 리 (17)	3.1 현장인력 배치의 적정 여부	3	-	- 현장대리인 기준 만족 여부 ※ 발주청의 요구사항이 있는 경우 해당 사항 만족여부 함께 고려	- 현장대리인 및 배치기술자 기준 만족 여부 ※ 건설산업기본법 시행령 35조, 건설기술자의 현장배치기준 등 참조 ※ 발주자의 요구사항이 있는 경우, 해당 사항의 만족 여부 함께 고려	적정		부적정		좌		동
		3.2 시공계획서 적기수립	2	-	- 계약문서와 관련규정에 따른 시공계획서의 적기 승인여부 및 시방서와 관련규정과의 적정성 여부 ※ 감리자 또는 감독자의 적기 미확인 시, 평가자가 사유 확인 후, 시공자 귀책 여부를 판단하여 평가	- 계약문서와 관련규정에 따른 시공계획서의 적기 제출 및 승인 ※ 총괄계획서 및 공종별 계획서를 모두 포함 ※ 제출일을 기준으로 하되, 발주자의 보완 요청이 있는 경우는 최종제출일을 기준으로 함 ※ 감리자 또는 감독자의 적기 미확인 시, 평가자가 사유 확인 후, 시공자 귀책 여부를 판단하여 평가 ※세부공종별 계획서를 포함하여 총 지연 기간을 합산한 수치로 평가	적기수립	7일 이내	14일 이내	14일 초과	적기수립	7일 이내 지연	14일 이내 지연	14일 초과 지연
		3.3 시공계획서 이행 관련 외부기관의 개선 지적건수	6	용어수정	- 현지시정 이상의 지적건수(동일건 재발송은 제외) ※ 건수는 연평균 건수임(전체 건수/공사기간, 반올림)	- 외부점검기관(발주청 포함)의 개선 지적건수 - 현지시정 이상의 지적건수(동일건 재발송은 제외) ※ 환경관리 관련 지적건수는 제외 ※ 건수는 연평균 건수임(전체 건수/공사기간, 반올림) ※ 외부점검기관은 건설기술진흥법 제54조에 따른 국토교통부장관 또는 지자체장을 말하며, 발주기관을 포함 ※ 발주자는 필요시 국토교통부의 승인을 얻어 운영지침에 의거하여 제출된 시공계획서 중 일부항목을 표본추출하여 계획대비 이행건수 비율을 측정하여 이행여부를 평가할 수 있음	1건 이하	2-3건	4-5건	6건 이상	1건 이하 (연평균)	3건 이하	5건 이하	5건 초과
		3.4 민원발생 건수	2	-	- 시공자 귀책에 의한 민원건수로 평가 ※ 건수는 연평균 건수임(전체 건수/공사기간, 반올림) ※ 민원대장 등 확인	- 시공자 귀책에 의한 민원 발생 건수로 평가 ※ 건수는 연평균 건수임(전체 건수/공사기간, 반올림) ※ 발주처나 시공사에 서류로 접수된 민원건수를 대상으로 함.	1건 이하	2~3건	4~5건	5건 초과	1건 이하 (연평균)	3건 이하	5건 이하	5건 초과
		3.5 시공상세도 작성의 충실도 및 이행여부	4	-	- 공사기간 전체를 대상으로 표본추출을 통하여 시방서, 발주청 작성 기준 등 관련 기준에 따라 작성 이행된 건수 비율로 평가 - 공사마다 내용이 상이하므로 공통항목 표본추출 제외 ※ 이행건수 비율 = 작성 이행 건수 / 표본추출 건수	- 공사기간 전체를 대상으로 표본추출을 통하여 시방서, 발주청 작성 기준 등 관련 기준에 따라 작성 이행된 건수 비율로 평가 - 공사마다 내용이 상이하므로 공통항목 표본추출 제외 ※ 이행건수 비율 = 작성 이행 건수 / 표본추출 건수 (관련 벌칙 규정) ※ 건설산업기본법 제82조(영업정지 등) 제1항 제6호의나 : 건설기술진흥법 제48조제41항에 따른 시공상세도면의 작성의무를 위반하거나 건설사업관리를 수행하는 건설기술자 또는 공사감독자의 검토와 확인을 받지 아니하고 시공한 경우 - 국토교통부 벌점측정기준 1.9항에 해당되는 경우, 불량으로 평가	100% 작성	95% 이상 작성	90% 이상 작성	90% 미만 작성	100% 작성	95% 이상 작성	90%이상 작성	90% 미만 작성 또는 이와 관련 행정처분을 받은 경우
	4. 하 도 급 관 리 (6)	4.1 하도급 계약의 적정성	3	항목독립	- 하도급계약의 부적정에 의한 발주청의 재발주 요청 건수 및 타절 발생 건수 ※ 건수는 연평균 건수임(전체 건수/공사기간, 반올림)	- 하도급계약의 부적정에 의한 발주청의 재발주 요청 건수 및 타절 발생 건수	0건	1건	2건	3건 이상	없음	1건	2건	3건 이상
		4.2 하도급 관리의 적정성	3	항목독립	- 하도급거래공정화에 관한 법률 위반(공사비 지불, 재하도급 등)건수 ※공사비 지불기간 : 건설산업기본법34조 및 하도급거래공정화에 관한 법률 13조 참조	- 하도급거래공정화에 관한 법률 및 건설산업기본법의 하도급 관련 규정 위반(공사비 지불, 재하도급 등) 건수 ※ 문서로 지적된 사항이나 시정명령, 과태료등 행정처분 부과건수로 평가 ※ 공사비 지불기간 : 건설산업기본법34조 및 하도급거래공정화에 관한 법률 13조 참조 ※ 건수는 연평균 건수임(전체 건수/공사기간, 반올림)	0건	2건	3건	4건 이상	없음 (연평균)	1건 이하	2건 이하	2건 초과
	5. 공 사 비 관 리 (5)	5.1 설계도서 사전 검토 미흡으로 인한 공사비 증액 비율	2	항목독립	- 시공자의 사전 설계도서 검토 미흡으로 인해 설계변경이 발생하고 공사비가 증액된 비율(사전 설계검토시 지적되어 변경된 내역은 제외) ※ 증액 비율 = 공사 기간 중 증액된 총액 / 최종 설계변경된 공사금액	- 시공자의 사전 설계도서 검토 미흡으로 인해 설계변경이 발생하고 공사비가 증액된 비율(사전 설계검토시 지적되어 변경된 내역은 제외) ※ 증액 비율 = 공사 기간 중 증액된 총액 / 최종 설계변경된 공사금액	5/1000 이하	10/1000 이하	20/1000 이하	20/1000 초과		좌	동
		5.2 시공자 제안으로 인한 공사비 절감비율	3	항목독립	- 시공사 제안에 의한 개선 사항 중 발주청이 채택하여 공사비 절감된 비율(신기술/신공법 적용 포함) ※ 절감 비율 = 공사 기간 중 절감 총액 / 최종 설계변경된 공사금액	- 시공사 제안에 의한 개선 사항중 발주청이 채택하여 공사비 절감된 비율(신기술/신공법 적용 포함) ※ 절감 비율 = 공사 기간 중 절감 총액 / 최종 설계변경된 공사금액	5/1000 초과 (3.0점)	5/1000 이하 (2.0점)	2/1000 이하 (1.0점)	0.5/1000 이하 (0점)	1/1000 초과	0.3/1000 -1/1000 이하	0.3/1000 미만	실적없음
	6. 안 전 관 리 (15)	6.1 안전관리계획 적기제출 및 적정성	3	-	- 발주청의 요구 또는 건진법 시행령 93조의2항에 의한 안전관리계획서(대상시설물별 세부안전관리계획서 포함)의 적기 제출 여부 ※건진법 시행령 93조의제2항(안전관리계획서 제출) : 공사감독자 또는 감리원의 확인을 받아 건설공사 착공(건설공사 현장의 부지정리 및 가설사무소의 설치 등의 공사준비는 착공으로 보지 아니한다) 전에 발주청에게 제출하여야 한다. ※대상시설물별 세부안전관리계획의 제출 : 발주청 요구 기간 내 또는 공사 수행 전 제출 ※감리자 또는 감독자의 적기 미확인 시, 평가자가 사유 확인 후, 시공자 귀책 여부를 판단하여 평가 ※기간은 평균지연기간임(총 지연기간/제출 필요 건수)	- 발주청의 요구 또는 건설기술진흥법 시행령 제98조 안전관리계획의 수립에 의한 (총괄 및 세부공종별) 안전관리계획서의 적기 제출 및 승인 여부 ※ 제출일을 기준으로 하되, 발주자의 보완 요청이 있는 경우는 최종제출일을 기준으로 함 ※ 건설기술진흥법 제98조2항에 의거, 안전관리계획서는 공사감독자 또는 건설사업관리기술자의 검토 및 확인을 받아 건설공사 착공(건설공사현장의 부지정리 및 가설사무소의 설치 등의 공사준비는 착공으로 보지 아니한다)전에 발주자에게 제출되어야 한다. ※대상시설물별 세부안전관리계획의 제출 : 발주청 요구기간내 또는 공사 수행전 제출 ※감리자 또는 감독자의 적기 미확인시, 사유 확인후 시공자 귀책 여부를 판단하여 평가 ※세부공종별 계획서를 포함하여 총 지연 기간을 합산한 수치로 평가	적기수립	7일 이내 지연	14일 이내 지연	14일 초과 지연	적기수립	7일 이내 지연	14일 이내 지연	14일 초과 지연
		6.2 안전관리조직 구성의 적정 여부	2	-	- 발주청의 요구사항 또는 다음의 건진법 제26조의3의 요구조건 만족 여부(①~③ 모두 만족) ①당해 건설공사의 시공 및 안전에 관한 업무를 총괄하여 관리하는 안전총괄책임자 ②토목ㆍ건축ㆍ전기ㆍ기계ㆍ설비 등 건설공사의 각 분야별 시공 및 안전관리를 지휘하는 분야별 안전관리책임자 ③건설공사현장에서 직접 시공 및 안전관리를 담당하는 안전관리담당자 ※발주청이 승인한 경우 조정된 사항을 조직 구성의 기준으로 함	- 건설기술진흥법 제64조에 규정된 건설공사 안전관리조직의 조건 만족 여부(①~③ 모두 만족) ①해당 건설공사의 시공 및 안전에 관한 업무를 총괄하여 관리하는 안전총괄책임자 ②토목ㆍ건축ㆍ전기ㆍ기계ㆍ설비 등 건설공사의 각 분야별 시공 및 안전관리를 지휘하는 분야별 안전관리책임자 ③건설공사현장에서 직접 시공 및 안전관리를 담당하는 안전관리담당자 ※ 발주청이 승인한 경우 조정된 사항을 조직 구성의 기준으로 함	적정		부적정		좌		동
		6.3 안전관리의 적정성	4	-	- 안전관리계획(공종별 포함)의 이행여부를 공사기간 전체를 대상으로 표본추출(운영지침 참고)하여 이행건수 비율을 측정하여 평가함 ※안전관리계획 조정 시 최종본 기준 ※정기 및 정밀안전점검 계획 및 실시 현황 점검 ※안전관리계획서 상에 ‘정기 및 정밀 안전점검’에 대한 사항이 누락된 경우, 별도의 관련 계획 확인하여 평가에 반영 ※이행건수 비율 = 이행 건수 / 표본추출 수	- 안전관리대책, 안전시설 설치, 안전관리 관련하여 시정명령 등 행정조치를 받은 결과로 평가 (관련 벌칙 규정) ※ 건설기술진흥법 제80조(시정명령) 제3호 : 건설기술진흥법 제62조제1항 및 제2항에 따른 안전관리계획을 성실하게 수행하지 아니한 경우 ※ 건설기술진흥법 제88조(벌칙) 제6호 : 건설기술진흥법 제62조제1항 및 제2항에 따른 안전관리계획을 수립 및 이행하지 아니하거나 안전점검을 하지 아니한 건설업자 또는 주택건설등록업자 - 국토교통부 벌점측정기준 1.12 및 1.13항에 해당되는 경우 ※ 발주자는 필요시 국토교통부의 승인을 얻어 안전관리계획(공종별 포함)의 이행여부를 공사기간 전체를 대상으로 표본추출(운영지침 참고)하여 이행건수 비율을 측정하여 평가할 수 있음					없음	시정명령을 받은 경우	과태료, 과징금 등을 부과받은 경우	벌점 부과, 영업정지, 고발입건 등
		6.4 당해 현장의 재해율	6	-	- 현장 단위의 환산재해율을 계산하여 평균환산재해율 대비 비율로 평가(소수 3자리 반올림) ※ 산업안전보건법의 환산재해율(별표3) 기준 준용 ※평가 시점에서 가장 최근의 한국산업안전보건공단 평균환산재해율을 기준(11년 0.43%)으로 평가 ※ 공사기간 전체를 산출 대상으로 함	- 현장 단위의 환산재해율을 계산하여 평균환산재해율 대비 비율로 평가(소수 3자리 반올림) ※ 산업안전보건법의 환산재해율(별표3) 기준 준용 ※ 평가 시점에서 가장 최근의 한국산업안전보건공단 평균환산재해율을 기준으로 평가 ※ 공사기간 전체를 산출 대상으로 함	0.5배 이하	0.8배 이하	1.0배 이하	1.0배 초과		좌	동
	7. 환 경 관 리 (6)	7.1 환경관리계획 이행의 적정성	3	-	- 수립된 환경관리계획의 이행여부를 공사기간 전체를 대상으로 표본추출(운영지침 참고)하여 이행건수 비율을 측정하여 평가함 ※제출된 시공계획서중 일부 항목을 표본추출하여 계획대비 이행여부를 평가 ※이행건수 비율 = 이행건수/표본추출수	- 환경영향평가를 통한 변경된 사업내용의 이행여부를 공사기간 전체를 대상으로 표본추출하여 이행건수 비율을 측정하여 평가함 - 공사마다 내용이 상이하므로 공통항목 표본추출 제외 ※ 이행건수 비율 = 이행 건수 / 표본추출 수 - 환경영향평가법 제23조(협의내용의 이행 등) 기준 참조 ※환경영향평가 협의대상공사가 아닌 경우, 발주자는 승인된 환경관리계획를 토대로 공사기간 전체를 대상으로 표본추출하여 이행건수 비율을 측정하여 평가함.	100% 이행	90%이상 이행	80%이상 이행	80%미만 이행		좌	동
		7.2 환경점검 지적건수	3	-	- 환경점검 지적 건수 ※ 건수는 연평균 건수임(전체 건수/공사기간, 반올림)	- 환경관리대책, 소음진동, 분진, 폐기물 처리, 재활용 등과 관련하여 시정명령 등 행정조치를 받은 결과로 평가	3건 이하	4∼5건	6∼7건	8건 이상	없음	시정명령을 받은 경우	과태료, 과징금 등을 부과받은 경우	벌점부과, 영업정지, 고발입건 등
Ⅱ. 목적물의 품질 및 성능 (32)	8. 시 공 품 질 (18)	8.1 공사 완성도	5	항목이동	- 평가자의 판단에 따른 공사 전반에 걸친 완성도 - 주관적 평가 및 사유 명기	평가자의 판단에 따른 공사 전반에 걸친 완성도를 평가 - 평가 사유를 명기 ※발주자는 필요시 국토교통부 승인을 받아 자체 개발한 품질지수나 체크리스트 등을 활용하여 평가할 수 있음.	2.0점	1.5점	1.0점	0점	95% 이상 만족	90% 이상 만족	80% 이상 만족	80% 미만 만족
		8.2 주요 공종 시설물의 도면, 시방서 만족비율	9	항목이동	- 주요공종 시설물을 대상으로 표본추출을 통하여 도면,시방서등 관련 기준에 따라 적절히 시공된 건수 비율 측정 - 공사마다 내용이 상이하므로 공통항목 표본추출 제외 ※ 시공건수 비율 = 적정 시공 건수 / 표본추출 건수	- 부실시공관련 벌점 부과 점수로 평가 ※ 국토교통부 벌점측정기준 가운데 1.1내지 1.8, 1.16내지 1.21에 해당하는 벌점을 대상으로 함. ※ 연평균 벌점부과점수로 평가(전체 벌점부과점수/공사기간, 반올림) ※발주자는 필요시 국토교통부의 승인을 얻어 주요 공종 시설물을 대상으로 표본추출을 통하여 도면 시방서 등관련 기준에 따라 적절히 시공된 건수 비율을 측정하 여 평가할 수 있음					없음	1점 이하 (연평균)	2점 이하	2점 초과
		8.3 공사중지 및 재시공 여부	4	이동 및 용어 수정	- 재시공된 건수를 평가 ※ 건수는 연평균 건수임(전체 건수/공사기간, 반올림)	- 공사중지 및 재시공된 건수를 평가 ※ 발주자가 설계도면 또는 시방서에 따라 시공되지 않은 부분을 부실시공으로 규정하고, 공사중지나 철거 후 일괄 재시공토록 지적한 건수를 평가 ※ 건수는 연평균 건수임(전체건수/공사기간, 반올림) ※ 관련 규정 - 건설기술진흥법 제40조(건설사업관리 중 공사중지 명령 등) ① 제39조제2항에 따라 건설사업관리를 수행하는 건설기술용역업자는 건설업자가 건설공사의 설계도서ㆍ시방서(示方書), 그 밖의 관계 서류의 내용과 맞지 아니하게 그 건설공사를 시공하는 경우에는 재시공ㆍ공사중지 명령이나 그 밖에 필요한 조치를 할 수 있다.	0건	1건	2건	3건 이상	없음	1건 이하 (연평균)	2건 이하	2건 초과
	9. 구 조 안 전 성 (10)	9.1 정기안전점검결과	5	신설		- 정기안전점검 결과를 참조하여 평가 - 정기안전점검 결과, 부실시공이 우려되어 정밀안전점검을 실시한 경우, ‘불량’ 으로 평가 - 필요시 준공시점에서 무작위 비파괴시험, 코어 채취 등을 실시하여 직접 평가 가능					우수	보통	정밀안전점검을 실시한 경우	정밀안전점검후, 구조보강 등을 실시
		9.2 중대건설현장 사고 발생 여부	5	신설		- 시설물이 붕괴되거나 전도되어 재시공이 필요하거나 국토교통부장관 등의 사고조사가 필요하다고 판단되는 중대건설현장사고의 발생 여부 평가 ※ 건설기술진흥법 제67조 및 동법 시행규칙 62조 규정 참조					미발생		발생
	10. 창 의 성 (4)	10.1 설계도서 사전검토를 통한 사용성 및 유지보수성 향상여부	4	항목이동	- 공사비 증감이 수반되지는 않으나 설계개선 및 신기술 신공법 적용 등으로 구조물의 내구성 및 사용성과 유지보수성을 향상시킨 건수로 평가	- 공사비 증감이 수반되지는 않으나 설계개선 및 신기술 신공법 적용 등으로 구조물의 내구성 및 사용성과 유지보수성을 향상시킨 건수로 평가	10건이상	5∼9건	3∼4건	2건이하	10건 이상	3건 이상	2건 이하	없음
(가점) (3)		공사 특성 및 난이도 등에 따른 보정	3	신설		(첨부) 평가표 참조, 최대 3점
주 : 발주자가 필요시 국토교통부 승인을 받아 시공계획서의 이행여부 등을 표본추출을 통하여 평가할 경우, 100% 이행시 우수(×1.0), 90%이상 보통(×0.8), 80%이상 미흡(×0.6), 80% 미만 이행시 불량(×0.4)으로 평가하는 것을 기준으로 하되, 행정처분에 의한 평가등급과의 형평성을 고려하여 평가등급을 조정해야 한다.

(가점) 공사 특성 및 난이도 등에 따른 보정 (최대 3점)

1. 구조물의 특수성에 대응 (최대 2점)
* 아래 사항에 해당되는 사항이 있는 경우, 각각 1점을 가점한다. - 교량·터널·항만·댐·건축물 등 공중의 이용편의와 안전을 도모하기 위하여 특별히 관리할 필요가 있거나 구조상 유지관리에 고도의 기술이 필요하다고 인정하여 “시설물의 안전관리에 관한 특별법” 시행령 별표1에서 규정하고 있는 1종 시설물 가. 도로교량 ·상부구조형식이 현수교, 사장교, 아치교 및 트러스교인 교량 ·최대 경간장 50미터 이상의 교량(한 경간 교량은 제외한다) ·연장 500미터 이상의 교량 ·폭 12미터 이상이고 연장 500미터 이상인 복개구조물 나. 철도교량 ·고속철도 교량 ·도시철도의 교량 및 고가교 ·상부구조형식이 트러스교 및 아치교인 교량 ·연장 500미터 이상의 교량 다. 도로터널 ·연장 1천미터 이상의 터널 ·3차로 이상의 터널 ·터널구간의 연장이 500미터 이상인 지하차도	라. 철도터널 ·고속철도 터널 ·도시철도 터널 ·연장 1천미터 이상의 터널 마. 갑문시설 바. 계류시설 ·20만톤급 이상 선박의 하역시설로서 원유부이(BUOY)식 계류시설(부대시설인 해저송유관을 포함한다) ·말뚝구조의 계류시설(5만톤급 이상의 시설만 해당한다) 사. 다목적댐, 발전용댐, 홍수전용댐 및 총저수용량 1천만톤 이상의 용수전용댐 아. 공동주택 외의 건축물 ·21층 이상 또는 연면적 5만제곱미터 이상의 건축물 ·연면적 3만제곱미터 이상의 철도역시설 및 관람장 ·연면적 1만제곱미터 이상의 지하도상가(지하보도면적을 포함한다) 자. 하구둑 차. 포용조수량 8천만톤 이상의 방조제 카. 특별시 및 광역시에 있는 국가하천의 수문 및 통문(通門) 타. 국가하천에 설치된 높이 5미터 이상인 다기능 보 파. 상수도 ·광역상수도 ·공업용수도 ·1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도
2. 도시 등의 작업 환경, 사회 조건 등에 대한 대응 (최대 1점)
※ 아래 사항에 해당하는 경우 1점을 가점한다. 가. 소음진동관리법 시행규칙 제18조 제1항 및 [별표7]과 관련하여 총동력합계 5,000마력 이상인 사업장 나. 소음진동관리법 시행규칙 제26조관련 [별표11]에 규정된 소음진동규제지역에서 시행되는 건설공사