2017년 적용

건설공사표준품셈 개정사항

2017. 1.

	국토교통부
	한국건설기술연구원

【개정목차】

토 목 부 문

제 1장 적용기준	3

제 2장 가설공사	5

제 6장 철근콘크리트공사	21

제 8장 기계화시공	46

제 9장 기계경비	66

제10장 도로포장 및 유지	74

제13장 터널	114

건 축 부 문

제 6장 철근콘크리트공사	117

제14장 금속공사	132

제17장 칠공사	135

제18장 기타잡공사	137

기 계 설 비 부 문

제Ⅱ편 기계설비공사 제1장 공통공사	148

부 록

[부록] 건설기계가격표	152

용어 및 오류수정

토 목 부 문

2017년 적용 건설공사표준품셈

- 제1장 적용기준 -

2017. 1.

	국토교통부
	한국건설기술연구원

항목	구분	현 행	개 정 사 항	비고
제1장 적용기준	보완	1-16 품의 할증 품의 할증은 필요한 경우 다음의 기준 이내에서 적정공사비 산정을 위하여 공사규모, 현장조건 등을 감안하여 적용하고, 품셈 각 항목별 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용한다.	1-16 품의 할증 품의 할증은 필요한 경우 다음의 기준 이내에서 적정공사비 산정을 위하여 공사규모, 현장조건 등을 감안하여 적용하고, 품셈 각 항목별 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용한다. 품의 할증은 인력품 적용이 원칙이나 작업능률 저하로 인해 건설기계의 사용시간이 늘어나는 경우, 기계품에도 적용 가능하다.	토목 건축 설비

2017년 적용 건설공사표준품셈

- 제2장 가설공사 -

2017. 1.

	국토교통부
	한국건설기술연구원

편 제 – 현 행

⇨

편 제 – 개 정 사 항

대분류	중분류		세분류	비 고
2-1 가설물의 한도			현장사무소 등의 규모
			2. 시험실의 규모
2-2 가설건축물 및 손율	2-2-1 손율			현행유지
	2-2-2 철제조립식 가설건축물		1. 조립해체
			2. 손율
	2-2-3 콘테이너형 가설건축물
2-3 가설울타리	2-3-1 조립식 가설울타리		1. 설치	삭 제
			2. 공기에 대한 손율
	2-3-2 전기아연도금강판(EGI 휀스) 가설 울타리
	2-3-3 재생플라스틱 가설 울타리
	2-3-4 가설방음벽		1. 지주 설치
			2. 방음판 설치
2-4 규준틀	2-4-1 토공의 비탈 규준틀
	2-4-2 수평 규준틀		1. 개소당 규준틀
			2. 면적당 규준틀	삭 제
	2-4-3 세로 규준틀			삭 제
2-7 낙하물방지	2-7-1 강관사용
	2-7-2 플라잉넷
2-8 보호막설치	2-8-1 비계주위 보호막
	2-8-2 갱폼주위 보호막
2-11 방진망 설치 및 철거
2-15 파이프 루프공		1. 장비조립해체		현행유지
		2. 강관추진공	가. 작업편성인원
			나. 작업편성장비
			다. 작업능력
		3. 기계이동 설치

대분류	중분류		세분류	비 고
2-1 가설물의 한도	2-1-1 현장사무소 등의 규모
	2-1-2 시험실의 규모
2-2 가설건축물 및 손율	2-2-1 손율
	2-2-2 철제조립식 가설건축물		1.조립해체
			2.손율
	2-2-3 콘테이너형 가설건축물
2-3 가설울타리 및 가설방음벽	2-3-1 공기에 대한 손율
	2-3-2 지주		1.강관 지주
			2.H형강 지주
	2-3-3 판		1.가설울타리판
			2.세로형 가설방음판
			3.가로형 가설방음판
2-4 규준틀	2-4-1 토공의 비탈 규준틀
	2-4-2 수평 규준틀		1.목재 규준틀
			2.철재 규준틀	신 설
2-7 낙하물 방지망	2-7-1 강관사용
	2-7-2 플라잉넷
2-8 수직 보호망	2-8-1 비계주위 보호막
	2-8-2 비계주위 보호망			신 설
	2-8-3 갱폼주위 보호망
	2-8-4 방진망
2-14 파이프 루프공		1.장비조립해체
		2.강관추진공	가.작업편성인원
			나.작업편성장비
			다.작업능력
		3.기계이동 설치

항목	구분	현 행	개 정 사 항	비고
제2장 가설공사	보완	2-1 가설물의 한도 1. 현장사무소 등의 규모 내용생략 - [주]①～⑩ 내용생략 ⑪ 위생시설 및 전기, 수도 인입시설은 현장여건에 따라 별도 계상할 수 있다. ⑫ 내용생략	2-1 가설물의 한도 2-1-1 현장사무소 등의 규모 내용생략 - [주]①～⑩ 현행과 동일 ⑪ 위생시설(오폐수처리시설 등) 및 전기, 수도 인입시설은 현장여건에 따라 별도 계상할 수 있다. ⑫ 현행과 동일	토목 건축 설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

삭제

2-3 가설울타리

2-3-1 조립식 가설 울타리

1. 설치('09년 보완)

(m당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
칼 라 철 판 기 둥 띠 장 콘 크 리 트 비계공 보통인부	800×2,000×0.45mm 각파이프 60×60mm C-60×30×10×2.2mm 기초	매 m m ㎥ 인 인	1.33 1.76 3 0.038 0.1 0.05
비고	- 본 품은 설치품으로 해체는 설치품의 40%를 별도 계상한다.

[주] ① 출입구 문을 설치하는 경우에는 재료 및 품을 별도 계상한다.

② 철재면에 문양이나 도색 등이 필요할 경우에는 재료 및 품을 별도 계상한다.

③ 잡재료는 공구손료를 포함하여 인력품의 5%로 별도 계상한다.

④ 가설표준은 다음과 같다.

구 분	가 설 표 준
높이	2.0m
기둥	각파이프(60mm×60mm)를 사용하고 기둥간격은 1.8m, 지중매립은 25cm로 한다.
버팀기둥	각파이프(60mm×60mm)를 사용하고 간격은 3.6m로 한다.
널재	800×2,000mm의 칼라철판을 사용하고 겹침폭은 5cm로 한다.
띠장	C형강(60×30×10×2.2mm)을 사용하고 간격은 85cm로 한다.

⑤ 기둥 및 띠장의 재료를 원형파이프 등으로 가설하고자 할 때에는 설계에 따라 계상할 수 있다.

2-3 가설울타리 및 가설방음벽

- 삭   제 -

토목

건축

설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

보완

2. 공기에 대한 손율

재 료 사용시간	손율 (%)
	칼라철판	기둥 및 띠장
3개월	16	6
6개월	25	10
12개월	38	19
24개월	53	37
36개월	70	55
48개월	100	73

2-3-1 공기에 대한 손율

재 료 사용시간	손율 (%)
	전기아연도금강판	재생플라스틱 방음판	스틸 방음판	기둥 및 띠장
3개월	16	6	16	6
6개월	25	12	25	10
12개월	38	24	38	19
24개월	53	48	53	37
36개월	70	72	70	55
48개월	100	100	100	73

토목

건축

설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

보완

2-3-2 전기아연도금강판(EGI 휀스) 가설 울타리

(m당)

구분	규격	단 위	수 량	비 고
EGI철판	500 × 2400	매	2
강관파이프	±48.6	m	6.6
클램프	자동	개	0.28
	고정	개	2.26
연결핀		개	0.56
볼트/넛트		개	13.33
비계공		인	0.04
보통인부		인	0.02
굴삭기	0.2㎥	hr	0.05
비고	- 본 품은 설치 품으로 해체는 설치 품의 40%를 별도 가산한다.

[주] ① 본 품은 0.2㎥ 굴삭기를 사용하여 EGI 휀스 가설 울타리를 설치할 때의 품이다.

→ 개정 2-3-3 / 1. 가설울타리판 [주] ① ‘보완’

② 출입구 문을 설치할 경우는 재료 및 품을 별도 계상한다.

→ 개정 2-3-2 지주 [주] ③ ‘이기시행’

③ 가설울타리 상단에 설치하는 분진망은 별도 계상한다.

→ 개정 2-3-2 지주 [주] ③ ‘이기시행’

④ 철재면에 문양이나 도색 등이 필요한 경우에는 재료 및 품을 별도 계상한다.

→ 개정 2-3-3 판 [주] ② ‘이기시행’

⑤ 공구손료는 인력품의 5%로 계상한다.

→ 개정 2-3-2 / 1. 강관지주 [주] ④ ‘보완’

/ 2-3-3 / 1. 가설울타리판 [주] ③ ‘보완’

⑥ 콘크리트 기초가 필요한 경우는 별도 계상한다.

→ 개정 2-3-2 / 1. 강관지주 [주] ③ ‘이기시행’

⑦ 손율은 “2-3-1 조립식 가설울타리”의 손율을 적용한다

→ 개정 2-3-1 공기에 대한 손율 ‘이기시행’

⑧ 가설표준은 다음과 같다.

구 분	가 설 표 준
높 이	2.4m
기 둥	기둥간격은 1.8m, 지중 매립은 1.5m를 기준으로 한다.
버 팀 기 둥	버팀기둥 간격은 3.6m로 한다.
띠 장	띠장은 강관파이프를 사용하고 간격은 100㎝로 한다.

→ 삭제

2-3-2 지주

1. 강관 지주

(10m당)

구 분	규 격	단위	지주높이 3.5m이하		지주높이 6m이하
			설치	해체	설치	해체
비계공		인	0.30	0.12	0.46	0.18
보통인부		인	0.11	0.04	0.16	0.06
굴삭기	0.2㎥	hr	0.35	0.14	0.35	0.14

[주] ① 본 품은 강관을 사용한 지주(지주간격 2.0m)의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 지반평탄작업, 강관매입, 보조기둥 설치 및 해체 작업을 포함한다.

③ 콘크리트 기초, 출입구문, 방진망 작업은 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

토목

건축

설비

2. H형강 지주

(10m당)

구 분	규 격	단위	지주높이 4m이하		지주높이 7m이하
			설치	해체	설치	해체
비계공		인	0.49	0.20	0.99	0.40
보통인부		인	0.18	0.07	0.35	0.14
굴삭기	0.2㎥	hr	0.63	0.25	0.63	0.25
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.73	0.29	1.09	0.44

[주] ① 본 품은 H형강을 사용한 지주(지주간격 2.0m)의 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 본 품은 지반평탄작업, 강관매입, H형강 근입 및 해체 작업을 포함하며, H형강 설치를 위한 천공 작업은 제외되어 있다.

③ 콘크리트 기초, 출입구문, 방진망 작업은 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

토목

건축

설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

보완

2-3-3 재생플라스틱 가설 울타리

(m당)

지주높이	구 분	규 격	단 위	수 량
				지주간격 (2∼3m)
5∼6m	비계공		인	0.20
	보통인부		인	0.07
	굴삭기	0.2㎥	hr	0.05
	트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.12
비 고	- 해체품은 설치품의 40%로 별도 계상한다.

[주] ① 본 품은 재생플라스틱 가설 울타리 설치에 대한 품으로 지반평탄작업, 소운반, 강관 매입, 지주(H형강) 설치 및 띠장 매기작업 등이 포함되어 있다.

→ 개정 2-3-2 / 2. H형강 지주 [주] ①, ② ‘보완’

/ 2-3-3 / 2. 세로형 가설방음판 [주] ① ‘보완’

② 콘크리트 기초 타설에 소요되는 재료 품은 별도 계상한다.

→ 개정 2-3-2 / 2. H형강 지주 [주] ③ ‘이기시행’

③ 재료량은 설계수량에 따르며, 재생플라스틱 판의 손율은 다음과 같이 계상한다.

사용월수	3개월	6개월	12개월	24개월	36개월	48개월
손 율(%)	6	12	24	48	72	100

→ 개정 2-3-1 공기에 대한 손율 ‘이기시행’

2-3-3 판

1. 가설울타리판

(10m당)

구 분	단위	설치높이 3m이하		설치높이 6m이하
		설치	해체	설치	해체
비계공	인	0.26	0.10	0.30	0.12
보통인부	인	0.09	0.04	0.11	0.05

[주] ① 본 품은 후크볼트를 사용한 전기아연도금강판(EGI휀스, 폭 550mm이하) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 재료량은 설계수량을 적용한다.

토목

건축

설비

2. 세로형 가설방음판

(10m당)

구 분	단위	설치높이 3m이하		설치높이 6m이하
		설치	해체	설치	해체
비계공	인	0.24	0.10	0.28	0.11
보통인부	인	0.09	0.03	0.10	0.04

[주] ① 본 품은 조이너클립을 사용한 재생플라스틱 방음판(폭 650mm이하) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

④ 재료량은 설계수량을 적용한다.

토목

건축

설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

보완

2-3-4 가설방음벽

1. 지주 설치

(방음벽길이 m당)

지주높이	구 분	단위	수량
			지주간격(1.5∼2m)
4∼6m	철공	인	0.11
	굴삭기(0.2㎥)	hr	0.05

[주] ① 본 품은 가설방음벽의 매입강관 및 지주(수직, 수평, 보조)를 설치하기 위한 것으로 지반평탄작업 및 소운반을 포함한다.

→ 개정 2-3-2 / 1. 강관 지주 [주] ①, ② ‘보완’

② 강관의 규격은 Ø48×2.3T를 기준으로 조사되었다.

→ 삭제

③ 재료량은 설계수량에 따르며, 손율은“2-3-1 조립식 가설울타리”의 기둥 및 띠장 손율을 적용한다.

→ 개정 2-3-1 공기에 대한 손율 ‘이기시행’

< 2-3-2 지주 / 1. 강관 지주 반영 >

토목

건축

설비

보완

2. 방음판 설치

(방음벽길이 m당)

지주높이	구분	단위	수량
			지주간격(1.5∼2m)
4∼6m	철공	인	0.12
	트럭탑재형크레인(5ton)	hr	0.20

[주] ① 본 품은 가설방음벽의 방음판을 설치하기 위한 것으로 지지기구 설치 및 소운반을 포함한다.

→ 개정 2-3-3 / 3. 가로형 가설방음판 [주] ①, ② ‘보완’

② 방음판의 규격은 500㎜×30T×1,980㎜를 기준으로 조사되었다.

→ 개정 2-3-3 / 3. 가로형 가설방음판 [주] ① ‘이기시행’

③ 재료량은 설계수량에 따르며, 손율은“2-3-1 조립식 가설울타리”의 칼라철판 손율을 적용한다.

→ 개정 2-3-1 공기에 대한 손율 ‘이기시행’

3. 가로형 가설방음판

(10m당)

구 분	규 격	단위	설치높이 3m이하		설치높이 6m이하
			설치	해체	설치	해체
비계공		인	0.72	0.29	0.84	0.34
보통인부		인	0.26	0.10	0.30	0.12
트럭탑재형크레인	5ton	hr	0.95	0.38	1.11	0.44

[주] ① 본 품은 H-bar를 사용한 스틸 방음판(500㎜×30T×1,980㎜) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② H-bar 설치 및 해체를 포함하며, 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

④ 재료량은 설계수량을 적용한다.

토목

건축

설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

보완

2-4 규준틀

2-4-1 토공의 비탈 규준틀

(개소당)

종 류	단 위	수 량
건축목공	인	0.16
보통인부	인	0.14

[주] ① 본 품은 높이 0.5m, 표지판 2개를 설치한 비탈규준틀의 제작, 도색, 가설, 철거를 포함한 것이다.

② 목재의 손율은 1개소 사용당 50%로 한다.

③ 재료량은 설계수량에 따른다.

2-4 규준틀

2-4-1 토공의 비탈 규준틀

- 현행과 동일 -

토목

건축

설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

보완

2-4-2 수평 규준틀

1. 개소당 규준틀

(개소당)

종 류	단 위	수 량
건축목공	인	0.21
보통인부	인	0.19

[주] ① 본 품은 높이 2.4m, 표지판 8개를 설치한 수평규준틀의 제작, 도색, 가설, 철거를 포함한 것이다.

② 목재의 손율은 1개소 사용당 80%로 한다.

③ 재료량은 설계수량에 따른다.

2-4-2 수평 규준틀

1. 목재 규준틀

- 현행과 동일 -

토목

신설

2. 철재 규준틀

(개소당)

종 류	단 위	규준틀 높이
		5m이하	10m이하
건축목공	인	0.14	0.17
보통인부	인	0.12	0.14

[주] ① 본 품은 제작된 수평규준틀을 기준한 것이며, 조립, 설치 및 철거작업을 포함한다.

② 재료량은 설계수량에 따른다.

③ 손율은 ‘2-6-6 공기에 대한 손율(강관)’에 따른다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

삭제

2. 면적당 규준틀

(㎡당)

구 분	단 위	수 량
목재	㎥	0.002
건축목공	인	0.018
보통인부	인	0.016

[주] ① 본 품은 제작, 가설, 철거를 포함한 것이다.

② 목재 손율은 80%로 한다.

- 삭   제 -

토목

건축

설비

삭제

2-4-3 세로 규준틀

(개소당)

구 분 종 별	목재(㎥)	건축목공(인)	보통인부(인)
귀규준틀(1층)	0.056	0.18	0.2
평규준틀(1층)	0.062	0.18	0.2

[주] ① 본 품은 높이 3.6m를 기준으로 한 것으로, 3.6m를 초과하는 경우에는 비례적으로 가산할 수 있다.

② 목재 손율은 30%로 한다.

- 삭   제 -

토목

건축

설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

보완

2-7 낙하물방지

2-7-1 강관사용

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량
강관	ø48.6mm×2.4mm	m	2.7
브 라 켓		개	0.26
철선		kg	0.25
클 램 프		개	0.27
그 물 망		㎡	1.24
비 계 공		인	0.03

[주] ① 본 품은 강관비계를 이용하여 구조물 첫 단(지상으로부터 약8m)에 설치하는 낙하물 방지망을 설치할 때의 재료 및 품이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 설치에 필요한 타워크레인 또는 크레인 경비는 별도 계상한다.

→ 삭제

③ 철선 및 그물망은 소모품으로 필요에 따라 별도 계상한다.

→ 삭제

④ 강관 및 부속철물의 손율은 2-6-6의 “공기에 대한 손율”에 따른다

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

⑤ 가설기준

㉮ 지상에서 높이 8m 되는 곳의 비계 바깥에 수평에 대하여 20∼30ﾟ 정도로 경사지게 방지망을 설치하고, 그 위는 필요한 부분에 높이 10m 이내마다 2-7-2 플라잉넷을 설치한다.

㉯ 낙하물 방지망(그물망)은 가로×세로 35㎜ 그물코 이하의 합성섬유(폴리에틸렌) 또는 그 이상의 물리적 성질을 갖는 것이어야 한다.

→ 삭제

2-7 낙하물 방지망

2-7-1 강관사용

(10㎡당)

구분	규격	단위	수량
비계공	설치, 해체	인	0.30
보통인부	설치, 해체	인	0.10

[주] ① 본 품은 비계 외부에 강관을 사용한 낙하물방지망(수평방향 3m이하) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

③ 타워크레인 또는 크레인이 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.

④ 재료량은 다음을 참고하며, 강관 및 부속철물의 손율은 ‘2-6-6 공기에 대한 손율’을 따른다.

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량
강관	ø48.6mm×2.4mm	m	2.70
브라켓		개	0.26
철선		kg	0.25
클램프		개	0.27
그물망		㎡	1.24

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 그물망의 손율은 1회사용 후100%로 한다.

토목

건축

설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

보완

2-7-2 플라잉넷

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량
강관	ø48.6㎜×2.4㎜	m	0.167
브라켓		개	0.116
사다리	폭 30㎝×길이 3m 기준	m	0.111
와이어로프	ø6	m	0.764
클램프		개	0.127
그물망	5cm 이하	㎡	1.39
비계공		인	0.02
비고	- 해체품은 설치품의 40%로 별도 계상한다

[주] ① 본 품은 구조물 첫 단 이후(8m 이상)에 설치하는 플라잉넷의 설치에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 공구 손료는 인력품의 5%이며, 재료할증이 포함되어 있다.

→ 개정 [주] ② ‘보완’

③ 강관 및 부속철물의 손율은 2-6-6의“공기에 대한 손율”에 따른다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

④ 사용된 그물망은 1회 사용 후 손율 100%로 한다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

2-7-2 플라잉넷

(10㎡당)

구분	규격	단위	수량
비계공	설치, 해체	인	0.20
보통인부	설치, 해체	인	0.10

[주] ① 본 품은 구조체 외부에 사다리를 사용한 낙하물방지망(수평방향 3m이하) 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

② 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

③ 재료량은 다음을 참고하며, 강관 및 부속철물의 손율은 ‘2-6-6 공기에 대한 손율’을 따른다.

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량
강관	ø48.6mm×2.4mm	m	0.167
브라켓		개	0.116
사다리	폭 30㎝×길이 3m 기준	m	0.111
와이어로프	ø6	m	0.764
클램프		개	0.127
그물망		㎡	1.390

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 그물망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

토목

건축

설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

보완

2-8 보호막설치

2-8-1 비계주위 보호막

(㎡당)

구 분	단 위	수 량
보 호 막	㎡	1.05
비 계 공	인	0.02

[주] ① 본 품에는 가설 및 철거품이 포함되어 있다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 보호막의 손율은 1회 사용후 100%로 한다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

③ 보호막 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

④ 보호막이란 기존비계를 이용하여 시공안전 및 미관 등을 목적으로 시공건물 주위에 설치하는 재료이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

2-8 수직 보호망

2-8-1 비계주위 보호막

(10㎡당)

구 분	단 위	수 량
비계공	인	0.20

[주] ① 본 품은 시공안전, 미관, 외부차단 등을 목적으로 비계에 설치하는 보호막 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.

② 재료량은 다음을 참고하며, 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.

(㎡당)

구 분	단 위	수 량
보호막	㎡	1.05

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호막의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

토목

건축

설비

보완

2-8-2 비계주위 보호망

(10㎡당)

구 분	단 위	수 량
비계공	인	0.10

[주] ① 본 품은 낙하물방지 등을 목적으로 비계주위에 설치하는 보호망(그물망 등) 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.

② 재료량은 다음을 참고하며, 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.

(㎡당)

구 분	단 위	수 량
보호망	㎡	1.05

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

토목

건축

설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

보완

2-8-2 갱폼 주위 보호막

(㎡당)

구 분	단 위	수 량
보 호 막	㎡	1.05
비 계 공	인	0.004

[주] ① 본 품은 갱폼 주위 보호막 설치 및 철거품이 포함되어 있다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 보호막의 손율은 1회 사용후 100%로 한다.

→ 개정 [주] ② ‘이기시행’

③ 보호막 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ② ‘이기시행’

④ 본 품은 재료 할증을 포함한다.

→ 개정 [주] ② ‘이기시행’

2-8-3 갱폼주위 보호망

(10㎡당)

구 분	단 위	수 량
비계공	인	0.04

[주] ① 본 품은 낙하물방지 등을 목적으로 갱폼주위에 설치하는 보호망(그물망 등) 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.

② 재료량은 다음을 참고하며, 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.

(㎡당)

구 분	단 위	수 량
보호망	㎡	1.05

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

토목

건축

설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제2장

가설공사

보완

2-11 방진망 설치 및 철거

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비고
방진망		㎡	1.06
철선		㎏	0.115
비계공		인	0.019

[주] ① 본 품에는 재료의 할증･소운반･설치 및 철거품이 포함되어 있다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 방진망의 손율은 1회사용후 100%로 한다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

③ 방진망 설치를 위해 비계 등의 가시설이 필요한 경우는 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ② ‘이기시행’

2-8-4 방진망

(10㎡당)

구 분	단 위	수 량
비계공	인	0.16

[주] ① 본 품은 가설울타리 및 가설방음벽 상부에 설치하는 그물망 설치 및 해체 작업을 기준한 것이다.

② 비계 등의 가시설이 필요한 경우는 별도 계상한다.

③ 재료량은 다음을 참고한다.

(㎡당)

구 분	단 위	수 량
방진망	㎡	1.06
철선	kg	0.115

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 방진망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

토목

건축

설비

2017년 적용 건설공사표준품셈

- 제6장 철근콘크리트공사 -

2017. 1.

	국토교통부
	한국건설기술연구원

편 제 – 현 행

⇨

편 제 – 개 정 사 항

대분류	중분류	세분류	비 고
6-1 콘크리트	6-1-1 콘크리트 타설	1.레디믹스트콘크리트 타설
		2.기계비빔타설	항목통합
		3.인력비빔타설
	6-1-2 콘크리트펌프차 타설	1.작업능력
		2.콘크리트 펌프차 타설인부
		3.압송관설치 및 철거
	6-1-3 비탈면구조물 콘크리트 타설		항목통합
6-3 거푸집	6-3-1 목재 거푸집		삭 제
	6-3-2 합판 거푸집
	6-3-3 원형 거푸집		삭 제
	6-3-3 제치장 거푸집 (제물치장 거푸집)		항목통합
	6-3-4 강재 거푸집	1.인력거치 및 해체
		2.장비조합 거치 및 해체
	6-3-5 유로폼 (EURO FORM)
	6-3-6 갱폼 (Gang Form)		삭 제
	6-3-7 터널폼 (Tunnel Form)		삭 제
	6-3-9 합성수지(P.E)원형 맨홀 거푸집		현행유지
6-6 교량 부대공	6-6-3 교량점검시설 제작 및 설치
6-7 조립식구조물	6-7-3 조립식 PC맨홀

대분류	중분류	세분류	비 고
6-1 콘크리트	6-1-1 콘크리트 타설	1.레디믹스트콘크리트 타설
		2.기계 및 인력비빔 타설
		3.표면 마무리	신 설
	6-1-2 콘크리트펌프차 타설	1.적용범위
		2.인력편성
		3.작업소요시간
		4.압송관 설치 및 철거
6-3 거푸집	6-3-1 합판거푸집	1.재료사용
		2.인력투입
	6-3-2 강재거푸집	1.사용기준
		2.인력 설치 및 해체
		3.장비조합 설치 및 해체
	6-3-3 유로폼	1.재료사용
		2.인력투입
	6-3-4 합성수지(P.E)원형 맨홀 거푸집
6-6 교량 부대공	6-6-3 교량점검시설 설치
6-7 조립식구조물	6-7-3 조립식 PC맨홀

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

6-1 콘크리트

6-1-1 콘크리트 타설

1. 레디믹스트콘크리트 타설

(㎥당)

직 종 구 분	콘 크 리 트 공 (인)	보 통 인 부 (인)
무근구조물	0.12	0.15
철근구조물	0.14	0.16
소형구조물	0.24	0.30

※ 본 품은 콘크리트 소운반, 타설, 다짐 및 양생의 품이 포함된 것임.

→ 개정 6-1-1 / 1.레디믹스트콘크리트 타설 [주] ① ‘보완’

6-1 콘크리트

6-1-1 콘크리트 타설

1. 레디믹스트콘크리트 타설

(㎥당)

유 형

구 분

규 격

단위

수량

무근구조물

철근구조물

소형구조물

인력운반 타설

콘크리트공

-

인

0.12

0.14

0.24

보통인부

-

인

0.15

0.16

0.30

장비사용 타설

콘크리트공

-

인

0.06

0.07

0.09

보통인부

-

인

0.02

0.02

0.02

굴삭기

(0.6∼0.8㎥)

hr

0.09

0.10

0.31

비고

- 본 품의 타설유형은 다음의 경우에 적용한다.

구분	내 용
인력운반 타설	- 인력운반 장비(손수레 등)로 콘크리트를 운반하여 시공하는 기준이다.
장비사용 타설	- 믹서트럭에서 콘크리트를 굴삭기로 공급받아 근접된 타설 위치에 직접 시공하는 기준이다.

[주] ① 본 품은 현장 내 콘크리트 운반, 타설, 다짐 및 양생준비를 포함한다.

② 소형구조물은 개소별 소량(6㎥이하)의 타설 위치가 산재되어 있는 경우에 적용한다.

③ 미장공에 의한 표면 마무리가 필요한 경우 ‘3. 표면 마무리’를 따른다.

④ 양생은 양생방법 및 시간을 고려하여 별도 계상한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등) 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

2. 기계비빔타설

(㎥당)

직 종 구 분	콘 크 리 트 공 (인)	보 통 인 부 (인)
무근구조물	0.15	0.46
철근구조물	0.17	0.68
소형구조물	0.24	0.94

※ 본 품은 기계를 이용한 비빔, 재료 소운반, 콘크리트 소운반, 타설, 다짐 및 양생의 품이 포함된 것임.

→ 개정 6-1-1 / 2. 기계 및 인력비빔 타설 [주] ① ‘보완’

※ 기계경비는 별도 계상함.

→ 개정 6-1-1 / 2. 기계 및 인력비빔 타설 [주] ④ ‘이기시행’

2. 기계 및 인력비빔 타설

(㎥당)

유 형	구 분	단위	수량
			무근구조물	철근구조물	소형구조물
기계비빔타설	콘크리트공	인	0.15	0.17	0.24
	보통인부	인	0.46	0.68	0.94
인력비빔타설	콘크리트공	인	0.85	0.87	1.29
	보통인부	인	0.82	0.99	1.36

[주] ① 본 품은 현장 내 콘크리트 운반, 타설, 다짐 및 양생준비를 포함한다.

② 소형구조물은 소량의 콘크리트 구조물(인력비빔 3㎥내외, 기계비빔 10㎥내외)이 산재되어 있는 경우에 적용한다.

③ 미장공에 의한 표면 마무리가 필요한 경우 ‘3. 표면 마무리’를 따른다.

④ 콘크리트 용수를 현장에서 구득하기 어려운 경우에는 운반비를 별도 계상한다.

⑤ 양생은 양생방법 및 시간을 고려하여 별도 계상한다.

⑥ 비빔 및 타설에 필요한 장비(배합기, 진동기 등)의 기계경비는 별도 계상한다.

토목

삭제

3. 인력비빔타설

(㎥당)

직 종 구 분	콘 크 리 트 공 (인)	보 통 인 부 (인)
무근구조물	0.85	0.82
철근구조물	0.87	0.99
소형구조물	1.29	1.36

※ 품은 인력비빔, 재료소운반, 콘크리트소운반, 타설, 다짐 및 양생의 품이 포함된 것임

→ 개정 6-1-1 / 2. 기계 및 인력비빔 타설 [주] ① ‘보완’

“ 계   속 ”

- 항 목 통 합 -

< ‘2. 기계 및 인력비빔 타설’에 반영 >

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

[주] ① 무근구조물 : 중력식 옹벽 등의 무근구조물, 무근･철근구조물의 버림 콘크리트 및 비교적 단순한 철근을 넣은 반중력식옹벽 교대 등의 구조물

→ 삭제

② 철근구조물 : 돌출식 옹벽, 부벽식 옹벽, 박스칼버트, 돌출식 교대, 부벽식교대, 교량상판, 교각, 수문, 암거 등의 철근량이 많은 구조물

→ 삭제

③ 소형구조물 : 소량의 콘크리트 구조물(인력비빔 3㎥내외, 기계비빔 10㎥내외)이 산재되어 있는 경우를 말한다.

→ 개정 6-1-1 / 2. 기계 및 인력비빔 타설 [주] ② ‘이기시행’

④ 소량의 콘크리트 또는 구조적으로 중요하지 않은 콘크리트인 경우에는 다음 표에 따라 1㎥당 재료를 계상하며, 이 경우 (B)배합을 표준으로 하고 모래가 부족한 경우에는 (A)배합, 많은 경우에는 (C)배합으로 하되, 모래는 건조상태를 기준으로 한 것이므로 모래가 젖어 있을 경우에는 시멘트 중량 50kg마다 5∼10kg을 가산하며 단위수량은 물 시멘트비가 45∼65%가 되는 범위에서 요구되는 콘크리트의 성질, 시공난이도에 따라 결정한다.

(㎥당)

골재의 최대치수(㎜)	배합종류	시멘트(kg)	모래(kg)	자갈 또는 부순돌(kg)
13	(A)	390	1,018	706
	(B)	385	963	778
	(C)	379	949	828
19	-내용생략-
25
40
50

→ 삭제

“ 계   속 ”

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

⑤ 수중 콘크리트의 경우에는 시멘트량을 30% 가산하되 단위 시멘트량을 370kg이상으로 해야 한다.

→ 삭제

⑥ 콘크리트 용수를 현장에서 구득하기 곤란한 경우에는 운반비를 별도 계상한다.

→ 삭제

⑦ 다짐에서 진동기를 사용할 경우에는 노무비를 제외한 운전경비 및 손료를 별도 계상한다.

→ 삭제

⑧ 콘크리트 타설에 필요한 가설비는 별도 계상한다.

→ 삭제

⑨ 기계비빔인 경우 1회 기계비빔량은 믹서 공칭 용량으로 하고 1시간당 비빔횟수는 15회를 표준으로 한다.

단, 플랜트혼합인 경우에는 능력에 따라 별도 계상한다.

→ 삭제

⑩ 한중콘크리트를 시공해야 할 경우 시방준수를 위한 보온 양생시설 등 제비용은 현장실정에 따라 별도 계상하며, 양생온도를 유지하기 위한 시후카의 양은 다음을 표준으로 하되 물시멘트 비를 조절한다.

(㎥당)

온 도 품 종	0℃때	-5℃때	-10℃때	-20℃때
시후카	21ℓ	30ℓ	35ℓ	52ℓ

→ 삭제

⑪ 슬래브 콘크리트에서 수평마무리가 필요할 경우에는 미장공을 별도 계상한다.

→ 개정 6-1-1 / 3. 표면마무리 ‘항목신설’

⑫ 특수양생(한중, 서중, PS, 피막, 기타 등)이 필요한 경우에는 별도 계상할 수 있다.

→ 삭제

토목

신설

3. 표면 마무리

(100㎡당)

구분	단위	수량
미장공	인	0.34

[주] 본 품은 콘크리트 타설 후 쇠흙손을 이용하여 마감하는 기준이다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

6-1-2 콘크리트 펌프차 타설

1. 작업능력(80㎥/hr급)

(㎥/hr)

구조물별	1일타설량	50㎥미만	50∼100㎥ 미만	100㎥∼300㎥미만	300㎥이상
	슬럼프 (cm)
무근 구조물	21	33.2	47.1	55.2	69.2
	18	26.6	37.7	44.2	55.4
	15	21.2	30.1	35.4	44.3
	8∼12	18.8	26.7	31.4	39.4
철근 구조물	21	27.7	41.6	49.9	63.0
	18	22.1	33.1	39.8	50.4
	15	17.7	26.6	31.9	40.3
	8∼12	15.7	23.5	28.3	35.8

[주] ① 일타설량은 구조물의 1일 평균타설량으로 하고, 둘 이상의 구조물을 1일내 작업하는 경우는 동일군으로 한다.

→ 개정 6-1-2 / 1. 적용범위 [주] ② ‘보완’

② 작업능력은 골재입경, 콘크리트 압송높이, 콘크리트 압송수평거리, 압송타설의 연속, 비연속 등의 조건에 따라 ±20% 내에서 증감할 수 있다.

→ 개정 6-1-2 / 3. 작업소요시간 ‘보완’

③ 붐 및 관경은 슬럼프값, 골재입경, 현장조건에 따라 산정한다.

→ 삭제

④ 압송콘크리트의 골재치수는 자연자갈의 경우 20∼40mm를, 쇄석의 경우 20∼30mm를 기준한 것이다.

→ 삭제

⑤ 기계손료 및 운전경비는 별도 계상한다.

→ 개정 6-1-2 / 3. 작업소요시간 ‘보완’

⑥ 콘크리트펌프차의 붐타설은 높이 H.15m, 수평거리 Z.15m의 경우에 적용하고, 배관타설은 상기 범위외 및 붐타설이 곤란한 경우, 혹은 현장조건 등에 따라 배관타설이 적당한 경우에 적용한다.

→ 개정 6-1-2 / 1. 적용범위 [주] ⑤ ‘보완’

6-1-2 콘크리트 펌프차 타설

1. 적용범위

① 본 품은 콘크리트펌프차(80㎥/hr 이상)를 활용한 콘크리트 타설에 적용한다.

② 펌프차 타설은 단일구조물의 1회타설(셋팅 및 마감)을 기준으로 하며, 인접되어 있는 두개 이상의 구조물을 재셋팅하여 작업하는 경우 동일군으로 계상한다.

단, 펌프차의 타설범위(타설높이 및 수평거리)를 초과하여 재셋팅이 필요한 경우 ‘3.작업소요시간의 T3(펌프차 이동 및 재셋팅)’을 콘크리트 펌프차 운전시간(Tc)에 반영한다.

③ 본 품은 펌프차를 활용한 타설, 다짐, 양생준비 작업을 포함한다.

④ 타설 후 별도의 표면 마무리가 필요한 경우 ‘6-1-1 콘크리트 타설 / 3. 표면 마무리’를 따른다.

⑤ 콘크리트 펌프차 규격은 타설높이 및 수평거리를 고려하여 선정한다.

⑥ 배관타설은 붐 타설이 곤란한 경우, 혹은 현장조건 등에 따라 배관타설이 적당한 경우에 적용하며, 배관의 설치 및 철거는  ‘4.압송관 설치 및 철거’를 따른다.

⑦ 양생은 양생방법 및 시간을 고려하여 별도 계상한다.

⑧ 와이어메시 등의 소모재료가 필요한 경우 별도 계상한다.

토목

2. 인력편성

구분	단위	편성인력(1회 타설)			비고
		100㎥미만	100~200㎥	200㎥이상
콘크리트공	인	5	6	6	타설/진동기/면정리
특별인부	인	2	2	3	타설보조/면정리 (배관타설시 1인 추가)
보통인부	인	2	2	2	현장정리/보조

① 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로 진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트공과 특별인부를 각 1인 제외한다.

② 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의 기계경비와 잡재료비는 인력품에 다음 요율을 적용한다.

구분	100㎥ 미만	200㎥ 미만	200㎥ 이상
인력품의 %	5%	4%	3%

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

2. 콘크리트 펌프차 타설인부

(인/10㎥당)

타설구분

구조물종류

콘크리트공

보통인부

붐 타 설

무근구조물

0.44

0.21

철근구조물

0.49

0.24

배관타설

무근구조물

0.74

0.41

철근구조물

0.81

0.46

비 고

- 본 품은 양생이 포함되지 않은 것이므로 양생이 필요한 경우에는 다음에 따라 계상한다. 단, 다음의 양생품은 물을 뿌려 양생하는 정도의 일반양생을 기준한 것이므로, 특수양생의 경우에는 별도 계상한다.

(10㎥당)

구분	단위	무근구조물	철근구조물
보통인부	인	0.22	0.07
제잡비 (양생재료,기구손료)	%	31	41

→ 개정 6-1-2 / 2. 인력편성 ‘보완’

→ 개정 6-1-2 /1. 적용범위 [주] ⑥ ‘보완’

[주] ① 본 품은 다짐이 포함된 것이며, 다짐을 위한 콘크리트진동기 등의 기계경비는 콘크리트펌프차의 기계손료 및 운전경비와 콘크리트타설 인력품의 합계액의 1%까지 계상한다.

→ 개정 6-1-2 / 2. 인력편성 [주] ② ‘보완’

② 상기 배관 타설품에는 압송관 조립, 철거, 인력품(40m 정도)이 포함된 것이며, 40m이상의 압송관 조립, 철거를 필요로 하는 경우에는 다음 “3”항의 표에 의거 별도 가산한다.

→ 개정 6-1-2 / 4. 압송관 설치 및 철거  ‘보완’

③ 제치장 콘크리트, 곡면；경사면, 최소폭 15㎝미만의 난간 및 파라펫트와 벽체 등의 돌출부분 또는 요철부분은 10%범위내에서 품을 가산할 수 있다.

→ 개정 6-1-2 / 3. 작업소요시간 ‘보완’

“ 계   속 ”

3. 작업소요시간

가. 전체작업소요시간(T) : 인력편성 노무비에 적용

T= Tc+Tb

Tc : 콘크리트펌프차 운전시간

Tb : 인력에 의한 타설준비 및 마무리 시간

나. 콘크리트 펌프차 운전시간(Tc) : 콘크리트 펌프차 운전시간 적용

Tc = (t1+t2+t3+t4)/F

t1(펌프차 셋팅) : 20min

t2(펌프차 마감) : 20min

t3(펌프차 이동 및 재셋팅) : 30min/회당

t4(펌프차 타설, min) : 기준시간×f1×f2×타설량

F(작업계수)

(1) 펌프차 셋팅 : 펌프차 현장진입 후 타설준비까지 소요시간

(2) 펌프차 마감 : 믹서트럭 마지막 차량 타설 후 차량마감 및 현장정리

(3) 펌프차 이동 및 재셋팅은 타설위치가 넓거나 산재하여 펌프차의 이동으로 재셋팅이 필요한 경우에 적용하며, 펌프차 작업가능 수평거리를 고려하여 재셋팅 횟수를 산정한다.

(4) 펌프차 타설의 기준시간은 다음을 적용한다.

슬럼프	기준시간(min)
	무근콘크리트	철근콘크리트
8~12cm	1.15	1.35
15cm	1.10	1.25
18cm이상	1.00	1.15

[주] 기준시간은 콘크리트 1㎥당 타설시간임

(5) 시설유형(f1)

유형	양호	보통	불량	매우불량
f1	1.0	1.20	1.40	4.0

[주] ① 양호 : 매트기초 등 펌프차 작업에 제약이 없는 시설물

② 보통 : 벽, 기둥, 보, 슬라브, 교대, 교각 등 펌프차 작업에 큰 지장이 없어 일반적인 시공이 가능한 시설물

“ 계   속 ”

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

④  독립굴뚝:싸이로:고가수조 및 이에 준하는 구조물로서 높이 10∼50m인 경우에는 품을 높이에 따라 50%까지 할증할 수 있으며, 비계공을 적용한다.

→ 개정 6-1-2 / 3. 작업소요시간 ‘보완’

⑤  슬래브 없는 [월거더:wall girder]구조로서 기둥과 보에 있어서는 품을 20%범위 내에서 가산 할 수 있다.

→ 개정 6-1-2 / 3. 작업소요시간 ‘보완’

③ 불량 : 옹벽, 줄기초, 슬래브 없는[월거더:wall girder]구조의 기둥과 보 등 펌프차 작업에 제약을 받는 타설부위가 좁거나 깊은 시설물

④ 매우불량 : 절․성토부 비탈면에 시공되는 구조물 등 펌프차 작업에 제약이 매우 큰 시설물

(6) 믹서트럭진입 조건(f2)

유형	양호	보통	불량
f2	1.0	1.20	1.40

[주] ① 양호는 대기공간이 충분히 넓어 믹서트럭 2대가 병렬로 타설준비가 가능하며 지속적인 타설을 수행하는 경우

② 보통은 믹서트럭이 1대씩 직렬로 대기하며 순차적으로 타설준비하여 타설하는 일반적인 경우

③ 불량은 믹서트럭의 대기공간이 매우 협소하고 진출입 길이가 길어 연속적인 타설이 어려운 경우

토목

다. 작업계수(F) : 1회 타설규모

유형	100㎥ 미만	200㎥ 미만	200㎥ 이상
F	0.70	0.80	0.90

토목

라. 타설준비 및 마무리 시간(Tb)

유형	100㎥ 미만	200㎥ 미만	200㎥ 이상
Tb(min)	25	35	45

[주] ①	타설준비 작업은 펌프차 셋팅 전 작업인력에 의한 타설위치 확인,  점검 등 작업에 소요되는 시간이다.

② 마무리 작업은 펌프차 타설 후 인력에 의한 양생준비 등 작업에 소요되는 시간이다.

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

3. 압송관설치 및 철거

(m당)

종류	직종	품(인)		계(인)
		조립	철거
압송관	비계공	0.009	0.006	0.015

[주] ①  압송관의 고정비계를 필요로 하는 경우에는 설치 및 철거비를 별도 계상한다.

→ 개정 3. 압송관 설치 및 철거 ‘이기시행’

② 소운반은 별도 계상한다.

→ 삭제

4. 압송관 설치 및 철거

(m당)

종류	직종	품(인)		계(인)
		설치	철거
- 현행과 동일 -

[주] ① 압송관의 고정비계를 필요로 하는 경우에는 설치 및 철거비를 별도 계상한다.

② 소운반은 별도 계상한다.

토목

삭제

6-1-3 비탈면 구조물 콘크리트 타설

(㎥당)

구 분	규 격	단위	경사도
			1:1.2∼1:1.8 (1:1.2를 포함)	1:1.2보다 급한 경우
콘 크 리 트 공		인	0.19	0.29
보통인부		인	0.13	0.19
콘크리트펌프차	80㎥/hr	시간	0.17	0.26

[주] ① 본 품은 도로나 철도 건설공사 등에 있어 절･성토부 비탈면에 시공되는 구조물(도수로, 산마루 측구 등)의 콘크리트 타설에 적용하며, 이와 유사한 조건의 구조물에도 본 품을 적용할 수 있다.

→ 개정 6-1-2 / 3. 작업소요시간 ‘보완’

② 본 품은 다짐이 포함된 것이며, 다짐을 위한 콘크리트진동기 등의 기계경비는 콘크리트타설 인력품과 콘크리트펌프차의 기계손료 및 운전경비의 합계액의 1%까지 계상한다.

→ 개정 6-1-2 / 2. 인력편성 [주] ② ‘보완’

③ 본 품은 양생이 포함되지 않은 것이므로 양생이 필요한 경우에는 별도 계상한다.

→ 개정 6-1-2 /1. 적용범위 [주] ⑥ ‘이기시행’

④ 급경사시 와이어 메쉬 등의 잡재료비는 별도 계상한다.

→ 개정 6-1-2 /1. 적용범위 [주] ⑦ ‘이기시행’

- 항 목 통 합 -

< ‘6-1-2 콘크리트 펌프차 타설’에 반영 >

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

6-3 거푸집

◦ 거푸집 사용횟수의 결정은 단일공사별 계약 단위별로 하며 일반적으로 다음 표를 표준으로 하고, 구조물 형상 또는 현장조건에 제한을 받을 경우에는 이를 감안하여 결정할 수 있다.

→ 개정 6-3-1 / 1. 재료사용 ‘보완’

◦ 극히 간단한 구조는 6회이상을 적용할 수 있으며, 품은 현행품의 비율을 적용한다.

→ 개정 6-3-1 / 1. 재료사용 ‘보완’

◦ 현장여건상 특수거푸집을 제작사용할시 별도품을 계상할 수 있다.

사용횟수	구 조 물
2회	T형보, 난간, 특히 복잡한 구조의 교각, 교대, 수문관의 본체 등 복잡한 구조
3회	슬래브, 교대, 교각, 옹벽, 파라펫트, 날개벽 등 약간 복잡한 구조
4회	측구, 수로, 확대기초, 우물통 등 비교적 간단한 구조
6회	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 극히 간단한 구조

→ 개정 6-3-1 / 1. 재료사용 / 가.사용횟수 ‘보완’

6-3 거푸집

6-3-1 합판거푸집

1. 재료사용

가. 사용횟수

사용횟수	유 형	구 조 물
1~2회	제물치장	제물치장 콘크리트
2회	매우복잡/ 소규모	T형보, 난간, 복잡한 구조의 교각, 교대, 수문관의 본체 등 매우 복잡한 구조 소규모 : 조적턱, 창호턱 등 소규모로 산재되어 있는 구조물
3회	복잡	교대, 교각, 파라펫트, 날개벽 등 복잡한 벽체 구조, 건축 라멘구조의 보, 기둥
4회	보통	측구, 수로, 우물통 등 비교적 간단한 벽체구조, 교량 및 건축 슬래브
6회	간단	수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 간단한 구조

[주] ① 사용횟수는 구조물 형상 또는 현장조건에 제한을 받는 경우에는 이를 고려하여 결정한다.

② 제물치장의 경우 2회 사용 시 ‘나. 자재수량’을 참고한다.

③ 극히 간단한 구조에서는 6회 이상을 적용한다.

④ 현장 여건상 특수거푸집을 제작 사용할 경우 별도 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

삭제

6-3-1 목재 거푸집

(㎡당)

종별	단위	기준수량 (1회사용시)	사용횟수별기준수량에대한 비율(%)			비고
			횟수별	재료비(%)	노무비(%)
판 재	㎥	0.03	1회사용시	100	100
각 재	㎥	0.038	2회 〃	57.7	63.0
철 선	kg	0.29	3회 〃	46.6	51.6
못	kg	0.25	4회 〃	39.7	45.9
박 리 제	ℓ	0.19
형틀목공 보통인부	인인	0.34 0.27				제작조립 철거포함
사용고재 평가기준	%	23			판재와 각재의 설계 단가를 기준으로 함.
비고	- 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3m 증가마다 인력품을 10%까지 가산한다. 다만 현장여건에 따라 장비가 필요하다고 판단되는 구조물에서는 장비로 계상할 수 있다.

[주] ① 본 품의 2회이상의 사용 고재량은 각 횟수별 재료비 비율속에 기포함되어 있다.

② 본 품의 기준수량은 목재 거푸집 1회사용시 기준한 것이며 사용 횟수별로 재료 및 노무비를 계상코자 할 때는 횟수별 비율을 적용한다.

③ 동바리재료 및 품은 포함되지 않았다.

④ P.C빔제작용 볼트, 긴장기 및 세퍼레이터를 사용할 때의 재료는 별도 계상할 수 있다.

⑤ 곡면부분의 거푸집은 자재 및 품을 별도 계상할 수 있다.

⑥ 수중에서 거푸집을 조립 및 해체할 때에는 별도 계상한다.

⑦ 산재되어 있는 소형구조물(콘크리트 10㎥미만)인 경우에는 인력품을30%까지 가산할 수 있다.

“ 계   속 ”

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

⑧ 폼타이(Form Tie) 사용 시는 다음에 의거 계상한다.

㉮ 폼타이(D형 1/2인치 경우) 소요량은 거푸집 ㎡당 2.14본(1.07조)으로 하고 사용횟수는 10회로 한다.

㉯ 특수한 경우(거푸집 측압이 6t/㎡이상)에는 폼타이 수량을 적의 조정할 수 있다.

㉰ 세퍼레이터는 필요한 경우에 소모 재료로 계상한다.

[계산예]

목재 거푸집

(㎡ 당)

사용 횟수	명칭	규격	단위	수 량	단가		재 료 비		노 무 비		계
1 회 사 용	판재		㎥	0.03	153,000		4,590
	각재		〃	0.038	120,000		4,560
	철선	#8	kg	0.29	270		78	30
	못		〃	0.25	280		70	00
	박 리 제	경유	ℓ	0.19	183	84	34	90
	형틀목공		인	0.50	10,570				5,285	00
	보통인부		〃	0.40	6,120				2,448	00
	고재처리	23%					(―) 2,104	50
계							7,228	70	7,733	00
2회 1회사용 재료비의 57.7% 인건비의 63% 3회 1회사용 재료비의 46.6% 인건비의 51.6% 4회 1회사용 재료비의 39.7% 인건비의 45.9%							4,170 3,368 2,869	95 57 79	4,871 3,990 3,549	79 22 44	9,042 7,358 6,419	74 79 23

※ 단가는 '86년 단가 기준

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

6-3-2 합판 거푸집

(㎡ 당)

종별	단위	기준수량 (1회사용시)	사용횟수별기준수량에대한 비율(%)			비고
			횟 수 별	재료비(%)	노무비(%)
합 판	㎡	1.030	1회사용시 2회사용시 3회사용시 4회사용시 5회사용시 6회사용시	100.0 57.0 46.1 40.1 37.1 34.7	100.0 60.0 47.1 40.0 34.2 32.0	12㎜내수 합판기준 제작조립 철거포함
각 재	㎥	0.038
철 선	kg	0.29
못	kg	0.20
박 리 제	ℓ	0.19
형 틀 목 공	인	0.22
보 통 인 부	인	0.12
사용고재 평가기준	%	23			목재와 합판의 설계단가를 기준으로 함
비 고	- 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3m 증가 마다 인력품을 10%까지 가산한다. 다만 현장여건에 따라 장비가 필요하다고 판단되는 구조물에서는 장비로 계상할 수 있다.

[주] ① 본 품의 2회 이상의 사용고재량은 재료비비율 속에 기포함되어 있다.

→ 개정 6-3-1 / 1. 재료사용 / 나. 자재수량 [주] ② ‘이기시행’

② 본 품의 기준수량은 합판 거푸집 1회 사용시 기준한 것이며 사용 횟수별로 재료 및 노무비를 계상코자 할 때는 횟수별 비율을 적용한다.

→ 개정 6-3-1 / 1. 재료사용 ‘보완’

→ 개정 6-3-1 / 2. 인력투입 ‘보완’

③ 동바리재료 및 품은 포함되지 않는다.

→ 개정 6-3-1 / 2. 인력투입 [주] ② ‘보완’

④ P.C빔 제작용 볼트, 긴장기 및 세퍼레이터를 사용할 때의 재료는 별도 계상할 수 있다.

→ 삭제

“ 계   속 ”

6-3-1 합판거푸집

나. 자재수량

(㎡ 당)

구분	단위	수량	1회 사용 자재비의 %
		1회	2회	3회	4회	5회	6회
합판	㎡	1.03	55.0	44.3	38.0	35.0	32.7
각재	㎥	0.038
소모자재 (박리재 등)	주자재비의%	5.0%	8.0	10.0	12.0	13.0	14.0
비고	- 사용고재 평가기준 : 23%

[주] ① 자재수량은 설계조건에 따라 별도 계상할 수 있다.

② 2회 이상에서는 1회 사용수량에 대해 해당 요율을 적용하며, 사용 고재량은 재료비 비율에 포함되어 있다.

③ 제물치장에 소요되는 볼트, 나무덧쇠, 파이프 등은 별도 계상한다.

④ 폼타이(Form Tie) 사용시 소요수량은 콘크리트의 측압에 따라 다음에 의거 계상한다.

(조/㎡당)

측압 규격	3 t/㎡	4 t/㎡	5 t/㎡	6 t/㎡
7.9mm	1.07	1.42	1.80	2.14
9.5mm	0.71	0.97	1.19	1.43
12.7mm	0.53	0.72	0.88	1.07

㉮ 폼타이(D형1/2인치 경우) 소요량은 거푸집 ㎡당 2.14본(1.07조)으로 하고 사용횟수는 10회로 한다.

㉯ 특수한 경우(거푸집 측압이 6t/㎡이상)에는 폼타이 수량을 적의 조정하여 사용한다.

㉰ 세퍼레이터는 필요한 경우에 소모재료로 계상한다.

⑤ 폼 타이 제거 후 구멍땜이 필요한 경우 다음표를 기준으로 계상한다.

(100개소당)

구분	단위	수 량	비고
시멘트	㎏	6.99	배합비 1 : 3 기준
모래	㎥	0.015
혼화재	g	-	(필요에 따라서 별도계상)
보통인부	인	0.62

㉮ 폼타이 규격은 12.7mm를 기준한 것이며, 코킹재를 사용할 경우 별도 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

⑤ 곡면부분의 거푸집은 자재 및 품을 별도 계상할 수 있다.

→ 개정 6-3-1 / 2. 인력투입 [주] ③ ‘이기시행’

⑥ 산재되어 있는 소형구조물(콘크리트 10㎥미만)인 경우에는 인력품을 30%까지 가산할 수 있다.

→ 개정 6-3-1 / 2. 인력투입 ‘보완’

⑦ 폼타이(Form Tie) 사용시는 다음에 의거 계상한다.

㉮ 폼타이(D형 1/2인치 경우) 소요량은 거푸집 ㎡당 2.14 본(1.07조)으로 하고 사용횟수는 10회로 한다.

㉯ 특수한 경우(거푸집 측압이 6t/㎡이상)에는 폼타이 수량을 적의 조정할수 있다.

㉰ 세퍼레이터는 필요한 경우에 소모 재료로 계상한다.

→ 개정 6-3-1 / 1. 재료사용 / 나. 자재수량 [주] ④ ‘이기시행’

[계산예]

합판 거푸집

(㎡ 당)

사용 횟수	명칭	규격	단위	수량	단가		재료비		노무비		계
1 회	합판	내수합판 12m/m	㎡	1.03	2,898	1	2,985	0
	각재		㎥	0.038	120,000		4,560
	철선	#8	kg	0.29	270		78	30
	못		〃	0.2	280		56	0
	박리제	중유	ℓ	0.19	183	84	34	90
	형틀목공		인	0.22	10,570				2,325	40
	보통인부		〃	0.12	6,120				734	40
	고재처리	23%					(―) 1,735	35
	계						5,978	85	3,059	80
2회 1회사용 재료비의 57.0% 인건비의 60% 3회 1회사용 재료비의 46.1% 인건비의 47.10% 4회 1회사용 재료비의 40.1% 인건비의 40% 5회 1회사용 재료비의 37.1% 인건비의 34.2% 6회 1회사용 재료비의 34.7% 인건비의 32%							3,407 2,756 2,397 2,218 2,074	94 25 51 15 66	1,835 1,441 1,223 1,046 979	80 16 92 45 13	5,243 4,197 3,621 3,264 3,053	74 41 43 60 79

※ 단가는 '86년 단가 기준

→ 삭제

2. 인력투입

(㎡당)

구분	단위	유형
		제물치장	매우복잡/소규모	복잡	보통	간단
형틀목공	인	0.23	0.18	0.16	0.11	0.10
보통인부	인	0.14	0.05	0.04	0.03	0.02
비고	- 제물치장의 경우 자재 1회사용 기준이며, 2회 사용 시 본 품의 60%를 적용한다. - 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3m 마다 인력품을 10%까지 가산한다. (현장 여건에 따라 장비가 필요한 경우 양중장비를 계상하고, 인력품을 가산하지 않는다.) - 지붕 슬래브 설치(경사도 20˚ 미만)에서는 인력품을 20% 가산한다.

[주] ① 본 품은 설치면적을 기준한 것이며, 합판거푸집(내수합판 12mm기준)의 가공, 제작, 조립, 해체를 포함한다.

② 본 품에는 청소, 박리제 바름 및 보수 품이 포함되어 있으며, 동바리 설치(재료포함)는 제외되어 있다.

③ 곡면 및 특수형상 부분의 품은 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비 기계경비는 인력품의 1%로 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

삭제

6-3-3 원형 거푸집

(㎡ 당)

종 별	단위	기준수량	사용횟수별기준수량에대한 비율(%)			비고
			횟 수 별	재료비(%)	노무비(%)
판재	㎥	0.05	1회 2회 3회	100.0 57.1 42.0	100.0 62.8 51.5	3㎜합판 기준 제작, 조립 철거포함
각재	㎥	0.053
합판	㎡	1.03
철선	kg	0.29
못	kg	0.25
박 리 제	ℓ	0.19
형틀목공	인	0.54
보통인부	인	0.25
사용고재 평가기준	%	23			판재와 각재의 설계 단가를 기준으로 함.
비고	- 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3m 증가 마다 인력품을 10%까지 가산한다. 다만, 현장 여건에 따라 장비가 필요하다고 판단되는 구조물에서는 장비로 계상할 수 있다.

[주] ① 본 품의 2회 이상의 사용고재량은 재료비 비율속에 기 포함되어 있다.

② 본 품의 기준수량은 원형거푸집 1회 사용시를 기준으로 한 것이며 사용횟수별로 재료 및 노무비를 계상하고자 할 때에는 횟수별 비용을 적용한다.

③ 동바리재료 및 품은 포함되지 않았다.

④ 폼타이(Form Tie) 사용시는 다음에 의거 계상한다.

㉮ 폼타이(D형 1 / 2인치 경우) 소요량은 거푸집 ㎡당 2.14본 (1.07조)으로 하고 사용횟수는 10회로 한다.

㉯ 특수한 경우(거푸집 측압이 6t / ㎡이상)에는 폼타이 수량을 적의 조정할 수 있다.

㉰ 세퍼레이터는 필요한 경우에 소모 재료량을 계상한다.

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

6-3-4 강재 거푸집

1. 인력거치 및 해체

(100㎡당)

명칭	단위	거치	해체	계
형 틀 목 공	인	4.5	1.7	6.2
비 계 공	인	4.5	4.5	9.0
보 통 인 부	인	7.5	4.5	12.0

[주] ① 강재거푸집제작은 별도 계상한다.

→ 개정 6-3-2 / 1. 사용기준 [주] ① ‘이기시행’

② 고임 및 쇄기용 목재손료는 별도 계상한다.

→ 개정 6-3-2 / 2. 인력설치 및 해체 [주] ③ ‘이기시행’

③ 수직고 7m이상인 경우에는 3m증가마다 품을 10%까지 별도 가산할 수 있다.

→ 개정 6-3-2 / 2. 인력설치 및 해체 [본품] 비고 ‘이기시행’

④ 강재 거푸집 사용횟수는 다음과 같다.

구조물	전 용 횟 수	비고
간 단 한 구 조	50∼60	측구, 기초, 수로
약 간 복 잡 한 구 조	40∼50	옹벽, 교대, 호안
복 잡 한 구 조	30∼40	형교, 곡면거푸집, 우물통
터널	100

* 손료를 계상할 경우에는 잔존율을 10%로 함.

→ 개정 6-3-2 / 1. 사용기준 ‘이기시행’

⑤ 본 품은 강재만으로 U클립, 핀, 볼트 및 너트 등으로 조립되는 거푸집을 표준으로 한 것이다.

→ 개정 6-3-2 / 2. 인력설치 및 해체 [주] ② ‘이기시행’

⑥ 강재거푸집은 강철의 두께와 형태에 따라 전용횟수를 조정하여 적용할 수 있다.

→ 개정 6-3-2 / 1. 사용기준 ‘이기시행’

⑦ 본 품은 두께 3.2mm를 기준으로 한 것이며, 터널의 경우 6㎜ 기준이다.

→ 개정 6-3-2 / 1. 사용기준 ‘이기시행’

6-3-2 강재 거푸집

1. 사용기준

가. 강재거푸집 제작(현장제작 포함)은 별도 계상한다.

나. 강재거푸집 사용횟수는 다음을 참고한다.

구조물	사용횟수	유형	비고
간단한구조	50∼60	측구, 기초, 수로	잔존율 10%
약간복잡한구조	40∼50	옹벽, 교대, 호안
복잡한구조	30∼40	형교, 곡면거푸집, 우물통
터널	100

[주] ① 강판의 두께와 형태에 따라 사용횟수를 조정하여 적용할 수 있다.

② 강재거푸집은 두께 3.2mm(터널 6mm)를 기준으로 한 것이다.

토목

2. 인력 설치 및 해체

(100㎡당)

명칭	단위	설치	해체	계
형 틀 목 공	인	4.5	1.7	6.2
비 계 공	인	4.5	4.5	9.0
보 통 인 부	인	7.5	4.5	12.0
비고	- 수직고 7m이상인 경우에는 3m증가마다 품을 10%까지 별도 가산할 수 있다.

[주] ① 본 품은 인력에 의한 강재거푸집 설치 및 해체를 기준한 것이다.

② 본 품은 강재만으로 U클립, 핀, 볼트 및 너트 등으로 조립되는 거푸집을 기준한 것이다.

③ 고임 및 쇄기용 목재손료는 별도 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

2. 장비조합 거치 및 해체

(100㎡당)

명칭	단위	거치	해체	계
형 틀 목 공	인	7.06	3.40	10.46
비 계 공	인	2.97	2.11	5.08
보 통 인 부	인	1.99	1.39	3.38
크 레 인	hr	8.72	6.19	14.91

[주] ① 본 품은 인력과 크레인(10ton) 조합기준으로 교량의 교각 및 코핑부위에 적용한다.

→ 개정 6-3-2 / 3.장비조합 설치 및 해체 [주] ① ‘보완’

② 강재거푸집 제작은 별도 계상한다.

→ 개정 6-3-2 / 1. 사용기준 [주] ① ‘이기시행’

③ 고임 및 쇄기용 목재손료는 별도 계상한다.

→ 개정 6-3-2 / 3.장비조합 설치 및 해체 [주] ⑤ ‘이기시행’

④ 강재 거푸집 사용횟수는 “1. 인력거치 및 해체”를 참조하여 적용한다.

→ 개정 6-3-2 / 1. 사용기준 [주] ① ‘이기시행’

⑤ 본 품은 강재만으로 U클립, 핀, 볼트 및 너트 등으로 조립되는 거푸집을 표준으로 한 것이다.

→ 개정 6-3-2 / 3.장비조합 설치 및 해체 [주] ② ‘이기시행’

⑥ 강재거푸집은 강철의 두께와 형태에 따라 전용횟수를 조정하여 적용할 수 있다.

→ 개정 6-3-2 / 1. 사용기준 [주] ① ‘이기시행’

⑦ 본 품은 거푸집(5ton미만/개당) 기준으로 거푸집 중량 및 현장여건에 따라 크레인 규격은 가감하여 적용할 수 있다.

→ 개정 6-3-2 / 3.장비조합 설치 및 해체 [주] ③ ‘보완’

3. 장비조합 설치 및 해체

(100㎡당)

구분	규격	단위	유형
			코핑	교각
형 틀 목 공		인	11.5	9.3
보 통 인 부		인	2.0	1.6
크 레 인	25ton이상	hr	15.2	10.6

[주] ① 본 품은 고소작업이 필요한 교량의 교각 및 코핑부위에 강재거푸집을 설치 및 해체하는 기준이다.

② 본 품은 강재만으로 U클립, 핀, 볼트 및 너트 등으로 조립되는 거푸집을 기준한 것이다.

③ 크레인 규격은 작업여건(거푸집 중량 및 현장조건)에 따라 변경할 수 있다.

④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등) 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.

⑤ 고임 및 쇄기용 목재손료는 별도 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

6-3-4 유로폼(EURO FORM)

(10㎡당)

구 분	규격	단위	벽	바닥
패 널	600×1,800㎜	매	-	0.47
패 널	600×1,200 〃	매	0.71	-
슬래브코너 패널	220×1,500 〃	매	-	0.13
내부패널	(200+200)×1,200㎜	매	0.02	-
보	100×1,650 〃	매	-	0.064
웨이지핀(WEDGEPIN)		개	19.002	6.567
드롭헤드(DROP HEAD)		개	-	0.074
볼트(너트포함)		조	-	0.377
플랫타이(FLAT TIE)	L=200㎜	개	20.026	-
강관파이프	D=48.6〃	m	0.773	-
훅크･크램프(HOOK CLAMP)		개	2.827	-
목재		㎥	-	0.007
박리제		ℓ	0.125	0.125
형 틀 목 공 보 통 인 부	조립･해체	인인	0.96 0.45
비고	- 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3m 증가마다 인력품을 10%까지 가산 한다. 다만, 현장여건에 따라 장비가 필요 하다고 판단되는 구조물에서는 장비로 계상할 수 있다.

[주] ① 본 품에는 재료의 할증 및 손율이 계상되어 있다.

→ 개정 6-3-3 / 1.재료사용 [주] ① ‘이기시행’

② 본 품에는 소운반, 청소, 기름칠 및 보수품이 포함되어 있다.

→ 개정 6-3-3 / 2.인력투입 [주] ② ‘보완’

③ 잡재료(철선, 보조각재 등)는 재료비의 5%로 계상한다.

→ 개정 6-3-3 / 1.재료사용 [주] ② ‘보완’

④ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

→ 개정 6-3-3 / 2.인력투입 [주] ③ ‘보완’

⑤ 플랫 타이(FLAT TIE) 대신 폼타이(Form Tie) 사용시 소요수량은 “6-3-1목재거푸집”의 [주] ⑧항에 따라 계상한다.

→ 개정 6-3-3 / 1.재료사용 [주] ③ ‘이기시행’

“ 계   속 ”

6-3-3 유로폼

본 품은 유로폼 패널의 벽체 설치 및 해체를 기준한다.

1. 재료사용

가. 유로폼의 자재수량은 다음 기준을 참고하며, 규격이 상이할 경우 설계조건에 따라 별도 계상할 수 있다.

(10㎡당)

구분	규격	단위	수량
패 널	600×1,200㎜	매	0.89
내부패널	(200+200)×1,200㎜	매	0.03
웨이지핀(WEDGEPIN)		개	19.0
플랫타이(FLAT TIE)	L=200㎜	개	20.0
강관파이프	D=48.6〃	m	0.77
훅크･크램프(HOOK CLAMP)		개	2.83

[주] ① 재료량에는 재료의 할증 및 손율이 포함되어 있다.

② 소모재료 및 잡재료(박리재, 철선, 보조각재 등)는 주재료(패널, 내부패널)비의 5%로 계상한다.

③ 플랫 타이(FLAT TIE) 대신 폼타이(Form Tie) 사용시 소요수량은 “6-3-1 합판거푸집/ 1.재료사용 기준”을 따른다.

토목

나. 사용 조작횟수

구분	사용조작회수
패널류	12회사용 잔존율 25%
보, 드롭헤드, 강관파이프, 후크클램프, 웨지핀	25회 사용 잔존율 10%

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

⑥ 본 품의 사용조작횟수(손율)기준은 다음을 기준한 것이다.

구 분	사용조작회수
패널류	15회 사용시 잔존율 25%
보, 드롭헤드, 강관파이프, 후크 크램프, 웨이지핀	25회 사용시 잔존율 10%

→ 개정 6-3-3 / 1.재료사용 나. 사용조작횟수 ‘보완’

⑦ 패널류의 수량은 본표에 표시된 규격을 기준으로 하여 산정한 것이므로 규격이 다를 경우에는 별도 계상할 수 있다.

→ 개정 6-3-3 / 1.재료사용 가. ‘이기시행’

2. 인력투입

가. 유로폼의 인력투입은 다음표를 기준으로 하며, 구조물 형상 또는 현장조건에 제한을 받는 경우에는 이를 고려하여 결정할 수 있다.

구분	유형
복잡	토목 : 교대, 날개벽 등 복잡하고 보강이 많은 구조 건축 : 외부 벽체, 보/기둥
보통	측구, 수로, 옹벽, 일반적인 벽체, 박스 등
간단	수문 또는 관의 기초, 건축 매트기초 등 간단한 구조

토목

나. 수량

(㎡당)

구분	단위	유형
		복잡	보통	간단
형틀목공	인	0.14	0.10	0.09
보통인부	인	0.03	0.03	0.02
비고	- 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 이를 초과하는 경우 매 3m 증가마다 인력품을 10%까지 가산 한다. 다만, 현장여건에 따라 장비가 필요 하다고 판단되는 구조물에서는 장비로 계상할 수 있다.

[주] ① 본품은 유로폼 패널의 벽체조립 및 해체를 기준한 것이다.

② 본 품에는 청소, 박리제 바름 및 보수 품이 포함되어 있다.

③ 공구손료 및 경장비 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

삭제

6-3-6 갱폼(Gang Form)

(㎡당)

구 분	단 위	수 량
형 틀 목 공	인	0.067
보 통 인 부	인	0.029

[주] ① 기계경비는 별도 계상한다.

→ 개정 6-3-4 갱폼 [주] ③/④ ‘보완’

② 청소, 기름칠 및 보수품이 포함된 것이다.

→ 개정 6-3-4 갱폼 [주] ② ‘보완’

③ 재료 및 손료는 별도 계상한다.

→ 개정 6-3-4 갱폼 [주] ⑤ ‘이기시행’

④ 갱폼용 핸드레일 및 작업발판 재료 및 품은 별도 계상한다.

→ 개정 6-3-4 갱폼 [주] ⑥ ‘이기시행’

- 삭   제 -

<건축부문  6-3-4 갱폼 반영>

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

삭제

6-3-7 터널폼(Tunnel Form)

(㎡당)

구 분	단위	수 량
형틀목공	인	0.115
용접공	인	0.006
보통인부	인	0.066

[주] ① 기계경비는 별도 계상한다.

② 청소, 기름칠 및 보수품이 포함된 것이다.

③ 재료 및 손료는 별도 계상한다.

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

6-6 교량 부대공

6-6-3 교량점검시설 제작 및 설치

(톤당)

구분	규격	단위	제작(공장제작)	설치
철공		인	14.77	5.28
보통인부		인	-	2.64
크 레 인	15톤	시간	-	9.70
비고	- 본 품은 수직고(지면∼발판재까지의 높이) 10m까지를 기준한 것이므로, 10m를 초과하는 매 10m증가마다 10%씩 가산한다. 단, 크레인의 규격은 수직고 20m까지는 15톤을 적용하되, 20∼30m는 25톤을, 30∼40m는 40톤을 적용한다.

[주] ① 본 품은 교량의 점검 및 유지관리를 위해 교대 및 교각 등에 설치하는 교량점검시설(출입시설 포함)의 제작 및 설치에 적용하는 품이다.

→ 개정 6-6-3 교량점검시설 설치 [주] ① ‘보완’

② “제작”은 다음을 기준으로 한다.

㉮ 본 품은 교량점검시설의 모든 자재를 스테인리스강(stainless steel)으로 제작하는 경우를 기준한 것이므로, 이와 재질이 다른 경우에는 별도로 계상한다(단, 스테인리스강과 강재(steel)를 혼합･사용하는 경우로서 점검시설의 난간 및 출입시설에는 스테인리스강을, 나머지 부재에는 강재를 사용하는 경우에는 13.22인/톤으로 적용한다)

㉯ 본 품은 절단, 절곡, 용접 및 공장경비 등 제비용이 포함된 것이다.

㉰ 중량은 볼트･너트를 제외한 모든 강재(형강･강관･강판･발판재 등)의 중량으로 한다.

㉱ 공장에서 현장까지의 운반비용은 별도 계상한다.

㉲ 재료량은 설계에 따른다.

→ 삭제

“ 계   속 ”

6-6 교량 부대공

6-6-3 교량점검시설 설치

구분	규격	단위	점검통로 (설치연장 m당)		점검계단 (발판면적 ㎡당)
			수직고		수직고
			20m 이하	40m 이하	20m 이하	40m 이하
철공		인	0.05	0.06	0.23	0.26
보통인부		인	0.02	0.02	0.08	0.09
크 레 인	-	hr	0.11	0.13	0.66	0.79

[주] ① 본 품은 교량의 점검 및 유지관리를 위해 교대 및 교각 등에 설치하는 제작이 완료된 교량점검시설의 설치를 기준한 것이다.

② 본 품의 점검통로는 난간을 포함하며, 점검계단은 출입을 위한 경사형 계단 기준으로 계단참을 포함한다.

③ 본 품은 천공, 앵커볼트 설치, 점검시설 설치 및 고정을 포한한다.

④ 본 품은 육상에서 크레인을 이용하여 시공하는 경우를 기준한 것으로, 크레인 진입이 불가하여 비계를 설치하여 작업하는 경우 및 교량상판 위에서 작업하는 경우, 육상이 아닌 해상에서 작업하는 경우 등에 있어서는 각각의 시공방법에 맞도록 별도로 계상하여야 한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

⑥ 본 품의 크레인 규격은 다음을 기준으로 하며, 작업여건에 따라 변경할 수 있다.

수직고(m)	장 비 규 격
20m 이하 30m 이하 40m 이하	15톤급 크레인(타이어) 25톤급 크레인(타이어) 40톤급 크레인(타이어)

토목

항목	구분	현 행	개 정 사 항	비고
제6장 철근콘크리트공사		③ “설치”는 다음을 기준으로 한다. ㉮ 본 품은 육상에서 크레인을 이용하여 시공하는 경우를 기준한 것이므로, 크레인 진입이 불가하여 비계를 설치하여 작업하는 경우 및 교량상판 위에서 작업하는 경우, 육상이 아닌 해상에서 작업하는 경우 등에 있어서는 각각의 시공방법에 맞도록 별도로 계상하여야 한다. → 개정 6-6-3 교량점검시설 설치 [주] ④ ‘보완’ ㉯ 본 품의 앵커볼트(교량점검시설을 지지･고정) 설치방식은 교각 등의 콘크리트 타설전에 미리 설치하는 방식(embeded anchor)을 기준한 것이다. → 삭제 ㉰ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다. → 개정 6-6-3 교량점검시설 설치 [주] ⑤ ‘보완’ ④ 상기 형식 외 교량점검시설 제작 및 설치에 대해서는 별도 계상한다. → 삭제		토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

6-7-3 조립식PC맨홀

(개당)

구 분	단위	수 량
		D900	D1,200
특별인부	인	0.20	0.54
보통인부	인	0.52	1.22
크레인(타이어)(10ton)	hr	1.22	2.00

[주] ① 본 품은 조립식 PC맨홀을 설치하는 것으로 소운반 및 작업마무리를 포함한 작업설치 일체가 포함되어있다.

→ 개정 6-7-3 조립식 PC맨홀 [주] ①/② ‘보완’

② 터파기, 지반고르기, 되메우기, 맨홀뚜껑설치는 별도 계상한다.

→ 개정 6-7-3 조립식 PC맨홀 [주] ③ ‘이기시행’

③ 재료량은 별도계상 한다.

→ 개정 6-7-3 조립식 PC맨홀 [주] ④ ‘이기시행’

④ D900은 높이(1,000∼2,000) D1,200은 높이(2,000∼3,000) 기준이다.

→ 삭제

6-7-3 조립식 PC맨홀

(개당)

구 분	규격	단위	수 량
			D900		D1,200		D1,500		D1,800
			하부구체 + 상판	연직구체	하부구체 + 상판	연직구체	하부구체 + 상판	연직구체	하부구체 + 상판	연직구체
특별인부		인	0.48	0.25	0.64	0.33	0.80	0.41	0.96	0.46
보통인부		인	0.23	0.12	0.30	0.15	0.38	0.19	0.48	0.23
크레인	10ton	hr	0.98	0.50	1.12	0.57	1.25	0.64	1.44	0.83

[주] ① 본 품은 조립식 PC맨홀 설치를 기준한 것이다.

② 본 품의 연직구체는 1개 설치기준으로 설치수량에 따라 추가 계상한다.

③ 본 품은 맨홀 설치 및 조정, 접합부 연결(고무링, 연결핀, 모르타르 등)을 포함한다.

④ 터파기, 지반고르기, 되메우기, 맨홀뚜껑설치는 별도 계상한다.

⑤ 크레인 규격은 작업여건에 따라 변경할 수 있다.

⑥ 재료량은 별도계상 한다.

토목

2017년 적용 건설공사표준품셈

- 제8장 기계화시공 -

2017. 1.

	국토교통부
	한국건설기술연구원

편 제 – 현 행

⇨

편 제 – 개 정 사 항

번호	항목명
8-1	기계화시공 적용기준
8-2	건설기계 시공능력의 산정 기본식
8-3	불도저
8-4	리퍼(유압식)
8-5	굴삭기
8-6	트랜처
8-7	로더
8-8	셔블계굴삭기(파워셔블, 백호, 드래그라인, 크램쉘)
8-9	모터 스크레이퍼
8-10	모터 그레이더
8-11	덤프트럭
8-12	롤러
8-13	플레이트 콤팩터
8-14	래머
8-15	아스팔트 플랜트
8-16	아스팔트 살포기
8-17	아스팔트 페이버(피니셔)
8-18	스테이빌라이저(노상안정기)
8-19	크러셔
8-20	대형브레이커
8-21	압쇄기(콘크리트 소할용)
8-22	법면다짐기

번호	항목명
8-1	기계화시공 적용기준
8-2	건설기계 시공능력의 산정 기본식
8-3	불도저
8-4	리퍼(유압식)
8-5	굴삭기
8-6	트랜처
8-7	로더
- 삭 제 -
8-8	모터 스크레이퍼
8-9	모터 그레이더
8-10	덤프트럭
8-11	롤러
8-12	플레이트 콤팩터
8-13	래머
8-14	아스팔트 플랜트
- 삭 제 -
8-15	스테이빌라이저(노상안정기)
8-16	크러셔
8-17	대형브레이커
8-18	압쇄기(콘크리트 소할용)
8-19	법면다짐기

편 제 – 현 행

⇨

편 제 – 개 정 사 항

번호	항목명
8-23	노면 파쇄기
8-24	골재세척설비
8-25	콘크리트 믹서
8-26	콘크리트 배치플랜트(강제 혼합식)
8-27	콘크리트 운반
8-28	콘크리트 피니셔(포장용)
8-29	콘크리트 피니셔(중앙분리대용)
8-30	콘크리트 펌프차
8-31	기관차
8-32	경운기
8-33	디젤 파일 해머
8-34	유압 파일 해머
8-35	진동파일 해머
8-36	진동파일해머(워터제트 병용 압입공)
8-37	유압식 압입 인발기(유압식 압입 인발공)
8-38	수중펌프
8-39	터널전단면 굴착기(TBM)
8-40	펌프식 준설선
8-41	그래브 준설선
8-42	쇄암선(중추식)
8-43	이동식 임목파쇄기
8-44	하천골재재취선

번호	항목명
8-20	노면 파쇄기
8-21	골재세척설비
8-22	콘크리트 믹서
8-23	콘크리트 배치플랜트(강제 혼합식)
8-24	콘크리트 운반
- 삭 제 -
8-25	기관차
8-26	경운기
8-27	디젤 파일 해머
8-28	유압 파일 해머
8-29	진동파일 해머
8-30	진동파일해머(워터제트 병용 압입공)
8-31	유압식 압입 인발기(유압식 압입 인발공)
8-32	수중펌프
8-33	터널전단면 굴착기(TBM)
8-34	펌프식 준설선
8-35	그래브 준설선
8-36	쇄암선(중추식)
8-37	이동식 임목파쇄기
8-38	하천골재재취선

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

보완

8-1 기계화시공 적용기준

1. 건설기계 선정기준

가. 작업종류별

작업종류	건설기계 종류
벌개, 제근	불도저(레이크도우저)
굴삭	로더, 굴삭기, 불도저, 리퍼, 셔블계굴삭기(파워셔블, 백호, 드래그라인, 크램쉘)
적재	로더, 버킷식엑스커베이터, 셔블계굴삭기(파워셔블, 백호, 드래그라인, 크램쉘)
굴삭, 적재	로더, 굴삭기, 버킷식 엑스커베이터, 셔블계굴삭기 (파워셔블, 백호, 드래그라인, 크램쉘)
굴삭･운반	불도저, 스크레이퍼
운반	불도저, 덤프트럭, 벨트컨베이어
부설	불도저, 모터그레이더
함수량조절	살수차
다짐	롤러(타이어, 탬핑, 진동, 로드), 불도저, 진동콤팩터, 래머, 탬퍼
정지	불도저, 모터그레이더
도랑파기	굴삭기, 트렌처

나. 운반거리별

작업구분	운반거리	표 준
절붕･압토	평균 20m	불도저
토운반	60m이하	불도저
	60∼100m	- 불도저 - 셔블계굴삭기(백호, 셔블, 드래그라인, 크램쉘) +덤프트럭 - 로더+덤프트럭 - 굴삭기+덤프트럭 - 피견인식 스크레이퍼
	100m이상	- 셔블계굴삭기(백호, 셔블, 드래그라인, 크램쉘) +덤프트럭 - 로더+덤프트럭 - 굴삭기+덤프트럭 - 피견인식 스크레이퍼 - 모터스크레이퍼

8-1 기계화시공 적용기준

1. 건설기계 선정기준

가. 작업종류별

작업종류	건설기계 종류
벌개, 제근	불도저(레이크도우저)
굴삭	로더, 굴삭기, 불도저, 리퍼, 이하 삭제
적재	로더, 버킷식엑스커베이터, 이하 삭제
굴삭, 적재	로더, 굴삭기, 버킷식 엑스커베이터, 이하 삭제
굴삭･운반	불도저, 스크레이퍼
운반	불도저, 덤프트럭, 벨트컨베이어
부설	불도저, 모터그레이더
함수량조절	살수차
다짐	롤러(타이어, 탬핑, 진동, 로드), 불도저, 진동콤팩터, 래머, 탬퍼
정지	불도저, 모터그레이더
도랑파기	굴삭기, 트렌처

나. 운반거리별

작업구분	운반거리	표 준
절붕･압토	평균 20m	불도저
토운반	60m이하	불도저
	60∼100m	- 불도저 - 삭제 - 로더+덤프트럭 - 굴삭기+덤프트럭 - 삭제
	100m이상	- 삭제 - 로더+덤프트럭 - 굴삭기+덤프트럭 - 삭제 - 모터스크레이퍼

토목

항목	구분	현 행	개 정 사 항	비고
제8장 기계화시공	보완	8-1 기계화시공 적용기준 3. 운반 및 수송 사. 운반기계의 유류산정 트럭 또는 기타 운반기계로 기자재를 운반할 경우 적사에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 주행거리에 해당하는 유류만을 계상한다.	8-1 기계화시공 적용기준 3. 운반 및 수송 사. 운반기계의 유류산정 트럭 또는 기타 운반기계로 기자재를 운반할 경우 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상한다.	토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

삭제

8-8 셔블계굴삭기(파워셔블, 백호, 드래그라인, 크램쉘)

Q = [eqn: rm {3,600 cdot q cdot k cdot f cdot E} over {cm}]

여기서	Q	: 시간당 작업량(㎥/hr)

q	: 리퍼 또는 버킷용량(㎥)

f	: 체적환산계수

E	: 작업효율

k	: 리퍼 또는 버킷계수

cm	: 1회 싸이클 시간(초)

- 삭   제 -

토목

삭제

1. K의 값

현장조건	파 워 셔 블	백호, 크램쉘 드래그라인
용이하게 굴착할 수 있는 연한 토질로서 버킷에 산적으로 가득찰 때가 많은 조건이 좋은 모래, 보통토인 경우	1.20	1.10
위의 토질보다 약간 단단한 토질로서 버킷에 거의 가득찰 수 있는 모래, 보통토 및 조건이 좋은 점토인 경우	0.95	0.90
버킷에 가득 채우기가 어렵거나 가벼운 발파를 필요로 하는 것으로서 단단한 점토질, 점토, 역토질인 경우	0.75	0.70
버킷에 넣기 어렵고 불규칙한 공극이 생기는 것으로서 발파 또는 리퍼작업 등에 의하여 얻어진 암괴, 파쇄암, 호박돌, 역 등인 경우	0.60	0.55

[주] ① 파워셔블은 위치한 지면보다 높은데 있는 토량의 굴착에 적합하고, 백호, 드래그라인, 크램쉘 등은 특수한 경우는 제외하고는 위치한 지면보다 낮은데 있는 토량굴착에 사용되는 것이 일반이다.

② 리퍼 또는 버킷계수는 굴착하는 토질과 굴착작업의 높이 또는 깊이에 따라 다르나 작업현장 조건을 고려하여 기종이 선택되므로 특수한 경우를 제외하고는 굴착작업의 높이 또는 깊이는 리퍼 또는 버킷계수에 영향을 주지 않는 것으로 한다.

③ 굴착기계는 굴착된 토량을 운반하는 기계와는 상태가 작업상 균형이 유지되고 굴착기계에 대한 운반기계의 적재높이가 적합토록 이루어져야 좋다.

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

삭제

2. 파워셔블 E의 값

토 질 명	현장조건
	양호	보통	불량
모 래	0.85	0.70	0.60
사질토, 보통토	0.60	0.50	0.40
역질토, 호박돌	0.50	0.40	0.30
점질토, 점토	0.40	0.30	0.20
파쇄 암	0.40	0.30	0.20

[주] ① 양호 : 작업현장이 넓고 굴착 높이가 2∼5m로서 지형, 배수, 운반기계의 적재높이, 운반기계의 조합 등이 좋은 상태

② 보통 : 위의 조건보다는 못하나 작업진행에 지장이 없는 상태

③ 불량 : 작업현장이 넓지 않고 굴착 높이가 너무 낮거나 높으며, 지형, 배수, 운반기계의 조합 등이 불량하여 작업에 영향을 주는 상태

- 삭   제 -

토목

삭제

3. 백호 E의 값

토질명	현 장 조 건
	양호	보통	불량
모래, 사질토, 보통토, 역질토, 호박돌, 점질토, 점토, 파쇄암	0.75	0.60	0.45

[주] ① 양호 : 굴착깊이 1∼4m 정도에서 토질이 단단하지 않으며 장애물이 없이 작업이 순조롭게 진행될 때

② 보통 : 양호한 현장조건과 불량한 현장조건의 중간으로 판단되는 상태

③  불량  :  굴착깊이가 너무 깊거나 얕고 토질이 단단하며 장애물 등이 있어서 작업에 곤란을 느끼는 상태

- 삭   제 -

토목

삭제

4. 드래그라인, 크램쉘 E의 값

토질명	현 장 조 건
	양호	보통	불량
사질토, 보통토	0.75	0.60	0.45
역질토, 호박돌	0.60	0.50	0.40
점질토, 점토, 파쇄암	0.30	0.25	0.20

[주]  ①  양호  :  작업현장이 넓고 토질이 단단하지 않으며 굴착깊이 0∼3m 정도에서 작업이 순조롭게 진행될 때를 말함

② 보통  :  양호한 현장조건과 불량한 현장조건의 중간으로 판단되는 상태를 말함.

③  불량  :  작업장소가 협소하고 수중굴착으로 굴착깊이가 깊으며 토질이 단단하며 작업에 곤란을 느끼는 상태

④ 파쇄암은 크램쉘 작업인 경우에만 해당한다.

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

삭제

5. 백호 cm의 값(초)

선회각도	45ﾟ	90ﾟ	135ﾟ	180ﾟ
cm(초)	27	30	33	36

- 삭   제 -

토목

삭제

6. 파워셔블 cm의 값(초)

선회각도 용량(㎥) 굴착정도	90ﾟ
	0.38	0.57	0.76	0.95	1.15	1.53	1.91	2.29	3.06
용이한 굴착	15	18	18	18	18	18	20	22	24
보통의 굴착	18	20	20	20	20	20	22	24	26
곤란한 굴착	24	26	26	26	26	26	28	30	32

- 삭   제 -

토목

삭제

7. 크램쉘 및 드래그라인 cm의 값(초)

선회각도 용량(㎥) 굴착정도	110ﾟ
	0.38	0.57	0.76	0.95	1.15	1.53	1.91	2.29	3.06
용이한 굴착	20	22	24	24	24	28	28	30	32
보통의 굴착	24	26	28	28	28	33	34	35	38
곤란한 굴착	30	32	35	35	35	41	41	42	45

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

삭제

8. 선회각도에 따른 cm의 보정계수

선회각도 구분	45ﾟ	60ﾟ	75ﾟ	90ﾟ	120ﾟ	150ﾟ	180ﾟ
파 워 셔 블	0.80	0.86	0.93	1.00	1.14	1.27	1.41
드래그라인및크램쉘	0.78	0.85	0.90	0.95	1.03	1.12	1.17

[주] 크램쉘의 우물통 작업인 경우 90ﾟ 선회 각도에서 싸이클 작업에 소요되는 시간은 크램쉘 규격에 따라 아래와 같다.

버킷표준용량 작업단계	㎥	0.57 이하	0.76	1.15	1.53	1.91	2.29	2.67	3.06
기본동작시간	초	22∼27	25∼31	25∼31	28∼34	30∼36	32∼39	32∼39	33∼41
사일로에 넣는 시간	초	3∼4	4∼5	4∼5	4∼5	4∼5	5∼6	5∼6	5∼6
낙하후 굴착에 소요되는 추가시간	초	5∼6	6∼8	6∼8	7∼8	7∼8	8∼10	8∼10	8∼11
굴착깊이 1m 마다의 추가시간	초	1.5	1.45	1.3	1.25	1.25	0.9	0.85	0.8

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

보완

8-11 덤프트럭

Q = [eqn: rm { { 60 CDOT q CDOT f CDOT E } over { cm } }]

q = [eqn: rm { { T } over { gamma _{ t } } CDOT L }]

여기서	Q	: 1시간당 작업량(㎥/hr)

q	: 흐트러진 상태의 덤프트럭 1회 적재량(㎥)

Υt	: 자연상태에서의 토석의 단위 중량(습윤밀도)(t/㎥)

T	: 덤프트럭의 적재용량(ton)

L	: 체적환산계수에서의 체적변화율

L = [eqn: { 흐트러진~상태의~체적( rm { m^{ 3 } ) } } over { 자연상태의~체적( rm { m^{ 3 } ) } }]

f	: 체적환산계수

E	: 작업효율(0.9)

cm	: 1회 싸이클시간(분)

cm = t1+t2+t3+t4+t5

8-11 덤프트럭

Q = [eqn: rm { { 60 CDOT q CDOT f CDOT E } over { cm } }]

q = [eqn: rm { { T } over { gamma _{ t } } CDOT L }]

여기서	Q	: 1시간당 작업량(㎥/hr)

q	: 흐트러진 상태의 덤프트럭 1회 적재량(㎥)

Υt	: 자연상태에서의 토석의 단위 중량(습윤밀도)(t/㎥)

T	: 덤프트럭의 적재용량(ton)

L	: 체적환산계수에서의 체적변화율

L = [eqn: { 흐트러진~상태의~체적( rm { m^{ 3 } ) } } over { 자연상태의~체적( rm { m^{ 3 } ) } }]

f	: 체적환산계수

E	: 작업효율(0.9)

cm	: 1회 싸이클시간(분)

cm = t1+t2+t3+t4+t5+t6

토목

신설

7. 세륜기통과시간(t6)

세륜시간(min)	1.5

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

보완

8-12 롤러

Q = 1,000･V･W･D･E･[eqn: rm { { f } over { N } }]

A = 1,000･V･W･E･[eqn: rm { { 1 } over { N } }]

여기서	Q	: 시간당 다짐토량(㎥/hr)

A	: 시간당 다짐면적(㎡/hr)

W	: 롤러의 유효폭(m)

D	: 펴는 흙의 두께(m)

f	: 체적환산계수

N	: 소요다짐횟수

V	: 다짐속도(㎞/hr)

E	: 작업효율

[주] ① 다짐기계는 토질 및 지형조건에 따라 다음의 표를 참조하여 다짐효과를 얻을 수 있도록 선정하여야 한다.

다짐기계의 종류	암괴 호박돌 역	역질토	모래	사질토	점 토 및 점질토	역이섞인 점토 및 점질토	연약한 점토및 점질토	단단한 점토및 점질토
로드롤러	B	A	A	A	B	B	C	C
자주식타이어롤러	B	A	A	A	A	A	C	B
견인식타이어롤러	B	A	A	A	A	A	C	B
탬핑롤러	C	C	B	B	B	B	C	A
진동롤러	A	A	A	A	C	B	C	C
콤팩터	A	A	A	A	C	B	C	C
래 머	B	A	A	A	B	B	C	C
불도저	A	A	A	A	B	B	C	A
습 지 불 도 저	C	C	C	C	B	B	A	C

㉮ 여기서 A는 효과적이고 적당한 방법이며, B는 따로 적당한 기계가 없을 때 사용하여야 하고, C는 부적당하다.

㉯ 로드롤러(머캐덤, 탠덤)는 노면 등의 마무리에 사용한다.

㉰ 타이어롤러로 하는 흙쌓기 부분의 다짐에는 일반으로 자주식을 사용하는 것이 경제적이나 지형이 복잡하고 여러 공구를 동시에 작업할 경우 등에는 견인식을 사용하는 것도 검토할 필요가 있다.

㉱ 견인식 타이어롤러를 흙쌓기 비탈면의 다짐에 사용할 때에는 비탈면의 길이가 5∼6m 정도일 경우에 작업이 능률적이다.

㉲ 불도저를 흙쌓기 비탈면의 다짐에 사용할 때에는 비탈면의 경사가 1:1.8 보다 낮아질 경우에 능률적이다.

㉳ 래머콤팩터는 구조물의 뒤채움 등 국부적인 장소의 다짐에 사용한다.

㉴ 습지도우저를 흙쌓기 비탈면의 다짐에 사용할 경우에는 qc(콘지수)=4이하의 대단히 연약한 점질토 점토 등에 적용한다.

8-12 롤러

Q = 1,000･V･W･D･E･[eqn: rm { { f } over { N } }]

A = 1,000･V･W･E･[eqn: rm { { 1 } over { N } }]

여기서	Q	: 시간당 다짐토량(㎥/hr)

A	: 시간당 다짐면적(㎡/hr)

W	: 롤러의 유효폭(m)

D	: 펴는 흙의 두께(m)

f	: 체적환산계수

N	: 소요다짐횟수

V	: 다짐속도(㎞/hr)

E	: 작업효율

[주] ① 다짐기계는 토질 및 지형조건에 따라 다음의 표를 참조하여 다짐효과를 얻을 수 있도록 선정하여야 한다.

다짐기계의 종류	암괴 호박돌 역	역질토	모래	사질토	점 토 및 점질토	역이섞인 점토 및 점질토	연약한 점토및 점질토	단단한 점토및 점질토
로드롤러	B	A	A	A	B	B	C	C
자주식타이어롤러	B	A	A	A	A	A	C	B
삭제	-	-	-	-	-	-	-	-
탬핑롤러	C	C	B	B	B	B	C	A
진동롤러	A	A	A	A	C	B	C	C
콤팩터	A	A	A	A	C	B	C	C
래 머	B	A	A	A	B	B	C	C
불도저	A	A	A	A	B	B	C	A
습 지 불 도 저	C	C	C	C	B	B	A	C

㉮ 여기서 A는 효과적이고 적당한 방법이며, B는 따로 적당한 기계가 없을 때 사용하여야 하고, C는 부적당하다.

㉯ 로드롤러(머캐덤, 탠덤)는 노면 등의 마무리에 사용한다.

㉰ 타이어롤러로 하는 흙쌓기 부분의 다짐에는 일반으로 자주식을 사용하는 것이 경제적이나 지형이 복잡하고 여러 공구를 동시에 작업할 경우 등에는 견인식을 사용하는 것도 검토할 필요가 있다.

- 삭  제 -

㉱ 불도저를 흙쌓기 비탈면의 다짐에 사용할 때에는 비탈면의 경사가 1:1.8 보다 낮아질 경우에 능률적이다.

㉲ 래머콤팩터는 구조물의 뒤채움 등 국부적인 장소의 다짐에 사용한다.

㉳ 습지도우저를 흙쌓기 비탈면의 다짐에 사용할 경우에는 qc(콘지수)=4이하의 대단히 연약한 점질토 점토 등에 적용한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

보완

1. 다짐기계의 유효다짐폭(W)과 다짐속도(V)

다짐기계	규 격 (ton)	유효다짐폭 (m)	표준다짐속도(㎞/hr)
			노체, 축제 노 상	보조기층 기층	표층
머캐덤롤러	6∼8 8∼10 10∼12 12∼15	0.7 0.8 0.8 0.9	2.0	2.5	3.0
탠덤롤러	5∼8 8∼10 10∼14	1.1 1.1 1.2	2.0	-	3.0
타이어롤러	5∼8 8∼15 15∼25	1.4 1.8 2.0	2.5	4.0	4.0
불도저	12 19	0.7 0.8	4.0	-	-
자주식, 양족식 롤러	19	1.8	4.0	-	-
견인식, 양족식 롤러(드럼2개 기준)	3∼6 7∼10 11∼20	2.7 3.1 3.4	4.0	-	-
진동 롤러 (자주식)	2.5 4.4 6.0 10.0	0.7 0.8 1.5 1.9	1.0 1.0 3.0 4.0	1.0 1.0 3.0 4.0

1. 다짐기계의 유효다짐폭(W)과 다짐속도(V)

다짐기계	규 격 (ton)	유효다짐폭 (m)	표준다짐속도(㎞/hr)
			노체, 축제 노 상	보조기층 기층	표층
머캐덤롤러	6∼8 8∼10 10∼12 12∼15	0.7 0.8 0.8 0.9	2.0	2.5	3.0
탠덤롤러	5∼8 8∼10 10∼14	1.1 1.1 1.2	2.0	-	3.0
타이어롤러	5∼8 8∼15 15∼25	1.4 1.8 2.0	2.5	4.0	4.0
불도저	12 19	0.7 0.8	4.0	-	-
자주식, 양족식 롤러	19	1.8	4.0	-	-
삭 제	-	-	-	-	-
진동 롤러 (자주식)	2.5 4.4 6.0 10.0	0.7 0.8 1.5 1.9	1.0 1.0 3.0 4.0	1.0 1.0 3.0 4.0

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

보완

3. 작업효율(E)

현장조건 공종 다짐기계		양호	보통	불량
표층	머캐덤롤러 타이어롤러 탠덤롤러	0.75 0.65 0.60	0.55 0.45 0.45	0.35 0.25 0.30
기층 보조기층	진동롤러 머캐덤롤러 타이어롤러	0.80 0.70 0.60	0.60 0.50 0.40	0.40 0.30 0.20
노체 축제 노상	불도우저 타이어롤러 진동롤러 양족식롤러 (자 주 식,견 인 식)	0.80	0.60	0.40

[주] 작업효율의 결정은 다음 사항을 고려하여 이들의 조건이 보통의 경우보다 좋은 때에는 양호측으로 나쁠 때에는 불량측의 값을 택한다.

① 흙쌓기 재료 또는 노반재료의 공급능력과 다짐 작업과의 균형(평형 또는 공급능력이 상회하였을 때에는 작업효율은 양호)

② 흙쌓기 재료 또는 노반재료의 토질, 함수비, 입도 배합 등의 적정

③ 작업현장에서의 작업방해의 정도

④ 작업현장의 요철(凹凸) 굴곡 등 지형상황

3. 작업효율(E)

현장조건 공종 다짐기계		양호	보통	불량
표층	머캐덤롤러 타이어롤러 탠덤롤러	0.75 0.65 0.60	0.55 0.45 0.45	0.35 0.25 0.30
기층 보조기층	진동롤러 머캐덤롤러 타이어롤러	0.80 0.70 0.60	0.60 0.50 0.40	0.40 0.30 0.20
노체 축제 노상	불도우저 타이어롤러 진동롤러 양족식롤러(자 주 식)	0.80	0.60	0.40

[주] 작업효율의 결정은 다음 사항을 고려하여 이들의 조건이 보통의 경우보다 좋은 때에는 양호측으로 나쁠 때에는 불량측의 값을 택한다.

① 흙쌓기 재료 또는 노반재료의 공급능력과 다짐 작업과의 균형(평형 또는 공급능력이 상회하였을 때에는 작업효율은 양호)

② 흙쌓기 재료 또는 노반재료의 토질, 함수비, 입도 배합 등의 적정

③ 작업현장에서의 작업방해의 정도

④ 작업현장의 요철(凹凸) 굴곡 등 지형상황

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

삭제

8-16 아스팔트 살포기

기계명	아스팔트디스트리뷰터(트럭 적재식스프레이어의 폭 2.4m)		아스팔트스프레이어 (수동식 살포기)
규격(탱크용량)(ℓ) 최대살포능력(ℓ/분)	3,000 350	3,800 350	300 35	400 35

V = [eqn: rm { { Q } over { D CDOT L } }]

여기서	V	: 소요주행속도(m/분)

Q	: 전 스프레이어에서의 토출량(ℓ/분)

L	: 전 스프레이어의 살포폭(m)

D	: 단위 면적당 소요 살포량(ℓ/㎡)

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

삭제

8-17 아스팔트 페이버(피니셔)

Q = V×W×t×d×E

여기서	Q	: 시간당 포설량(ton/hr)

V	: 아스팔트 페이버의 평균 작업속도(m/hr)

W	: 아스팔트 페이버의 시공폭(m)

t	: 포설 마무리 두께(m)

d	: 다져진 후의 밀도(ton/㎥)

E	: 작업효율(0.8)

- 삭   제 -

토목

삭제

1. 아스팔트 페이버의 시공폭(W)

규격	표준마무리폭(m)	액스텐숀을 붙인 폭
2.5 3.0	2.5 3.0	3.5 4.2

- 삭   제 -

토목

삭제

2. 아스팔트 페이버의 평균 작업속도(V)

규 격(m)	작업속도(m/hr)
2.5 3.0	120 180

- 삭   제 -

토목

삭제

3. 아스팔트 플랜트와 아스팔트 페이버의 조합

Qp = Qf･N

여기서	Qp	: 아스팔트 플랜트의 시간당 생산량(ton/hr)

Qf	: 아스팔트 페이버의 시간당 포설량(ton/hr)

N	: 아스팔트 페이버의 소요대수

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

보완

8-20 대형브레이커

2. 작업능력

가. 구조물 헐기(㎥ / hr)

구분	무근 구조물	철근 구조물
구조물의 평균두께 30㎝ 미만	3.3∼5.9	1.6∼3.3
구조물의 평균두께 30㎝ 이상	2.6∼4.6	1.4∼2.7
간이철근 구조물	2.8∼5.0	-
교량상부 강교슬래브	-	1.8∼3.7
아스콘 포장 30cm 미만	16.0
아스콘 포장 30cm 이상	12.5

[주] ① 본 품은 도로(콘크리트, 아스콘), 하천, 해안 사방공사의 기설 콘크리트 및 구조물의 헐기품이다.

② 터파기, 되메우기, 파쇄물 집적 및 소운반, 싣기 및 운반 등은 포함되지 않았으므로 별도 계상한다.

③ 작업보조로서 보통인부 1인을 별도 계상한다.

④ 철근절단 및 절단기 손료는 별도 계산한다.

⑤ 굴삭기 0.4㎥을 조합 사용하는 경우는 상기 작업능력의 하한치를 적용한다.(아크콘 포장 제외)

⑥ 인구 밀집지역의 소규모 지선도로 포장깨기에는 0.2㎥ 굴삭기를 조합사용할 수 있으며 이때의 작업능력은 1.75㎥/hr를 적용한다.(아스콘 포장 제외)

8-20 대형브레이커

2. 작업능력

가. 구조물 헐기(㎥ / hr)

구분	무근 구조물	철근 구조물
- 현행과 동일 -

[주] ①∼⑥ 현행과 동일

⑦ 굴삭기(0.4㎥ 이하)로 아스콘 포장 깨기를 하는 경우 다음을 기준으로 적용한다.

구분	규격	단위	수량	비 고
굴삭기+브레이커	0.4㎥	㎥/hr	6.9	두께 20㎝이하
	0.2㎥	㎥/hr	4.1

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

삭제

8-28 콘크리트 피니셔(포장용)

Q = 60×W×t×V×E

여기서	Q	: 시간당 포설량(㎥ / hr)

W	: 콘크리트 피니셔의 시공폭(m)

t	: 포설마무리 두께

V	: 콘크리트 피니셔의 평균작업속도(m / min)

E	: 작업효율

- 삭   제 -

토목

삭제

1. 작업속도(V)

1.5m / min(콘크리트 스프레더+콘크리트 피니셔 조합시)

0.9m / min(콘크리트 피니셔 단독포설)

- 삭   제 -

토목

삭제

2. 작업효율(E)

조 건		현 장 조 건
		양호	보통	불량
도로	교통통제 일방통행	0.9 0.7	0.7 0.5	0.5 0.3
터널		0.7	0.5	0.3

[주] ① 4차선 이상의 신설도로의 포장인 경우는 양호로 적용한다.

② 4차선 이상 포장은 교통통제, 2차선 이하 포장은 일방통행 적용을 원칙으로 한다.

③ 고속도로 신설공사인 경우 콘크리트 스프레더 사용을 원칙으로 한다.

- 삭   제 -

토목

삭제

3. 콘크리트 피니셔의 시공폭(W)

규격(kW)	표준마무리 폭(m)	엑스텐숀을 붙인폭(m)
74.6	4.5	-
160.4	7.95	9.1
168.5	7.95	11.5
299.9	8.2	16.0

[주] 콘크리트 피니셔 및 배치플랜트 등 관련장비는 합리적인 장비조합이 되도록 한다.

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

삭제

8-29 콘크리트 피니셔(중앙분리대용)('04년 보완)

Q = 60×q×V×E

여기서	Q	: 시간당 포설량(㎥ / hr)

q	: 단위 m당 포설량(㎥ / hr)
(q=A×m)

A	: 중앙분리대의 단면적(㎡)

V	: 작업속도(m/분)

E	: 작업효율

- 삭   제 -

토목

삭제

1. 작업속도(V)

중앙분리대 높이	0.81m	1.27m
작업속도(m/분)	0.8	0.4

- 삭   제 -

토목

삭제

2. 작업효율(E)

조건		현 장 조 건
		양 호	보 통	불 량
도로	교통통제	0.9	0.7	0.5
	일방통행	0.7	0.5	0.3

[주] ① 본 품은 고속도로 중앙분리대 작업에 적용한다.

② 중앙분리대 설치 및 유도선 설치인부는 별도 계상한다.

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

삭제

8-30 콘크리트 펌프차

1. 작업능력(80㎥/hr급)

(㎥/hr)

구조물별		50㎥미만	50∼100㎥미만	100㎥∼300㎥미만	300㎥이상
	1일 타설량 슬럼프(cm)
무근구조물	21	33.2	47.1	55.2	69.2
	18	26.6	37.7	44.2	55.4
	15	21.2	30.1	35.4	44.3
	8∼12	18.8	26.7	31.4	39.4
철근구조물	21	27.7	41.6	49.9	63.0
	18	22.1	33.1	39.8	50.4
	15	17.7	26.6	31.9	40.3
	8∼12	15.7	23.5	28.3	35.8

[주] ① 1일 타설랑은 구조물이 1일평균 타설량으로 2개이상의 구조물을 1일내에 작업하는 경우는 동일군으로 한다.

② 작업능력은 골재입경, 콘크리트 압송높이, 콘크리트 압송수평거리, 압송타설의 연속, 비연속 등의 조건에 따라 ±20%의 내에서 증감할 수 있다.

③ 붐 및 관경은 슬럼프값, 골재입경, 현장조건에 따라 선정한다.

④ 압송콘크리트의 골재치수는 자연자갈의 경우 20∼40mm를, 쇄석의 경우 20∼30mm를 기준한 것이다.

⑤ 콘크리트 펌프차의 붐타설은, 높이 H≦15m, 수평거리 Z≦15m의 경우에 적용하고, 배관타설은 상기범위 및 붐타설이 곤란한 경우, 혹은 현장조건에 따라 배관타설이 적당한 경우에 적용한다.

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

삭제

2. 콘크리트 펌프차 타설인부

(인 / 10㎥)

타설구분

구조물종류

콘크리트공

보통인부

붐 타 설

무근구조물

0.44

0.21

철근구조물

0.49

0.24

배관타설

무근구조물

0.74

0.41

철근구조물

0.81

0.46

비고

- 본 품은 양생이 포함되지 않은 것이므로 양생이 필요한 경우에는 다음에 따라 계상한다. 단, 다음의 양생품은 물을 뿌려 양생하는 정도의 일반양생을 기준한 것이므로, 특수양생의 경우에는 별도 계상한다.

(10㎥당)

구분	단위	무근구조물	철근구조물
보통인부	인	0.22	0.07
제 잡 비 (양생재료, 공구손료)	%	31	41

- 상기 배관타설품은 압송관 조립, 철거인력품(40m정도)이 포함된 것이며, 40m이상의 압송관 조립, 철거를 필요로 하는 경우에는 다음표에 의거 별도 가산한다.

(m당)

종별	직종	품		계
		조립	철거
압송관	비계공	0.009	0.006	0.015

* 압송관의 고정비계를 필요로 하는 경우에는 설치 및 철거비를 별도 계상함

* 소운반은 별도 계상함

[주] 본 품은 다짐이 포함된 것이며, 다짐을 위한 콘크리트진동기 등의 기계경비는 콘크리트펌프차의 기계손료 및 운전경비와 콘크리트타설 인력품의 합계액의 1%까지 계상한다.

- 삭   제 -

토목

삭제

3. 수송비는 별도 계상한다.(수송시 속도는 20km / h로 한다.)

- 삭   제 -

토목

2017년 적용 건설공사표준품셈

- 제9장 기계경비 -

2017. 1.

	국토교통부
	한국건설기술연구원

항목	구분	현 행	개 정 사 항	비고
제9장 기계경비	보완	9-1 건설기계의 경비산정 3. 운반기계의 유류산정 트럭 또는 기타 운반기계로 기자재를 운반할 경우 적사에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 주행거리에 해당하는 유류만을 계상한다.	9-1 건설기계의 경비산정 3. 운반기계의 유류산정 트럭 또는 기타 운반기계로 기자재를 운반할 경우 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상한다.	토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제9장

기계경비

보완

9-2 손료산정

(1306) 진동롤러(자주식)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간표준 가동시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
1306-0025	2.5	7,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,286	857	614	2,757
0044	4.4	7,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,286	857	614	2,757
0060	6	7,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,286	857	614	2,757
0100	10	7,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,286	857	614	2,757

9-2 손료산정

(1306) 진동롤러(자주식)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간표준 가동시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
1306-0025	2.5	7,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,286	857	614	2,757
0044	4.4	7,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,286	857	614	2,757
0060	6	7,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,286	857	614	2,757
0100	10	7,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,286	857	614	2,757
0120	12	7,000	1,000	0.9	0.6	0.1	1,286	857	614	2,757

토목

삭제

(1307) 진동롤러(피견인식)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간표준 가동시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
1307-0001	1	10,000	1,000	0.9	0.55	0.1	900	550	595	2,045
0002	2	10,000	1,000	0.9	0.55	0.1	900	550	595	2,045
0003	3	10,000	1,000	0.9	0.55	0.1	900	550	595	2,045
0004	4	10,000	1,000	0.9	0.55	0.1	900	550	595	2,045
0005	5	10,000	1,000	0.9	0.55	0.1	900	550	595	2,045
0006	6	10,000	1,000	0.9	0.55	0.1	900	550	595	2,045
0008	8	10,000	1,000	0.9	0.55	0.1	900	550	595	2,045
0009	9	10,000	1,000	0.9	0.55	0.1	900	550	595	2,045
0010	10	10,000	1,000	0.9	0.55	0.1	900	550	595	2,045
0011	11	10,000	1,000	0.9	0.55	0.1	900	550	595	2,045

[주] 규격은 자체중량을 말한다.

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제9장

기계경비

삭제

(1407) 타이어 롤러(피견인식)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간표준 가동시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
1407-0001	1	9,000	1,000	0.9	0.3	0.1	1,000	333	600	1,933
0002	2	9,000	1,000	0.9	0.3	0.1	1,000	333	600	1,933
0007	7	9,000	1,000	0.9	0.3	0.1	1,000	333	600	1,933
0008	8	9,000	1,000	0.9	0.3	0.1	1,000	333	600	1,933
0010	10	9,000	1,000	0.9	0.3	0.1	1,000	333	600	1,933
0014	14	9,000	1,000	0.9	0.3	0.1	1,000	333	600	1,933
0017	17	9,000	1,000	0.9	0.3	0.1	1,000	333	600	1,933
0018	18	9,000	1,000	0.9	0.3	0.1	1,000	333	600	1,933
0019	19	9,000	1,000	0.9	0.3	0.1	1,000	333	600	1,933
0034	34	9,000	1,000	0.9	0.3	0.1	1,000	333	600	1,933

[주] ① 규격은 자체중량을 말한다.

②  모래 등 하중을 추가하면 능력이 증가되므로 함용적을 고려한 중량으로 환산하여야 한다.

- 삭   제 -

토목

삭제

(1507) 양족식 롤러(피견인식)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간표준 가동시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
1507-0003	3	11,000	1,000	0.9	0.25	0.1	818	227	591	1,636
0007	7	11,000	1,000	0.9	0.25	0.1	818	227	591	1,636
0009	9	11,000	1,000	0.9	0.25	0.1	818	227	591	1,636
0011	11	11,000	1,000	0.9	0.25	0.1	818	227	591	1,636
0013	13	11,000	1,000	0.9	0.25	0.1	818	227	591	1,636
0014	14	11,000	1,000	0.9	0.25	0.1	818	227	591	1,636
0020	20	11,000	1,000	0.9	0.25	0.1	818	227	591	1,636

[주] 규격은 자체중량을 말한다.

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제9장

기계경비

삭제

(1509) 양족식 진동 롤러(피견인식)

분류 번호	규격 (ton)	내용 시간	연간표준 가동시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
1509-0002	2	11,000	1,000	0.9	0.55	0.1	818	500	591	1,909
0003	3	11,000	1,000	0.9	0.55	0.1	818	500	591	1,909
0004	4	11,000	1,000	0.9	0.55	0.1	818	500	591	1,909
0006	6	11,000	1,000	0.9	0.55	0.1	818	500	591	1,909
0008	8	11,000	1,000	0.9	0.55	0.1	818	500	591	1,909
0009	9	11,000	1,000	0.9	0.55	0.1	818	500	591	1,909

[주] 규격은 자체중량을 말한다.

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제9장

기계경비

삭제

(2110) 크레인 부수물

분류번호	명 칭	규격(㎥)	내용시간	시 간 당(10-7)
2111-0029	셔블	0.29	9,000	1,000
0038	〃	0.38	9,000	1,000
0057	〃	0.57	9,000	1,000
0076	〃	0.76	9,000	1,000
0115	〃	1.15	9,000	1,000
0153	〃	1.53	9,000	1,000
0191	〃	1.91	9,000	1,000
0229	〃	2.29	9,000	1,000
0268	〃	2.68	9,000	1,000
2112-0029	백호	0.29	9,000	1,000
0038	〃	0.38	9,000	1,000
0057	〃	0.57	9,000	1,000
0076	〃	0.76	9,000	1,000
0115	〃	1.15	9,000	1,000
0153	〃	1.53	9,000	1,000
0191	〃	1.91	9,000	1,000
0229	〃	2.29	9,000	1,000
0268	〃	2.68	9,000	1,000
2113-0029	드래그라인	0.29	6,000	1,500
0038	〃	0.38	6,000	1,500
0057	〃	0.57	6,000	1,500
0076	〃	0.76	6,000	1,500
0115	〃	1.15	6,000	1,500
0153	〃	1.53	6,000	1,500
0191	〃	1.91	6,000	1,500
0229	〃	2.29	6,000	1,500
0268	〃	2.68	6,000	1,500
2114-0029	크램쉘	0.29	6,000	1,500
0038	〃	0.38	6,000	1,500
0057	〃	0.57	6,000	1,500
0076	〃	0.76	6,000	1,500
0115	〃	1.15	6,000	1,500
0153	〃	1.53	6,000	1,500
0191	〃	1.91	6,000	1,500
0229	〃	2.29	6,000	1,500
0268	〃	2.68	6,000	1,500

- 삭   제 -

토목

보완

(3201) 아스팔트 페이버(피니셔)

분류 번호	규격 (m)	내용 시간	연간표준 가동시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
3201-0003	3	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294

(3201) 아스팔트 피니셔

분류 번호	규격 (m)	내용 시간	연간표준 가동시간	상각 비율	정비 비율	연간 관리 비율	시 간 당(10-7)
							상각비 계수	정비비 계수	관리비 계수	계
3201-0001	1.7	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294
-0003	3	8,000	1,000	0.9	0.45	0.1	1,125	563	606	2,294

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제9장

기계경비

신설

(5220) 소형브레이커(전기식)

분류번호	규격	내용시간	시 간 당(10-7)
5220-0015	1.5kW	8,000	2,500

토목

보완

9-3 운전경비산정

분류번호	기계명	규격	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)
1306-0025	진동롤러(자주식)	2.5ton	2.3	13	1
0044		4.4ton	3.2	13	1
0060		6	11.6	30	1
0100		10	14.4	30	1

9-3 운전경비산정

분류번호	기계명	규격	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)
1306-0025	진동롤러(자주식)	2.5ton	2.3	13	1
0044		4.4ton	3.2	13	1
0060		6	11.6	30	1
0100		10	14.4	30	1
0120		12	15.8	30	1

토목

삭제

분류번호	기계명	규격	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)
1509-0002	양족식진동롤러 (피견인식)	2ton	4.3	8	-
0003		3	4.8	8	-
0004		4	4.8	8	-
0006		6	4.8	8	-
0008		8	7.0	7	-
0009		9	9.1	7	-

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제9장

기계경비

보완

분류번호	기계명	규격	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)
3201-0003	아스팔트 페이퍼	3m	13	7	1

분류번호	기계명	규격	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)
3201-0001	아스팔트 피니셔	1.7m	7	7	1
-0003	아스팔트 피니셔	3m	13	7	1

토목

신설

분류번호	기계명	규격	주연료 (ℓ/hr)	잡재료 (주연료의%)	조종원 (인/일)
7210-0845	동력분무기	4.85㎾	휘발유7.5	20	-

토목

보완

[주] ①～ ④ 내용생략

⑤ 기중기에 셔블, 백호(무한궤도 제외), 드래그라인, 크램쉘을 부착하여 사용하는 경우의 티스소모량은 다음과 같다.

기 종	티스소모율	시간당 티스 소모 경비
셔블 백호, 드래그라인, 크램쉘	0.003 0.002	티스개당가격×티스갯수 ×소모율

⑥ 내용생략

⑦ 비 자주식(피견인식) 스크레이퍼의 소모재료 계산이 필요한 경우의 소모율은 다음을 적용한다.

구분	삽날	귀삽날	타이어	시간당소모경비
소모율	0.001	0.001	0.00025	개당가격×갯수×소모율

[주] ①～ ④ 현행과 동일

⑤ 삭제

⑥ 내용생략

⑦ 삭제

토목

2017년 적용 건설공사표준품셈

- 제10장 도로포장 및 유지 -

2017. 1.

	국토교통부
	한국건설기술연구원

편 제 – 현 행

⇨

편 제 – 개 정 사 항

대분류	중분류	세분류
10-1 공통사항	10-1-1 포장포설 준비작업
	10-1-2 교통통제 및 안전처리
10-2 포장하부	10-2-1 동상방지층	1. 인력식 소규모 장비사용 시공
		2. 기계시공-길어깨 포장
		3. 기계시공-본선포장
	10-2-2 보조기층	1. 인력식 소규모 장비사용 시공
		2. 기계시공 - 길어깨 포장
		3. 기계시공 - 본선포장
	10-2-3 기층	1. 린 콘크리트 기층
		2. 아스팔트 기층(BB층)
		3. 입도조정기층공	가. 인력식
			나. 길어깨기계시공
			다. 본선기계시공
10-3 신설포장	10-3-1 아스팔트 표층	1. 텍코팅 및 프라임 코팅
		2. 일반아스팔트포장	가. 인력식
			나. 기계시공
		3. 특수아스팔트포장	가. 개질아스팔트
			나. 투배수성 포장
	10-3-2 콘크리트표층	1. 인력시공
		2. 기계시공
		3. 포장절단 및 줄눈	가. 포장절단
			나. 줄눈설치
		4. 콘크리트포장 거푸집
		5. 콘크리트배치플랜트	가. 부지조성
			나. 조립철거
			다. 골재적치장
			라. 보조인부
10-5 부대공	10-5-2 방음벽	1. 앵커볼트설치
		2. 지주설치
		3. 방음판설치	가. 금속제 방음판
			나. 투명방음판
	10-5-3 경계블록	1. 보차도경계석
		2. 보차도 및 도로경계블록
10-6 교통안전공	10-6-1 교통안전시설	2. 분리대병(鋲) 제거공
		3. 분리대병(鋲) 설치공
		4. 시선유도표지 설치 및 철거
	10-6-3 가드레일	1. 준비 및 지주설치 작업
		2. 간격재 조립 및 판 설치
	10-6-4 중앙분리대	1. 가드레일식
		2. 콘크리트 포설식

대분류	중분류	세분류
10-1 공통사항	10-1-1 교통통제 및 안전처리
	10-1-2 포장포설 준비작업
10-2 포장하부	10-2-1 동상방지층	1. 인력식 소규모 장비사용 시공
		2. 기계시공-길어깨 포장
		3. 기계시공-본선 포장
	10-2-2 보조기층	1. 인력식 소규모 장비사용 시공
		2. 기계시공-길어깨 포장
		3. 기계시공-본선 포장
	10-2-3 입도조정기층	1. 인력식 소규모 장비사용 시공
		2. 기계시공-길어깨 포장
		3. 기계시공-본선 포장
10-3 신설포장	10-3-1 아스팔트 포장	1. 텍코팅 및 프라임 코팅
		2. 아스팔트 기층(BB층)
		3. 일반아스팔트 표층	가. 인력식 소규모
			나. 기계식 소규모 장비
			다. 기계시공
		4. 특수아스팔트
			가. 개질아스팔트
			나. 투배수성 포장
	10-3-2 콘크리트 포장	1. 린 콘크리트 기층
		2. 콘크리트 표층	가. 인력시공
			나. 기계시공
		3. 포장절단 및 줄눈	가. 포장절단
			나. 줄눈설치
10-5 부대공	10-5-2 방음벽	1. 앵커볼트 설치
		2. 지주 설치
		3. 방음판 설치
	10-5-3 경계블록	1. 보차도 경계석(화강암)
		2. 보차도 및 도로 경계블록(콘크리트)
10-6 교통안전공	10-6-1 교통안전시설	2. 분리대병(鋲) 제거
		3. 분리대병(鋲) 설치
		4. 시선유도표지 설치 및 철거
	10-6-3 가드레일	1. 준비 및 지주 설치
		2. 간격재 조립 및 판 설치
	10-6-4 중앙분리대	1. 가드레일식
		2. 콘크리트 포설식

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

10-1 공통사항

10-1-1 포장포설 준비작업

(일당)

배치인원(인)		시공량 (m)	비고
시 공 측 량 사	1	2,000
보 통 인 부	2

[주] ① 본 품은 포장공의 포설 준비 작업이며, 시공 측량 및 유도선 설치에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 유도선(String Line)설치에 따른 재료(스틱, 와이어선 등)는 사용 횟수에 따라 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

10-1 공통사항

10-1-2 포장포설 준비작업

(일당)

구분	단위	수량	시공량 (m)
			설치간격 10m	설치간격 6m
특 별 인 부	인	2	1,900	1,600
보 통 인 부	인	1

[주] ① 본 품은 포장공의 포설준비를 기준한 것으로, 위치측량, 스틱(철근) 및 유도선 설치를 포함한다.

② 현장여건에 따라 설치간격을 본 품의 기준과 상이하게 적용할 경우 시공량을 변경 할 수 있다.

③ 유도선(String Line)설치에 따른 재료(스틱, 와이어선 등)는 사용 횟수에 따라 별도 계상한다.

④ 스틱(철근) 설치를 위해 천공작업이 필요한 경우는 별도 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

10-1-2 교통통제 및 안전처리

(일당)

배치인원(인)		배치기준	비 고
보 통 인 부	2	공구 연장 500m 미만
보 통 인 부	3	공구 연장 500m 이상

[주]  ① 본 품은 도로포장 및 유지공사에 공통적으로 적용되는 교통 안전처리에 대한 품이다.

→ 삭제

② 본 품은 교통통제나 안전처리가 요구되는 공정 및 현장에서, 공정에 대한 작업자의 품에 더하여 별도 계상 할 수 있다.

→ 개정 [주] ‘보완’

③ 도로의 확포장, 유지보수, 교통통제가 필요한 부대공 및 교통안전공에 본 품을 적용한다.

→ 개정 [주] ‘보완’

10-1-1 교통통제 및 안전처리

◦ 도로의 확포장, 도로시설 유지보수 등 교통통제 및 안전처리가 필요한 공사에는 교통안전처리 인력을 배치하며, 배치인원(보통인부)은 현장조건(교통상황, 교통통제시간 및 범위 등)을 고려하여 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

10-2 포장하부

10-2-1 동상방지층

1. 인력식 소규모 장비사용 시공

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎥)
		명칭	규격
보통인부	4	굴삭기 진동롤러(핸드가이드식) 살수차	0.6㎥ 0.7ton 5,500ℓ	165
비고	- 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

[주]  ①  본 품은 소로, 단지 내 도로, 유지보수 등 동상방지층 인력식 소규모 장비사용 시공에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

③ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

→ 개정 [주] ④ ‘이기시행’

10-2 포장하부

10-2-1 동상방지층

1. 인력식 소규모 장비사용 시공

(일당)

구분	규격	단 위	수 량	시공량 (㎥)
특별인부		인	1	165
보통인부		인	3
굴삭기	0.6㎥	대	1
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	대	1
살수차	5,500ℓ	대	0.5
비고	- 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

[주]  ①  본 품은 인력식 소형 다짐장비를 사용한 동상방지층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

④ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

2. 기계시공-길어깨 포장

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎥)
		명칭	규격
보통인부	2	굴삭기 타이어롤러 진동롤러 살수차	1.0㎥ 8∼15ton 10ton 16,000ℓ	250
비고	- 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

[주]  ① 본 품은 동상방지층 기계시공-길어깨 포장에 대한 품이며, 콘크리트 포장 길어깨의 동상방지층 포설 및 다짐을 기준한다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

③ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

→ 개정 [주] ④ ‘이기시행’

2. 기계시공-길어깨 포장

(일당)

구 분	규격	단 위	수 량	시공량 (㎥)
특별인부		인	1	250
보통인부		인	2
굴삭기	1.0㎥	대	1
진동롤러	12ton	대	1
살수차	16,000ℓ	대	0.5
비고	- 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

[주]  ①  본 품은 대형 다짐장비를 사용한 콘크리트 포장 길어깨 구간의 동상방지층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있으며, 타이어롤러 등이 필요한 경우는 추가 계상한다.

④ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

3. 기계시공-본선 포장

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎥)
		명칭	규격
보통인부	2	모터 그레이더 타이어롤러 진동롤러 살수차	3.6m 8∼15ton 10ton 16,000ℓ	600
비고		- 순수 인력 살수시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

[주] ① 본 품은 동상방지층 기계 시공 중 본선포장에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

③ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

→ 개정 [주] ④ ‘이기시행’

3. 기계시공-본선 포장

(일당)

구 분	규격	단 위	수 량	시공량 (㎥)
특별인부		인	1	600
보통인부		인	1
모터 그레이더	3.6m	대	1
진동롤러	12ton	대	1
살수차	16,000ℓ	대	0.5
비고	- 순수 인력 살수시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

[주]  ①  본 품은 대형 다짐장비를 사용한 본선 포장구간의 동상방지층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있으며, 타이어롤러 등이 필요한 경우는 추가 계상한다.

④ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

10-2-2 보조기층

1. 인력식 소규모 장비사용 시공

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎥)
		명칭	규격
보통인부	4	굴삭기 진동롤러(핸드가이드식) 살수차	0.6㎥ 0.7ton 5,500ℓ	150
비고		- 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

[주]  ①  본 품은 소로, 단지내 도로, 유지보수 등 보조기층 인력식 소규모 장비사용 시공에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

③ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

→ 개정 [주] ④ ‘이기시행’

10-2-2 보조기층

1. 인력식 소규모 장비사용 시공

(일당)

구분	규격	단 위	수 량	시공량 (㎥)
특별인부		인	1	150
보통인부		인	3
굴삭기	0.6㎥	대	1
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	대	1
살수차	5,500ℓ	대	0.5
비고	- 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

[주]  ①  본 품은 인력식 소형 다짐장비를 사용한 보조기층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

④ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

2. 기계시공-길어깨 포장

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎥)
		명칭	규격
특별인부 보통인부	1 2	굴삭기 타이어롤러 진동롤러 살수차	1.0㎥ 8∼15ton 10ton 16,000ℓ	225
비고		- 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

[주] ① 본 품은 보조기층 기계시공-길어깨 포장에 대한 품이며, 콘크리트 포장 길어깨의 보조기층 포설 및 다짐을 기준한다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

③ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

→ 개정 [주] ④ ‘이기시행’

2. 기계시공-길어깨 포장

(일당)

구 분	규격	단 위	수 량	시공량 (㎥)
특별인부		인	1	225
보통인부		인	2
굴삭기	1.0㎥	대	1
진동롤러	12ton	대	1
살수차	16,000ℓ	대	0.5
비고	- 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

[주]  ①  본 품은 대형 다짐장비를 사용한 콘크리트 포장 길어깨 구간의 보조기층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있으며, 타이어롤러 등이 필요한 경우는 추가 계상한다.

④ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

3. 기계시공-본선포장

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎥)
		명칭	규격
특별인부 보통인부	1 2	모터 그레이더 타이어롤러 진동롤러 살수차	3.6m 8∼15ton 10ton 16,000ℓ	550
비고		- 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

[주] ① 본 품은 보조기층 기계시공 중 본선포장에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

③ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

→ 개정 [주] ④ ‘이기시행’

3. 기계시공-본선 포장

(일당)

구 분	규격	단 위	수 량	시공량 (㎥)
특별인부		인	1	550
보통인부		인	1
모터 그레이더	3.6m	대	1
진동롤러	12ton	대	1
살수차	16,000ℓ	대	0.5
비고	- 순수 인력 살수시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

[주]  ①  본 품은 대형 다짐장비를 사용한 본선 포장구간의 보조기층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있으며, 타이어롤러 등이 필요한 경우는 추가 계상한다.

④ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

10-2-3 기층

3. 입도조정기층공

가. 인력식 소규모 장비사용 시공

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎥)
		명칭	규격
보통인부	4	굴삭기 진동롤러(핸드가이드식) 살수차	0.6㎥ 0.7ton 5,500ℓ	135

10-2-3 입도조정기층

1. 인력식 소규모 장비사용 시공

(일당)

구분	규격	단 위	수 량	시공량 (㎥)
특별인부		인	1	135
보통인부		인	3
굴삭기	0.6㎥	대	1
진동롤러(핸드가이드식)	0.7ton	대	1
살수차	5,500ℓ	대	0.5
비고	- 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

[주]  ①  본 품은 인력식 소형 다짐장비를 사용한 입도조정기층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

④ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

나. 기계시공 - 길어깨 포장

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎥)
		명칭	규격
특별인부 보통인부	1 2	굴삭기 타이어롤러 진동롤러 살수차	1.0㎥ 8∼15ton 10ton 16,000ℓ	200

2. 기계시공-길어깨 포장

(일당)

구 분	규격	단 위	수 량	시공량 (㎥)
특별인부		인	1	200
보통인부		인	2
굴삭기	1.0㎥	대	1
진동롤러	12ton	대	1
살수차	16,000ℓ	대	0.5
비고	- 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

[주]  ①  본 품은 대형 다짐장비를 사용한 콘크리트 포장 길어깨 구간의 입도조정기층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있으며, 타이어롤러 등이 필요한 경우는 추가 계상한다.

④ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

다. 기계시공 - 본선포장

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎥)
		명칭	규격
특별인부 보통인부	1 2	모터 그레이더 타이어롤러 진동롤러 살수차	3.6m 8∼15ton 10ton 16,000ℓ	500
비고	- 순수 인력 살수 시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

[주]  ①  본 품은 입도조정기층공의 자갈기층, 부순돌기층, 고로슬래그 부순돌기층에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

③ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 자갈기층공 2ton, 부순돌기층공 1.5ton, 고로슬래그 부순돌기층공은 2.5ton을 표준으로 한다.

→ 개정 [주] ④ ‘이기시행’

3. 기계시공-본선 포장

(일당)

구 분	규격	단 위	수 량	시공량 (㎥)
특별인부		인	1	500
보통인부		인	1
모터 그레이더	3.6m	대	1
진동롤러	12ton	대	1
살수차	16,000ℓ	대	0.5
비고	- 순수 인력 살수시에는 살수품을 100㎡당 1인 가산한다.

[주]  ①  본 품은 대형 다짐장비를 사용한 본선 포장구간의 입도조정기층 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 고르기 및 다짐 작업을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있으며, 타이어롤러 등이 필요한 경우는 추가 계상한다.

④ 두께 20cm일 때 100㎡당 살수량은 일반적으로 2ton을 표준으로 한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

10-3 신설포장

10-3-1 아스팔트 표층

1. 텍코팅 및 프라임 코팅

(일당)

배치인원 (인)			사용기계 (1대)		시공량 (㎡)
			명칭	규격
프라임 코팅 (MC-1:75ℓ/a)	포장공 보통인부	1 2	아스팔트 스프레어	수동식 400ℓ	8,000
프라임 코팅 (RSC-3:75ℓ/a)	보통인부	2	아스팔트 스프레어	수동식 400ℓ	8,000
텍 코팅 (RSC-4:30ℓ/a)	보통인부	2	아스팔트 스프레어	수동식 400ℓ	8,000
비고	- 역청재의 비산 방지가 필요한 때는 보통인부를 2,000ℓ당 1인을 가산한다 - 양생에 모래가 필요할 때는 살포 인력품으로 보통인부를 모래 2㎥당 1인을 가산한다.

[주] ① 본 품은 텍코팅 및 프라임 코팅에 대한 품이며, 살포 종류와 재료에 따라 적용한다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 필요에 따라 본 품을 유지공사에 적용할 수 있다.

→ 삭제

③ 프라임 코팅(MC-1)의 경우, 용해기 연료비(경유)를 톤당 26ℓ 계상하며 버너, 캣틀 손료는 별도 계상한다.

→ 삭제

10-3 신설포장

10-3-1 아스팔트 포장

1. 텍코팅 및 프라임 코팅

(일당)

구 분		규 격	단 위	수 량	시공량 (㎡)
인력식	보통인부		인	2	8,000
	아스팔트스프레어 (수동식 살포기)	400ℓ	대	1
기계식	보통인부		인	1	20,000
	아스팔트디스트리뷰터 (폭 2.4m)	3,800ℓ	대	1
비고	- 역청재의 비산 방지가 필요한 때는 보통인부를 2,000ℓ당 1인을 가산한다 - 양생에 모래가 필요할 때는 살포 인력품으로 보통인부를 모래 2㎥당 1인을 가산한다.

[주] ① 본 품은 텍코팅 및 프라임코팅 역청재 살포작업을 기준한 것이다.

② 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

10-2-3 기층

2. 아스팔트 기층(BB층)

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎡)
		명칭	규격
포장공 보통인부	4 1	아스팔트 피니셔 머캐덤롤러 타이어롤러 진동롤러 살수차	3m 10∼12ton 8∼15ton 10ton 16,000ℓ	두께≥10cm	3,600
				두께<10cm	4,000

[주] ① 본 품은 아스팔트 기층(BB층)의 포설과 다짐에 대한 품이며, 1층 포설을 기준으로 한다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 소규모 현장 포설시 10-3-1의 아스팔트 표층의 ‘인력식 소규모 장비사용 시공’을 적용한다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

③ 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

→ 개정 [주] ④ ‘이기시행’

10-3-1 아스팔트 포장

2. 아스팔트 기층(BB층)

(일당)

구 분	규 격	단위	수량	시공량 (㎡)
				2m≤시공폭<3m		3m≤시공폭
				1층 포설두께5~7cm	1층 포설두께8~10cm	1층 포설두께5~7cm	1층 포설두께8~10cm
포장공		인	4	2,700	2,500	4,900	4,500
보통인부		인	1
아스팔트 피니셔	3m	대	1
머캐덤롤러	10∼12ton	대	1
타이어롤러	8∼15ton	대	1
탠덤롤러	5∼8t	대	1
살수차	16,000ℓ	대	0.5

[주] ① 본 품은 아스팔트 기층 포설을 기준한 것이며, 기층의 포설 및 다짐을 포함한다.

② 시공폭 2m이상 3m미만은 피니셔(3m)를 활용하여 시공이 가능한 길어깨 등을 기준하며, 시공폭 3m이상은 본선을 기준한다.

③ 소규모 현장 포설시 3. 일반 아스팔트 표층의 ‘가. 인력식 소규모 장비사용 시공’, ‘나. 기계식 소규모 장비사용 시공’을 적용한다.

④ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

신설

3. 일반 아스팔트 표층

나. 기계식 소규모 장비사용 시공

(일당)

구 분	규 격	단 위	수 량	시공량 (㎡)
포장공		인	3	1,600
보통인부		인	1
아스팔트 피니셔	1.7m	대	1
굴삭기	0.6㎥	대	1
머캐덤롤러	8~10ton	대	1
타이어롤러	5~8ton	대	1
살수차	5,500ℓ	대	0.5

[주] ① 본 품은 소형장비를 활용하여 아스팔트 표층을 포설하는 품으로, 1층 포설두께 5~7cm를 기준한 것이다.

② 본 품은 시공폭 2m 미만의 도로포장을 기준한다.

③ 본 품은 표층의 포설 및 다짐을 포함한다.

④ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

나. 기계시공

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎡)
		명칭	규격
포장공 보통인부	4 1	아스팔트 피니셔 머캐덤롤러 타이어롤러 탠덤롤러 살수차	3.0m 10∼12 t 8∼15 t 5∼8t 16,000ℓ	1.4m≤시공폭<3m	2,000
				3m≤시공폭	5,000

[주] ① 본 품은 아스팔트 표층 및 중간층 포장의 포설, 다짐에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

→ 개정 [주] ⑤ ‘이기시행’

③ “1.4m≤시공폭<3m” 은 콘크리트 포장에서의 길어깨 시공 및 굴착 후 아스팔트 포설을 기준으로 한다.

→ 개정 [주] ② ‘보완’

④ “3m≤시공폭” 은 본선 아스팔트 포설을 기준으로 한다.

→ 개정 [주] ② ‘이기시행’

⑤ 본선의 경우 포설두께 7cm 이하, 길어깨 구간의 경우 7.5cm 이하를 기준으로 한다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

다. 기계시공

(일당)

구 분	규 격	단위	수량	시공량 (㎡)
				2m≤시공폭<3m	3m≤시공폭
포장공		인	4	2,600	4,800
보통인부		인	1
아스팔트 피니셔	3m	대	1
머캐덤롤러	10∼12ton	대	1
타이어롤러	8∼15ton	대	1
탠덤롤러	5∼8t	대	1
살수차	16,000ℓ	대	0.5

[주] ① 본 품은 아스팔트 표층 및 중간층을 포설하는 품으로, 1층 포설두께 5~7cm를 기준한 것이다.

② 시공폭 2m이상 3m미만은 피니셔(3m)를 활용하여 시공이 가능한 길어깨 등을 기준하며, 시공폭 3m이상은 본선을 기준한다.

③ 시공폭 2m미만은 ‘나. 기계식 소규모 장비사용 시공’을 적용한다.

④ 본 품은 표층 및 중간층의 포설 및 다짐을 포함한다.

⑤ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

3. 특수 아스팔트 포장

가. 개질 아스팔트 포장

(일당)

배치인원(인)		사용기계			시공량 (㎡)
		명칭	대수	규격
포장공 보통인부	4 1	아스팔트 피니셔 머캐덤롤러 탠덤롤러 살수차	1 2 1 1	3.0m 10∼12 t 5∼8t 16,000ℓ	1.4m≤시공폭<3m	1,800
					3m≤시공폭	4,500

[주] ① 본 품은 아스팔트 포장 중 개질제를 이용한 포장의 포설, 다짐에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ② ‘보완’

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

→ 개정 [주] ⑤ ‘이기시행’

③ “1.4m≤시공폭<3m” 은 콘크리트 포장에서의 길어깨 시공 및 굴착 후 아스팔트 포설을 기준으로 한다.

→ 개정 [주] ② ‘보완’

④ “3m≤시공폭” 은 본선 아스팔트 포설을 기준으로 한다.

→ 개정 [주] ② ‘이기시행’

⑤ 본선의 경우 포설두께 7cm 이하, 길어깨 구간의 경우 7.5cm 이하를 기준으로 한다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

4. 특수 아스팔트 표층

가. 개질 아스팔트 포장

(일당)

구 분	규 격	단위	수량	시공량 (㎡)
				2m≤시공폭<3m	3m≤시공폭
포장공		인	4	2,500	4,500
보통인부		인	1
아스팔트 피니셔	3m	대	1
머캐덤롤러	10∼12ton	대	2
탠덤롤러	5∼8t	대	1
살수차	16,000ℓ	대	0.5

[주] ① 본 품은 개질제 아스팔트 표층을 포설하는 품으로, 1층 포설두께 5cm를 기준한 것이다.

② 본선은 시공폭 3m이상을 기준하며, 길어깨는 피니셔를 활용한 시공을 수행하는 시공폭 2m이상을 기준한다.

③ 시공폭 2m미만은 ‘나. 기계식 소규모 장비사용 시공’을 적용한다.

④ 본 품은 표층의 포설 및 다짐을 포함한다.

⑤ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

나. 투배수성 포장

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)			시공량 (㎡)
		명칭	대수	규격
포장공 보통인부	4 1	아스팔트 피니셔 머캐덤롤러 탠덤롤러 살수차	1 2 1 1	3.0m 10∼12 t 5∼8t 16,000ℓ	1.4m≤시공폭<3m	1,600
					3m≤시공폭	4,000

[주] ① 본 품은 아스팔트 포장중 투배수성 포장의 포설, 다짐에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

→ 개정 [주] ⑤ ‘이기시행’

③ “1.4m≤시공폭<3m” 은 콘크리트 포장에서의 길어깨 시공 및 굴착 후 아스팔트 포설을 기준으로 한다.

→ 개정 [주] ② ‘보완’

④ “3m≤시공폭” 은 본선 아스팔트 포설을 기준으로 한다.

→ 개정 [주] ② ‘이기시행’

⑤ 본선의 경우 포설두께 7cm 이하, 길어깨 구간의 경우 7.5cm이하를 기준으로 한다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

나. 투배수성 포장

(일당)

구 분	규 격	단위	수량	시공량 (㎡)
				2m≤시공폭<3m	3m≤시공폭
포장공		인	4	2,100	4,000
보통인부		인	1
아스팔트 피니셔	3m	대	1
머캐덤롤러	10∼12ton	대	2
탠덤롤러	5∼8t	대	1
살수차	16,000ℓ	대	0.5

[주] ① 본 품은 투배수성 아스팔트 표층을 포설하는 품으로, 1층 포설두께 5cm를 기준한 것이다.

② 본선은 시공폭 3m이상을 기준하며, 길어깨는 피니셔를 활용한 시공을 수행하는 시공폭 2m이상을 기준한다.

③ 시공폭 2m미만은 ‘나. 기계식 소규모 장비사용 시공’을 적용한다.

④ 본 품은 표층의 포설 및 다짐을 포함한다.

⑤ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

10-2-3 기층

1. 린 콘크리트 기층

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎥)
		명칭	규격
특별인부 보통인부(포설) 보통인부(양생)	1 2 1	아스팔트 피니셔 타이어롤러 진동롤러	3m 8∼15ton 10ton	550

[주] ① 본 품은 린 콘크리트 기층의 포설과 양생에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ①, ② ‘보완’

② 다짐시 공사시방에 따라 장비조합을 변경할 수 있다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

10-3-2 콘크리트 포장

1. 린 콘크리트 기층

(일당)

구 분	규 격	단 위	수 량	시공량 (㎥)
				일반구간	터널구간
포장공		인	2	550	500
보통인부		인	2
아스팔트 피니셔	3m	대	1
타이어롤러	8∼15ton	대	1
진동롤러	10ton	대	1

[주] ① 본 품은 린 콘크리트 기층의 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 포설, 다짐 및 양생을 포함한다.

③ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

10-3-2 콘크리트 표층

1. 인력시공

(일당)

배치인원(인)		포장 두께	시공량 (㎥)
			콘크리트믹서트럭 직접타설인 경우	콘크리트믹서트럭 후진 진입 또는 경운기 등으로 운반인 경우
포장공 보통인부	3 3	20cm	100	좌측 시공량의 50%까지 감하여 적용한다.
		30cm	150
		40cm	200

[주] ① 본 품은 콘크리트 포장의 인력포설에 대한 품으로, 비닐깔기 및 철망깔기, 콘크리트 포설, 양생 등이 포함된 것이며, 거푸집 설치 해체 및 줄눈작업은 포함되지 않은 것이다.

② 양생에 필요한 재료비(비닐, 양생재 등) 및 철망재료비는 별도 계상한다.

③ 현장여건상 콘크리트믹서트럭의 진입이 어려워 경운기 등 기타방법으로 콘크리트를 운반하여야 하는 경우 소운반 비용은 별도 계상한다.

④  현장여건상 재료수급이 원할치 않아 레미콘의 지속적인 공급이 어려운 경우, 두께 20cm는 10%까지, 두께 30cm는 20%까지, 두께 40cm는 30%까지 시공량을 감하여 적용한다. 단, 콘크리트믹서트럭 후진진입 또는 경운기 등으로 운반인 경우는 적용하지 않는다.

⑤  스크리드 등의 기계기구 손료는 인력품의 5%로 계상한다.

⑥ 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다.

⑦ 콘크리트와 노반과의 접착부 처리품(모래층 깔기 등)은 별도 계상한다. 모래 부설시 일당 작업량은 보통인부 2인기준 두께 3cm시 660㎡, 두께 6cm시 410㎡ 이다.

10-3-2 콘크리트 포장

2. 콘크리트 표층

가. 인력시공

- 현행과 동일 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

2. 기계시공

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (㎥)
		명칭	규격	형식		시공량
포장공 보통인부 특별인부	4 4 1	콘크리트 페이버 콘크리트 페이버 굴삭기 조면마무리기 살수차	75㎾(1차로) 161㎾(2차로) 1.0㎥ 7.95m 16,000ℓ	일반 구간	1차로 2차로	350 800
				터널 구간	1차로 2차로	300 650

[주] ① 본 품은 콘크리트 표층 포장의 분리막 설치, 포설 및 다웰바, 타이바 등 철근설치, 양생, 조면마무리에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ② ‘보완’

② 콘크리트 페이버를 이용한 1차로 포장은 테이퍼, 램프, 교차로 등 2차로 타설이 불가한 특수구간에 대한 포장을 기준으로 한다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

③ 양생제, 마대, 잡품 등 부대 재료비는 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ⑤ ‘보완’

나. 기계시공

(일당)

구 분	규 격	단 위	수 량	시공량 (㎥)
				일반구간		터널구간
				1차로	2차로	1차로	2차로
포장공		인	4	300	700	270	600
특별인부		인	2
보통인부	1차로	인	2
보통인부	2차로	인	3
콘크리트 페이버	161㎾(1차로)	대	1
콘크리트 페이버	186.5㎾(2차로)	대	1
굴삭기	1.0㎥	대	1
살수차	16,000ℓ	대	0.5

[주] ① 본 품은 콘크리트 표층의 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 분리막 설치, 포설 및 다웰바, 타이바 등 철근설치, 면마무리 및 양생을 포함한다.

③ 1차로 포장은 테이퍼, 램프, 교차로 등 2차로 타설이 불가한 구간에 적용한다.

④ 장비는 현장여건 및 시험포장 결과에 따라 장비조합 및 규격을 변경하여 적용할 수 있다.

⑤ 잡재료비(양생제, 마대, 잡품 등)는 인력품의 2%로 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

3. 포장절단 및 줄눈설치

가. 포장절단

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (m)
		명칭	규격	형식	시공량
특별인부 보통인부	1 2	커터	320-400mm	1차로	350
				2차로	600

[주] ① 본 품은 콘크리트 표층 포장의 포장절단에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 품의 절단 깊이는 1차 절단(50∼75mm)을 기준한다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

③ 100m당 블레이드 0.31개를 계상한다.

→ 개정 [주] ④ ‘이기시행’

④ 100m당 물 3,000ℓ를 계상한다.

→ 개정 [주] ④ ‘이기시행’

3. 포장절단 및 줄눈설치

가. 포장절단

(일당)

구 분	규격	단 위	수량	시공량 (m)
				1차로	2차로
특별인부		인	1	500	700
보통인부		인	1
커터	320-400mm	대	1
동력분무기	4.85kW	대	0.5

[주] ① 본 품은 콘크리트 표층 포장의 절단을 기준한 것이다.

② 본 품은 포장절단, 절단면 물청소를 포함한다.

③ 절단 깊이는 1차 절단(50∼75mm)을 기준한다.

④ 100m당 블레이드 0.31개, 물 3,000ℓ를 계상한다.

토목

보완

나. 줄눈설치

(일당)

배치인원(인)		시공량 (m)
특별인부 보통인부	2 3	700

[주] 줄눈재, 백업재 등 부대 재료비는 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

나. 줄눈설치

(일당)

구 분	단 위	수 량	시공량 (m)
특별인부	인	3	900
보통인부	인	2

[주] ① 본 품은 콘크리트 표층 절단면에 줄눈 설치를 기준한 것이다.

② 본 품은 백업재 설치, 프라이머 및 줄눈재 시공을 포함한다.

③ 줄눈재, 백업재 등 부대 재료비는 별도 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

삭제

4. 콘크리트 포장 거푸집

(일당)

배치인원(인)		시공량 (거푸집연장 m)
		포장두께 (cm)	시공량
형틀목공 보통인부	2 1	포장두께≤20cm	100
		20cm<포장두께≤25cm	85
		25cm<포장두께≤30cm	70
		30cm<포장두께≤40cm	50

[주] ① 철재 거푸집 1본의 길이는 3m로 하고 핀폴은 1m당 1개로 계상하되 20회 사용을 원칙으로 한다.

② 거푸집 1회전은 6일을 표준으로 한다.

③ 잡재료는 철재 거푸집 및 핀폴손료의 2%까지 계상할 수 있다.

④ 철재 거푸집 및 핀폴의 잔존율은 10%로 한다.

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

삭제

다. 골재적치장 설비

(1식)

구분	단위	콘 크 리 트 량
		250㎥	500㎥	900㎥
목공(형틀)	인	8.4	14.8	16.8
보 통 인 부	인	16.8	29.6	42.4
원 목	㎥	5.4	10.2	14.4
판 재	㎥	4.8	7.5	10.7

- 삭   제 -

토목

삭제

라. 플랜트 가동 보조 인부

(플랜트 대당)

구분	재료공급보조	현장정리	계
보통인부	2	2	4
비고	- 벌크 시멘트 사용시에는 인부 1인을 감한다.

[주] ① 배치플랜트장 인근의 환경보존 및 공해방지를 위한 제시설(습식집진시설, 폐수처리시설, 세륜시설 등), 임시전력설비, 물 공급설비, 배치플랜트 기초공사(콘크리트 타설 등) 및 진입로 개설비용은 별도로 계상한다.

② 배치플랜트 및 사일로의 운반비용은 별도로 계상한다.

③ 상기의 “가. 콘크리트 배치플랜트 부지조성”은 부지정리, 골재저치장, 운반도로(부지내), 도로보수 등을 포함하며, 평탄한 곳(경사 10ﾟ 이하)에 설치할 경우에는 불도저를 계상하지 않는다.

④ 상기의 “나. 콘크리트 배치플랜트 조립 및 철거”는 조립 대 철거의 비율이 55 : 45이며, 사일로의 조립 및 철거비용도 포함된 것으로, 사일로의 규격 및 대수는 현장여건에 맞추어 별도로 정한다.

⑤ 상기의 “다. 골재저치장 설비”는 다음에 따른다.

㉮ 본 품은 7일분의 콘크리트를 생산할 수 있는 양을 저장할 수 있는 시설을 기준한 것이다.

㉯ 본 품은 골재저치장의 조립, 철거 및 정리 등이 포함된 것이다.

㉰ 목재의 손료는 30%로 계상한다.

㉱ 잡재료는 인력품의 2%로 계상한다.

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

삭제

5. 콘크리트 배치플랜트 가설

가. 콘크리트 배치플랜트 부지조성

구분	플랜트규격 (㎥/hr)	60∼90	120∼150	180∼210	비 고
	부지소요면적 단위	7,000㎡	8,500㎡	10,000㎡
보통인부	인	120	160	200
불 도 저	hr	88	104	120	19톤급
롤러	hr	24	28	32	탠덤롤러 5∼8톤
그레이더	hr	8	12	16	3.6m

- 삭   제 -

토목

삭제

나. 콘크리트 배치플랜트 조립 및 철거

구 분	규 격	단위	배치플랜트 규격(㎥/hr)
			60	90	120	150	180	210
기계설비공		인	135	145	154	164	173	183
비계공		인	189	203	216	229	243	256
보 통 인 부		인	128	137	146	155	164	173
플랜트전공		인	100	107	114	121	128	135
크레인	50톤	시간	176	184	200	213	225	237

- 삭   제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

신설

10-3-1 아스팔트 표층

2. 일반 아스팔트 포장

가. 인력식 소규모 장비사용 시공

(일당)

배치인원(인)	사용기계 (1대)		시공량 (㎡)
	명칭	규격
- 내 용 생 략 -
비고	- 아스팔트 포장 절단이 필요한 경우, 보통인부 3인이 일당 400m 절단 가능하며, 100m당 블레이드 0.27개, 물 2,000ℓ를 계상한다.

[주] - 내 용 생 략 -

10-4-2 일상유지보수

9. 아스팔트 포장 절단

(일당)

구 분	규격	단 위	수량	시공량 (m)
특별인부		인	1	500
보통인부		인	1
커터	320-400mm	대	1
동력분무기	4.85kW	대	0.5

[주] ① 본 품은 아스팔트 포장의 절단을 기준한 것이다.

② 포장두께 20cm 이하를 기준한다.

③ 100m당 블레이드 0.27개, 물 2,000ℓ를 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

10-5 부대공

10-5-2 방음벽

1. 앵커볼트 설치

(일당)

배치인원(인)		시공량 (지주설치 개소)
철공	2	지주높이 2∼3m	6
		지주높이 4∼5m	5
		지주높이 6∼7m	4
		지주높이 8∼9m	3

[주] ① 본 품은 매설앵커볼트(L형) 및 천공앵커볼트(케미컬앵커볼트) 시공에 적용하며, 이와 시공방법이 다를 경우에는 별도로 계상한다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

→ 개정 [주] ③ ‘보완’

③ 본 품은 소운반 및 용접비용이 포함된 것이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

10-5 부대공

10-5-2 방음벽

1. 앵커볼트 설치

(일당)

구분	단위	수량	시공량(개)
철공	인	2	40
보통인부	인	1

[주] ① 본 품은 매설앵커볼트(L형)를 기준한 것이며, 이와 시공방법이 다를 경우에는 별도로 계상한다.

② 본 품은 앵커볼트와 철근의 용접을 포함한다.

③ 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

2. 지주설치

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (개소)
		명칭	규격	지주 간격	2m	3m	4m
철공	1	트럭탑재형크레인	5 ton	지주높이 2m	16	15	13
보통인부	2			지주높이 3∼7m	13	12	11
철공	2	트럭탑재형크레인	5 ton	지주높이 8∼9m	10	-	-
보통인부	2

[주] ① 본 품은 매설앵커방식 및 천공앵커방식으로 지주를 세울 경우에 적용하며, 이와 시공방법이 다를 경우에는 별도로 계상한다.

→ 개정 [주] ① ‘이기시행’

② 현장여건상 장비 진입이 불가능하여 인력에 의존해야 할 경우에는 시공량의 40%까지 감하여 적용할 수 있다.

→ 삭제

③ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

→ 개정 [주] ④ ‘보완’

④ 본 품은 소운반이 포함된 것이다.

→ 삭제

2. 지주 설치

(일당)

구분	규격	단위	수량	시공량 (개소)
				지주높이	지주 간격
					2m	3m	4m
철공		인	3	3m 이하	23	22	21
보통인부		인	1
				7m 이하	20	19	18
트럭탑재형크레인	5 ton	대	1
철공		인	3	9m 이하	17	-	-
보통인부		인	2
				11m 이하	13	-	-
트럭탑재형크레인	5 ton	대	1

[주] ① 본 품은 매설앵커방식으로 지주를 세울 경우에 적용하며, 이와 시공방법이 다를 경우에는 별도로 계상한다.

② 본 품은 지주세우기, 고정 및 조정, 마무리 작업을 포함한다.

③ 크레인의 규격은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

3. 방음판 설치

가. 금속제 방음판

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (개)
		명칭	규격	지주 간격	2m	3m	4m
철공 보통인부	2 4	트럭탑재형 크레인	5ton	지주높이 2m	100	98	83
				지주높이 3m	120	111	86
				지주높이 4m	135	108	79
철공 보통인부	4 4	트럭탑재형 크레인 (2대)	5ton	지주높이 5m	140	127	89
				지주높이 6m	140	125	-
				지주높이 7m	140	123	-
				지주높이 8m	125	-	-
				지주높이 9m	110	-	-
철공 보통인부	2 4	인력시공		지주높이 2m	상측 시공량의 40%까지 감하여 적용한다.
				지주높이 3m
				지주높이 4m
철공 보통인부	4 4	인력시공		지주높이 5m
				지주높이 6m
				지주높이 7m
				지주높이 8m
				지주높이 9m

[주] ① 본 품은 금속제 방음판(방음판 높이 0.5m)을 기준한 것이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

→ 개정 [주] ④ ‘보완’

③ 본 품은 소운반이 포함된 것이다.

→ 삭제

3. 방음판 설치

(일당)

구 분	규 격	단 위	수 량	시공량 (개)
				지주 높이	방음벽 개당 면적
					1㎡ 이하	2㎡ 이하	3㎡ 이하	4㎡ 이하
철공		인	4	3m이하	109	87	85	72
보통인부		인	2
트럭탑재형크레인	5ton	대	1
철공		인	4	5m이하	138	121	111	77
				7m이하	129	103	90	-
보통인부		인	3
				9m이하	119	95	-	-
트럭탑재형크레인	5ton	대	2
				11m이하	108	86	-	-

[주] ① 본 품은 금속제 및 투명 방음판 설치를 기준한 것이다.

② 본 품은 방음벽 설치 및 고정, 하부 패드설치, 상부 마감을 포함한다.

③ 크레인의 규격은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

삭제

나. 투명방음판

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량 (개)
		명칭	규격	지주 간격	2m	3m	4m
철공 보통인부	2 4	트럭탑재형 크레인	5ton	지주높이 2m	80	78	66
				지주높이 3m	96	89	69
				지주높이 4m	108	86	63
철공 보통인부	4 4	트럭탑재형 크레인(2대)	5ton	지주높이 5m	112	102	71
				지주높이 6m	112	100	-
				지주높이 7m	112	98	-
				지주높이 8m	100	-	-
				지주높이 9m	88	-	-
철공 보통인부	2 4	인력시공		지주높이 2m	상측 시공량의 40%까지 감하여 적용한다.
				지주높이 3m
				지주높이 4m
철공 보통인부	4 4	인력시공		지주높이 5m
				지주높이 6m
				지주높이 7m
				지주높이 8m
				지주높이 9m

[주] ① 본 품은 투명방음판(방음판 높이 1.0m)을 기준한 것이다.

→ 개정 10-5-2 / 3. 방음판 설치 [주] ① ‘보완’

② 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

→ 개정 10-5-2 / 3. 방음판 설치 [주] ④ ‘보완’

③ 본 품은 소운반이 포함된 것이다.

→ 삭제

- 항 목 통 합 -

< ‘3. 방음판 설치’에 반영 >

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

10-5-3 경계블록

1. 보차도 경계석(화강암)

(일당)

사용기계 (1대)		배치인원(인)		시공량 (m)
명칭	규격			규격	시공량
트럭탑재형 크레인	5ton	보통인부 특별인부	1 3	180×200×1,000mm	110
				200×250×1,000mm	80
				200×300×1,000mm	50
				250×250×1,000mm	50
				210×300×1,000mm	50

[주] ① 본 품은 화강암을 이용한 보차도 경계석 시공에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 기초 콘크리트와 이음 모르타르는 현장 여건(규격, 지반 등)에 따라 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ② ‘보완’

③ 본 품은 소운반이 포함된 것이다.

→ 삭제

④ 터파기, 되메우기, 잔토처리는 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ③ ‘보완’

⑤ 본 품은 제작품을 설치하는 것이다.

→ 삭제

⑥ 택지조성현장 등 작업조건이 매우 양호한 현장에 경계석을 설치할 경우, 일당 시공량의 20% 범위 내에서 증하여 적용할 수 있다.

→ 삭제

⑦  도심부 상가나 주택지 등 교통 및 작업 조건이 어려운 경우, 일당 시공량의 20% 범위 내에서 감하여 적용할 수 있다.

→ 삭제

10-5-3 경계블록

1. 보차도 경계석(화강암)

(일당)

구 분	규 격	단 위	수 량	규 격	시공량 (m)
					직선구간	곡선구간
특별인부		인	3	180×200×1,000mm	125	105
보통인부		인	1	200×250×1,000mm	90	70
트럭탑재형 크레인	5ton	대	1	200×300×1,000mm	55	45
				250×250×1,000mm	55	45
				210×300×1,000mm	55	45

[주] ① 본 품은 화강암을 이용한 보차도 경계석을 시공하는 품으로, 신설공사를 기준한 것이다.

② 본 품은 경계블록 설치 및 조정, 이음모르타르 바름을 포함한다.

③ 기초 콘크리트, 터파기, 되메우기, 잔토처리는 현장 여건에 따라 별도 계상한다.

④ 크레인의 규격은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

2. 보차도 및 도로 경계블록(콘크리트)

(일당)

사용기계 (1대)		배치인원(인)		시공량 (m)
명칭	규격			규격	시공량
트럭 탑재형 크레인	5ton	보통인부 특별인부	1 2	120×120×120×1,000mm	150
				150×120×120×1,000mm	145
				150×150×120×1,000mm	140
				150×150×150×1,000mm	120
				150×170×200×1,000mm	110
				180×205×250×1,000mm	80
				180×210×300×1,000mm	50

[주] ① 본 품은 콘크리트 블록을 이용한 보차도 및 도로 경계블록 시공에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 기초 콘크리트와 이음모르타르는 현장여건(규격, 지반 등)에 따라 계상한다.

→ 개정 [주] ② ‘보완’

③ 본 품은 소운반품이 포함되어 있다.

→ 삭제

④ 터파기, 되메우기, 잔토처리는 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ③ ‘보완’

⑤ 본 품은 제작품을 설치하는 품이다.

→ 삭제

⑥  택지조성현장 등 작업조건이 매우 양호한 현장에 경계석을 설치할 경우, 일당 시공량의 20% 범위 내에서 증하여 적용할 수 있다.

→ 삭제

⑦  도심부 상가나 주택지 등 교통 및 작업 조건이 어려운 경우, 일당 시공량의 20% 범위 내에서 감하여 적용할 수 있다.

→ 삭제

⑧  합성수지 유색품은 국토교통부에서 신기술로 지정고시한 P.C경계블록을 기준으로 콘크리트의 50%로 적용하고 이와 유사한 공법에도 본 품을 준용할 수 있다.

→ 삭제

2. 보차도 및 도로 경계블록(콘크리트)

(일당)

구 분	규 격	단 위	수 량	규 격	시공량 (m)
					직선구간	곡선구간
특별인부		인	3	120×120×120×1,000mm	165	145
				150×120×120×1,000mm	160	140
보통인부		인	1	150×150×120×1,000mm	155	135
				150×150×150×1,000mm	135	115
트럭탑재형 크레인	5ton	대	1	150×170×200×1,000mm	125	105
				180×205×250×1,000mm	90	75
				180×210×300×1,000mm	55	45

[주] ① 본 품은 콘크리트 블록을 이용한 보차도 및 도로 경계블록 시공을 시공하는 품으로, 신설공사를 기준한 것이다.

② 본 품은 경계블록 설치 및 조정, 이음모르타르 바름을 포함한다.

③ 기초 콘크리트, 터파기, 되메우기, 잔토처리는 현장 여건에 따라 별도 계상한다.

④ 크레인의 규격은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

10-6 교통안전공

10-6-1 교통안전시설

3. 분리대병(鋲) 설치공

(일당)

배치인원(인)		시공량 (개)
		규격	설치
특별인부 보통인부	1 4	분리대병	170

10-6 교통안전공

10-6-1 교통안전시설

3. 분리대병(鋲) 설치

(일당)

구분	단 위	수 량	시공량 (개)
특별인부	인	1	70
보통인부	인	1

[주] ① 본 품은 천공, 분리대병 앵커고정, 접착제 접합을 포함한다.

② 분리대병 설치공의 경우 1개당 접착제 0.15kg, 기타재료비 인력품의 4%를 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

4. 시선유도표지 설치 및 철거

(일당)

배치인원(인)		시공량 (개)
		규격	철거	설치
보통인부	2	흙속 매설용	130	50
		가드레일용	260	130
		옹벽용	130	50

[주] ① 본 품은 데리네이터 설치의 설치, 철거에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 폐자재 운반은 별도 계상한다.

→ 삭제

③ 흙속 매설용은 지주를 박아서 매설하는 경우 또는 터파기 후 되메우기 하여 매설하는 경우에 적용하는 것이며, 콘크리트 기초를 두어 설치하는 경우에는 별도로 계상한다.

→ 개정 [주] ② ‘이기시행’

④ 분리대병 설치공의 경우 1개당 접착제 0.15kg, 기타재료비 인력품의 4%를 계상한다.

→ 삭제

⑤ 옹벽용은 천공작업이 포함된 것이며, 천공을 위한 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

→ 개정 [주] ③ ‘보완’

4. 시선유도표지 설치 및 철거

(일당)

구분	단 위	수 량	규격	시공량 (개)
				설치	철거
특별인부	인	1	흙속 매설용	60	130
			가드레일용	150	260
보통인부	인	1
			옹벽용	60	130

[주] ① 본 품은 데리네이터의 설치 및 철거를 기준한 것이다.

② 흙속 매설용은 지주를 박아서 매설하는 경우 또는 터파기 후 되메우기 하여 매설하는 경우에 적용하는 것이며, 콘크리트 기초를 두어 설치하는 경우에는 별도로 계상한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

10-6-3 가드레일

1. 준비 및 지주설치 작업

(일당)

시공형태	사용기계 (1대)		배치인원(인)		시공량 (개)
	명칭	규격
기계식	굴삭기 (대형브레이커 부착)	0.6㎥	특별인부 보통인부	2 2	240
인력식	천공기 발전기	152.4㎜ 5㎾	특별인부 보통인부	3 3	40

10-6-3 가드레일

1. 준비 및 지주 설치

(일당)

구 분	규격	단위	수량	시공량(개)
특별인부		인	2	210
보통인부		인	1
굴삭기(대형브레이커 부착)	0.6㎥	대	1
트 럭	2.5ton	대	1

[주] ① 본 품은 노측 토공구간에 가드레일 지주(간격 2m~4m)를 항타 설치하는 기준이다.

② 본 품은 항타기준선 설치, 지주 항타 및 보강재 설치를 포함한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

2. 간격재 조립 및 판 설치

(일당)

배치인원(인)		시공량 (개)	비고
특별인부 보통인부	4 4	200
비 고		- 철거는 본 품의 50%로 한다.

[주] ① 본 품은 가드레일 설치의 기준선 설치, 지주박기, 가드레일판 설치, 운반 등에 대한 품이며, 지주간격 4m를 기준으로 한다.

→ 개정 10-6-3 / 1. 준비 및 지주설치 [주] ①, ② ‘보완’

/ 10-6-3 / 2. 간격재 조립 및 판 설치 [주] ①, ② ‘보완’

② 본 품은 노측의 흙속에 지주설치를 위한 터파기, 되메우기, 다짐세우기 및 레일을 붙이는 품이다.

→ 개정 10-6-3 / 1. 준비 및 지주설치 [주] ② ‘보완’

/ 10-6-3 / 2. 간격재 조립 및 판 설치 [주] ② ‘보완’

③ 본 품에는 천공, 청소, 항타기준선 설치, 지주박기, 가드레일 설치, 모르타르 및 모래채우기, 자재 등에 대한 소운반 품이 포함되어 있다

→ 개정 10-6-3 / 1. 준비 및 지주설치 [주] ② ‘보완’

/ 10-6-3 / 2. 간격재 조립 및 판 설치 [주] ② ‘보완’

④ 기타 잡재료비 및 기구손료는 인력품의 3%까지 별도로 계상할 수 있다

→ 개정 10-6-3 / 2. 간격재 조립 및 판 설치 [주] ③ ‘보완’

⑤ 램프구간의 가드레일 설치시 일당 시공량의 40% 범위 내에서 감하여 적용할 수 있다.

→ 개정 10-6-3 / 2. 간격재 조립 및 판 설치 [주] ④ ‘이기시행’

⑥ 인력식 지주설치(천공)시 10m당 3단코어비트(152.4㎜)를 0.17개 계상한다.

→ 삭제

2. 간격재 조립 및 판 설치

(일당)

구 분	단위	수량	시공량(개)
			지주간격 2m		지주간격 4m
			2W	3W	2W	3W
특별인부	인	4	130	110	170	140
보통인부	인	2
비 고	- 철거는 본 품의 50%로 한다.

[주] ① 본 품은 가드레일 지주에 간격재 및 판(길이 4m)의 설치를 기준한 것이다.

② 본 품은 간격재 및 판설치의 설치 및 볼트고정 작업을 포함한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)으 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

④ 램프구간 등 곡선구간의 가드레일 설치 시 시공량의 40% 범위 내에서 감하여 적용할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

10-6-4 중앙분리대

1. 가드레일식

(일당)

시공형태	사용기계 (1대)		배치인원(인)		시공량 (m)
	명칭	규격
기계식	코아드릴 발전기 대형브레이커 경운기	152.4㎜ 5㎾ 0.6㎥	특별인부 보통인부	1 3	50

[주] ① 본 품은 포장층(t=30㎝정도)을 천공후 지주(2m간격)를 포장면에서 1.5m정도까지 항타하여 세운후 양면형 가드레일을 설치하는 품이다.

→ 개정 10-6-4 / 1. / 가. 지주설치 [주] ① ‘보완’

(10m당)

구분	명칭	단 위	규 격	수 량	비 고
사용자재	가드레일	개	4330×350×4㎜	5
	지주	〃	ø139.8×4.5×2200㎜	5
	완충브라켓	〃	300×70×4.5㎜	10
	볼트	〃	ø19×175㎜	5
	볼트	〃	ø16×33㎜	60
	3단코아비트	〃	ø152.4㎜	0.17

→ 삭제

② 본 품에는 천공, 청소, 항타기준선 설치, 지주박기, 가드레일 설치, 모르타르 및 모래채우기, 자재 등에 대한 소운반 품이 포함되어 있다.

→ 개정 10-6-4 / 1. / 가. 지주설치 [주] ② ‘보완’

/ 10-6-4 / 1. / 나. 간격재 조립 및 판 설치 [주] ② ‘보완’

③ 기타 잡재료비 및 기구손료는 인력품의 3%까지 별도로 계상할 수 있다.

→ 개정 10-6-4 / 1. / 나. 간격재 조립 및 판 설치 [주] ③ ‘보완’

④  본 품은 레일 외측간격 75㎝미만에 적용하는 품이며, 75㎝이상일 경우에는 지주규격을 ±114.3㎜로 조정할 수 있다.

→ 삭제

10-6-4 중앙분리대

1. 가드레일식

가. 준비 및 지주설치

(일당)

구 분	규격	단위	수량	시공량(개)
특별인부		인	3	130
보통인부		인	1
굴삭기+대형브레이커	0.6㎥	대	1
크롤러드릴	공기식	대	1
공기압축기	17.0㎥/min	대	1
트 럭	2.5ton	대	1

[주] ① 본 품은 포장층을 천공 후 지주(간격 2m~4m)를 항타 설치하는 기준이다.

② 본 품은 천공, 청소, 항타기준선 설치, 지주 및 보강재 설치, 모르타르 및 모래채우기 를 포함한다.

③ 장비의 규격은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

토목

보완

나. 간격재 조립 및 판 설치

(일당)

구 분	단위	수량	시공량(개)
			지주간격2m		지주간격4m
			2W	3W	2W	3W
특별인부	인	4	130	110	170	140
보통인부	인	2

[주] ① 본 품은 가드레일 지주에 간격재 및 판(길이 4m)의 설치를 기준한 것이다.

② 본 품은 간격재 및 판 설치, 볼트고정 작업을 포함한다.

③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

2. 콘크리트 포설식

(일당)

배치인원(인)		사용기계 (1대)		시공량(m)
		명칭	규격
철근공 포설공 보통인부(포설) 보통인부(양생)	1 2 2 1	콘크리트 피니셔 굴삭기	105.9㎾ 1.0㎥	350

[주] ① 본 품은 콘크리트 피니셔 포설식 중앙분리대 설치의 철근 조립 및 설치, 포설, 양생에 대한 품이다.

→ 개정 [주] ①, ② ‘보완’

② 본 품은 단면적 0.33㎡의 중앙분리대가 기준이다.

→ 삭제

2. 콘크리트 포설식

(일당)

구 분	규격	단위	수량	시공량 (m)
				높이 0.81m	높이 1.27m
포장공		인	2	350	300
철근공		인	1
보통인부		인	2
콘크리트 피니셔	105.9㎾	대	1
굴삭기	1.0㎥	대	1

[주] ① 본 품은 콘크리트 피니셔를 활용한 중앙분리대 포설을 기준한 것이다.

② 본 품은 포설식 중앙분리대 설치의 철망 조립 및 설치, 포설 및 양생을 포함한다.

③ 장비의 규격은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제10장

도로포장 및 유지

보완

10-6-2 차선도색

2. 상온형 페인트 수동식 (핸드가이드식 라인마커 사용)

(일당)

구 분	규격	단위	수 량	시공량 (㎡)
				규 격	미공용구간	공용구간
내용생략

[주] ① ∼ ⑥ 현행유지

⑦ 재료량은 다음을 참고하며, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치･관리매뉴얼 (경찰청)” 기준에 따른다.

(10㎡당)

구분	단위	수량
페인트	ℓ	3.1

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

→ 개정 [주] ⑦ ‘보완’

10-6-2 차선도색

2. 수용성형 페인트 수동식 (핸드가이드식 라인마커 사용)

(일당)

구 분	규격	단위	수 량	시공량 (㎡)
				규 격	미공용구간	공용구간
내용생략

[주] ① ∼ ⑥ 현행유지

⑦ 재료량은 다음을 참고하며, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치･관리매뉴얼 (경찰청)” 기준에 따른다.

(10㎡당)

구분	단위	수량
페인트	ℓ	4.2

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

토목

보완

3. 상온형 페인트 기계식 (자주식 라인마커 사용)

(일당)

구 분	규격	단위	수 량	시공량 (㎡)
				규 격	미공용구간	공용구간
내용생략

[주] ① ∼ ④ 현행유지

⑤ 재료량은 다음과 같으며, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치･관리매뉴얼 (경찰청)” 기준에 따른다.

(10㎡당)

구분	단위	수 량
페인트	ℓ	3.1

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

→ 개정 [주] ⑤ ‘보완’

3. 수용성형 페인트 기계식 (자주식 라인마커 사용)

(일당)

구 분	규격	단위	수 량	시공량 (㎡)
				규 격	미공용구간	공용구간
내용생략

[주] ① ∼ ④ 현행유지

⑤ 재료량은 다음과 같으며, 유리알 살포량은 “교통노면표시설치･관리매뉴얼 (경찰청)” 기준에 따른다.

(10㎡당)

구분	단위	수 량
페인트	ℓ	4.2

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.

토목

2017년 적용 건설공사표준품셈

- 제13장 터널 -

2017. 1.

	국토교통부
	한국건설기술연구원

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제13장

터널

보완

13-2 터널 여굴(餘掘)량

터널굴착에 따른 여굴량은 다음 표를 표준으로 한다.

구 분	아 치	측 벽	바닥 및 인버트	비고
여굴두께(cm)	15∼20	10∼15	10∼15

[주] “바닥 및 인버트” 구간에 여굴을 계상하는 경우는 바닥 및 인버트의 버력을 제거하여 콘크리트 등으로 채우는 경우에 한하며, 암질에 따라 달리 적용할 수 있음.  단, 수로터널 등 단면이 적은 경우는 5cm 이내에서 현장 여건에 따라 적용할 수 있다.

13-2 터널 여굴(餘掘)량

터널굴착에 따른 여굴량은 다음 표를 표준으로 한다.

구 분	아 치	측 벽	바닥 및 인버트	비고
여굴두께(cm)	12∼19	12∼18	10∼15

[주] ① 본 여굴량은 발파공법(NATM)을 기준으로 한 것이다.

② 암질의 절리 및 풍화가 발달하여 터널타입과 관계없이 과다 여굴이 발생되거나, 해저터널에서 강관다단 등 터널보강이 필요하여 공법상 불가피하게 추가 여굴이 발생되는 경우에는 여굴기준의 20%이내에서 추가 적용 할 수 있다.

③ “바닥 및 인버트”구간은 버력을 제거한 후 콘크리트 등으로 채우는 경우에 적용하며, 암질에 따라 달리 적용 할 수 있다. 다만, 수로터널 등 단면이 적은 경우는 5cm이내에서 현장 여건에 따라 적용할 수 있다.

토목

건 축 부 문

2017년 적용 건설공사표준품셈

- 제6장 철근콘크리트공사 -

2017. 1.

	국토교통부
	한국건설기술연구원

편 제 – 현 행

⇨

편 제 – 개 정 사 항

대분류	중분류	세분류	비 고
6-1 콘크리트	6-1-1 콘크리트 타설	1.레디믹스트콘크리트 타설
	6-1-2 콘크리트펌프차 타설	1.작업능력
		2.콘크리트펌프차 타설인부
		3.압송관설치 및 철거
		4.펌프카의 수송비
6-3 거푸집	6-3-1 목재 거푸집		삭 제
	6-3-2 합판 거푸집
	6-3-3 제치장 거푸집 (제물치장 거푸집)		항목통합
	6-3-4 유로폼 (EURO FORM) [건축]
	6-3-5 알루미늄폼 조립해체 [건축]
	6-3-6 갱폼 조립해체 (Gang Form) [건축]

대분류	중분류	세분류	비 고
6-1 콘크리트	6-1-1 콘크리트 타설	1.레디믹스트콘크리트 타설
		2.기계 및 인력비빔 타설	신 설
		3.표면 마무리	신 설
	6-1-2 콘크리트 펌프차 타설	1.적용범위
		2.인력편성
		3.작업소요시간
		4.압송관 설치 및 철거
6-3 거푸집	6-3-1 합판거푸집	1.재료사용
		2.인력투입
	6-3-2 유로폼	1.재료사용
		2.인력투입
	6-3-3 알루미늄폼
	6-3-4 갱폼

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

6-1 콘크리트

6-1-1 콘크리트 타설

1. 레디믹스트콘크리트 타설

(㎥당)

직 종 구 분	콘크리트공(인)	보 통 인 부 (인)
무근	0.12	0.15
철근	0.14	0.16

※ 본 품에는 재료 및 콘크리트의 소운반, 타설, 다짐 및 양생의 품이 포함된 것임.

→ 개정 6-1-1 / 1.레디믹스트콘크리트 타설 [주] ① ‘보완’

※ 레미콘의 타설할증률(구입시)은 무근 구조물인 경우에는 2%, 철근구조물 또는 철골 철근 구조물인 경우에는 1%를 적용.

→ 삭제

※ 본 품에는 층수에 따른 품의 할증이 포함된 것임.

→ 삭제

[주] ① 다짐에서 진동기를 사용할 경우에는 인력품을 제외한 운전경비 및 손료를 별도 계상한다.

→ 개정 6-1-1 / 1.레디믹스트콘크리트 타설 [주] ④ ‘보완’

② 콘크리트 타설에 필요한 가설비는 별도 계상한다.

→ 삭제

③ 슬래브에서 수평마무리가 필요할 경우에는 미장공을 별도 계상한다.

→ 개정 6-1-1 / 3. 표면 마무리 ‘항목신설’

6-1 콘크리트

6-1-1 콘크리트 타설

1. 레디믹스트콘크리트 타설

개정 토목 6-1-1 / 1. 레드믹스트콘크리트 타설과 동일

건축

항목	구분	현 행	개 정 사 항	비고
제6장 철근콘크리트공사	보완		2. 기계 및 인력비빔타설 개정 토목 6-1-1 / 2. 기계 및 인력비빔타설과 동일	건축
	신설		3. 표면 마무리 개정 토목 6-1-1 / 3. 표면 마무리와 동일	건축

항목	구분	현 행	개 정 사 항	비고
제6장 철근콘크리트공사	보완	6-1-2 콘크리트 펌프차 타설 토목 6-1-2 콘크리트 펌프차 타설과 동일	6-1-2 콘크리트 펌프차 타설 개정 토목 6-1-2 콘크리트 펌프차 타설과 동일	건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

삭제

6-3 거푸집

6-3-1 목재 거푸집

(㎡당)

종별	단위	기준수량 (1회사용시)	사용횟수별기준수량에대한 비율(%)			비고
			횟 수 별	재 료 비	노 무 비
토목 6-3-1 목재거푸집과 동일
비 고	- 토목 6-3-1 목재거푸집과 동일 - Slab 거푸집 설치부위가 경사진 바닥의 경우에는 다음에 따른다. ㉮ 합판 및 각재의 재료량은 5% 가산한다. ㉯ 인력품은 20% 가산한다. ㉰ 거푸집의 경사도 20˚ 미만을 기준으로 한다.

[주] ①∼⑦ 토목 6-3-1 목재거푸집과  동일

⑧ 폼타이(Form Tie) 사용시 소요수량은 콘크리트의 측압에 따라 다음에 의거 계상한다.

(조/㎡당)

측압 규격	3 t/㎡	4 t/㎡	5 t/㎡	6 t/㎡
7.9mm	1.07	1.42	1.80	2.14
9.5mm	0.71	0.97	1.19	1.43
12.7mm	0.53	0.72	0.88	1.07

㉮ 폼타이(D형 12.7mm 경우) 소요량은 거푸집 ㎡당 2.14본(1.07조)으로 하고 사용횟수는 10회로 한다.

㉯ 특수한 경우(거푸집 측압이 6t/㎡이상)일때에는 폼타이 수량을 적의 조정할 수 있다.

㉰ 세퍼레이터는 필요한 경우에 소모 재료로 계상한다.

→ 개정 6-3-1 / 1. 재료사용 / 나. 자재수량 [주] ④ ‘이기시행’

“ 계   속 ”

- 삭   제 -

건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

㉱ 폼타이 제거후 구멍땜이 필요할 때는 다음표를 기준으로 별도 계상한다.

(100개소당)

구분	단위	수 량	비고
시멘트	㎏	6.99	배합비 1 : 3 기준
모래	㎥	0.015
혼화재	g	-	(필요에 따라서 별도계상)
보통인부	인	0.62

※ 본 품의 폼타이 규격은 12.7mm를 기준한 것임.

※ 코킹재를 사용할 경우에는 별도 계상함.

→ 개정 6-3-1 / 1. 재료사용 / 나. 자재수량 [주] ⑤ ‘이기시행’

㉲ 폼타이와 철선은 시공부위나 시공정도에 따라 선택 사용하되 중복계상하지 아니한다.

→ 삭제

⑩ 사용횟수는 공정, 공종 및 시공방법에 따라서 결정하되 제치장 및 특이한 구조물을 제외하고는 3회 이하인 경우에는 목재(판재) 거푸집과 비교 설계하여 결정한다.

→ 삭제

⑪ 기둥면접기 및 물끓기에 필요한 각재는 시공방법에 따라서 결정하되 특이한 구조물을 제외하고는 다음을 표준으로 한다.

(m당)

구분	규격	단위	수 량	비고
기둥면접기	△2.1㎝×2.1㎝×1m	㎥	0.000247	할증 10% 포함
물끓기	□1.5㎝×1.5㎝×1m	㎥	0.00025	할증 10% 포함

→ 삭제

“ 계   속 ”

건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

[계산예]

◦ 재료비 A = A1+A2+A3+A4+A5

판재	: 0.03 ×0.77×A1' =A1	판재와 각재의 사용고재

각재	: 0.038×0.77×A2' =A2	평가기준 23%를 공제한 것임

철선	: 0.29 × A3' =A3

못	: 0.25 × A4' =A4

박리제	: 0.19 × A5' =A5

◦ 노무비 B = B1+B2

형틀목공 : 0.34×B1' =B1

보통인부 : 0.27×B2' =B2

◦ 1회 사용시 재료비는 A이고 노무비는 B이므로

2회사용시	1회사용시재료비(A)×57.7% ………………………… 재료비 1회사용시노무비(B)×63% ………………………… 노무비
3회사용시	1회사용시재료비(A)×46.6% ………………………… 재료비 1회사용시노무비(B)×51.6% ………………………… 노무비
4회사용시	1회사용시재료비(A)×39.7% ………………………… 재료비 1회사용시노무비(B)×45.9% ………………………… 노무비

→ 삭제

건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

6-3-2 합판거푸집

(㎡당)

종별	단위	기준수량 (1회사용시)	사용횟수별기준수량에대한 비율(%)			비고
			횟 수 별	재료비(%)	노무비(%)
토목 6-3-2 합판거푸집과 동일
비 고	- 토목 6-3-2 합판거푸집과 동일 - Slab 거푸집 설치부위가 경사진 바닥의 경우에는 다음에 따른다. ㉮ 합판 및 각재의 재료량은 5% 가산한다. ㉯ 인력품은 20% 가산한다. ㉰ 거푸집의 경사도 20˚ 미만을 기준으로 한다.

[주] ① ~ ⑤ 토목 6-3-2 합판거푸집과 동일

⑥ 수중에서 거푸집을 조립·해체할 때에는 별도 계상할 수 있다.

⑦ 토목 6-3-2 합판거푸집 [주] ⑥과 동일

⑧ 폼타이(Form Tie) 사용시 소요수량은 콘크리트의 측압에 따라 다음에 의거 계상한다.

(조/㎡당)

측압 규격	3 t/㎡	4 t/㎡	5 t/㎡	6 t/㎡
7.9mm	1.07	1.42	1.80	2.14
9.5mm	0.71	0.97	1.19	1.43
12.7mm	0.53	0.72	0.88	1.07

㉮ 폼타이(D형 12.7mm 경우) 소요량은 거푸집 ㎡당 2.14본(1.07)으로 하고 사용횟수는 10회로 한다.

㉯ 특수한 경우(거푸집 측압이 6t/㎡이상) 일때에는 폼타이 수량을 적의 조정할 수 있다.

㉰ 세퍼레이터는 필요한 경우에 소모 재료로 계상한다.

→ 개정 6-3-1 / 1. 재료사용 / 나. 자재수량 [주] ④ ‘이기시행’

“ 계   속 ”

6-3-1 합판거푸집

개정 토목 6-3-1 합판거푸집과 동일

건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

㉱ 폼타이 제거후 구멍땜이 필요할 때는 다음표를 기준으로 별도 계상한다.

(100개소당)

구분	단위	수 량	비고
시멘트	㎏	6.99	배합비 1 : 3 기준
모래	㎥	0.015
혼화재	g	-	(필요에 따라서 별도계상)
보통인부	인	0.62

※ 본 품의 폼타이 규격은 12.7mm를 기준한 것임.

※ 코킹재를 사용할 경우에는 별도 계상함.

→ 개정 6-3-1 / 1. 재료사용 / 나. 자재수량 [주] ⑤ ‘이기시행’

㉲ 폼타이와 철선은 시공부위나 시공정도에 따라 선택 사용하되 중복계상하지 아니한다.

→ 삭제

⑨ 사용횟수는 공정, 공종 및 시공방법에 따라서 결정하되 제치장 및 특이한 구조물을 제외하고는 3회 이하인 경우에는 목재(판재) 거푸집과 비교 설계하여 결정한다.

→ 삭제

⑩ 기둥면접기 및 물끓기에 필요한 각재는 시공방법에 따라서 결정하되 특이한 구조물을 제외하고는 다음을 표준으로 한다.

(m당)

구분	규격	단위	수 량	비고
기둥면접기	△2.1㎝×2.1㎝×1m	㎥	0.000247	할증 10% 포함
물끓기	□1.5㎝×1.5㎝×1m	㎥	0.00025	할증 10% 포함

→ 삭제

“ 계   속 ”

건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

[계산예]

◦재료비	A = A1+A2+A3+A4+A5
판재	:	1.03×0.77×A1' =A1			합판과 각재의 사용고재
각재	:	0.038×0.77×A2'=A2			평가기준 23%를 공제한 것임
철선	:	0.29×A3' =A3
못	:	0.20×A4' =A4
박리제	:	0.19×A5' =A5

◦노무비	B = B1+B2
형틀목공	:	0.22×B1' =B1
보통인부	:	0.12×B2' =B2

◦ 1회 사용시 재료비는 A이고 노무비는 B이므로

2회사용시	1회사용시재료비(A)×57.0% ………………………… 재료비 1회사용시노무비(B)×60.0% ………………………… 노무비
3회사용시	1회사용시재료비(A)×46.1% ………………………… 재료비 1회사용시노무비(B)×47.1% ………………………… 노무비
4회사용시	1회사용시재료비(A)×40.1% ………………………… 재료비 1회사용시노무비(B)×40.0% ………………………… 노무비
5회사용시	1회사용시재료비(A)×37.1% ………………………… 재료비 1회사용시노무비(B)×34.2% ………………………… 노무비
6회사용시	1회사용시재료비(A)×34.7% ………………………… 재료비 1회사용시노무비(B)×32.0% ………………………… 노무비

→ 삭제

건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

삭제

6-3-3 제치장 거푸집(제물치장 거푸집)

(㎡당)

종 별	단위	기준수량		사용횟수별 기준수량에 대한 비율(%)
		목 재	합 판	구 분		목 재	합 판
판재	㎥	0.03	-	1회 사용시	재 료 비 노 무 비	100% 100%	100% 100%
합판	㎡	-	1.03
각재	㎥	0.038	0.038
철선	㎏	0.29	0.29
못	㎏	0.25	0.2	2회 사용시	재 료 비 노 무 비	57.7% 63%	57% 60%
볼트	개	2	2
나무덧쇠	개	2	2
박 리 제	ℓ	0.19	0.19
형틀목공	인	0.42	0.23	제작･조립･철거 포함
보통인부	인	0.24	0.14
사용고재 평가기준	(%)	23	23	판재･합판 및 각재의 설계단가를 기준으로 함

[주] ① 본 품에는 제치장 거푸집(제물치장 콘크리트용 거푸집)의 제작ㆍ조립ㆍ설치에 소요되는 품이 포함되어 있다.

② 본 품에서 2회의 사용고재량은 횟수별 비율속에 포함되어 있다.

③  본 품의 기준수량은 1회 사용시를 기준한 것이므로 2회 사용시의 재료 및 노무비를 계상하고자 할 때는 횟수별 비율만을 적용한다.

④ 동바리 재료 및 품은 별도 계상한다.

⑤ 곡면 및 특수형상부분(와플슬래브, 난간 등)의 거푸집자재 및 품은 별도 계상할 수 있다.

⑥ 볼트의 손율은 15%이다.

⑦ 파이프는 별도 계상한다.

⑧ 합판규격은 12㎜ 내수합판을 기준한 것이다.

- 삭   제 -

< ‘6-3-2 합판 거푸집’에 반영 >

건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

6-3-4 유로폼(EURO FORM)

(10㎡당)

구분	규 격	단위	수 량
			벽	바 닥
토목 6-3-5 유로폼과 동일

[주] ① 본 품은 철근콘크리트 벽식구조를 기준한 것이다.

→ 삭제

②∼⑧ 토목 6-3-5 유로폼과 동일

6-3-2 유로폼

개정 토목 6-3-3 유로폼과 동일

건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

6-3-5 알루미늄폼 조립해체

(10㎡당)

구분	단위	수량
형 틀 목 공	인	0.72
보 통 인 부	인	0.42

[주] ① 본 품은 철근콘크리트 벽식구조를 기준한 것이다.

→ 개정 6-3-3 / 1.적용범위 ① ‘이기시행’

② AL PANEL은 150회 사용으로 한다.

→ 개정 6-3-3 / 1.적용범위 ③ ‘이기시행’

③ 본 품에는 소운반, 청소, 기름칠 및 보수품이 포함되어 있다.

→ 개정 6-3-3 / 1.적용범위 ② ‘보완’

④ 재료 및 손료는 별도 계상한다.

→ 개정 6-3-3 / 1.적용범위 ④ ‘이기시행’

⑤ 기계경비는 별도 계상한다.

→ 개정 6-3-3 / 1.적용범위 ④ ‘이기시행’

⑥ 동바리 설치품은 별도 계상한다.

→ 개정 6-3-3 / 1.적용범위 ② ‘이기시행’

6-3-3 알루미늄폼

적용범위

① 본 품은 철근콘크리트 벽식구조에서 일반 알루미늄 폼의 조립, 해체를 기준한 것이다.

② 본 품에는 조립, 해체, 청소, 보수작업이 포함되어 있으며, 동바리 설치 및 해체는 별도 계상한다.

③ 알루미늄 판넬은 150회 사용을 기준한다.

④ 재료 및 기계경비는 별도 계상한다.

⑤ 알루미늄 폼의 품 적용은 다음을 참조한다.

구조물	적용면적(㎡)
셋 팅 층	알루미늄폼이 설치되는 최저층
일반층 설치 및 해체	전체층수-2개층(셋팅층, 마감층)
마 감 층	알루미늄폼이 해체되는 최상층

⑥ 본 품은 단면에 변화가 없는 기준이며, 단면의 형태 및 크기에 변화가 발생되는 경우 현장 여건에 따라 “2.셋팅층 및 마감층”을 조정하여 별도 계상한다.

2. 셋팅층 및 마감층

(10㎡당)

구분	단위	수량
		셋팅층	마감층
형 틀 목 공	인	2.73	1.30
보 통 인 부	인	0.87	0.41

[주] ① 셋팅층은 알루미늄 폼을 현장 반입하여 최저층에서 최초 조립, 해체하는 기준이다.

② 마감층은 최상층에서 알루미늄 폼을 조립하여 해체 정리하는 기준이다.

3. 일반층

(10㎡당)

구분	단위	수량
형 틀 목 공	인	0.47
보 통 인 부	인	0.15

[주] 일반층은 셋팅층 이후 최상층전까지 각 층마다 조립 후 해체하는 기준이다.

건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

6-3-6 갱폼 조립해체(Gang Form)

(㎡당)

구 분	단 위	수 량
형 틀 목 공	인	0.067
보 통 인 부	인	0.029

[주] ① 기계경비는 별도 계상한다.

→ 개정 6-3-4 / 1.적용범위 ③, ④ ‘보완’

② 청소, 기름칠 및 보수품이 포함된 것이다.

→ 개정 6-3-4 / 1.적용범위 ② ‘이기시행’

③ 재료 및 손료는 별도 계상한다.

→ 개정 6-3-4 / 1.적용범위 ⑤ ‘이기시행’

④ 갱폼용 핸드레일 및 작업발판 재료 및 품은 별도 계상한다.

→ 개정 6-3-4 / 1.적용범위 ⑥ ‘이기시행’

6-3-4 갱폼

1. 적용범위

① 본 품은 철근콘크리트 구조의 갱폼 조립․ 해체를 기준한 것이다.

② 본 품에는 조립, 해체, 청소, 보수작업이 포함되어 있다.

③ 양중에 소요되는 기계경비(크레인 등)는 별도 계상한다.

④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

⑤ 재료 및 손료는 별도 계상한다.

⑥ 갱폼용 핸드레일 및 작업발판의 재료 및 품은 별도 계상한다.

⑦ 갱폼의 품 적용은 다음을 참조한다.

구조물	적용면적(㎡)
셋 팅 층	갱폼이 설치되는 최저층
일반층 설치 및 해체	전체층수-2개층(셋팅층, 마감층)
마 감 층	갱폼이 해체되는 최상층

⑧ 본 품은 단면에 변화가 없는 기준이며, 단면의 형태 및 크기에 변화가 발생되는 경우 현장 여건에 따라 “2.셋팅층 및 마감층”을 조정하여 별도 계상한다.

2. 셋팅층 및 마감층

(10㎡당)

구분	단위	수량
		셋팅층	마감층
형 틀 목 공	인	1.89	1.32
보 통 인 부	인	0.59	0.41

[주] ① 셋팅층은 갱폼을 현장 반입하여 최저층에서 최초 조립, 해체하는 기준이다.

② 마감층은 최상층에서 갱폼을 조립 및 해체 정리하는 기준이다.

3. 일반층

(10㎡당)

구분	단위	수량
형 틀 목 공	인	0.48
보 통 인 부	인	0.15

[주] 일반층은 셋팅층 이후 최상층전까지 각 층마다 조립 후 해체하는 기준이다.

건축

2017년 적용 건설공사표준품셈

- 제14장 금속공사 -

2017. 1.

	국토교통부
	한국건설기술연구원

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제14장

금속공사

삭제

14-3 각종 금속망 붙임

14-3-1 라스붙임

(㎡당)

공종별 구 분단위		아스팔트 펠트	메탈라스	다이아몬드 라스	원형라스	리브라스
라 스	㎡	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
펠 트	㎡	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
U 형 못	㎏	0.04	0.04	0.04	0.04	-
힘 살 철 선	개	-	-	1.8	1.8	0.1
(#10길이 1.8m)
미장공(벽)	인	0.013	0.02	0.025	0.025	0.025
〃 (천장)	〃	0.017	0.025	0.03	0.033	0.033
〃(돌림띠)	〃	0.025	0.05	0.10	0.067	0.067
〃 (기둥)	〃	0.025	0.04	0.045	0.05	0.05
〃(추녀천장)	〃	0.022	0.035	0.070	0.054	0.047

[주] 본 품은 재료의 할증이 포함되어 있다.

- 삭   제 -

건축

제15장

미장공사

신설

15-1 모르타르 바름

15-1-3 라스 붙임

(10㎡당)

구분	단위	수량
미장공	인	0.14

[주] 본 품은 미장면 보강을 위해 미장 시 메탈라스 또는 유리섬유메쉬를 붙이는 작업을 기준한 것이다.

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제14장

금속공사

보완

14-8 난간설치

14-8-1 용접식 난간

(ton당)

구 분	단위	수 량		비고
		스테인리스제	철 제
용 접 봉	㎏	6.7	6.15
용 접 공	인	13.86	10.15
특별인부	인	7.7	5.83
보통인부	인	8.98	6.89

[주] ① 본 품은 스테인리스제, 철제 난간(발코니･계단)설치에 대한 일반적 기준이며 특수제작 및 설치시는 별도 계상할 수 있다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 제작에 소요되는 재료 및 품은 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ② ‘보완’

③ 스테인리스 발코니 난간설치에 있어서 비계매기 또는 장애물 처리에 비계공이 필요한 경우에는 “14-5 각종 잡철물 제작 설치”의 비계공을 계상할 수 있다.

→ 개정 [주] ⑤ ‘이기시행’

④ 설치용 장비가 필요한 경우에는 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ⑥ ‘이기시행’

⑤ 본 품은 소운반 품이 포함되어 있다.

→ 삭제

⑥ 설치에 필요한 용접기 손료 및 전력소요량은 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ⑦ ‘보완’

⑦ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

→ 개정 [주] ⑦ ‘보완’

14-8 난간설치

14-8-1 용접식 난간

(ton당)

구분	단위	주자재 제작설치	규격자재 설치
용접공	인	9.73	6.02
특별인부	인	10.81	6.69
보통인부	인	3.16	1.95
비 고	- 경량철물(스테인리스)의 설치는 본 품의 25%를 가산한다.

[주] ① 본 품은 용접을 사용한 철제 난간 설치를 기준한 것이다.

② 주자재 제작설치는 형상의 변화가 다양(진입램프 및 계단 등)하여 현장에서 주자재가 제작(절단, 가공, 용접 등)되어 설치되는 기준이다.

③ 규격자재 설치는 유사규격이 연속적으로 시공이 가능(외부발코니 등)하여 1차 제작되어 반입되는 기준으로, 현장에서 용접 접합 및 설치하는 기준이다.

④ 용접부위의 갈기 및 재도장이 필요한 경우는 별도 계상한다.

⑤ 난간 설치에 있어 비계매기 또는 장애물처리에 필요한 경우 별도 계상한다.

⑥ 설치용 장비(크레인 등)가 필요한 경우 별도 계상한다.

⑦ 공구손료 및 경장비의 기계경비(용접기, 절단기 등), 잡재료(용접봉 등)비는 인력 품에 다음 요율을 계상한다.

구분	주자재 제작설치	규격자재 설치
공구손료 / 경장비기계경비	2%	2%
잡재료비	2%	2%

건축

2017년 적용 건설공사표준품셈

- 제17장 칠공사 -

2017. 1.

	국토교통부
	한국건설기술연구원

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제17장

칠공사

보완

17-5 오일스테인칠

(㎡당)

바탕별	재료명	단위	칠수량			도 장 공 (인)
			1회	2회	3회	1회	2회	3회
목재면	오일스테인	㎏	0.091	0.15	-
	시너	ℓ	0.008	0.018	-	0.024	0.045
	퍼티	㎏	0.006	0.006	-

[주] ① 본 품은 재료의 할증, 공구손료 및 소운반품이 포함되어 있다.

→ 개정 [주] ③ ‘보완’

② 바탕처리용 스테인 휠러는 별도 가산하고, 품은 ㎡당 0.021∼0.03인을 가산한다.

→ 개정 [품] 비고 ‘이기시행’

③ 소모재료는 필요에 따라 다음을 표준으로 계상한다.

(㎡당)

구 분	단 위	1회칠	2회칠
가솔린	ℓ	0.02	0.02
넝마	㎏	0.01	0.01

→ 개정 [주] ③ ‘보완’

17-5 오일스테인칠

(㎡당)

구 분	단 위	수 량
도장공	인	0.021
보통인부	인	0.004
비 고	- 바탕처리용 스테인 휠러는 별도 가산하고, 품은 ㎡당 도장공 0.021∼0.03인을 가산한다.

[주] ① 본 품은 목재면에 오일스테인을 붓으로 1회 칠하는 기준이다.

② 비계사용시 높이별 품 할증은 “17-1-1 도장 전 바탕만들기”에 준하여 계상한다.

③ 재료량은 다음을 참고하며, 상세 수량은 도료종류에 따라 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용할 수 있다.

구 분		단 위	1회칠	2회칠
주재료	오일스테인	kg	0.091	0.150
	시너	L	0.008	0.018
	퍼티	kg	0.006	0.006

※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이며, 각 횟수의 재료량은 합산한 누계 수치이다.

※ 잡재료비(가솔린, 넝마)는 주재료(오일스테인, 시너)의 6%로 계상한다.

건축

2017년 적용 건설공사표준품셈

- 제18장 기타잡공사 -

2017. 1.

	국토교통부
	한국건설기술연구원

편 제 – 현 행

⇨

편 제 – 개 정 사 항

대분류	중분류	세분류	비 고
18-1 해체철거공사	1.목조건물 철거		삭 제
	2.건축물 구조체별 철거		18-1-1 건축물 구조체별 철거
	3.헐기 및 부수기	가. 인력	18-2-3 돌공사
		나. 소형장비 사용	18-2-1 콘크리트 구조물
		다. 기계사용
	4.철골재 철거		18-2-2 철골재 구조물
	5.기존방수층 및 보호층 철거		18-1-2 기존방수층 및 보호층 철거
	6.석면건축자재 해체		18-1-3 석면건축자재 해체
18-2 철조망(P.V.C 코팅망) 울타리 설치			제14장 금속공사 편제 이동
18-3 RC구조물 발파해체공법	1.내장재 철거작업		삭 제
	2.사전취약화 작업
	3.천공 및 발파
	4.방호
	5.붕괴구조물 2차파쇄
	6.발생재 처리

대분류	중분류	세분류
18-1 분별해체공사	18-1-1 건축물 구조체별 철거
	18-1-2 기존 방수층 및 보호층 철거
	18-1-3 석면건축자재 해체
18-2 구조물 헐기 및 부수기	18-2-1 콘크리트 구조물	1. 소형장비 사용
		2. 대형장비 사용
	18-2-2 철골재 구조물
	18-2-3 돌공사
14-10 철조망(P.V.C 코팅망) 울타리 설치
- 삭 제 -

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제18장

기타잡공사

삭제

18-1 해체철거공사

1. 목조건물 철거

(연건평, ㎡당)

구분	건 축 목 공 (인)
해체재를 재사용치 않을 경우	0.12 ∼ 0.2
해체재를 일부 재사용할 경우	0.2∼ 0.45
이축할 경우	0.3∼ 0.54

[주] ① 본 품에는 보통인부품이 포함되어 있다.

② 본 품은 와가(瓦家)를 기준으로 한 것이다.

- 삭   제 -

건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제18장

기타잡공사

보완

3. 헐기 및 부수기

가. 인력

구 분	단위	할석공(인)	보통인부(인)
메쌓기 뒷길이 45∼60㎝	㎡당	-	0.2
메쌓기 뒷길이 60∼90㎝	㎡당	-	0.3
찰쌓기	㎡당	-	0.6
절석 (마름돌) 쌓기	㎥당	0.1	1.1
벽돌	㎥당	0.1	1.0
콘크리트	㎥당	2.0	-
철근콘크리트	㎥당	5.0	-

[주] ① 잡재료는 인력품의 5%이내에서 계상한다.

→ 개정 [주] ④ ‘이기시행’

② 발생품을 재사용코자 할 때나 제자리 고르기를 할 경우는 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ② ‘이기시행’

③ 본 품은 기준높이 3.6m일 때의 품이며 그 이상일 때의 작업 안전설비 및 특수 조건에 대한 품은 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ① ‘이기시행’

④ 본 품은 부수기내의 장애물 제거(철근, 파이프 등) 및 공구손료가 포함되어 있다.

→ 개정 [주] ③ ‘이기시행’

18-2 구조물 헐기 및 부수기

18-2-3 돌공사

구 분	단위	할석공(인)	보통인부(인)
메쌓기 뒷길이 45∼60㎝	㎡당	- 현행과 동일 -
메쌓기 뒷길이 60∼90㎝	㎡당
찰쌓기	㎡당
절석 (마름돌) 쌓기	㎥당
벽돌	㎥당

[주] ① 본 품은 기준높이 3.6m일 때의 인력헐기를 기준한 것이며, 그 이상일 때의 작업 안전설비 및 특수 조건에 대한 품은 별도 계상한다.

② 발생품을 재사용코자 할 때나 제자리 고르기를 할 경우는 별도 계상한다.

③ 본 품은 부수기내의 장애물 제거(철근, 파이프 등) 및 공구손료가 포함되어 있다.

④ 잡재료는 인력품의 5%이내에서 계상한다.

건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제18장

기타잡공사

보완

3. 헐기 및 부수기

나. 소형장비 사용

(10㎥당)

명칭	단위	구 분		비고
		무근구조물	철근구조물
착 암 공	인	5.7	6.2
보 통 인 부	인	3.7	4.5
소 형 브 레 이 커	시간	10	32	소형브레이커 25kg급
공기압축기	시간	5	16	공기압축기 3.5㎥ / min

[주]  ① 철근 절단이 필요한 경우 별도 계상할 수 있다.

→ 개정 [주] ② ‘이기시행’

② 잡재료는 인력품의 1%까지 계상할 수 있다.

→ 개정 [주] ④ ‘보완’

③ 공기압축기 1대와 소형브레이커 2대의 조합이다.

→ 삭제

18-2-1 콘크리트 구조물

1. 소형장비 사용

(㎥당)

구분	규격	단위	공압식		전기식
			무근	철근	무근	철근
착암공		인	0.57	0.62	0.78	0.92
보통인부		인	0.37	0.45	0.33	0.39
소 형 브 레 이 커	1.3㎥/min	hr	1.00	3.20	3.77	4.40
공기압축기	3.5㎥/min	hr	0.50	1.60	-	-

[주]  ① 본 품은 소형브레이커(공압식 또는 전기식)을 사용한 콘크리트 구조물 헐기 작업을 기준한 것이다.

② 철근 절단이 필요한 경우 별도 계상한다.

③ 소형브레이커의 규격은 다음을 기준으로 한다.

구 분	공압식	전기식
소형브레이커	1.3㎥/min	1.5㎾

④ 잡재료비(치즐 등)는 인력품의 1%로 계상한다.

건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제18장

기타잡공사

보완

3. 헐기 및 부수기

다. 기계사용

(㎥당)

구분	단위	수량	비 고
산소	ℓ	135
아세틸렌	㎏	0.05
용접공	인	0.02
보통인부	인	0.08

[주] ① 본 품은 기계를 사용하여 철근콘크리트 헐기 및 부수기할 때의 품이며 기계경비는 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ① ‘보완’

② 발생품을 재사용코자 할 때나 제자리 고르기를 할 경우는 별도 계상한다.

→ 삭제

③ 본 품은 기준높이 10m일 때의 품이며 그 이상일 때의 작업안전설비 및 특수조건에 대한 품은 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ② ‘이기시행’

④ 공사장의 보호 및 안전시설의 설치비는 별도 계상한다.

→ 개정 [주] ④ ‘이기시행’

⑤ 본 품은 부수기내의 장애물 제거(철근･파이프 등)가 포함되어 있다.

→ 삭제

⑥ 기계경비 산정시 기계조합은 다음을 기준으로 한다.

기계명	규격	작 업 능 력
굴삭기	1.0㎥	3.5㎥/시간
대형브레이커
압쇄기

→ 삭제

18-2-1 콘크리트 구조물

1. 대형장비 사용

(㎥당)

구분	규격	단위	장애물 미제거	장애물 제거
용접공		인	-	0.02
보통인부		인	0.06	0.08
굴삭기+압쇄기	1.0㎥	hr	0.20	-
굴삭기+브레이커+압쇄기	1.0㎥	hr	-	0.29

[주]  ① 본 품은 대형장비를 사용하여 철근콘크리트 구조물 헐기 및 부수기 작업을 기준한 것이며, 폐기물 상차 및 운반은 별도 계상한다.

② 본 품은 기준높이 10m이하 일 때의 품이며 그 이상일 때의 작업안전설비 및 특수조건에 대한 품은 별도 계상한다.

③ 장애물 미제거 시 굴삭기+브레이커가 필요한 경우 ‘8-20 대형브레이커’를 참조하여 별도 계상한다.

④ 공사장의 보호 및 안전시설의 설치비는 별도 계상한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(살수장비 등)의 기계경비는 인력품의 6%로 계상한다.

⑥ 장애물 제거(철근, 파이프 등) 시 재료량은 다음을 참고한다.

(㎥당)

구분	단위	수량
산소	L	135
아세틸렌	kg	0.05

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

건축

항목	구분	현 행	개 정 사 항	비고
제18장 기타잡공사	삭제	18-3 RC구조물 발파해체공법 1. 내장재 철거작업 ◦ “18-1. 2. 건축물 구조체별 철거”에 준하여 계상한다.	- 삭 제 -	건축
	삭제	2. 사전취약화 작업 ◦ 천공 및 발파작업 이전에 사전취약화 작업을 위해 지상에서 건물 하층부 내외부벽체를 장비로 철거할 때에는 “토목부문 8-20 대형브레이커”에 준하여 계상한다. ◦ 지상3층 이상에서 내외부 벽체를 인력으로 철거(부분 또는 전면)할 때에는 “18-1. 3. 가. 인력”에 준하여 계상한다. ◦ 구조물 붕괴시 폭풍압에 의해 버럭의 비산 및 분진방지를 위해 필요한 버럭 소운반 및 처리품은 별도 계상한다.	- 삭 제 -	건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제18장

기타잡공사

삭제

3. 천공 및 발파

(천공길이 m당)

구분 구조물 종류	폭약 (㎏)	뇌관 (개)	비트 (개)	화약공 (인)	보통 인부 (인)	착암공 (인)	착암기 (시간)	공기 압축기 (시간)
RC 라멘조	0.280	2.0	0.0025	0.253	0.053	0.148	0.6134	0.3067
대단면RC부재	0.4572	1.3	0.0025	0.109	0.086	0.015	0.1135	0.1135

[주] ① 본 품에는 시험발파 및 본발파에 관련된 장약, 전색, 결선 등의 작업품이 포함되어 있다.

② RC라멘조에서 뇌관개수는 천공길이 0.5m당 1개를 기준한 것이며, 발파설계방식 및 천공길이에 따라 조정 적용할 수 있다.

③ 대단면 RC부재에서 뇌관개수는 다단장약(Deck charge)인 경우이고, 장약중 심간의 거리는 90㎝를 기준한 것이다.

④ RC라멘조에서 폭약량은 기둥단면치수 40㎝를 기준한 것으로 단면치수가 다를 때에는 기둥의 단폭을 기준으로 다음에 따라 산정한다.

단면치수(㎝)	30	40	50	60	70	80	90	100
폭 약(㎏)	0.280	0.280	0.280	0.320	0.350	0.350	0.360	0.400

⑤ RC라멘조에서 공기압축기는 10.3㎥/min, 착암기는 래그해마 30㎏급을 기준한 것이다.

⑥ 대단면 RC부재에서 공기압축기는 17.0㎥/min, 착암기는 크롤러드릴(17㎥/min)를 기준한 것이다.

⑦ 폭약은 일반상용 다이너마이트, 뇌관은 각선길이 6m, 지연초시 0.1초 이상의 지연뇌관을 기준한 것이다.

⑧ 본 품에서 대단면 RC부재는 단면두께 1.2m 이상인 부재를 말한다.

- 삭   제 -

건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제18장

기타잡공사

삭제

4. 방 호

(방호대상 부재면적 ㎡당)

구 분 구조물종류		철망 (㎡)	골함석 (㎡)	철선 (㎏)	부직포 (㎡)	강관 (m)	조임 철물 (개)	이음 철물 (개)	비계공 (인)	보통 인부 (인)	고소 작업차 (시간)
RC 라멘조	1차방호	1.34	1.69	0.97	2.03					0.068	0.007
	2차방호	1.03		1.06	1.07					0.019	0.027
	3차방호	1.10			1.10	2.03	0.72	0.12	0.019
대단면RC부재		1.57		1.14	2.19					0.097	0.163

[주] ① 1차방호는 발파대상기둥을 골함석 1겹(3.5t), 철망 1,2겹, 부직포 2겹을 기본방호로 했을 때 기준이다.

② 2차방호는 발파층 외부 전체를 부직포 1겹, 능형철망 2겹으로 방호할 때를 기준한 것이다.

③ 3차방호는 발파대상 건물주변의 피해를 방지하기 위해 방호가 필요한 시설물쪽만 설치하는 것으로 높이 6m인 단관외줄비계를 장선간격 1.5m, 기둥간격 1.5m, 버팀대를 비계 내외부로 6m 간격마다 설치할 때를 기준한 것이다.

④ 대단면 RC부재의 방호품은 1차방호를 기준한 것으로 2, 3차 방호가 필요한 경우는 별도 계상한다.

⑤  1, 2차 방호에서 철망은 능형철망(#8-52×52)을, 3차방호는 메탈라스(#200)를 기준한 것이다.

⑥ RC 라멘조 건물의 3차방호는 주변에 방호가 반드시 필요한 시설물이 있을 때만 계상한다.

- 삭   제 -

건축

항목	구분	현 행	개 정 사 항	비고
제18장 기타잡공사	삭제	5. 붕괴구조물 2차파쇄 ◦ “18-1. 3. 나. 기계사용”에 준하여 계상한다. 단, 대단면 구조물은 발파후 남은 잔여부분에 대해서만 2차 파쇄품을 계상하며, 라멘조 건물은 발파붕괴로 구조물의 상당부가 파쇄되므로 구조물의 종류와 층수(또는 높이)에 따라 2차 파쇄물량을 별도로 추정하여 계상한다.	- 삭 제 -	건축
	삭제	6. 발생재 처리 ◦ 철거공사에서 발생되는 폐기물을 폐기물관리법 등의 규정에 따라 적정하게 처리하는데 소요되는 비용은 별도 계상한다.	- 삭 제 -	건축

기 계 설 비 부 문

2017년 적용 건설공사표준품셈

- 제Ⅱ편 기계설비공사 제1장 공통공사 -

2017. 1.

	국토교통부
	한국건설기술연구원

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

1-1 배관공사

1-1-2 금속관 배관

1. 강관배관

가. 용접식('04년 보완, '13년 보완, '15년 보완)

(1) 배관

(m당)

규 격(㎜)	배관공(인)	보통인부(인)	규 격(㎜)	배관공(인)	보통인부(인)
ø15	0.029	0.022	100	0.155	0.065
20	0.033	0.023	125	0.200	0.081
25	0.043	0.026	150	0.236	0.093
32	0.051	0.029	200	0.365	0.138
40	0.057	0.031	250	0.489	0.181
50	0.074	0.037	300	0.634	0.232
65	0.088	0.042	350	0.765	0.277
80	0.113	0.051	400	0.907	0.327
비 고	- 화장실 배관은 본 품에 20%, 기계실배관은 본 품의 30%를 가산한다. - 옥외배관(암거내)은 본 품에 10% 감한다.

[주] ① 본 품은 배관용 탄소 강관(KSD 3507)의 옥내일반배관 기준이다.

② 본 품은 인서트, 지지철물설치, 소운반, 절단, 배관(가용접), 배관시험을 포함한다.

③ 단열 지지대 및 관 지지대 설치 시에는 별도 계상한다.

④ 밸브류 설치품은 “1-2-1 밸브 및 콕류”를 적용하고, 관이음부속류의 설치품은 본 품에 포함되어 있으며, 용접접합품은 별도 계상한다.

1-1 배관공사

1-1-2 금속관 배관

1. 강관배관

가. 용접식('04년 보완, '13년 보완, '15년 보완)

(1) 배관

(m당)

규 격(㎜)	배관공(인)	보통인부(인)	규 격(㎜)	배관공(인)	보통인부(인)
- 현행과 동일 -

[주] ① 본 품은 배관용 탄소 강관(KSD 3507)의 옥내일반배관 기준이다.

② 본 품은 인서트(거푸집용 인서트 기준이며, 현장여건에 따라 콘크리트용 인서트를 사용할 경우 건축부문 ‘14-6 인서트’ 적용), 지지철물설치, 소운반, 절단, 배관(가용접), 배관시험을 포함한다.

③ 단열 지지대 및 관 지지대 설치 시에는 별도 계상한다.

④ 밸브류 설치품은 “1-2-1 밸브 및 콕류”를 적용하고, 관이음부속류의 설치품은 본 품에 포함되어 있으며, 용접접합품은 별도 계상한다.

기계

설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

1-1 배관공사

1-1-2 금속관배관/1.강관배관/나.나사식

1-1-2 금속관배관/1.강관배관/다.그루브조인트식

1-1-2 금속관배관/2.동관배관/가.배관

1-1-2 금속관배관/3.스테인리스강관배관/가.프레스식

1-1-2 금속관배관/3.스테인리스강관배관/나.용접식/(1)배관

1-1-2 금속관배관/3.스테인리스강관배관/다.스테인리스주름관

1-1-2 금속관배관/4.주철관배관/가.기계식접합

1-1-2 금속관배관/4.주철관배관/나.수밀밴드접합

1-1-3 비금속관배관/1.경질관배관/가.접착제접합

1-1-3 비금속관배관/1.경질관배관/나.소켓접합

1-1-2 금속관 배관

1. 강관배관

가. 용접식('04년 보완, '13년 보완, '15년 보완)

(1) 배관

[주] ② 본 품은 인서트(거푸집용 인서트 기준이며, 현장여건에 따라 콘크리트용 인서트를 사용할 경우 건축부문 ‘14-6 인서트’ 적용), 지지철물설치, 소운반, 절단, 배관(가용접), 배관시험을 포함한다.

- 현행 10개 항목 상기 내용과 동일 적용 -

기계

설비

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제6장

철근콘크리트공사

보완

1-1-3 비금속관 배관

2. 연질관 배관

가. 폴리부틸렌(PB)관

(1) 일반 배관

(m당)

규격(㎜)	배관공(인)	보 통 인 부(인)
ø16	0.038	0.015
20	0.042	0.017

[주] ① 본 품은 폴리부틸렌(PB)관(KSM 3363)의 옥내난방배관을 기준한 것이다.

② 본 품은 절단, 소운반, 배관 및 고정철물 설치, 접합, 배관시험을 포함한다.

1-1-3 비금속관 배관

2. 연질관 배관

가. 폴리부틸렌(PB)관

(1) 일반 배관

(m당)

규격(㎜)	배관공(인)	보 통 인 부(인)
- 현행과 동일 -

[주] ① 본 품은 폴리부틸렌(PB)관(KSM 3363)의 급수, 급탕용 배관을 기준한 것이다.

② 본 품은 절단, 소운반, 배관 및 고정철물 설치, 접합, 배관시험을 포함한다.

기계

설비

부 록

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

[부록]

건설기계가격표

[부록] 건설기계가격표

기종	분류번호	가격
		￦	$
불도저 (무한궤도)	0101-0007	56,440
	0010		109,513
	0012		123,530
	0019	151,448
	0032	192,702
불도저 (타이어)	0102-0015		109,445
	0028		202,232
	0033		256,362
굴삭기 (무한궤도)	0201-0020	55,890
	0040	62,435
	0060	90,133
	0070	100,000
	0080	101,733
	0100	117,567
	0120	139,150
	0200	240,518
굴삭기 (타이어)	0211-0018	57,982
	0060	96,582
	0080	115,177
대형브레이커용 치즐	0231-0004	56
	0007	223
로더 (무한궤도)	0301-0057		40,424
	0076		52,854
	0095		64,765
	0115		76,740
	0134		87,580
	0153		97,906
	0172		107,385
	0287		170,044

[부록] 건설기계가격표

기종	분류번호	가격
		￦	$
불도저 (무한궤도)	0101-0007	58,817
	0010		112,832
	0012		127,950
	0019	153,422
	0032	198,543
불도저 (타이어)	0102-0015		112,762
	0028		208,361
	0033		264,132
굴삭기 (무한궤도)	0201-0020	57,445
	0040	64,434
	0060	91,883
	0070	96,703
	0080	106,433
	0100	117,033
	0120	149,043
	0200	255,933
굴삭기 (타이어)	0211-0018	56,900
	0060	98,517
	0080	115,230
- 삭 제 -
로더 (무한궤도)	0301-0057		37,535
	0076		49,077
	0095		60,137
	0115		71,256
	0134		81,322
	0153		90,910
	0172		99,712
	0287		157,893

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

[부록]

건설기계가격표

기종	분류번호	가격
		￦	$
로더 (타이어)	0302-0025	22,900
	0057	28,506
	0134	75,224
	0500	279,508
스크레이퍼 (자주식)	0406-0054		86,092
	0115		160,155
	0161		211,992
	0206		268,235
덤프트럭	0602-0025	19,143
	0045	22,349
	0060	24,422
	0080	32,563
	0105	46,008
	0150	80,182
	0200	110,894
	0240	126,783
	0320	183,807
머캐덤롤러 (자주식)	1106-0010		41,100
	0012		51,313
	0015		57,553
탠덤롤러 (진동자주식)	1209-0001		8,400
	0002		15,157
	0004		32,382
	0006		51,926
	0007		61,144
	0008		64,768
	0013		108,180
진동롤러(핸드가이드식)	1305-0007	5,670
진동롤러(자주식)	규격신설

기종	분류번호	가격
		￦	$
로더 (타이어)	0302-0025	23,100
	0057	29,267
	0134	75,265
	0500	278,142
스크레이퍼 (자주식)	0406-0054		79,940
	0115		148,711
	0161		196,844
	0206		249,068
덤프트럭	0602-0025	19,200
	0045	22,415
	0060	24,494
	0080	32,659
	0105	46,144
	0150	80,650
	0200	111,222
	0240	126,794
	0320	184,351
머캐덤롤러 (자주식)	1106-0010		39,592
	0012		49,430
	0015		55,441
탠덤롤러 (진동자주식)	1209-0001	9,223
	0002	16,642
	0004		35,555
	0006		52,210
	0007		67,136
	0008		70,691
	0013		118,782
진동롤러(핸드가이드식)	1305-0007	5,838
진동롤러(자주식)	1306-0120		76,922

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

[부록]

건설기계가격표

기종	분류번호	가격
		￦	$
진동롤러 (피견인식)	1307-0001		11,940
	0002		13,818
	0003		24,549
	0004		26,016
	0005		31,603
	0006		33,714
	0008		48,069
	0009		56,778
	0010		59,840
	0011		67,794
타이어롤러 (피견인식)	1407-0001		6,800
	0002		8,384
	0007		24,128
	0008		34,620
	0010		38,794
	0014		60,876
	0017		65,166
	0018		75,002
	0019		82,551
	0034		159,366
양족식롤러 (자주식)	1506-0011		84,123
	0012		95,056
	0015		109,452
	0019		157,613
	0025		199,012
	0030		238,803
	0032		255,943
	0037		298,793

기종	분류번호	가격
		￦	$
- 삭 제 -
양족식롤러 (자주식)	1506-0011		88,152
	0012		99,609
	0015		114,695
	0019		165,163
	0025		208,545
	0030		250,242
	0032		268,203
	0037		313,105

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

[부록]

건설기계가격표

기종	분류번호	가격
		￦	$
양족식진동롤러 (피견인식)	1507-0003		8,434
	0007		19,842
	0009		25,544
	0011		28,655
	0013		33,545
	0014		41,323
	0020		78,063
양족식진동롤러 (피견인식)	1509-0002		17,905
	0003		25,317
	0004		30,269
	0006		40,968
	0008		51,611
	0009		59,597
램머	1630-0080	1,134
크레인 (무한궤도)	2101-0050	384,303
	0280		1,916,883
	0300		2,354,847
크레인 (타이어)	2104-0010	111,037
	0015	163,912
	0020	210,177
	0025	237,936
	0030	290,811
	0035	311,961
	0040	343,685
	0045	375,410
	0050	467,336
	0060	515,528
	0070	594,840
	0080	740,245
	0100	883,759

기종	분류번호	가격
		￦	$
- 삭 제 -
램머	1630-0080	1,188
크레인 (무한궤도)	2101-0050	384,403
	0280		1,916,884
	0300		2,354,848
크레인 (타이어)	2104-0010	108,531
	0015	160,213
	0020	205,434
	0025	232,567
	0030	284,249
	0035	304,921
	0040	335,929
	0045	366,939
	0050	456,790
	0060	503,895
	0070	581,417
	0080	723,541
	0100	878,054

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

[부록]

건설기계가격표

기종	분류번호	가격
		￦	$
	0130		1,155,723
	0160		1,546,891
	0200		1,598,312
	0220		2,000,289
	0250		2,333,672
트럭탑재형크레인	2105-0002	25,835
	0003	28,843
	0005	34,000
	0010	68,333
	0015	89,024
	0018	89,923
크레인부수물 (셔 블)	2111-0029		6,386
	0038		12,309
	0057		18,003
	0076		25,558
	0115		41,472
	0153		44,250
	0191		52,451
	0229		68,221
	0268		86,309
크레인부수물 (백 호)	2112-0029		6.847
	0038		12.297
	0057		18.352
	0076		22.831
	0115		36.574
	0153		38.534
	0191		47.434
	0229		60.850
	0268		82.558

기종	분류번호	가격
		￦	$
	0130		1,129,643
	0160		1,511,984
	0200		1,598,312
	0220		1,955,151
	0250		2,281,010
트럭탑재형크레인	2105-0002	25,759
	0003	28,758
	0005	33,800
	0010	68,333
	0015	88,762
	0018	89,659
- 삭 제 -

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

[부록]

건설기계가격표

기종	분류번호	가격
		￦	$
크레인부수물 (드레그라인)	2113-0029		1,062
	0038		2,165
	0057		3,043
	0076		3,688
	0115		5,540
	0153		6,407
	0191		7,700
	0229		8,905
	0268		12,997
크레인부수물 (크 램 쉘)	2113-0029		1,141
	0038		1,320
	0057		2,126
	0076		3,503
	0115		4,288
	0153		4,962
	0191		5,311
	0229		6,347
	0268		9,532
지게차	2502-0020	21,743
	0025	23,243
	0035	28,437
	0050	40,024
	0075	51,173
아스팔트페이버 (피니셔)	3201-0000
	0003	176,092
현장가열표층재생기	3450-0642		3,493,854
콘크리트 스프레더	3701-0200		283,226
콘크리트 롤러페이버	3805-0120		63,357
슬러리실 기계	3901-0300		205,922

기종	분류번호	가격
		￦	$
- 삭 제 -
지게차	2502-0020	21,805
	0025	23,613
	0035	28,636
	0050	40,468
	0075	52,302
아스팔트피니셔	3201-0001	170,000
	0003	180,853
현장가열표층재생기	3450-0642		3,517,612
콘크리트 스프레더	3701-0200		262,987
콘크리트 롤러페이버	3805-0120		65,068
슬러리실 기계	3901-0300		207,322

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

[부록]

건설기계가격표

기종	분류번호	가격
		￦	$
콘크리트펌프차	4504-0021	142,610
	0032	220,580
	0036	285,575
	0041	280,000
	0043	358,333
	0047	410,000
크러셔 (이동식)	5105-0050		186,232
	0100		258,539
	0150		290,858
	0200		316,717
벨트컨베이어	5111-0040		4,886
	0050		5,122
	0060		6,068
	0076		6,946
	0091		8,201
에이프런피더	5112-0001		24,478
	0002		26,649
	0003		34,501
	0004		35,789
	0005		48,017
죠크러셔	5113-0001		22,519
	0002		24,167
	0003		28,383
	0004		30,423
	0005		40,829
	0006		61,739
	0007		63,950
	0008		99,161
	0009		119,903
	0010		123,290
	0011		285,326

기종	분류번호	가격
		￦	$
콘크리트펌프차	4504-0021	142,477
	0032	222,380
	0036	277,514
	0041	288,400
	0043	354,333
	0047	409,500
크러셔 (이동식)	5105-0050		199,697
	0100		277,231
	0150		311,887
	0200		339,616
벨트컨베이어	5111-0040		5,239
	0050		5,492
	0060		6,507
	0076		7,448
	0091		8,794
에이프런피더	5112-0001		26,248
	0002		28,576
	0003		36,995
	0004		38,377
	0005		51,489
죠크러셔	5113-0001		24,147
	0002		25,914
	0003		30,435
	0004		32,623
	0005		43,781
	0006		66,204
	0007		68,574
	0008		106,330
	0009		128,572
	0010		132,204
	0011		305,955

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

[부록]

건설기계가격표

기종	분류번호	가격
		￦	$
롤크러셔	5114-0001		17,551
	0002		24,644
	0003		38,910
	0004		52,174
	0005		53,842
	0006		71,563
	0007		100,321
	0008		123,971
콘크러셔	5115-0030		46,066
	0055		70,666
	0075		108,087
	0095		119,783
스크린(2단)	5116-0001		13,841
	0002		15,141
	0003		16,065
	0004		16,317
	0005		16,652
	0006		17,466
	0007		28,770
	0008		29,774
스크린(3단)	5117-0001		17,059
	0002		17,346
	0003		18,920
	0004		19,869
	0005		21,026
	0006		31,835
	0007		33,117
	0008		37,680

기종	분류번호	가격
		￦	$
롤크러셔	5114-0001		18,820
	0002		26,426
	0003		41,723
	0004		55,946
	0005		57,735
	0006		76,737
	0007		107,574
	0008		132,934
콘크러셔	5115-0030		49,397
	0055		75,775
	0075		115,902
	0095		128,443
스크린(2단)	5116-0001		15,027
	0002		16,439
	0003		17,442
	0004		17,715
	0005		18,079
	0006		18,963
	0007		31,236
	0008		32,326
스크린(3단)	5117-0001		18,521
	0002		18,833
	0003		20,541
	0004		21,572
	0005		22,828
	0006		34,563
	0007		35,955
	0008		40,909

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

[부록]

건설기계가격표

기종	분류번호	가격
		￦	$
아그리게이트빈	5118-0001		4,365
	0002		5,039
	0003		7,473
	0004		9,928
	0005		15,314
	0006		20,338
	0007		21,600
골재세척설비	5119-0625	55,000
파이프추진기 (오거부착유압식)	5202-0127		124,700
	0240		279,295
	0300		445,643
파이프추진기 (공압식)	5203-1800		30,495
	2200		36,787
	2700		54,001
	3500		77,409
	4500		126,012
유압잭	5204-0200	40,987
	0300	45,187
	0400	47,637
	0500	53,600
	0600	61,675
공기압축기 (이동식)	5205-0035	12,599
	0071	18,282
	0103	27,974
	0170	29,290
페이브먼트브레이커	5210-0016		1,443
	0025		1,424
	0036		2,016
착암기	5630-0027		2,431
- 신 설 -

기종	분류번호	가격
		￦	$
아그리게이트빈	5118-0001		4,739
	0002		5,471
	0003		8,113
	0004		10,779
	0005		16,626
	0006		22,081
	0007		23,451
골재세척설비	5119-0625	59,714
파이프추진기 (오거부착유압식)	5202-0127		135,387
	0240		303,231
	0300		483,835
파이프추진기 (공압식)	5203-1800		33,108
	2200		39,940
	2700		58,629
	3500		84,043
	4500		136,811
유압잭	5204-0200	44,500
	0300	49,060
	0400	51,719
	0500	58,194
	0600	66,961
공기압축기 (이동식)	5205-0035	12,148
	0071	17,968
	0103	27,299
	0170	29,554
소형브레이커 (공압식)	5201-0010		1,527
	0013		1,547
	0019		2,016
	0027		2,431
소형브레이커 (전기식)	5220-0015	1,145

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

[부록]

건설기계가격표

기종	분류번호	가격
		￦	$
드릴웨곤	5330-0074		13,686
크롤러드릴 (공기식)	5401-0015		79,010
	0017	41,279
크롤러드릴 (탑승유압식)	5405-0110	130,000
	0150	175,000
노면파쇄기	5701-0010		264,311
	0020		360,000
점보드릴	5805-0002	444,039
	0003	883,964
코아드릴	5901-0006	713
	0010	1,007
	0016	1,800
오거	6410-0080	47,900
	0100	61,205
	0120	74,511
	0150	148,667
	0200	164,988

기종	분류번호	가격
		￦	$
드릴웨곤	5330-0074		14,859
크롤러드릴 (공기식)	5401-0015		85,781
	0017	44,817
크롤러드릴 (탑승유압식)	5405-0110	140,270
	0150	188,833
노면파쇄기	5701-0010	271,183
	0020	369,248
점보드릴	5805-0002	523,023
	0003	996,031
코아드릴	5901-0006	774
	0010	1,093
	0016	1,954
오 거	6410-0080	50,021
	0100	63,915
	0120	77,810
	0150	155,250
	0200	172,294

토목

용어 및 오류수정

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제3장

토공사

3-1 굴착

3-1-2 암석절취

1. 육상

사. 암석절취(착암기)

(㎥당)

구 분		규 격	단 위	수 량
자재	폭약		kg	0.35
	뇌관		개	1.0
	비트		개	0.008
인력	화약취급공		인	0.041
	착암공		인	0.041
	보통인부		인	0.103
장비	착암기	2.7㎥/min	hr	0.203
	공기압축기	10.3㎥/min	hr	0.074

3-1 굴착

3-1-2 암석절취

1. 육상

사. 암석절취(소형브레이커)

(㎥당)

구 분		규 격	단 위	수 량
자재	폭약		kg	0.35
	뇌관		개	1.0
	비트		개	0.008
인력	화약취급공		인	0.041
	착암공		인	0.041
	보통인부		인	0.103
장비	소형브레이커	2.7㎥/min	hr	0.203
	공기압축기	10.3㎥/min	hr	0.074

토목

건축

2. 수 중

(㎥당)

구 분	폭약 (kg)	뇌관 (개)	비트 (개)	화약 취급공 (인)	착암공 (인)	보통 인부 (인)	잠수부 (조)	착암기 (시간)	공기 압축기 (시간)
우물통발파	0.96	3.0	0.009	0.11	0.094 (0)	0.19	0.5 (1.0)	0.474	0.158
우물통발파 이외	0.92	1.2	0.006	0.07	0.064 (0)	0.11	0.3 (0.6)	0.313	0.104

2. 수 중

(㎥당)

구 분		규 격	단 위	수 량
				우물통발파	우물통발파 이외
자재	폭약		kg	0.96	0.92
	뇌관		개	3.0	1.2
	비트		개	0.009	0.006
인력	화약취급공		인	0.11	0.07
	착암공		인	0.094(0)	0.064(0)
	보통인부		인	0.19	0.11
	잠수부		조	0.5(1.0)	0.3(0.6)
장비	소형브레이커	2.7㎥/min	hr	0.474	0.313
	공기압축기	10.3㎥/min	hr	0.158	0.104

토목

건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제3장

토공사

3-1 굴착

3-1-3 터파기

2. 기계사용터파기(암반)

(㎥당)

구분 암질	착암공 (인)	보통인부 (인)	공기압축기 (시간)	소형브레이커 (시간)	비 고
풍 화 암	0.33	0.16	0.30	1.26	공기압축기
연 암	0.41	0.21	0.48	1.68	7.1㎥ / min
보 통 암	0.58	0.29	0.60	2.40	페이브멘트브레이커
경 암	0.94	0.48	0.96	3.90	25kg급 4대 기준

[주] ①～④ 내용생략

3-1 굴착

3-1-3 터파기

2. 기계사용터파기(암반)

(㎥당)

구분 암질	착암공 (인)	보통인부 (인)	공기압축기 (시간)	소형브레이커 (시간)	비 고
풍 화 암	0.33	0.16	0.30	1.26	공기압축기
연 암	0.41	0.21	0.48	1.68	7.1㎥/min
보 통 암	0.58	0.29	0.60	2.40	소형브레이커
경 암	0.94	0.48	0.96	3.90	1.3㎥/min 4대 기준

[주] ①～④ 현행과 동일

토목

건축

제10장

도로포장 및 유지

10-4 포장유지보수

10-4-2 일상 유지보수

1. 맨홀보수

(일당)

배치인원(인)

사용기계(1대)

시공량 (개소)

명칭

규격

형식

시공량

특별

인부

보통

인부

2

3

노면절단기

페이브먼트브레이커

공기압축기

믹서

플레이트콤팩터

원형

15.9Kg

3.5㎥/min

0.2㎥

1.5톤

하수도 ∮648

∮766

∮918

전기,통신538×576×2조

5

상수도∮648

3

비     고

- 인상높이에 따라 다음의 할증률을 인력품에 가산한다.

인상높이(㎝)	0	2	5	10	10이상
할증률(%)	0	5	10	20	별도계상

[주] ①～⑧ 내용생략

10-4 포장유지보수

10-4-2 일상 유지보수

1. 맨홀보수

(일당)

배치인원(인)

사용기계(1대)

시공량 (개소)

명칭

규격

형식

시공량

특별

인부

보통

인부

2

3

노면절단기

소형브레이커

공기압축기

믹서

플레이트콤팩터

원형

1.0㎥/min

3.5㎥/min

0.2㎥

1.5톤

하수도 ∮648

∮766

∮918

전기,통신538×576×2조

5

상수도∮648

3

비     고

- 인상높이에 따라 다음의 할증률을 인력품에 가산한다.

인상높이(㎝)	0	2	5	10	10이상
할증률(%)	0	5	10	20	별도계상

[주] ①～⑧ 현행과 동일

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제13장

터널공사

13-3 터널굴착

13-3-2 기계굴착의 능력

구 분		작업능력(㎥/hr)	비 고
소형브레이커(25kg)	풍화암	0.38	A군 터널에 적용
대형브레이커 +굴삭기 0.7㎥	풍화암	5.6∼6.8	B, C군 터널에 적용
	연 암	4.5∼5.5
	보통암	3.1∼3.7
	경 암	2.3∼2.9

[주] ① A, B, C군의 구분은 15-3-4항의 “④” 기준임.

② 현장조건에 따라 사용장비를 변경하여 적용할 수 있다.

③ 소형브레이커는 페이브먼트 브레이커 25kg급을 기준으로 한 것이다.

13-3 터널굴착

13-3-2 기계굴착의 능력

구 분		작업능력(㎥/hr)	비 고
소형브레이커(1.3㎥/min)	풍화암	0.38	A군 터널에 적용
대형브레이커 +굴삭기 0.7㎥	풍화암	5.6∼6.8	B, C군 터널에 적용
	연 암	4.5∼5.5
	보통암	3.1∼3.7
	경 암	2.3∼2.9

[주] ① A, B, C군의 구분은 15-3-4항의 “④” 기준임.

② 현장조건에 따라 사용장비를 변경하여 적용할 수 있다.

③ 삭제

토목

13-3-4 터널 굴착시 천공 및 버력처리 장비의 조합

구 분	A군	B군	C군	비 고
발파천공 및 록볼트 천공장비	착암기 (2∼4대)	점보드릴 (2붐)	점보드릴 (3붐)	장비조합은 천공단면 크기 및 조건에 따라 적정하게 조합하여 적용
버력상차장비	로더 1.72㎥	로더 3.5㎥	로더 3.5㎥
버력운반장비	로더 1.72㎥	덤프트럭 15톤	덤프트럭 15톤

[주] ①～③ 내용생략

④ 터널의 구분은 아래 표와 같이 구분하여 적용한다.

A군	· 기계굴착시 소형브레이커 사용이 가능한 소규모 터널 · 발파굴착시 착암기로 천공할 수 있는 소규모 터널.
B군	· 기계굴착시 대형브레이커 사용이 가능한 단선급 터널 · 발파굴착시 점보드릴로 천공은 가능하나 덤프트럭과 로더의 작업이 원활하지 못하고 장비의 교행이 불가능한 규모의 단선급 터널.
C군	· 기계굴착시 대형브레이커 사용이 가능한 복선급 터널 또는 2차로 이상의 터널 · 발파굴착시 점보드릴로 천공이 가능하며, 차량 교행은 물론 덤프트럭과 로더의 작업이 원활하고 장비의 교행이 가능한 복선급 터널 또는 2차로 이상의 터널.

※ A, B, C는 일반적인 기준이므로 굴착단면 크기 및 현장조건에 따라 장비종류 및 장비규격을 별도로 조합하여 사용할 수 있다.

13-3-4 터널 굴착시 천공 및 버력처리 장비의 조합

구 분	A군	B군	C군	비 고
발파천공 및 록볼트 천공장비	소형브레이커 (2.7㎥/min 2∼4대)	점보드릴 (2붐)	점보드릴 (3붐)	장비조합은 천공단면 크기 및 조건에 따라 적정하게 조합하여 적용
버력상차장비	로더 1.72㎥	로더 3.5㎥	로더 3.5㎥
버력운반장비	로더 1.72㎥	덤프트럭 15톤	덤프트럭 15톤

[주] ①～③ 현행과 동일

④ 터널의 구분은 아래 표와 같이 구분하여 적용한다.

A군	· 기계굴착시 소형브레이커 사용이 가능한 소규모 터널 · 발파굴착시 소형브레이커로 천공할 수 있는 소규모 터널.
B군	· 기계굴착시 대형브레이커 사용이 가능한 단선급 터널 · 발파굴착시 점보드릴로 천공은 가능하나 덤프트럭과 로더의 작업이 원활하지 못하고 장비의 교행이 불가능한 규모의 단선급 터널.
C군	· 기계굴착시 대형브레이커 사용이 가능한 복선급 터널 또는 2차로 이상의 터널 · 발파굴착시 점보드릴로 천공이 가능하며, 차량 교행은 물론 덤프트럭과 로더의 작업이 원활하고 장비의 교행이 가능한 복선급 터널 또는 2차로 이상의 터널.

※ A, B, C는 일반적인 기준이므로 굴착단면 크기 및 현장조건에 따라 장비종류 및 장비규격을 별도로 조합하여 사용할 수 있다.

토목

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제18장

기타 잡공사

18-1 해체철거공사

5. 기존방수층 및 보호층 철거

(㎡당)

구 분	단 위	수 량	비 고
착 암 공	인	0.06	공기압축기 3.5㎥/min
보 통 인 부	인	0.22	소형브레이커 25㎏급임
소형브레이커	시간	0.10
공 기 압 축 기	시간	0.05

[주] ① 본 품은 공기압축기 1대와 소형브레이커 2대의 조합이다.

② 본 품은 아스팔트 8층 방수를 보수하기 위하여 방수층을 철거하는 품으로 누름 콘크리트층의 파쇄, 방수층 철거, 폐자재 소운반 및 정리품이 포함되어 있다.

③ 소규모공사(개소당 작업면적 40㎡미만)인 경우는 장비 사용기간 및 품을 40% 범위내에서 가산할 수 있다.

④ 누름 콘크리트 두께 8㎝ 기준이다.

18-1 분별해체공사

18-1-2 기존방수층 및 보호층 철거

(㎡당)

구 분	규격	단 위	수 량
착 암 공		인	0.06
보 통 인 부		인	0.22
소형브레이커	1.3㎥/min	시간	0.10
공 기 압 축 기	3.5㎥/min	시간	0.05

[주] ① 본 품은 아스팔트 8층 방수를 보수하기 위하여 방수층을 철거하는 품으로 누름 콘크리트층의 파쇄, 방수층 철거, 폐자재 소운반 및 정리품이 포함되어 있다.

② 소규모공사(개소당 작업면적 40㎡미만)인 경우는 장비 사용기간 및 품을 40% 범위내에서 가산할 수 있다.

③ 누름 콘크리트 두께 8㎝ 기준이다.

건축

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제9장

기계경비

9-2 손료산정

(5210) 페이브먼트 브레이커

분류번호	규 격	내용시간	시 간 당(10-7)
5210-0016	15.9kg(35 #)	3,600	2,500
0025	25kg(55 #)	3,600	2,500
0036	36kg(80 #)	3,600	2,500

[주] 공기압축기와 부수물의 관계는 다음과 같다.

공기 압축기	부수물		래그 해머	드 릴 웨 곤	드릴 무한궤도	페이브먼트 브레이커			바이브레이터
	규 격		2.7 ㎥/min	(100㎜) 74 〃	(120㎜) 15 〃	(15.9kg) 1.0 〃	(25kg) 1.3 〃	(36kg) 1.9 〃	25 ㎜	37 ㎜	45 ㎜	60 ㎜
규격 (㎥/min)		사용에어 호스경(mm)	19	38	50	19	19	19
3.5			1	-	-	3	2	1	3	3	3	3
7.1			2(1)	-	-	7	5	3	7	7	7	7
10.3			3(2)	1	-	13	8	5	10	10	10	10
17.0			5(4)	2	1	17	13	9	17	17	17	17
25.5			9(8)	3	1	25	17	13	25	25	25	25

9-2 손료산정

(5210) 소형브레이커(공압식)

분류번호	규 격	내용시간	시 간 당(10-7)
5210-0010	1.0㎥/min	3,600	2,500
0013	1.3㎥/min	3,600	2,500
0019	1.9㎥/min	3,600	2,500
0027	2.7㎥/min	3,600	2,500

[주] 공기압축기와 부수물의 관계는 다음과 같다.

공기 압축기	부수물		래그 해머	드 릴 웨 곤	드릴 무한궤도	소형브레이커				바이브레이터
	규 격		2.7 ㎥/min	(100㎜) 74 ㎥/min	(120㎜) 15 ㎥/min	1.0 ㎥/min	1.3 ㎥/min	1.9 ㎥/min	2.7 ㎥/min	25 ㎜	37 ㎜	45 ㎜	60 ㎜
규격 (㎥/min)		사용에어 호스경(mm)	19	38	50	19	19	19	19
3.5			1	-	-	3	2	1	1	3	3	3	3
7.1			2(1)	-	-	7	5	3	2	7	7	7	7
10.3			3(2)	1	-	13	8	5	3	10	10	10	10
17.0			5(4)	2	1	17	13	9	6	17	17	17	17
25.5			9(8)	3	1	25	19	13	9	25	25	25	25

(5630) 착암기

분류번호	규 격	내용시간	시 간 당(10-7)
5630-0027	2.7㎥/min	3,600	2,500

- 삭   제 -

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제9장

기계경비

9-2 손료산정

(5210) 페이브먼트 브레이커

분류번호	규 격	내용시간	시 간 당(10-7)
5210-0016	15.9kg(35 #)	3,600	2,500
0025	25kg(55 #)	3,600	2,500
0036	36kg(80 #)	3,600	2,500

[주] 공기압축기와 부수물의 관계는 다음과 같다.

공기 압축기	부수물		래그 해머	드 릴 웨 곤	드릴 무한궤도	페이브먼트 브레이커			바이브레이터
	규 격		2.7 ㎥/min	(100㎜) 74 〃	(120㎜) 15 〃	(15.9kg) 1.0 〃	(25kg) 1.3 〃	(36kg) 1.9 〃	25 ㎜	37 ㎜	45 ㎜	60 ㎜
규격 (㎥/min)		사용에어 호스경(mm)	19	38	50	19	19	19
3.5			1	-	-	3	2	1	3	3	3	3
7.1			2(1)	-	-	7	5	3	7	7	7	7
10.3			3(2)	1	-	13	8	5	10	10	10	10
17.0			5(4)	2	1	17	13	9	17	17	17	17
25.5			9(8)	3	1	25	17	13	25	25	25	25

9-2 손료산정

(5210) 소형브레이커(공압식)

분류번호	규 격	내용시간	시 간 당(10-7)
5210-0010	1.0㎥/min	3,600	2,500
0013	1.3㎥/min	3,600	2,500
0019	1.9㎥/min	3,600	2,500
0027	2.7㎥/min	3,600	2,500

[주] 공기압축기와 부수물의 관계는 다음과 같다.

공기 압축기	부수물		래그 해머	드 릴 웨 곤	드릴 무한궤도	소형브레이커				바이브레이터
	규 격		2.7 ㎥/min	(100㎜) 74 ㎥/min	(120㎜) 15 ㎥/min	1.0 ㎥/min	1.3 ㎥/min	1.9 ㎥/min	2.7 ㎥/min	25 ㎜	37 ㎜	45 ㎜	60 ㎜
규격 (㎥/min)		사용에어 호스경(mm)	19	38	50	19	19	19	19
3.5			1	-	-	3	2	1	1	3	3	3	3
7.1			2(1)	-	-	7	5	3	2	7	7	7	7
10.3			3(2)	1	-	13	8	5	3	10	10	10	10
17.0			5(4)	2	1	17	13	9	6	17	17	17	17
25.5			9(8)	3	1	25	19	13	9	25	25	25	25

(5630) 착암기

분류번호	규 격	내용시간	시 간 당(10-7)
5630-0027	2.7㎥/min	3,600	2,500

- 삭   제 -

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

제8장

기계화시공

8-1 기계화시공 적용기준

3. 운반 및 수송('10년 보완)

마. 운전사의 구분

구 분	해 당 기 계
건설기계 운전사	건설기계관리법 시행령 제2조에 규정한 기계로서 다음과 같은 기종을 말한다. 불도저, 굴삭기, 로더, 지게차, 스크레이퍼, 덤프트럭(12ton이상), 기중기(차륜 및 무한궤도), 모터 그레이더, 롤러, 노상안정기, 콘크리트배치플랜트, 콘크리트 피니셔, 콘크리트스프레더, 콘크리트 믹서(0.55㎥ 이상), 콘크리트 펌프(5㎥이상), 아스팔트 믹싱플랜트, 아스팔트피니셔, 아스팔트살포기, 슬러리실기계, 골재살포기, 쇄석기, 공기압축기(2.83㎥/min 이상), 천공기, 항타 및 항발기(0.5ton 이상), 사리채취기, 노면파쇄기 기타 이와 유사한 기계
화물차 운전사	자동차관리법 시행규칙 제2조에 규정한 차량류로서 12ton미만의 덤프트럭, 화물트럭, 살수차, 트랙터, 제설차, 노면청소차, 트럭탑재형크레인, 기타 공업용 소형트럭 등을 말한다.
일반기계 운전사	건설기계관리법 및 자동차관리법에 규정되어 있지 아니한 기계로서 소형의 공기압축기, 양수기, 소형믹서, 윈치, 소형항타기, 소형그라우트펌프, 벨트컨베이어, 발전기, 래머, 콤팩터, 콘크리트파쇄기, 기타 소형기계 등을 말한다.

8-1 기계화시공 적용기준

3. 운반 및 수송('10년 보완)

마. 운전사의 구분

구 분	해 당 기 계
건설기계 운전사	건설기계관리법 시행령 제2조에 규정한 기계로서 다음과 같은 기종을 말한다. 불도저, 굴삭기, 로더, 지게차, 스크레이퍼, 덤프트럭(12ton이상), 기중기(차륜 및 무한궤도), 모터 그레이더, 롤러, 노상안정기, 콘크리트배치플랜트, 콘크리트 피니셔, 콘크리트스프레더, 콘크리트 믹서(0.55㎥ 이상), 콘크리트 펌프(5㎥이상), 아스팔트 믹싱플랜트, 아스팔트피니셔, 아스팔트살포기, 슬러리실기계, 골재살포기, 쇄석기, 천공기, 항타 및 항발기(0.5ton 이상), 사리채취기, 노면파쇄기 기타 이와 유사한 기계
화물차 운전사	자동차관리법 시행규칙 제2조에 규정한 차량류로서 12ton미만의 덤프트럭, 화물트럭, 살수차, 트랙터, 제설차, 노면청소차, 트럭탑재형크레인, 기타 공업용 소형트럭 등을 말한다.
일반기계 운전사	건설기계관리법 및 자동차관리법에 규정되어 있지 아니한 기계로서 소형의 공기압축기, 양수기, 소형믹서, 윈치, 소형항타기, 소형그라우트펌프, 벨트컨베이어, 발전기, 래머, 콤팩터, 콘크리트파쇄기, 공기압축기(2.83㎥/min 이상), 기타 소형기계 등을 말한다.

[부록]

건설기계가격표

기종	분류번호	가격
		￦	$
리버스서큐레이션드릴	6517-0150	692,500

기종	분류번호	가격
		￦	$
리버스서큐레이션드릴	6517-0150	592,500

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

전분야

- 산소 자재량 직접 제시 항목

부문	항목	단위	비 고
토목	5-4-2 말뚝두부정리	L
건축	5-4-2 말뚝두부정리	L
토목 건축	6-2-3 철근가스압접	L
토목	10-4-2 일상 유지보수/8.재래난간 철거공	㎥
토목	14-1-4 레일공사/1.가스압접	kL
토목	14-1-4 레일공사/2.테르밋용접	kL
토목	15-1-2 재료비	㎥
건축	7-3-1 데크플레이트 절단	㎥
건축	14-5 각종 잡철물 제작 설치	L	대기압상태기준
건축	18-1 해체철거공사/3.헐기 및 부수기 /다.기계사용	L
설비	Ⅱ편 1-1-2 금속관 배관/2.동관배관[참고자료]	L
설비	Ⅱ편 1-9 잡철물 제작 설치	L
설비	Ⅲ편 1-2-1 강관절단	L
설비	Ⅲ편 1-2-3 강관가스용접	L
설비	Ⅲ편 1-2-4 강판절단/1.수동식	L
설비	Ⅲ편 1-2-4 강판절단/2.자동절단	L
설비	Ⅲ편 1-2-6 강판가스용접	L
설비	Ⅲ편 1-4-2 철골 가공조립/1.가공 및 조립	L
설비	Ⅲ편 1-4-6 STORAGE TANK /2.탱크조립설치	L

- 산소 자재량의 기압상태 표기

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

부문	항목	단위	비 고
토목	5-4-2 말뚝두부정리	L	대기압상태기준
건축	5-4-2 말뚝두부정리	L	대기압상태기준
토목 건축	6-2-3 철근가스압접	L	대기압상태기준
토목	10-4-2 일상 유지보수/8.재래난간 철거공	㎥	대기압상태기준
토목	14-1-4 레일공사/1.가스압접	kL	대기압상태기준
토목	14-1-4 레일공사/2.테르밋용접	kL	대기압상태기준
토목	15-1-2 재료비	㎥	대기압상태기준
건축	7-3-1 데크플레이트 절단	㎥	대기압상태기준
건축	14-5 각종 잡철물 제작 설치	L	대기압상태기준
건축	18-1 해체철거공사/3.헐기 및 부수기 /다.기계사용	L	대기압상태기준
설비	Ⅱ편 1-1-2 금속관 배관/2.동관배관[참고자료]	L	대기압상태기준
설비	Ⅱ편 1-9 잡철물 제작 설치	L	대기압상태기준
설비	Ⅲ편 1-2-1 강관절단	L	대기압상태기준
설비	Ⅲ편 1-2-3 강관가스용접	L	대기압상태기준
설비	Ⅲ편 1-2-4 강판절단/1.수동식	L	대기압상태기준
설비	Ⅲ편 1-2-4 강판절단/2.자동절단	L	대기압상태기준
설비	Ⅲ편 1-2-6 강판가스용접	L	대기압상태기준
설비	Ⅲ편 1-4-2 철골 가공조립/1.가공 및 조립	L	대기압상태기준
설비	Ⅲ편 1-4-6 STORAGE TANK /2.탱크조립설치	L	대기압상태기준

항목

구분

현       행

개 정 사 항

비고

전분야

- 산소 자재량의 단위를 “병”으로 제시한 항목

부문	항목	단위	비 고
건축	18-1 해체철거공사/4.철골재 철거	병
설비	Ⅲ편 3-1 수차설치/1.공정별 설치수량	Bt
설비	Ⅲ편 3-2 발전기 설치/2.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 3-2 발전기 설치/2.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 3-3-2 수문설치/2.Roller Gate /나.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 3-4-1 Stop-Log 제작/2.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 3-4-2 Stop-Log 설치/2.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 3-5 수문 Hoist 설치/2.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 3-6 Spiral Casing 설치/1.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 3-7-1 Steel Penstock 제작 /1.Steel Penstock 공장제관/가.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 3-7-1 Steel Penstock 제작 /2.Steel Penstock 현장제관/가.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 3-7-2 Steel Penstock 현장설치 /1.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 3-8-1 Roller Gate Guide Metal 제작 /1.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 3-8-2 Roller Gate Guide Metal 설치 /1.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 3-9-1 Taiter Gate Guide Metal 제작 /1.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 3-9-2 Taiter Gate Guide Metal 설치 /1.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 3-10-1 Trash Rack 제작/1.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 3-10-2 Trash Rack 설치/1.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 3-11 Tainter Gate Anchorage 제관 /1.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 7-2-1 OVER HEAD CRANE 설치 /2.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 7-2-2 GANTRY CRANE 설치 /2.공정별 설치공량	병
설비	Ⅲ편 8-3 Batcher Plant/4.공정별 제관 수리품	병
설비	Ⅲ편 8-5 공사별 설치 소모자재[참고]	병

- 산소 자재량의 규격 및 단위를 구체적으로 제시

※ 산소량 규격은 대기압상태를 기준하며, 단위 ‘병’은 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 것을 기준한다.

부문	항목	단위	비 고
건축	18-1 해체철거공사/4.철골재 철거	병
설비	Ⅲ편 3-1 수차설치/1.공정별 설치수량	Bt
설비	Ⅲ편 3-2 발전기 설치/2.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 3-2 발전기 설치/2.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 3-3-2 수문설치/2.Roller Gate /나.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 3-4-1 Stop-Log 제작/2.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 3-4-2 Stop-Log 설치/2.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 3-5 수문 Hoist 설치/2.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 3-6 Spiral Casing 설치/1.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 3-7-1 Steel Penstock 제작 /1.Steel Penstock 공장제관/가.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 3-7-1 Steel Penstock 제작 /2.Steel Penstock 현장제관/가.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 3-7-2 Steel Penstock 현장설치 /1.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 3-8-1 Roller Gate Guide Metal 제작 /1.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 3-8-2 Roller Gate Guide Metal 설치 /1.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 3-9-1 Taiter Gate Guide Metal 제작 /1.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 3-9-2 Taiter Gate Guide Metal 설치 /1.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 3-10-1 Trash Rack 제작/1.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 3-10-2 Trash Rack 설치/1.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 3-11 Tainter Gate Anchorage 제관 /1.공정별 제작품	병
설비	Ⅲ편 7-2-1 OVER HEAD CRANE 설치 /2.공정별 설치품	병
설비	Ⅲ편 7-2-2 GANTRY CRANE 설치 /2.공정별 설치공량	병
설비	Ⅲ편 8-3 Batcher Plant/4.공정별 제관 수리품	병
설비	Ⅲ편 8-5 공사별 설치 소모자재[참고]	병