건설공사 현장점검지침

2012. 2

국 토 해 양 부

건 설 안 전 과

목  차

1. 건설공사 현장점검 개요

1.1 지침 목적	1

1.2 지침 적용범위	1

1.3 점검 종류 및 주체	1

1.4 안전관리단의 구성 및 역할	2

1.5 점검 시기 및 빈도	2

2. 현장점검 수행 절차

2.1 점검대상 선정	3

2.2 점검계획 수립	4

2.3 점검 준비절차	5

2.4 점검계획 통보	6

2.5 점검자 교육	6

2.6 점검업무 수행방법	7

2.7 주요 점검내용	8

2.8 현장 자율점검 시행	9

3. 준수사항 및 행동요령

3.1 점검자 준수사항	10

3.2 피점검자 행동요령	11

4. 이의제기 및 결과 보고ㆍ처리등

4.1 피점검자의 이의제기	11

4.2 점검결과 보고․처리	12

4.3 점검결과에 대한 사후관리	13

5. 기타 참고사항

<붙임> 관련 서식, 점검체크리스트 등

1. 건설공사 현장점검 개요

1.1 지침 목적

① 이 지침은 「건설기술관리법」(이하 “건기법”이라 한다) 제21조의5에 규정된 건설공사의 현장점검업무를 수행함(이하 “현장점검”이라 한다)에 있어 준수하여야 할 절차 및 행동요령을 정함을 목적으로 한다.

※ 관련규정

건설기술관리법 제21조의5(건설공사현장 등의 점검)

건설기술관리법 시행령 제71조(건설공사현장 등의 점검 등)

건설기술관리법 시행규칙 제29조(건설공사현장 등의 점검)

1.2 지침 적용범위

① 이 지침은 국토해양부장관 및 소속기관․산하기관의 장, 시장․군수․구청장이 수행하는 현장점검에 대하여 적용한다.

* 소속기관․산하기관의 장, 시장․군수․구청장은 이 지침을 참고하여 별도의 현장점검 지침을 마련할 수 있다.

1.3 점검 종류 및 주체

① 중앙점검 : 국토해양부 건설안전과 직원, 지방국토관리청 직원 및 안전관리단원 중 일부로 구성된 점검반

② 중앙품질안전관리단 점검 : 국토해양부 훈령 제2009-538호(2009.12.28) ｢중앙품질안전관리단 운영규정｣에 따른 분야별 안전관리단에서 구성된 점검반

③ 특별감리검수단 점검 : 건기법 제32조에 따라 ｢특별감리검수단규정｣으로 구성된 검수단

④ 지방국토관리청 점검 : 국토해양부장관의 위임을 받은 지방국토관리청장(이하 “지방국토청장”이라 한다)

⑤ 발주청 점검 : 국토해양부 소속․산하기관장, 시장․군수․구청장

1.4 안전관리단의 구성 및 역할

① 국토해양부장관은 체계적이고 효율적인 현장점검 시행 등을 위하여 건설분야 민간전문가로 안전관리단을 구성한다. 안전관리단의 구성 및 운영에 관한 사항은 별도로 정한다.

② 안전관리단의 역할은 다음과 같다.

가. 점검시기별 중점점검항목 선정 및 체크리스트 검토

나. 세부 현장점검계획의 수립 지원

다. 국토해양부(건설안전과) 직원과 동행하여 현장점검 수행 및 기술자문

라. 현장점검 결과에 대한 분석 및 평가

마. 부실신고센타 신고사례에 대한 기술자문

바. 기타 현장점검 업무 추진에 관한 정책자문

1.5 점검 시기 및 빈도

① 점검주체별 점검 시기 및 빈도는 다음과 같다.

가. 중앙점검 : 해빙기(2～3월), 우기(5～6월), 동절기(11～12월) 각 1회 이상 실시

나. 중앙품질안전관리단 : 해당 분야별로 반기별 1회 점검을 원칙으로 하되, 분야별 자체 점검계획에 따라 추가로 실시

다. 특별감리검수단 : 반기별 1회 정기점검 실시

라. 국토해양부 소속기관 및 산하기관 : 국토해양부장관(건설안전과) 주관하에 해빙기, 우기, 동절기 대비 일제점검을 실시하고, 지방항만청은 태풍내습(8～9월)에 대비한 추가 점검을 실시, 그 외에는 각 기관별 연간점검계획에 따라 자체 점검(매월 정기점검 포함) 실시

마. 시장․군수․구청장 : 자체 점검계획에 따라 반기별 1회 이상 점검

② 국토해양부장관 또는 지방국토청장은 건설공사 현장에서 재난이 발생하거나, 「시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제12조의 중대한 결함이 발생한 경우, 부실에 대하여 구체적인 민원이 제기된 경우, 안전사고 예방 등을 위하여 점검이 필요하다고 인정하는 건설공사의 경우에는 ①의 점검과 별도로 점검할 수 있다.

2. 현장점검 수행 절차

2.1 점검대상 선정

① 각 점검주체는 전년도 점검 현장 및 타 기관 점검현장을 미리 파악하여 중복점검이 되지 않도록 노력하여야 하고, 공정이 미진하거나 준공이 임박한 현장 등 점검효과가 다소 낮은 현장은 점검대상에서 제외할 수 있다.

가. 중앙점검 : 저가 수주 건설공사, 건설사고 발생 현장 위주로 점검대상을 선정

나. 중앙품질안전관리단 : 해당 분야별 관리단장은 대형 국책사업 위주로 점검대상을 매년 1월중에 선정

다. 특별감리검수단 : 책임감리 현장 중 부실 제보, 부실관련 언론 보도 현장 및 대규모 건설현장 등을 위주로 대상을 선정

라. 지방국토청 : 관내 건설공사에 대하여 점검이 필요한 현장(부실민원제기, 안전사고예방 등)을 전체적으로 파악하여 직접 점검대상을 선정

마. 소속기관(지방국토청장 제외) 및 산하기관 : 자체 발주공사 현장 중에서 점검대상을 선정하고, 연 1회이상 점검을 원칙

바. 시장․군수․구청장 : 자체 발주공사와 인․허가 건설공사에 한하여 점검대상을 선정. 다만, ｢공공기관의 운영에 관한 법률｣ 제4조에 따른 공공기관이 시행하는 건설공사는 지방국토청에서 직접점검

② 지방국토청장 및 시장․군수․구청장은 소관 발주공사 등 점검대상 현장 현황을 붙임7 서식에 따라 작성하여 매년 2월 10일까지 국토해양부(건설안전과)에 제출하여야 한다. 다만 지방국토청장은 관내 소속 및 산하기관, 시․군․구청 소관 현장 등을 모두 취합하여 점검대상현장을 작성 제출한다.

2.2 점검계획 수립

① 국토해양부장관은 매년 1월31일까지 연간점검계획을 수립하여 소속기관 및 산하기관에 통보하고, 해당 기관은 이를 토대로 각 기관별 연간점검계획을 수립한다.

② 지방국토청장은 매년 1월초에 관내 소속기관 및 산하기관, 지자체 발주공사 및 인․허가 건설공사에 대한 자료요청을 통해 점검대상 현장을 파악하여 연간점검계획을 수립하고 매년 2월10일까지 국토해양부 건설안전과에 제출하여야 한다.

③ 지방국토청장을 제외한 소속기관 및 산하기관의 장은 자체 발주공사에 대하여 연간점검계획을 수립하고 매년 2월10일까지 국토해양부 건설안전과에 제출하여야 한다.

④ 중앙품질안전관리단의 해당 분야별 관리단장은 중앙품질안전관리단 운영규정에 따라 각 분야별로 반기별로 점검계획을 수립한다.

⑤ 특별감리검수단의 점검은 책임감리 대상공사에 대하여 가급적 지방국토청 점검현장과 중복되지 않도록 반기별로 점검계획을 수립한다.

⑥ 시장․군수․구청장 등은 자체 발주공사와 인․허가 건설공사에 한하여 연간점검계획을 수립한다.

⑦ 점검계획 수립 기관은 점검대상이 서로 중복되지 않도록 노력하여야 하며, 동시에 2개 이상의 현장점검이 필요한 경우는 가급적 같은 날짜에 실시할 수 있도록 점검계획을 조정한다.

⑧ 점검계획에는 점검시기, 점검주안점, 점검방향, 점검결과에 따른 조치계획, 점검자 교육계획, 결과보고 시기 및 내용 등을 포함하여야 한다.

2.3 점검 준비절차

① 국토해양부장관은 해빙기, 우기, 동절기 등 안전 취약시기에 국토해양부 건설안전과 및 지방국토청 직원, 안전관리단원으로 점검반(이하 “중앙점검반”이라 한다)을 구성한다.

② 점검반은 5개조 이내로 구성하고 조원은 3명(건설안전과 1명, 안전관리단 1명, 지방국토청 1명)으로 한다. 단, 점검특성에 따라 구성방법을 일부 조정할 수 있다.

③ 건설안전과장은 관련부서, 소속기관 및 산하기관의 의견을 수렴하여 각 점검시기별 점검대상 현장을 선정하되 다음 사항을 고려하여야 한다.

가. 저가 수주 건설공사 현장

나. 건설사고 발생 현장

다. 부실공사로 언론에 보도되거나 부실신고센타 제보현장

라. 지방국토청 등 타 기관의 현장점검과의 중복여부

④ 중앙점검반은 사전검토회의를 개최하여 각 점검시기별 특성에 맞추어 안전에 취약한 공종을 중심으로 중점점검항목을 선정하고 체크리스트를 작성한다.

⑤ 중앙점검반은 점검계획을 수립하여 점검개시 3일 전까지 소속기관 및 산하기관 등에 통보(점검체크리스트 포함)하고 각 기관은 별도 점검반을 구성하여 같은 시기에 일제 점검을 실시한다.

⑥ 중앙점검반은 안전 취약시기 외에도 사고발생 등으로 중점점검이 필요하다고 인정되는 건설현장, 기관별 자체점검 결과 지적건수가 평균 지적건수에 크게 미달한 기관의 건설현장 등은 제1항 내지 제5항의 절차를 준용하여 특별점검계획을 수립하고 특별점검을 실시할 수 있다.

⑦ 소속기관 및 산하기관, 시장․군수․구청장은 ①,②,④,⑤,⑥의 규정을 참고하여 점검준비를 한다.

2.4 점검계획 통보

① 국토해양부장관, 소속기관 및 산하기관의 장, 시장․군수․구청장 등(이하 “점검기관의 장”이라 한다)은 점검계획 및 점검처리 절차 등에 대하여 점검 3일전까지 문서 등으로 점검을 받는 현장의 관계자(이하 “피점검자”라 한다)에게 통보하여야 한다. 다만, 안전사고가 발생한 경우이거나 건설공사의 부실에 대하여 구체적인 민원이 제기된 경우로서 긴급히 점검이 필요한 경우에는 통보없이 점검할 수 있다.

② 점검기관의 장이 피점검자에게 통보하는 점검계획은 다음 사항을 포함한다.

가. 점검 근거 및  목적

나. 점검일시

다. 점검기관의 점검계획에 따른 점검자(이하 “점검자”라 한다)의 인적사항

라. 점검의 종류 및 방법

마. 주요 점검내용

바. 기타 점검과 관련하여 필요한 사항

③ 점검기관의 장은 점검반을 구성할 때 해당분야의 전문적 사항에 대한 자문을 위하여 관계전문가를 포함할 수 있다.

2.5 점검자 교육

① 점검기관의 장은 긴급점검 등 불가피한 경우를 제외하고는 자체 교육계획을 수립하여 점검전 점검자에 대한 점검 교육을 점검 개시일부터 3일전까지 실시하여야 하며, 교육내용은 다음 사항을 포함한다.

가. 점검의 목적

나. 점검과 관련된 법령에 관한 사항

다. 중점 점검사항

라. 점검자의 점검자세 등 청렴과 관련된 사항

마. 기타 점검업무 수행과 관련하여 필요한 사항 등

2.6 점검업무 수행방법

① 점검자는 당해 피점검자가 비치하고 있는 방문기록부 등에 서명하고 점검목적, 점검일정, 점검내용, 점검결과 처리방법 등을 피점검자에게 설명하여야 한다.

② 점검자 및 피점검자는 붙임1 서식에 따른 청렴서약서에 청렴서약을 자필로 기재하고 서명 후 점검을 시작하여야 한다.

③ 점검자는 소속 점검조장이 정하는 바에 따라 점검 당일을 오전과 오후로 구분하여 서류점검과 현장점검을 실시한다.

④ 점검자는 본 지침 2.7에서 정한 주요 점검내용 또는 2.3 ④에서 제공한 내용, 붙임8,9 체크리스트 등을 활용하여 점검하되, 해빙기, 우기, 동절기 등 취약시기별 안전 고려사항 및 해당 현장의 추진 공종 등을 고려하여 세부점검항목을 가감할 수 있다.

⑤ 점검자는 점검수행중 경미한 사항 또는 재해위험 등이 있는 사항에 대해서는 현장에서 시정지도할 수 있다.

⑥ 점검조장은 점검결과 법령위반 사항 등에 대하여 붙임2 서식에 따른 확인서 등을 피점검자에게 징구하여야 하며, 이 경우 확인서에는 피점검자의 서명이 있어야 한다. 다만, 피점검자가 서명을 거부하는 경우 서명거부임을 명시하고 점검자가 서명할 수 있다.

⑦ 점검조장은 확인내용을 증명할 수 있는 사진, 도면, 관련서류 등을 포함하여 확인서를 작성한다.

⑧ 점검조장은 확인서 징구 등 점검일정이 종료되면 피점검자에게 점검결과에 대한 강평을 실시하여야 한다.

2.7 주요 점검내용

① 점검자의 주요 점검내용은 다음과 같다.

가. 설계․시방서 등 관련 기준 준수 및 견실시공 여부

나. 현장기술자 배치 적정성 및 감리업무 수행실태 적정성

다. 안전관리의 적정성

※ 안전관리의 적정성 검토항목

▪ 안전관리계획서 작성 여부와 발주청 또는 인․허가 기관장의 심사 여부

▪ 안전관리계획서에 의한 시공 및 안전관리 여부

▪ 안전점검, 안전교육 계획 등의 적정성 및 계획에 따른 이행 여부

▪ 안전관리 조직 구성 및 안전점검 실시 시기의 적정성

▪ 안전관리 조직변경, 시공내역 및 법령 등 변경에 따른 반영 여부

▪ 공사현장의 특성에 적합하게 안전관리계획이 작성되었는지 여부

▪ 건설안전점검기관 선정 시 발주청 또는 인․허가 기관의 장의 승인 여부

라. 품질관리 및 시험․검사의 적정성

※ 품질관리 및 시험․검사의 적정성 검토항목

▪ 품질관리계획서 작성 및 이행여부

▪ 품질관리자 배치의 적정성

▪ 품질시험 실시의 적정성 및 시험실 운영, 시험기구 관리 적정성

▪ 건기법제24조에 따른 6개 건설자재․부재에 대한 KS자재 사용 또는 품질시험실시 여부(레미콘, 아스콘, 바다모래, 부순 돌, 철근 및 H형강, 순환골재)

마. 동바리, 흙막이 시설 등 사고잦은 공종의 관련규정 준수 여부

바. 감리원의 감리업무의 적정성 여부

사. 건설현장 점검관련 지적사항 이행여부

아. 시공상세도면 작성 및 검토 ․ 확인 이행 여부 등

② 점검기관의 장은 점검대상별 특성에 따라 축소, 추가 또는 조정할 수 있다.

2.8 현장 자율점검 시행

① 지방국토청장과 시장․군수․구청장(이하 “지방국토청장 등”이라 한다)은 직접 점검하지 않는 현장에 대하여 해당 현장대리인이 자율점검계획을 수립하여 자율점검을 실시하도록 조치한다.

② 지방국토청장 등은 매년 1월 관내 소속 및 산하기관, 지자체 등으로부터 제출받은 건설공사 현장에 대한 자료를 토대로 공정이 미진하거나 준공이 임박한 현장 등 점검효과가 다소 낮은 현장을 자율점검 대상 현장으로 지정하여 통보한다.

③ 자율점검 대상현장에서는 해당 지방국토청장 등이 정하는 바에 따라 현장대리인의 책임하에 자율점검을 실시하고 공사감독 또는 책임감리원(민간건축공사의 경우 감리원)의 확인을 거친 후 점검결과를 지방국토청장 등에게 서면으로 제출한다.

④ 지방국토청장 등은 자율점검 현장에서 제출한 보고서를 검토하여 자율점검이 형식적으로 시행되거나, 점검항목이 누락된 경우 등 자율점검이 부실하다고 판단한 현장에 대해서는 차기 점검대상에 포함하여 중점 점검하고, 우수현장은 표창 수여 등 혜택을 부여할 수 있다.

⑤ 기타 세부운영사항은 “건설공사 자율점검 운영 요령(문서번호 : 건설안전과-4569, 2009.12.30)” 붙임10을 참고하여 지방국토청장 등이 따로 정하여 운영한다.

3. 준수사항 및 행동요령

3.1 점검자 준수사항

① 점검자는 공인으로서의 투철한 책임감을 가지고 공명정대한 자세로 업무를 수행하여야 한다.

② 점검자는 항상 창의적인 노력과 관계법령을 숙지하여 점검자로서의 자질을 구비하도록 노력하여야 한다.

③ 점검자는 항상 친절과 봉사하는 자세로 업무를 수행하여야 한다.

④ 점검자는 점검업무를 수행함에 있어 지연·학연·혈연 등을 이유로 피점검자에게 특혜를 주어서는 안된다.

⑤ 점검자는 점검업무가 자신의 이해와 관련되거나 4촌 이내의 친족(민법 제767조의 규정에 의한 친족을 말한다)이 피점검자에 해당되는 등 공정한 업무수행이 어렵다고 판단되는 경우에는 당해 점검업무의 회피여부 등에 관하여 직근상급자와 상담한 후 처리하여야 한다.

⑥ 점검자는 점검업무와 관련하여 청탁 등이 있는 경우 점검기관의 장에게 신고하여야 한다.

⑦ 점검자는 점검업무를 이용하여 이권에 개입하거나 권한을 남용하여서는 아니된다.

⑧ 점검자는 피점검자로부터 금전․선물․향응(이하 “금품등”이라 한다)을 요구하거나 받을 수 없다.

⑨ 점검자는 ｢청렴도 향상을 위한 건설현장 등 점검자 행동요령(국토해양부 훈령 제387호, 2009.8.24)｣을 준수한다.

3.2 피점검자 행동요령

①  피점검자는 각 기관의 점검 중복 등으로 인하여 당해 건설공사에 지장이 초래되는 경우 증빙자료를 첨부하여 점검시기에 대한 조정을 요청할 수 있다. 다만, 안전사고가 발생한 경우이거나 건설공사의 부실에 대하여 구체적인 민원이 제기된 경우로서 긴급히 점검하여야 할 경우에는 예외로 한다.

②  피점검자는 점검자가 요구한 자료 중 업체의 경영ㆍ영업상 비밀 및 개인 정보 등에 대하여 보호받을 권리가 있다. 또한, ｢공공기관의 정보공개에 관한 법률｣ 등에 따른 비공개대상(보호) 정보 외에 비공개를 원할 경우에도 타당한 사유를 첨부하여 요청할 수 있다.

③ 피점검자는 점검 및 처리, 이의제기절차 등에 대한 정보를 점검자에게 요구할 수 있다.

④  피점검자는 현장점검이 원활히 시행될 수 있도록 설계도서 및 시험성과표 등 관련 자료를 점검자에게 제시하여야 하며, 점검자가 점검에 필요한 자료를 요구하는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

⑤  피점검자는 점검요원에게 금품등의 제공으로 공정하고 투명한 점검 수행을 저해하는 행동을 하지 않아야 한다.

4. 이의제기 및 결과 보고ㆍ처리등

4.1 피점검자의 이의제기

① 점검자는 점검 종료전에 피점검자에게 확인서 내용에 대한 이의제기 방법, 절차 등을 알려 주어야 한다.

② 피점검자의 이의제기는 붙임3 서식에 의해 점검일 이후 10일이내에 서면으로 점검기관의 장에게 제출하는 것을 원칙으로 한다.

③ 점검기관의 장은 점검결과에 대한 이의제기가 있는 경우 이의제기의 타당성 여부를 검토하고, 접수일로부터 14일 이내에 그 결과를 피점검자에게 통보한다.

4.2 점검결과 보고․처리

① 점검자는 당일 점검한 내용을 점검종료 직후에 점검기관의 장에게 붙임4 서식에 따라 팩스 또는 메일로 일일보고하는 것을 원칙으로 한다.

② 점검조장은 전체 점검대상 현장에 대한 점검이 완료되면 지적사항, 처리계획 등 붙임5 서식에 따라 점검결과 보고서를 작성하여 해당 점검기관의 현장점검 업무담당자에게 제출하여야 한다.

③ 점검기관의 장은 국토해양부(건설안전과) 주관으로 실시하는 해빙기, 우기, 동절기 대비 점검이 완료되면 점검결과를 국토해양부 건설안전과에 제출하여야 한다.

④ 국토해양부장관을 제외한 점검기관의 장이 자체 점검계획에 따라 실시하는 현장점검의 결과를 붙임6 서식에 따라 작성하여 매반기 말일 기준으로 다음달 10일까지 국토해양부 건설안전과에 제출하여야 한다.

⑤ 점검기관의 장은 점검결과에 대한 처리계획을 내부 검토절차를 거쳐 다음과 같이 “시정명령”, “현지시정”, “주의”로 구분하여 해당 발주청 등 관련 기관에 통보하고 사안에 따라 시정지시, 관련 법령에 따른 행정처분 등 필요한 조치를 하여야 한다.

가. 시정명령 : 점검결과 지적사항 중 건기법 제21조의4에 따른 벌점 부과 대상에 해당하는 사항

나. 현지시정 : 점검결과 지적사항 중 “시정명령”외의 사항으로서 현장에서 즉시 조치가 가능한 경미한 사항 또는 장기 검토가 필요한 사항

다. 주의 : 점검결과 지적사항 중 “시정명령”외의 사항으로서, 처리기한이 경과하거나, 적정시기에 조치하지 못하여 점검일 현재 기준으로 조치이행이 불가한 사항

⑥ 중앙점검결과 “시정명령” 사항을 지방국토청에 통보하는 경우에는 위반내용, 건기법 시행규칙 별표10 제5호(부실벌점의 측정기준)의 해당번호 등 벌점부과에 대한 구체적인 사항을 기재하여 통보한다.

⑦  점검기관의 장은 점검결과 벌점을 책정하여 통지하고자 하는 경우에는 미리 30일 이상의 기간을 정하여 벌점의 부과대상자에게 의견 제출의 기회를 주어야 한다.

4.3 점검결과에 대한 사후관리

① 점검기관의 장은 피점검자의 발주청의 장 또는 인․허기관의 장, 피점검자 등에게  점검결과를 통보하고 기한을 정하여 조치결과를 제출토록 한다.

② 점검기관의 장은 “시정명령” 사항에 대하여 피점검자 등의 조치결과를 사후 확인하고 미이행시에는 건기법 등 관련 규정에 따라 처리 한다.

③ 점검기관의 장은 시공실태점검 지적사항 관리대장을 작성하여 지적건별로 조치완료여부를 기록․관리한다.

④ 점검기관의 장은 피점검자 등으로부터 조치결과 제출기한이 지났음에도 조치여부를 제출하지 않은 현장에 대하여 조치요구 독촉공문을 시행한 후 통신으로 통보하고 차기 점검시 중점 점검대상으로 관리한다.

5. 기타 참고사항

① 이 지침은 2012년 2월  일부터 시행하고, 추후 지침의 개정이 있기 전까지 동 지침을 준수하여야 한다.

② 이 지침에 규정하고 있는 내용 이외의 사항은 건기법 및 동법 시행령․시행규칙, 중앙품질안전관리단운영규정, 특별감리검수단규정, ｢청렴도 향상을 위한 건설현장 등 점검자 행동요령｣을 참조한다.

붙임 1

청 렴 서 약 서

공사명(공장명) :

(점검자)

위     에 대한          점검을 실시함에 있어 공명정대하게 업무를 수행하겠으며, 점검과 관련하여 적발된 사항을 묵인 또는 은폐하거나 이와 관련하여 금품수수 및 향응 등 점검자로서의 품위를 손상하는 행위를 하지 않을 것을 서약합니다.

아래 글을 자필로 따라적고 서명하십시오.(ㅇㅇㅇ에는 자신의 이름을 기재)

나 ㅇㅇㅇ는 서약을 지키며 청렴의무를 준수하겠습니다.(서명)

(피점검자)

위     에 대한          점검을 수검함에 있어 성실하게 점검에 임하겠으며, 점검과 관련하여 적발된 사항을 묵인 또는 은폐 등의 목적으로 금품수수 및 향응제공 등 수검자로서의 품위를 손상하는 행위를 하지 않을 것을 서약합니다.

아래 글을 자필로 따라적고 서명하십시오.(ㅇㅇㅇ에는 자신의 이름을 기재)

나 ㅇㅇㅇ는 서약을 지키며 성실하게 점검에 임하겠습니다.(서명)

2012 년    월    일

점검자대표: 소속             직급              성명             (서명)

수검자대표: 소속             직급              성명             (서명)

붙임 2

확    인    서

점 검 명
공사개요	공 사 명
	위 치
	발 주 자	(감독관: )
	공 사 금 액	백만원(도급액: 백만원, 보상비: 백만원)
	공 사 기 간	년 월 일 ～ 년 월 일
	시 공 자	(대 표: , 현장대리인: )
	감 리 자	(대 표: , 책임감리원: )
지적내용	제목 : 내용 : 상기내용에 대해, 점검일 이후 10일 이내에 붙임3 서식에 의해 서면으로 점검기관의 장에게 이의제기가 가능합니다. 위 사실을 확인합니다. 2012 년 월 일 확 인 자 현장대리인 소속 : 성명 : (인) 책임감리원 소속 : 성명 : (인)

공사 및 시공․감리업체 현황

공 사 명					연락처	TEL	FAX
현장주소 (우편번호)					시공사
발주기관 (전화번호)					감리사
공동도급		(공동이행, 분담이행) 방식			낙찰율	%
공사현황	구 분	시공부문		감리부문		사업 인허가 관련
		전체	금회	전체	금회	승인일자
	계약일					승인기관
	도급액	백만원	백만원	백만원	백만원	담당부서
	공사기간	～	～	～	～	전화번호
	현재공정	%	%
시공업체	업체명	대표자	업종 (면허번호)	본사소재지 주소		우편번호	분담공종 (지분%)
감리업체	업체명	대표자	업종 (등록번호)	본사 소재지 주소		우편번호	분담공종 (지분%)
시공기술자	담당업무	성명	소속회사	거주지 주소		자격종류 (자격번호)	주민등록번호
	총괄책임
	시공관리
	품질관리
	안전관리
감독 ․ 감 리 원	담당업무	성명	소속회사	거주지 주소		자격종류 (자격번호)	주민등록번호
	총괄책임
	시공관리
	품질관리
	안전관리

※ 주의사항: 괄호안의 항목까지 반드시 기입하고 자격종류와 자격번호를 명시할것

건설기술자 근무현황

□ 공사명 :

1. 책임감리원

성 명	소속회사	직 책	근무기간(년.월.일)	비 고

2. 현장대리인

성 명	소속회사	직 책	근무기간(년.월.일)	비 고

붙임 3

이 의 제 기 서

공   사   명 :

점 검  일 자 :

지적내용 요약

이의제기 내용

붙임 : 관련 증빙서류

2012 년    월     일

확인자 : 현장대리인          (인)

책임감리원          (인)

붙임 4

받음 : 00청 건설관리실(Fax 000-000-0000)

일일점검보고

점 검 명
공사개요	공 사 명
	위 치
	발 주 자	(공사관리관 : )
	공 사 금 액	백만원(도급액 : 백만원, 보상비 : 백만원)
	공 사 기 간	년 월 일 ～ 년 월 일
	시 공 자	(대 표: , 현장대리인: )
	감 리 자	(대 표: , 책임감리원: )
지적내용	○ 시공관리 - 제 목 : ․내 용 : ○ 품질관리 - 제 목 : ․내 용 : ○ 안전관리 - 제 목 : ․내 용 : ○ 검토사항 - 제 목 : ․내 용 : 위 사실을 보고함. 2012 년 월 일 보고자 : 00조 시설주사 (서명)

붙임 5

○○○ 대비 건설현장 점검결과 보고서(제○조)

1. 점검자

제 0조 반 장 :	(소속)		(직급)		(성명)
점검자 :	(소속)		(직급)		(성명)
	(소속)		(직급)		(성명)

2. 점검 총괄표

공사명	점검일	점검결과 조치사항 (건수)
		합계	현지시정	시정명령	주의

3. 현장별 점검결과

공 사 명	지적사항 및 조치계획	사 진
00 건설공사 (시공사/감리사)	(지적사항) ㅇ 제목 - 내용 (조치계획) - 시정명령(시공사, 기술자, 감리사, 감리원 벌점 부과) ＊벌점측정기준 00에 해당	jpg파일로 사진첨부 (크기는 박스에 맞게 조정)
00 건설공사 (시공사/감리사)	(지적사항) ㅇ 제목 - 내용 (조치계획) - 현지시정 또는 주의	jpg파일로 사진첨부 (크기는 박스에 맞게 조정)

＊ 지적사항 중 “시정명령(벌점 부과 사항)”은 건기법 시행규칙 별표10 제5호 벌점의 측정기준에 따른 벌점 부과 번호를 정확히 기재

4. 기타 특이사항

붙임 : 확인서, 도면, 세부 사진 등 관련 증빙서류

붙임 6

‘11년도 현장별 현장점검결과 제출양식

□ 기관명 :

번호	공사명	현장 위치	공사기간	사업량		사업비(억원)		낙찰율 (%)	공정율 (%)	시공사 (전화번호)	감리사 (전화번호)	‘10년 점검 회수 (시기)	‘11년도 점검결과									공동 조사 여부 (시기)
				전체	‘11년	전체	‘11년						점검 회수 (계)	해빙기 (2~3월)	4월	우기 (5~6월)	7월	8월	9월	10월	동절기 (11~ 12월)
(예) 1	00~00간 도로건설공사	00군 00읍 00리 000번지	'08.12.10~'15.12.30	도로 L=10.1km, 교량 6개소	도로 L=2.0km, 교량 2개소	1,234	123	67.8	33.3	00건설㈜ (031-123-4567)	00엔지니어링 (031-123-5678)	2회 (4월, 10월)	2회				○					○ (7월)

붙임 7

‘12년도 현장점검 대상 현황 제출양식

□ 기관명 :

번호	공사명	현장 위치	공사기간	사업량		사업비(억원)		낙찰율 (%)	공정율 (%)	시공사 (전화번호)	감리사 (전화번호)	‘11년 점검 회수 (시기)	‘12년도 점검계획									공동 조사 여부 (시기)
				전체	‘12년	전체	‘12년						점검 회수 (계)	해빙기 (2~3월)	4월	우기 (5~6월)	7월	8월	9월	10월	동절기 (11~ 12월)
(예) 1	00~00간 도로건설공사	00군 00읍 00리 000번지	'08.12.10~'15.12.30	도로 L=10.1km, 교량 6개소	도로 L=2.0km, 교량 2개소	1,234	123	67.8	33.3	00건설㈜ (031-123-4567)	00엔지니어링 (031-123-5678)	2회 (4월, 10월)	2회				○					○ (7월)

* 작성대상 : 관내 점검대상 전체를 작성(지방국토청 직접점검 미실시 현장도 작성)

붙임 8

중앙점검반 CHECK LIST

점 검 내 용	비 고
1. 설계도서 및 각종 기준의 내용대로 시공되었는지에 관한 단계별 확인 - 구조물에 대한 검토․확인 소홀로 보완시공이 필요하거나 공정에 차질이 발생되었는지 여부와 기타 확인검측 누락 또는 지연 여부 2. 주요구조부에 대한 시공상세도면 검토 실시 여부 3. 시공자의 안전관리계획서, 정기안전점검실시 등 건설안전관리 이행 여부 4. 설계변경 검토․확인 및 반영에 관한 사항 5. 시공계획 및 공정표 검토 잘못으로 보완시공이 필요하거나 공정에 차질이 발생되었는지 여부와 변경요인에 대한 적기에 승인 이행 여부 6. 품질관리계획(품질시험계획)의 수립과 시험성과에 관한 검토․확인이행 여부 7. 사용자재(레미콘, 철근등)의 적합성 검토 및 시험, 품질확인 실시 여부 8. 시공자 제출서류의 검토 적정 여부 9. 공사수행과 관련한 각종 민원발생 대응 여부 10. 기타 건기법 및 시특법에 규정된 사항 준수 여부 등

책임감리실태조사 CHECK LIST

점 검 내 용	비 고
1. 현장배치감리원의 자격적정여부 - 감리원 자격이 적합한지 여부 - 감리원 교체시 발주청 승인 여부 2. 현장배치감리원의 근무실태 - 감리원의 현장 무단이탈 여부 - 교육등 회의참석시 직무대행자 지정여부 - 감리원의 현장이탈시 발주청의 승인 여부 - 기술지원감리원의 월1회이상 점검 여부 3. 시공계획서의 검토․확인 적정여부 - 시공계획서의 적정 관리 여부 - 시공계획서 승인 처리기간 준수 여부 4. 공정관리의 검토․확인 적정 여부 - 공정관리계획서의 적정 관리 여부 - 공정관리계획서 승인 처리기간 준수여부 - 공정부진시 공정관리지도 사항 5. 품질관리계획(품질시험계획)의 검토․확인의 적정여부 - 품질관리계획서의 적정 관리 여부 - 품질관리계획서 승인 처리기간 준수여부 - 품질시험의 입회 및 검사 성과 적정성 확인 - 콘크리트 타설시 감리원 입회 여부 6. 안전관리계획수립 및 이행에 대한 적정여부 - 안전관리계획서의 적정성검토 - 안전점검 및 안전교육계획의 적정성 검토 - 감리원 중 안전관리담당자 지정 여부 7. 설계도서 및 시공상세도 검토의 적정 여부 - 시공상세도면 검토․확인 및 승인 후 시공여부 - 시공상세도 승인 처리기간 준수 여부 - 설계도서 및 시공상세도의 검토 소홀로 보완시공 또는 공정에 지장초래 여부 8 발주청에 현장실정보고의 적정 여부 - 공사현장의 문제점 발생 시 보고 여부 - 시공 관련하여 중요한 사항의 보고여부 - 예산에 관련된 사항 등의 보고 여부 9 사용자재에 대한 검토․확인의 적정성 - 레미콘, 철근등의 주요자재에 대한 품질시험 실시 및 확인 여부 - 주요자재에 대한 공급원승인 적정 여부 - 공급원승인 처리기간 준수 여부 10. 공사의 시공단계별 검측․확인상태 - 시공단계별 검측․확인 실시 여부 - 검측․확인의 소홀 또는 지연과 그로 인한 시공상 문제 발생여부 11. 감리보고서 작성 및 제출의 적정여부 - 보고서를 온라인감리업무보고시스템에 의한 업로드 여부 - 감리원 업무일지 작성의 적정여부 - 보고서 제출기간 적정여부 12. 설계변경사항에 대한 검토․확인의 적정 여부 - 설계변경사항의 검토기간 지연 여부 - 설계변경사항 검토의 적정여부 - 설계변경사항의 설계반영 여부 13. 공사가 설계도서 및 제규정대로 시공되었는지 시공상태의 적정성 확인여부 - 시공상태의 품질 또는 규격등 확인 적정 여부 - 부실 또는 조잡시공에 대한 적정 조치여부 14. 시공자 제출서류 검토의 적정여부 - 제출서류의 검토지연 여부 - 제출서류에 대한 검토의 적정 여부 15. 하도급 관련사항 적정검토․확인 여부 - 하도급자 자격 검토의 적정여부 - 하도급 통지기간 준수 여부 - 하도급 검토기간 준수 여부 16. 감리업무 관련 제반서류의 작성․보고 및 보관상태의 적정 여부 - 제반서류의 작성․보고 적정 여부 17. 발주기관 등의 지시사항에 대한 불이행 또는 처리 지연여부 18. 각 점검기관의 지적사항에 대한 시정조치 또는 이행확인 여부 19. 시공관리 등의 소홀에 따른 민원 관리 적정성 여부 - 협의내용을 기재한 관리대장 비치 여부등 20. 현장실명제 이행 여부 - 단속․점검 방문일지 비치 여부 - 방문자 기록관리 적정 여부 21. 가시설공사의 구조․안전검토 여부 - 비계, 동바리, 거푸집 등의 설계, 구조, 시공의 적정성 검토 여부 22. 건설공사의 과적방지 대책의 적정 여부 - 축중기 설치여부 - 축중기 운영․관리의 확인 여부 23. 기타 감리업무 수행의 적정여부 - 토석정보 시스템 입력․관리 적정 여부 - 암판정 위원회 구성․운영의 적정 여부 - 건설현장식당 선정계획서 검토 적정 여부 - 감리착수신고서의 발주청 승인 여부 - 검측업무지침 작성․수립 및 승인 여부 - 콘크리트 송장에 감리원 확인서명 여부 24. 설계도서대로 시공여부 확인 - 사용자재(재료)의 적합성 여부 - 구조물 규격의 적합성 여부 25. 기성 및 준공검사의 적정 여부 - 기성(준공)내용과 실제시공과의 일치여부 - 부실 또는 조잡시공에 대한 조치 여부 - 기성(준공) 검사계획서 승인 여부 - 검사처리기간 준수 여부 26. 건설기계 안전․규격 검토 여부 - 타워크레인, 항타기 등 건설중장비 설치 및 운전의 적정성

붙임 9

주요 공사별 점검 체크리스트

1. 공통사항

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목	비고
서류점검 사항	1. 설계도서 검토 및 시공상세도(Shop Drawing) 작성 여부
	2. 설계도면, 시방규정과 상이하게 시공여부
	3. 고정관리, 폐자재관리, 현장대리인 근무상황부 기록비치 여부
	4. 건기법 제26조의2에 의한 안전관리계획의 수립, 정기안전점검 이행 및 안전관리비 설계반영 여부
	5. 품질관리계획의 적정 여부
	6. 각종 품질시험의 적기 실시 여부
	7. 각종 반입자재의 사전 품질관리시험 실시 및 보관상태 적정 여부
	8. 각종 관리도의 작성비치 여부 (토공, 보조기층, 기층, 표층, 콘크리트 등)
	9. 콘크리트 양생의 적정 여부
	10. 사용자재의 사용전 공급원 승인을 득하였는지 여부
	11. 시험실설치, 시험기구의 확보 및 품질관리자 자격의 적정 여부
가설공사	1. 거푸집, 동바리, 비계등 가설물 설치 구조계산 및 시공상세도면 작성 여부
	2. 변형, 부식, 손상된 가설물 재료 사용여부
	3. 허용 적재하중 초과여부(구조계산서 및 시방서등 참조)
	4. 받침기둥, 거푸집등 가설물의 단면치수(구조계산서 및 시방서 참조) 및 설치간격(1.5m이내) 그리고 연결상태 긴결여부 검토
	5. 거푸집 존치기간 준수 및 해체시 압축강도 측정 여부
	6. 층높이 3.5m 초과시 높이 2m마다 수평연결재를 2방향으로 설치 여부
	7. 동바리를 지반에 설치시 두께 5㎝이상 깔목 또는 콘크리트 바닥 설치 여부
	8. 동바리, 멍에 등 연결부 못으로 고정 여부
	9. 받침기둥이 수직으로 세워져 있는지 확인
	10. 동바리와 수평연결재 교차부마다 클램프 등으로 연결여부
	11. 틀비계 받침기둥 사이에 교차가새 설치 여부
	12. 착공전 가설물 시공계획 및 안전관리계획 작성후 승인을 득하였는지 여부
	13. 가설물의 이완, 침하, 파손 등 경고성의 이상 여부
	14. 흙막이 시설의 변형 및 지표수의 현장내 유입방지 여부
	15. 기타 의심스러운 곳이 있으면 시공근거를 제시토록 요구하여 확인함.
구조물 공사	1. 콘크리트 구조물의 균열, 누수 및 재료분리 발생여부
	2. 각종 콘크리트 구조물의 조잡시공 여부
	3. 공사장 주변 석축, 옹벽의 균열 및 배수시설 안전성 여부
포장 공사	1. 아스콘 포설시 혼합물의 적정 온도관리 및 다짐장비 조합의 적정 여부
	2. 포장공의 각층별 두께 적정 여부 (동상방지층, 보조기층, 기층, 표층 등)

2. 건축공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 공통사항	1. 시공상세도면의 작성 여부
	2. 건설공사 품질관리(시험) 적정여부
	3. 건설공사 안전관리 적정여부
2. 가설공사	1. 가설구조물의 재료 및 설치상태
	2. 비계 안전성
	3. 가설물 및 기계설비등 배치의 적정 여부
3. 굴착 및 발파공사	1. 굴착, 흙막이, 발파공사 등의 공법의 적정성
	2. 안전관리계획서 작성 여부
	3. 지하매설물 보호조치
	4. 배수계획 및 계측관리실태
	5. 기계, 설비 등 배치의 적정 여부
	6. 인접구조물 보호조치
	7. 시공 적정성
4. 지정 및 기초공사	1. 지내력 시험방법
	2. 지정공법
	3. 파일항타 계획
5. 철근콘크리 트 공사	거푸집 공사	1. 동바리 안전성
		2. 거푸집 안전성
	철근가공 조립 공사	1. 가공제작도
		2. 철근 이음 및 정착
		3. 철근 배근의 적정성
	콘크리트 공사	1. 콘크리트 치기방법, 순서, 속도, 높이 등
		2. 콘크리트의 양생방법 및 기간
		3. 품질 및 시공관리상태
		4. 시공이음의 방수
		5. 공사용 장비등 배치계획
		6. PS 도입장치의 적정성
		7. PS 도입작업의 안전성
6. 철골공사	1. 사용부재, 장비 등의 적정 여부
	2. 이음․접합부위 시공의 적정성
	3. 안전시공절차 및 주의사항
7. PC공사	1. 부재․장비 등의 적정 여부
	2. 조립용 크레인 주행로 지반상태
	3. 조립순서의 적정성 및 가조립 상태
	4. 접합부의 시공 및 마감상태
8. 조적공사	1. 벽체배치 계획의 적정성
	2. 쌓기모르터의 충진상태
	3. 쌓기방법의 적정성

3. 교량공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 기초공사	1. 지내력 확인(지내력시험등) 여부 점검
	2. 최종 굴착 종료 판정 여부 점검
	3. “주변에 미치는 영향” 여부 점검1) 지내력 판정 시행 여부 점검
2. 하부공사	기초공	1. 기초와의 일체성 여부 점검
		2. 세굴에 대한 안전 여부 점검
	콘크리트공	1. 동바리의 안전 여부 점검
		2. 비계의 안전 여부 점검
		3. 1회 콘크리트 치기높이 안전 여부 점검
		4. 두부 콘크리트 치기시 안전 여부 점검
3. 상부공사	(1) 콘크리트공	1. 거푸집의 안전 여부 점검
		2. 동바리 안전 여부 점검
		3. 비계의 안전 여부 점검
		4. 콘크리트 치기순서
		5. 전도나 낙교에 대한 안전 여부 점검
		6. 철재 가설물의 안전 여부
		7. 각종 인양장치의 안전 여부
		8. PS도입 장치의 적정 여부
		9. PS도입 작업의 적정성
	(2) 강구조공	1. 교각부 조립상태의 안전 여부
		2. 이음부 조립상태의 안전 여부
		3. 케이블의 안정성 검토 여부
		1. 교량 교좌장치 및 신축이음장치 등 주요구조부의 시공상태 적정 및 안정성 여부
		2. 교량의 PC빔 설치시 전도방지시설 설치 적정여부
		3. 교량, 배수BOX등 구조물공사 완료후 뒷채움재료 및 시공상태 적정여부
4. 부대공사	1) 방수, 배수 등의 안정 및 적정 여부

4. 상하수도 공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 터파기공	1. 설계도서 준수여부
	2. 비탈면의 시공상태
	3. 지하매설물 및 인접구조물의 조사 및 보호조치
	4. 배수시설 등 수방대책
	흙막이공	1. 흙막이공의 주변여건
		2. 가설공법의 적정성 및 가설재의 설치상태
		3. 계측관리 상태
	흙막이공 및 연약지반 처리공	1. 재료의 품질관리 및 시공관리 상태
2. 관부설공	1. 설계도서 준수여부
	2. 지하매설물 및 인접구조물의 조사 및 보호조치
	3. 관 및 변류의 규격과 재질
	4. 터파기 바닥 상태
	5. 연약지반의 처리상태
	6. 타 시설물과의 이격거리
	7. 되메움 토양
	8. 배수시설 등 수방대책
	9. 상부지반의 침하방지대책(관추진공)
	10. 하천통수단면 감소에 대한 대책(하천횡단공)
	11. 홍수 등 급격한 수위상승에 대한 대책(하천횡단공)
	12. 재료의 품질관리 및 시공관리 상태
3. 관접합공	1. 설계도서 준수여부
	2. 접합방법 및 시공상태
	3. 현장시험방법 및 결과
	4. 정류기 및 양극의 규격, 설치상태(전기방식공)
	5. 절연부의 Bonding 상태(전기방식공)
	6. 재료의 품질관리 및 시공관리 상태

5. 터널공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 공통사항	안전관리	1. 안전관리 조직의 운영상태
		2. 교통 및 통행안전시설 관리 상태
		3. 화약관리 자격소지자 확인
		4. 전기관련 설비 상태(플랜트 포함)
		5. 주민 홍보시설 상태점검
	환경관리	1. 환기상태
		2. 조명상태
		3. 폐수 및 폐기물 처리상태
		4. 통로상태
2. 공사장 주변 안전공	1. 근접구조물 보호공 상태
	양육,가축시설보호공	2. 소음저감대책
		3. 진동저감대책
		4. 발파공법의 적정성
	5. 지하매설물 보호공 상태
	6. 지하굴착공사에 따른 갈수 및 용수 보호 상태
	7. 기타 공사장 주변 보호공 상태
3. 가시설공	토류 구조물공	1. 토류구조물의 설치상태 및 변위 여부
		2. 계측관리 상태
		3. 갱구보강 상태 및 변위 여부
		4. H-pile 수직도 상태
		5. H-pile 근입 상태
		6. 띠장 및 버팀보 상태
		7. 갱구 보강 상태
4. 굴착공	굴착공	1. 발파 굴착
		2. 여굴발생 조치 상태
		3. 뜬돌등 제거 상태
		4. 용출수 및 배수처리 상태

6. 항만공사

(1) 계류시설(중력식안벽, 잔교식 안벽, 돌핀)

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목	비고
1. 기초공 (기초준설,치환공)	1. 지질, 토질조사 여부 및 적정성
	2. 매설물, 위험물 조사 여부
	3. 배송관의 점검
	4. 주변영향 조사 및 보호조치 여부
	5. 해양오염 대책
	6. 재료의 품질 및 규격의 적정성
	7. 시공의 허용오차
2. 사석공	1. 단계별 시공조건에 따른 안정성
	2. 시공중 파랑 내습에 대한 피해 방지책 유무
	3. 세굴발생 여부
	4. 침하계측관리 여부
	5. 재료의 품질 및 규격의 적정성
	6. 시공의 허용오차
3. 제작 및 거치공	1. 제작장의 상태
	2. 해상운반계획 및 거치방법의 적정성
	3. 거치간격의 적정성
	4. 시공의 허용오차
4. 항타공	1. 말뚝(파일)의 적치상태
	2. 재료의 품질 및 규격의 적정성
	3. 항타계획
	4. 말뚝선단 및 두부보강
	5. 말뚝의 이음
	6. 소음 및 진동측정과 대책
	7. 말뚝의 항타 기록
	8. 시공의 허용오차
5. 동바리공	1. 조위 및 파랑 적응대책
	2. 말뚝손상 방지대책
	3. 구조검토의 적정성
	4. 콘크리트 치기전의 점검여부
6. 콘크리트공	1. 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태
	2. 철근 가공 및 조립 상태
	3. 콘크리트 치기방법, 순서, 속도
	4. 콘크리트의 양생방법 및 기간
	5. 시공이음의 방수
	6. 품질 및 시공관리 상태
	7. 시공의 허용오차
7. 속채움 및 뒷채움공	1. 재료의 품질 및 규격의 적정성
	2. 사석투하공 및 토사 유출방지 대책
	3. 시공의 허용오차
8. 매립공	1. 매립방법의 타당성
	2. 펌프준설토 이용시 점검사항
	3. 해양오염 방지대책
	4. 침하계측관리
	5. 재료의 품질 및 규격의 적정성
	6. 시공의 허용오차

(2) 외곽시설(방파제, 갑문, 호안)

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목	비고
1. 기초공 (기초준설, 치환공)	1) 지질, 토질조사 여부 및 적정성
	2) 매설물, 위험물 조사 여부
	3) 배송관의 점검
	4) 주변영향 조사 및 보호조치 여부
	5) 해양오염 대책
	6) 재료의 품질 및 규격의 적정성
	7) 시공의 허용오차
2. 사석공	1) 단계별 시공조건에 따른 안정성
	2) 시공중 파랑 내습에 대한 피해 방지책 유무
	3) 세굴발생 여부
	4) 침하계측관리 여부
	5) 재료의 품질 및 규격의 적정성
	6) 시공의 허용오차
3. 제작 및 거치공	1) 제작장의 상태
	2) 해상운반계획 및 거치방법의 적정성
	3) 거치간격의 적정성
	4) 시공의 허용오차
4. 콘크리트공	1) 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태
	2) 철근 가공 및 조립 상태
	3) 콘크리트 치기방법, 순서, 속도
	4) 콘크리트의 양생방법 및 기간
	5) 시공이음의 방수
	6) 품질 및 시공관리 상태
	7) 시공의 허용오차
5. 속채움 및 뒷채움	1) 재료의 품질 및 규격의 적정성
	2) 사석투하공 및 토사 유출방지 대책
	3) 시공의 허용오차
6. 가물막이공	1) 시공계획
	2) 구조적 안전성
	3) 파이핑 발생 유무
7. 부대공	1) 재료의 품질 및 규격의 적정성
	2) 시공의 허용오차

6. 댐공사

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 공통사항	안전 및 품질관리	1. 안전관리계획서 및 품질관리계획서의 적정성
	유수전환시설	1. 홍수기시 비상방류대책
		2. 상․하류지역 비상연락체계
		3. 월류시 피해저감 및 복구대책
		4. 가물막이 및 가배수 터널
	기초굴착 및 기초처리	1. 석산, 공사용 도로 및 이설도로
		2. 기초굴착상태
		3. 기초처리상태
		4. 파쇄대․용출수 등의 처리
		5. 양안부 굴착사면
2. 필댐	댐 축조(초기단계)	1. 재료선정의 적정성
		2. 다짐관리의 적정성
		3. 품질관리의 적정성
		4. 취수구, 방수로의 접합상태
		5. 계측기 매설
	댐 축조(중간단계)	1. 수평시공과 품질관리
		2. 계측계기 설치
	여수로	1. 대절토 사면
		2. 기초굴착
		3. 콘크리트 구조물
		4. 수문설치의 적정성
		5. 공사장 주변의 안전조치 적정성
	담수직후	1. 유수전환시설의 폐쇄
		2. 누수 상태
		3. 여수로 수문작동 상태
		4. 계측기 작동 상태
3. 콘크리트댐	댐 축조 (하상기초 완료후)	1. 배수처리와 우천시 대책
		2. 비계의 안전성
		3. 거푸집의 안전성
		4. 동바리의 안전성
		5. 치기순서, 치기높이 및 치기구획의 적합성
		6. 콘크리트의 품질관리
		7. 양생
		8. 지수설계에 대한 적정성 및 시공상태
	댐 축조(중간단계)	1. 콘크리트 치기과정의 적합성
		2. 품질관리
		3. 공사용 시설 안전관리
		4. 콘크리트 치기용 장비운영 및 관리
	여수로	1. 콘크리트 구조물 치기상태
		2. 수문설치공사의 적정성
	담수직전	1. 유수전환시설 폐쇄
		2. 댐체 시공 상태
		3. 여수로 수문작동 상태
		4. 매설계기 관리 상태

7. 하천공사

(1) 수로

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 가시설공	흙막이공	1. 설계도서 준수여부
		2. 막이공의 주변여건
		3. 가설재의 설치상태
		4. 지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치
		5. 배수시설 등 수방대책
		6. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	가물막이공	1. 설계도서 준수여부
		2. 가물막이공의 주변여건
		3. 가설재의 설치상태
		4. 지하매설물 및 주변환경에 대한 검토 및 보호조치
		5. 하천의 통수단면 감소에 대한 대책
		6. 홍수 등 급격한 수위상승 및 배수시설 등의 수방대책
		7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
2. 기초 및 콘크리트공	(1) 기초공	1. 설계도서 준수여부
		2. 지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치
		3. 말뚝길이, 수량, 위치의 설계도 부합여부
		4. 항타기록 등 현장시험 실시여부
		5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	(2) 비계, 동바리, 거푸집공	1. 설계도서 준수여부
		2. 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태
		3. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	철근공	4. 설계도서 준수여부
		5. 철근가공 및 조립상태
		6. 철근의 치수, 간격, 이음상태
		7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	콘크리트공	1. 설계도서 준수여부
		2. 치기방법, 순서, 속도
		3. 양생방법 및 기간
		4. 거푸집, 동바리 존치기간
		5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
3. 되메우기 및 호안공		1. 설계도서 준수여부
		2. 다짐방법, 순서, 시험의 준수여부
		3. 재료의 품질관리 및 시공관리상태

(2) 제방

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 하천 바닥파기, 누수방지, 연약지반보강, 기초처리공	1. 설계도서 준수여부
	2. 사면의 시공상태
	3. 지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치
	4. 배수시설 등 수방대책
	5. 계측관리상태
	6. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
2. 기초 및 콘크리트공	기초공	1. 설계도서 준수여부
		2. 지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치
		3. 말뚝길이, 수량, 위치의 설계도 부합여부
		4. 항타기록 등 현장시험 실시여부
		5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	비계, 동바리, 거푸집공	1. 설계도서 준수여부
		2. 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태
		3. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	철근공	1. 설계도서 준수여부
		2. 철근가공 및 조립상태
		3. 철근의 치수, 간격, 이음상태
		4. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	콘크리트치기, 양생공	1. 설계도서 준수여부
		2. 타설방법, 순서, 속도
		3. 양생방법 및 기간
		4. 거푸집, 동바리 존치기간
		5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
3. 본체 및 비탈면 흙 쌓기공	1. 설계도서 준수여부
	2. 다짐방법, 순서, 시험의 준수 여부
	3. 성토두께의 준수여부
	4. 때붙임 시공상태
	5. 호안공 시공상태
	6. 계측관리상태
	7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	8. 파이핑 여부 점검

(3) 하구둑

공종 구분	공 종 별 점 검 항 목		비고
1. 배수갑문 가물막이공	1. 설계도서 준수여부
	2. 가물막이공의 주변여건
	3. 가설재의 설치상태
	4. 지하매설물 및 주변환경에 대한 검토 및 보호조치
	5. 하천의 통수단면 감소에 대한 대책
	6. 홍수 등 급격한 수위상승 및 배수시설 등의 수방대책
	7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
2. 배수갑문 기초공	1. 설계도서 준수여부
	2. 지하매설물 및 인근 구조물의 조사 및 보호조치
	3. 말뚝길이, 수량, 위치의 설계도 부합여부
	4. 항타기록 등 현장시험 실시여부
	5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
3. 배수갑문 콘크리트공	비계, 동바리, 거푸집공	1. 설계도서 준수여부
		2. 비계, 동바리, 거푸집의 설치상태
		3. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	철근공	4. 설계도서 준수여부
		5. 철근가공 및 조립상태
		6. 철근의 치수, 간격, 이음상태
		7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
	(3)콘크리트공	1. 설계도서 준수여부
		2. 치기방법, 순서, 속도
		3. 양생방법 및 기간
		4. 거푸집, 동바리 존치기간
		5. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
4. 제체연약 지반 보강공	1. 설계도서 준수여부
	2. 지하매설물 및 인근구조물의 조사 및 보호조치
	3. 계측관리상태
	4. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
5. 제체사석공	1. 설계도서 준수여부
	2. 체절방법, 순서의 준수여부
	3. 계측관리상태
	4. 재료의 품질관리 및 시공관리상태
6. 제체성토공	1. 설계도서 준수여부
	2. 다짐방법, 순서, 시험의 준수여부
	3. 성토두께의 준수여부
	4. 필터공 시공상태
	5. 피복공 시공상태
	6. 계측관리 상태
	7. 재료의 품질관리 및 시공관리상태

붙임 10

건설공사 자율점검 운영 요령

제1조(목 적) 이 기준은 건설기술관리법(이하 “법”이라 한다)제21조의5 및 같은법시행령(이하 “영”이라 한다) 제38조의20의 규정에 따라 건설업체가 설계․시공․품질 및 안전관리 등 건설공사 전반에 대해 자율적 안전점검에 관련된 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 업무수행의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항을 정하는데 있다.

제2조(적용범위) 이 기준의 적용범위는 법 제21조의5 및 영 제38조의20의 규정에 따른 지방국토관리청(이하 “지방청”이라 한다)의 건설공사 현장 점검 대상공사로 한다.

제3조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “자율점검” 이란 건설현장 담당자가 부실시공을 방지하고 안전사고 예방을 위해 건설공사 전반에 대한 관련규정 준수 여부 등을 자율적으로 점검하는 것을 말한다.

2. “건설현장담당자” 란 자율점검책임자 및 자율점검참여자, 공사감독자, 책임감리원 등을 말한다.

3. “자율점검책임자”란 당해 현장의 현장대리인을 말한다.

4. “자율점검참여자”란 당해 현장의 안전관리자, 품질관리자, 감리원 또는 공사감독자 및 외부전문가를 말한다.

5. “공사감독자”란 발주청이 임명한 기술직원 또는 그의 대리인으로 당해공사 전반에 관한 감독업무를 수행하고 감리업무를 총괄하는 자를 말한다.

6. “책임감리원”이란 발주청과 체결된 책임감리용역계약에 의하여 감리전문회사를 대표하여 현장에 상주하면서 당해공사 전반에 관한 책임감리 등 업무를 총괄하는 자를 말한다.

7. “감리원”이란 감리전문회사에 소속되어 책임감리․시공감리 또는 검측감리를 수행하는 자를 말한다.

8. “자율점검 결과보고서”란 자율점검 카드, 공사 및 시공․감리업체 현황, 공사진척상황, 현장점검 결과, 우수사례 등이 포함된 전체 보고서를 말한다.

제4조(운영 절차) 자율점검 대상 현장 선정 및 자율점검 실시 등의 운영절차는 다음 각호와 같다.

1. 지방청장은 매년 1～2월 자율점검 대상 현장 지정을 위한 수요조사를 실시한다.

2. 지방청장은 매년 2월 자율점검 대상현장을 선정하여 해당 현장에 통보하고, 선정 현장에 대하여는 법 제21조의5에 의한 현장점검을 면제한다

3. 해당 현장에서는 매월 자율점검을 실시하고, 점검 결과 및 조치계획 등을 매 반기말 기준 다음 달 5일까지 해당 지방청에 제출한다.

제5조(점검대상 현장 수요조사) 지방청장은 정부부처, 소속 및 산하기관, 지자체의 발주 및 인․허가한 공사에 대하여 관련기관에 별지 제1호 서식으로 건설공사 시행 현황, 자율점검현장 선정 희망여부 등의 수요조사를 실시한다.

제6조(자율점검 현장 선정) ① 지방청장은 제5조에 의한 수요조사결과에 따라 다음 각호에 해당하는 공사에 대해 자율점검 현장을 선정한다.

1. 전년도에 지방청에서 직접 점검을 실시한 공사

2. 건설기술관리법 시행규칙 제29조에 의한 단순공종 반복공사

3. 공정율이 20% 미만의 신규 현장이나 주요 공정이 마무리된 공사

4. 주요공사 중 자율점검현장 선정시 부실 및 안전사고 방지에 실효성이 있다고 인정되는 공사

5. 기타 지방청장이 자율점검현장으로 선정이 필요하다고 인정하는 공사

② 지방청장은 자율점검현장 선정시에는 지방청 자체공사, 관내 타 기관 및 민간공사에 대한 점검의 형평성을 고려하여 선정한다.

③ 저가낙찰(70%이하) 현장, 특수교량 현장, 안전사고 발생 및 부실시공이 적발된 현장은 제외한다.

제7조(자율점검현장의 지방청 점검 면제) 지방청장은 제6조에 따라 자율점검 현장으로 선정된 현장에 대하여는 법 제21조의5의 규정에 따라 실시하는 현장점검을 면제한다.

제8조(자율점검 현장 선정 통보) ① 지방청장은 제6조에 따라 자율점검 현장을 선정한 경우 별지 제3호 서식에 의한 자율점검 체크리스트를 첨부하여 해당 현장에 통보한다.

② 지방청장은 제1항에 따라 자율점검현장을 선정결과를 연간 점검계획 수립․보고시 국토해양부장관에게 제출하여야 한다.

제9조(자율점검현장의 조치사항) ① 제6조에 따라 자율점검현장으로 선정된 건설현장 담당자는 다음 각호에 따라 부실시공 및 안전사고방지를 위한 자율점검 등의 조치를 하여야 한다.

1. 자율점검계획 수립 및 제출

2. 수시(일일) 및 월별 점검

3. 교차점검

4. 건설사 본사의 현장점검(이하 본사점검이라 한다)

② 제1항에 의한 점검은 현재 진행되고 있는 공정을 중심으로, 별지 제3호서식에 의한 자율점검 체크리스트에 따라 실시한다.

③ 제1항 제3호의 교차점검은 인근 건설현장 소속의 현장담당자와 그 직원으로 하여금 분기에 1회 이상 점검을 실시하는 것을 말하며 그 결과는 제10조에 의한 자율점검 결과 보고서에 포함되어야 한다. 다만, 제6조 제1항 제2호 및 제3호에 해당되는 공사는 교차점검을 제외한다.

④ 제1항 제4호의 본사점검은 최소 2인 이상의 본사 소속 직원으로 하여금 반기에 1회 이상 점검을 실시하는 것을 말하며 그 결과는 제10조에 의한 자율점검 결과 보고서에 포함되어야 한다. 다만, 제3항 단서 부분을 준용한다.

⑤ 자율점검현장의 점검책임자 및 점검참여자 등은 성실하게 자율점검을 실시하여야 하며, 점검책임자 및 확인자는 자율점검결과에 대하여 책임을 진다.

제10조(자율점검 결과 보고서 제출) 제6조에 따른 자율점검 현장으로 선정된 건설현장 담당자는 다음 각호의 사항을 포함하여 별지 제2호 서식으로 자율점검보고서를 작성하여 매 반기말 기준 다음 달 5일까지 해당 지방청에 제출한다.

1.  자율점검카드

2.  공사 및 시공․감리업체 현황(해당부분 모두 기재)

3.  공사 진척 상황

4.  현장 점검 결과(교차점검, 본사점검결과 포함) 및 조치계획

5.  제9조 제1항에 의한 자율점검계획

6. 우수사례 : 시공, 안전, 품질, 민원처리 등 작성

6. 작성자 : 현장대리인

7. 확인자 : 책임감리원 또는 공사감독자

8. 제출방법 : 보고서, CD, 담당자 메일 등 지방청에서 별도로 정하는 방법에 따라서 제출한다.

제11조(자율점검보고서 검토 및 보완요청) ① 지방청장은 자율점검 현장에서 제출한 자율점검결과 보고서에 대하여 다음 각 호의 적정여부를 검토한다.

1. 제출된 보고서가 적정하게 작성되었는지 여부 확인

2. 자율점검결과에 대한 처리결과 적합성 여부

3. 다양한 점검자(발주청 담당자, 외부전문가, 주변 현장 담당자 등) 활용 여부

② 지방청장은 현장에서 제출된 자율점검결과를 제출받아 적정성 여부 등을 검토하고 미비한 사항이나 보완이 필요한 경우에는 접수일로부터 30일 이내에 제출자에게 문서로 보완 지시할 수 있다.

제12조(자율점검 현장에 대한 조사) 지방청장은 제11조에 따라 보고서 검토 결과 다음 각호에 해당하는 경우 자율점검의 적정성 여부 등에 대하여 즉시 현장조사 할 수 있다.

1. 점검내용 및 보고서 작성 등이 허위작정으로 추정되거나 허위작성 사항을 발견한 경우

2. 제출기한 내 보고서를 제출하지 않은 경우

제13조(자율점검 현장선정 취소) ① 지방청장은 제10조에 의한 보고서에 대한 평가결과 다음 각 호에 해당하는 경우 자율점검 현장을 취소할 수 있다.

1. 자율점검 현장으로 선정되었음에도 불구하고 점검결과 보고서를 제출하지 않거나, 형식적으로 보고서를 작성한 현장

2. 점검결과 보고서를 허위로 작성한 현장

3. 자율점검 내용 등 점검결과가 부실하다고 판단되는 현장

4. 근로자 1인 이상 사망한 안전사고가 발생한 현장

② 지방청장은 제9조 제1항에 의한 자율점검 등을 시행하지 않을 경우 자율점검현장선정을 취소할 수 있다.

제14조(개선방안 마련) 지방청장은 제출된 보고서의 검토 및 평가가 종료되면 적용상의 문제점 등을 분석하고 개선방안을 마련한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 요령은 2010. 1. 1일 부터 시행한다.

【별지 제1호 서식】수요조사양식

건설공사 시행(발주/인․허가) 현황

NO	발주처/인․허가기관	구분 ①	공사명	위치 ②	공사기간 ③	공사 금액 (백만원)	규모 ④	공정 (%) ⑤	시공사/ 감리사	설계사	전화 번호 ⑥	자율점검 선정희망여부 ⑦	비고 ⑧
1	대한 주택 공사	건축	화성 봉담 0BL 아파트 건설 공사	00시 00동 00번지	‘05.3 ～ ’07.5	17,500	345세대 지하, 지상 00층	30%	(주)00건설/(주)00엔지니어링	000 건축사사무소	031- 000- 0000/ 031- 000- 0000	○

※ 차기년도 시행중이나 시행예정인 공사

(총공사비 : 관급자재비, VAT 포함, 토지 등의 취득․사용에 따른 보상비를 제외한 공사비)

※ 엑셀 양식에 의거 작성

① 구    분 : 토목, 건축, 산업, 환경설비, 조경공사로 표기

② 위    치 : 공사현장에서 우편물 수령 가능 주소 표기(우편번호 표기)

③ 공사기간 : 총체 공사기간으로 표기(차수 아님)

④ 규    모 : 건축은 연면적 및 세대수, 층수 표기

⑤ 공    정 : 총체 공정율 표기

⑥ 전화번호 : 시공사, 감리사의 현장 전화번호 표기

⑦ 자율점검 선정희망 여부 : 시공사의 희망여부를 ○, ×로 표기

⑧ 비    고 : 미발주, 공사중지(사유포함), 자율점검현장 선정 희망여부 등 기재

※ 공동도급인 경우, 공동이행은 주관업체, 분담이행은 분담업체가 제출

【별지 제2호 서식】

								건설공사 자율점검 보고서 (공사명 : )
							2009. 00. 작성자 :(주)00건설 현장대리인 000 (인) 확인자 :(주)00종합건축사사무소 책임감리원 000 (인)

Ⅰ		자율점검카드

1. 공 사 명 :

2. 공사개요

- 위    치 :

- 사업개요 :                          전화번호 :

- 발 주 자 :

- 공사금액 :(공사비+관급자재비, VAT 포함, 토지비 별도)

- 공사기간 :

- 설계회사 :                         대  표  자 :

- 감리회사 :                         감  리  자 :

- 시공회사 :                         현장대리인 :

3. 현장 전경사진(최근1개월 내)

공 사 사 진

※ 현재 진행중인 공종을 중심으로 촬영
위 치
사진설명
위 치
사진설명

Ⅱ		공사 및 시공 ․ 감리업체 현황

공 사 명					연락처	TEL	FAX
현장주소 (우편번호)		(우편물 발송 가능한 주소, 우편번호 기재)			시공사현장 (본 사)
발주기관 (전화번호)					감리사현장 (본 사)
공동도급		(공동이행, 분담이행) 방식			낙찰율	%
공사현황	구 분	시공부문		감리부문		사업 발주(인․허가) 관련
		전체	금회	전체	금회	승인일자
	계약일					승인기관
	도급액	백만원	백만원	백만원	백만원	담당부서
	공사기간					전화번호
	현재공정	%	%
시공업체	업체명	대표자	업종 (면허번호)	본사소재지 주소		우편번호	분담공종 (지분%)
				(우편물 발송 가능한 주소, 우편번호 기재)
감리업체	업체명	대표자	업종 (등록번호)	본사 소재지 주소		우편번호	분담공종 (지분%)
				(우편물 발송 가능한 주소, 우편번호 기재)
설계업체	업체명	대표자	업종 (면허번호)	본사소재지 주소		우편번호	분담공종 (지분%)
				(우편물 발송 가능한 주소, 우편번호 기재)
시공기술자	담당업무	성명	소속회사	거주지 주소		자격종류 (자격번호)	생년월일
	총괄책임
	시공관리
	품질관리
	안전관리
감독 ․ 감 리 원	담당업무	성명	소속회사	거주지 주소		자격종류 (자격번호)	생년월일
	총괄책임
	시공관리
	품질관리
	안전관리

※ 주의사항: 괄호안의 항목까지 반드시 기입하고 자격종류와 자격번호를 명시할 것

※ 해당부분만 작성

Ⅲ		공사 진척 현황

(예  시)

2009.   .    .

NO	구 분	내 용	비 고
1	구 조	철근콘크리트조 or 철골철근콘크리트조
2	층 수	00동, 지하0층/ 지상0층
3	주차장	지하 000대 /지상 00대
4	주요마감	내부마감 : 천정 : 텍스마감, 벽 : 수성페인트도장, SGP칸막이 바닥 : 수성페인트도장 외부마감 : 커튼월, AL SHEET 마감

(예  시)

NO	공 종	설 계 량	실적물량 (세부작성)	비 고
1	골조공사	00동, 지하0층/ 지상0층	0동 - 골조완료 0동 - 지하0층, 지상0층 0동 - 지하0층	공정율 00% 진행
2	마감공사 (내부)	천정 : 텍스마감, 벽 : 수성페인트도장, SGP칸막이 바닥 : 수성페인트도장	0동 - 바닥작업중 (천정, 벽 완료) 0동 - 천정, 벽 작업중 0동 - 미실시	공정율 00% 진행
5	마감공사 (외부)	커튼월, AL SHEET 마감	0동 - 커튼월공사중 0동 - 쉬트마감공사중 0동 - 미실시	공정율 00% 진행
현재 진행 공사		골조공사(00%) 지하층 방수공사(00%), 내부 벽체 도장공사(00%), 외부 포장공사 준비중

Ⅳ		자율점검 참석자 명단 (서약서)

위 공사에 대한 자율점검을 성실하게 수행하겠습니다.

점검일  :  2009.    .

NO	소 속	직 급	성 명	서 명	비 고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

※ 비 고 : 발주청(처), 인․허가기관, 본사, 감리사, 설계사 등 표기

※ 점검자 모두 기재

※ 점검자가 점검하는 사전 첨부

Ⅴ		자율점검 결과 및 조치계획

공사명 :

NO	공 종	구 분 ①	점검결과 ②	조치계획 ③	점검자 ④	확 인 ⑤
1						현장대리인(인)
						책임감리원(인)
2
3

※ 구    분 ① : 현지시정 및 시정명령

※ 점검결과 ② : 점검시 지적된 내용 등 점검 결과를 기재

※ 조치결과 ③ : 점검결과에 대한 조치 내용 및 향후계획 등을 세부적으로 작성

※ 점 검 자 ④ : 점검자 모두 기재(현장대리인, 안전관리자, 품질관리자, 감리원, 교차점검자 등)

예)현장대리인 000, 품질관리자 000, 안전관리자 000, 외부전문가 000,

※ 확    인 ⑤ : 점검결과에 대해 시공사 현장대리인(점검책임자), 책임감리원 또는 공사감독(확인자)  확인 필.

※ 첨부서류    : 시정 전, 후 사진

Ⅵ		자율점검 계획

□ 일일점검 및 월별점검 계획

□ 교차점검계획

□ 본사점검계획

□ 점검인원 등 자율적 안전점검 계획을 현장실정에 맞게 수립

Ⅶ		우수사례

□ 제  목 : (예: 안전, 환경관리 등 우수공종 작성)

□ 분  야 : (예: 도로, 아파트 등 공사유형 작성)

□ 내  용

ㅇ 개선전

- 기존 설계도서 및 공법의 내용을 요약하고

시공시 문제점등을 서술(사진 등 첨부)

ㅇ 개선후

- 변경 또는 개선한 결과 장․단점을 예산, 공기, 품질 등

분야별로 구체적 사례를 객관적으로 요약․작성

(관련설계도서, 대비표작성, 사진 등 자료첨부)

□ 기대효과

- 시방서 등 관련기준 개정 등

- 신공법 ․ 신기술의 인정 여부

- 예산절감, 공기단축 등과 유사 공종에 적용으로 건설공사의 품질향상에 기여 등을 작성

※ 작성 분량은 공종별로 작성하되, 가급적  2Page 이내